И М Е Н Е М    Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И

         

Р Е Ш Е Н И Е

город Москва

 Дело №  № А40-42940/21-27-291

18 мая 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2021 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 мая 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

При введении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР КСК"

(143002, 

<

...> ДОМ

8А, ЭТАЖ 3, ОФИС 330, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.01.2011,

ИНН: 

<

***>, КПП: 503201001)

ответчик:      ОБЩЕСТВО        С        ОГРАНИЧЕННОЙ        ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ    ЭНЕРГОСЕРВИС"    (129343,    МОСКВА    ГОРОД,    ПРОЕЗД СЕРЕБРЯКОВА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 15, ЭТАЖ 3 КАБ 68, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.11.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 771601001) 

о взыскании денежных средств в размере 6 645 513 рублей 74 копеек 

при участии: согласно протоколу;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР КСК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВО        С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ  ЭНЕРГОСЕРВИС"  о взыскании денежных средств в размере 6 645 513 рублей 74 копеек.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик в удовлетворении исковых требований возражал.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст.71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно, и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Вектор КСК» (далее «Истец», «Субподрядчик») и ООО «Комплексный Энергосервис» (далее «Ответчик», «Подрядчик») заключены Договоры подряда, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству тепловых сетей для подключения объектов к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК», а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы з порядке, установленном договорами.

В соответствии с Договором подряда № 40-СМР-МТ/16/ГП-КЭС7СП от 01.08.2018  Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства комплекса апартаментов, расположенного по адресу: г, Москва, пр-т Вернадского, д. 4. стр. 2.

Истцом выполнены, а Ответчиком приняты работы на сумму 43 650 030.73 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ формы КС-3, актами о приемке выполненных работ формы КС-2.

В соответствии с пунктом 5.2 Договора выполненные работы оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком Подрядчику комплекта документов (КС-2, КС-3, счет, счет-фактура) до достижения суммы 90% стоимости выполненных работ.

Подрядчиком внесено Субподрядчику авансовых платежей и оплат за выполненные работы по Договору на сумму 39 339 584,10 руб., что подтверждается платежными поручениями.

Окончательный расчет в размере 10% от цены договора производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Субподрядчика исполнительной документации в полном объеме (пункт 5.2 Договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 03.08.2018). 

Истцом исполнительная документация по объекту сдана сопроводительным письмом б/н от 04.11.2019, полученным Подрядчиком 04.11.2019. 

Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате окончательного расчета по Договору подряда № 40-СМР-МТ/16/ГП-КЭС7СП от 01.08.2018 составляет 4 310 446, 63 руб., срок оплаты окончательного расчета - до 04.12.2019.

В соответствии с Договором подряда № 61-СМР-11209/17-СП-В от 16.03.2018 Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы на объекте капитального строительства: административно-бытовые помещения, расположенные по адресу: 

<

...>.

Истцом выполнены, а ответчиком приняты работы на сумму 60 437 622,51 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ формы КС-3, актами о приемке выполненных работ формы КС-2.

В соответствии с пунктом 5.2 Договора 2 выполненные работы оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком Подрядчику комплекта документов (КС-2, КС-3. счет, счет-фактура) до достижения суммы 90% стоимости выполненных работ.

Ответчиком внесены Истцу авансовые платежи, оплаты за выполненные работы, а также частично погашена задолженность по оплате окончательного расчета на сумму 59 990 813.50 руб., что подтверждается платежными поручениями.

Окончательный расчет в размере 10% от цены договора производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Субподрядчика исполнительной документации в полном объеме (пункт 5.2 Договора ).

Истцом исполнительная документация по объекту сдана с сопроводительным письмом б/н от 17.01.2019, полученным ответчиком 17.01.2019.

Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате окончательного расчета по Договору составляет 446 809,01 руб., срок оплаты окончательного расчета - до 16.02.2019.

В соответствии с Договором подряда № 396-СМР-2166/19-В от 12.03.2020  Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы/услуги для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Административно-офисные помещения», расположенного по адресу; 

<

...>.

Истцом выполнены, а Ответчиком приняты работы на сумму 18 882 580,97 руб., что подтверждается справками о стоимости выполненных работ формы КС-3. актами о приемке выполненных работ формы КС-2.

 Согласно п. 5.1.1 Договора выполненные работы оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Субподрядчиком Подрядчику комплекта документов (КС-2. КС-3, счет, счет-фактура) до достижения суммы 90% стоимости выполненных работ.

Ответчиком внесена Истцу оплата за выполненные работы по Договору на сумму 16 994 322,87 руб., что подтверждается платежными поручениями.

В соответствии с пунктом 5.1.3 окончательный расчет в размере 10% от стоимости работ производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Субподрядчика документации (акт о готовности тепловой энергоустановки (для не ОНО), акт осмотра электроустановки (МТУ Ростехнадзор), разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (МТУ Ростехнадзор).

Истцом документация сдана сопроводительным письмом б/н от 03.09.2020. полученным Ответчиком 03.09.2020.

Задолженность Ответчика перед Истцом по оплате окончательного расчета по Договору составляет 1 888 258,10 руб., срок оплаты окончательного расчета – до 03.10.2020.

Таким образом общий размер задолженности ответчика перед истцом по оплате окончательного расчета по договорам составляет 6 645 513, 74 руб.

31.12.2019 и 31.12.2020 сторонами подписан акт сверки по Договорам, которым подтвержден вышеуказанный размер задолженности Ответчика.

Также предъявленная задолженность по Договорам подтверждена сторонами путем подписания акта сверки расчетов от 

Досудебный порядок урегулирования спора был соблюден. Претензия оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доводы ответчика отклонены как необоснованные и не подтвержденные материалами дела.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика задолженность по Договорам подряда в размере 6 645 513 руб. 74 коп.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь ст.ст. 309, 310, 330, 702, 711, 746  ГК РФ, ст. ст. 41, 70, 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЭНЕРГОСЕРВИС" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР КСК" задолженность в размере 6 645 513 руб. 74 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 56 228 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

            Судья         В.И. Крикунова