10818_11009509  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-17709/23

21 сентября 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Арбатских Е.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Газпром сеть АЗС» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Донпромпроект» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) об обязании,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Нью-Дос» (ИНН 

<

***>) 

 Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Донпромпроект» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в течение 10 календарных дней со дня вступления в  силу решения суда безвозмездно выполнить следующие гарантийные обязательства:  

1.1. Произвести наладку комплексов налива АСН-К-01, заданная доза для отгрузки  нефтепродуктов в АЦ должна быть в пределах допустимой относительной погрешности,  добиться стабильной работы и повторяемости результатов, подтвердить результат  поверкой, с привлечением специализированной организации.  

1.2. Произвести наладку СИ «СТРУНА+» с целью получения корректных значений  при измерении уровня нефтепродуктов в резервуарах, проверить целостность кабельных  трасс уровнемер РВС № 2,5 – блок управления, восстановить связь между уровнемерами и  блоком управления.  

1.3. Настроить установленный алгоритм работы насосных агрегатов (ДТ), задвижек  с электроприводом, при фиксации случаев превышения ПДК паров нефтепродуктов на  технологических объектах.  

1.4. Наладить стабильную работу насосных агрегатов для слива ДТ в насосной № 1  (ДТ).  

1.5. Смонтировать один светильник освещения в насосной станции (акт КС-2 № 7  от 24.09.2021).  

1.6. Наладить работу системы газового анализа и насосных агрегатов «Сигма-1М»  для слива ДТ.  

В случае неисполнения обществом с ограниченной ответственностью  «Донпромпроект» судебного акта в течение 10 календарных дней со дня вступления в  силу решения суда взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Донпромпроект» (ИНН 6150045876 ОГРН 1056150320478) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Газпром сеть АЗС» (ИНН 6164317329 ОГРН  1146164001807) судебную неустойку в размере 3000 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда.  

В остальной части требования отклонить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Донпромпроект» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Газпром сеть АЗС» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) 6 000 рублей в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по правилам гл. 35 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

 Судья Новожилова М. А.