ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А65-23127/2021

город Самара

8 июля 2022 года

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июля 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 8 июля 2022 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Кузнецова С.А., судей Буртасовой О.И., Барковской О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с участием: от истца: представители ФИО2 (доверенность от 28.02.2022), ФИО3 (доверенность от 16.02.2022), от ответчика: представитель ФИО4 (доверенность от 01.01.2022), от других лиц, участвующих в деле, представители не явились, извещены надлежащим образом, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Промэнерго" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.03.2022 (судья Харин Р.С.) по делу № А65-23127/2021 по иску общества с ограниченной ответственностью "Промэнерго" к обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергощитК" о взыскании неосновательного обогащения и неустойки, третье лицо: временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Промэнерго" ФИО5,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Промэнерго" (далее – ООО "Промэнерго", истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЭнергощитК" (далее – ООО "ЭнергощитК", ответчик) о взыскании 7 200 000 руб. штрафных санкций, 900 000 руб. перечисленного аванса.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Промэнерго" ФИО5 (далее – ВУ ООО "Промэнерго" ФИО5, третье лицо).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.03.2022  в иске отказано. 

Истец обжаловал судебный акт суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В апелляционной жалобе истец просит решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.03.2022  в части отказа в требовании о взыскании 7 200 000 руб. штрафных санкций отменить, принять новый судебный акт, иск удовлетворить. 

Апелляционная жалоба мотивирована неполным выяснением и недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, несоответствием изложенных в обжалуемом судебном акте выводов обстоятельствам дела, нарушением и неправильным применением норм материального и процессуального права.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили апелляционную жалобу удовлетворить, а представитель ответчика возражал относительно удовлетворения апелляционной жалобы.

Суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, представленных истцом в судебном заседании суда апелляционной инстанции, в связи с отсутствием предусмотренных частями 2, 3 статьи 268  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств, поскольку представившее дополнительные доказательства лицо не обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, а из буквального толкования положений статьи 268 данного Кодекса следует, что в основу судебного акта суда апелляционной инстанции могут быть положены доказательства, удостоверяющие факты, которые имели место до вынесения решения суда первой инстанции (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.05.2009 № 17426/08 по делу № А40-69225/07-89-512).

От истца поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства, в удовлетворении которого суд апелляционной инстанции отказал в связи с отсутствием предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отложения судебного разбирательства.

От истца поступило ходатайство о привлечении ООО "Моспрострой-М" к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в удовлетворении которого суд апелляционной инстанции отказал в связи с тем, что в арбитражном суде апелляционной инстанции не применяются правила о привлечении к участию в деле третьих лиц (часть 3 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также в связи с отсутствием предусмотренных статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для привлечения данного лица к участию в деле, поскольку обжалуемый судебный акт не может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, объяснения лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 19.08.2019 между истцом (подрядчик) и ответчиком (субподрядчик) был заключен договор субподряда № ПЭ-13-П/СП, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы по слаботочным системам разделов «Газовая котельная с ЦТП. Компрессорная станция» и «Понизительная подстанция. Тягово-понизительная подстанция» (работы) на объекте «Электродепо «Нижегородское» (реконструкция)» (объект). Состав и объем работ определяется технической документацией, передаваемой подрядчиком субподрядчику согласно п. 5.2.2 договора (техническая документация), и расчетом приблизительной стоимости (приложение № 1 к договору). В случае выхода изменений к технической документации, состав и объем работ подлежат соответствующей корректировке, что оформляется сторонами путем подписания дополнительного соглашения к договору. Документом, подтверждающим выполнение субподрядчиком работ по настоящему договору, является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору. Субподрядчик обязался выполнить работы и сдать их результат подрядчику в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором. Подрядчик обязался создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, осуществить приемку их результата и оплатить обусловленную договором стоимость работ (раздел 1 договора).

Согласно разделу 1а договора, подрядчик назначает представителя, который с момента заключения договора, на основании выданной ему доверенности, будет вправе осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и другие акты, в том числе акты скрытых работ, принимать решения по строительству, подписывать от имени подрядчика другие документы, связанные со строительством объекта. В течение 3 календарных дней с момента подписания договора субподрядчик направляет подрядчику письмо о согласовании кандидатуры представителя субподрядчика, который на основании выданной ему доверенности будет принимать непосредственное участие в регулировании работ на объекте, подписывать от имени  субподрядчика акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки результата завершенных работ и другие документы, связанные с исполнением принятых субподрядчиком обязательств. В отсутствие такого лица, указанные документы подписывает генеральный директор субподрядчика или иное уполномоченное лицо. Подрядчик письменно уведомляет субподрядчика о согласовании кандидатуры представителя. Подрядчик может потребовать замену представителя субподрядчика, направив субподрядчику письменное уведомление с указанием причин/мотивов такой замены. При получении такого требования субподрядчик в течение 2 рабочих дней обязан представить на согласование подрядчику новую кандидатуру представителя.

Субподрядчик обязан своевременно обеспечить передачу подрядчику оригиналов доверенностей (либо их надлежащим образом заверенных копий) на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени субподрядчика в отношении подрядчика, в частности представителей субподрядчика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, выдачи оборудования в монтаж, совместных комиссиях; выезжающих на строительную площадку; подписывающих спецификации, передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий поставленной продукции, выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

Указанные выше доверенности должны быть переданы подрядчику до совершения уполномоченными представителями субподрядчика юридически-значимых действий в отношении подрядчика, в том числе до направления указанных представителей на объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет подрядчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке, при этом обязательство подрядчика по вызову представителей субподрядчика считается исполненным, а процедуры, связанные с вызовом и присутствием представителей субподрядчика соблюденными.

В случае истечения у представителя субподрядчика срока действия доверенности на осуществление юридически-значимых действий субподрядчик обязан заблаговременно обеспечить предоставление подрядчику новых доверенностей. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск подрядчиком представителя субподрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени субподрядчика несет сам субподрядчик.

Субподрядчик при исполнении договора может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Под субподрядными организациями в договоре понимаются также организации, с которыми субподрядчик заключает договоры об оказании услуг, в случае если в ходе выполнения работ по договору возникает необходимость в оказании услуг третьими лицами. Перечень и форма документов, обосновывающих привлечение субподрядчиком субподрядных организаций, определены в приложении № 9 к договору. Согласование субподрядной организации подрядчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента предоставления обосновывающих документов. В случае отклонения предлагаемой субподрядной организации, подрядчик направляет мотивированный отказ. В случае заключения договора субподряда с несогласованной подрядчиком организацией, работы, выполненные по такому договору субподряда и предъявленные субподрядчиком в срок и с надлежащим качеством, оплачиваются подрядчиком только в части стоимости материалов, конструкций и оборудования, использованных при выполнении работ. 

При заключении договора субподряда субподрядчик обязан обеспечить включение в такой договор обязанности субподрядной организации по запросу подрядчика (в том числе, в рамках выездных проверок, осуществляемых представителями подрядчика, а также заказчика-генподрядчика): предоставлять подрядчику учредительные и финансовые документы субподрядной организации; техническую документацию, подтверждающую выполненные объемы работ, квалификацию сотрудников субподрядной организации; а также иную документацию в рамках исполнения договора; обеспечивать доступ представителей подрядчика к помещениям субподрядной организации; обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и  иных мероприятиях, проводимых подрядчиком. Все действия при исполнении договора осуществляются сторонами только в письменном виде. Субподрядчик обязан исполнять письменные указания подрядчика и его представителей, выданные в виде записи в общем журнале работ и специальных журналах работ. Субподрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению подрядчика принимать участие в проводимых совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ.

Подрядчик вправе осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны окружающей среды, охраны культуры производства и охраны труда путем проведения плановых и внеплановых проверок. Субподрядчик обеспечивает доступ на строительную площадку и создает условия работы представителям организаций, осуществляющих авторский, технический надзор за выполнением работ, а также лицам, осуществляющим контроль за соблюдением охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Субподрядчик обязан по требованию подрядчика удалить со строительной площадки строящегося объекта любого работника, привлеченного к строительству объекта, с лишением права доступа на объект.

Стоимость выполняемых субподрядчиком работ по настоящему договору (цена договора) определена на основании расчета приблизительной стоимости (приложение № 1 к настоящему договору) и приблизительно составляет 5 102 881, 79 руб., в том числе НДС 20 %. Цена договора включает в себя компенсацию любых издержек субподрядчика, связанных с выполнением работ по договору, и причитающееся ему вознаграждение, в том числе расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также расходы на доставку грунтов с объекта к месту приема грунтов, на получение разрешения на перемещение грунтов (выдаваемого Департаментом строительства города Москвы), на приобретение талонов для утилизации (размещения) грунтов; на разработку проекта производства работ, на мероприятия по технике безопасности; на обеспечение строительной техникой, инструментом, расходными материалами; накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты; затраты, связанные с обеспечением рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, доставку до места проведения работ и обратно, работу в круглосуточном режиме и все доплаты и надбавки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Цена договора на дату его подписания является приблизительной. Окончательная цена договора будет определяться после утверждения подрядчиком итоговой локальной сметы на выполняемые по договору работы в сметно-нормативной базе «Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) в редакции 2017 с изменениями 1-4)», с применением ценника в кодах ФССЦ-2017 Республики Татарстан на 2 квартал 2019 года. До утверждения подрядчиком итоговой локальной сметы на выполняемые работы в сметно-нормативной базе «Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) в редакции 2017 с изменениями 1-4)» определяется фактическая цена выполненных работ. Для целей настоящего договора под фактической ценой выполненных работ понимается стоимость выполненных работ в базовом уровне цен, определенная на основании рабочей локальной сметы, выданной и согласованной заказчиком-генподрядчиком (по стадии РД), пересчитанная в текущие цены посредством применения индексов (коэффициентов пересчета, разработанных Москомэкспертизой) на дату производства работ, умноженная на понижающий коэффициент К1 = 0, 90, который применяется к стоимости всех работ, кроме того НДС по ставке 20 %, за исключением давальческих материалов и оборудования. После утверждения подрядчиком итоговой локальной сметы на выполняемые работы в сметно-нормативной базе «Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНп) в редакции 2017 с изменениями 1-4)» определяется сметная стоимость выполненных работ. Для целей настоящего договора под сметной стоимостью выполненных работ понимается стоимость выполненных работ в базовом уровне цен, определенная на основании локальной сметы, утвержденной и выданной заказчиком-генподрядчиком «В производство работ», пересчитанная в текущие цены посредством применения индексов (коэффициентов пересчета, разработанных Москомэкспертизой) на дату производства работ, умноженная на понижающий коэффициент К1 = 0,90, который применяется к стоимости всех работ, кроме того НДС по ставке 20 %, за исключением давальческих материалов и оборудования. В случае, если фактическая стоимость превысит сметную стоимость, субподрядчику будет выплачена сметная стоимость. Субподрядчик не вправе претендовать на положительную разницу между фактической стоимостью и сметной стоимостью, при этом сметная стоимость выполненных работ будет являться окончательной ценой договора.

Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), подписанные сторонами с момента заключения договора, должны быть скорректированы с учетом снижения фактической стоимости до уровня сметной стоимости выполненных работ. Если фактическая стоимость работ была оплачена субподрядчику, субподрядчик обязан возвратить подрядчику разницу между оплаченной фактической стоимостью и сметной стоимостью, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования от подрядчика. В случае, если сметная стоимость превысит фактическую стоимость, субподрядчику будет выплачена фактическая стоимость, при этом фактическая стоимость выполненных работ будет являться окончательной ценой договора. В случае поручения подрядчиком субподрядчику выполнения дополнительных видов работ, необходимость выполнения которых не была изначально предусмотрена условиями договора, либо была вызвана внесением изменений в техническую документацию, стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к договору. В случае исключения части работ, предусмотренных договором, цена договора подлежит изменению в сторону уменьшению путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. Работы, выполненные субподрядчиком с изменением или отклонением от технической документации, выполненные с отклонением от условий договора и не оформленные сторонами дополнительным соглашением, оплате не подлежат (раздел 2).

Дата начала работ - не позднее 2 календарных дней с даты подписания договора. Дата окончания работ - не позднее 31.12.2019. Промежуточные сроки выполнения работ с указанием дат начала и окончания этапов работ (контрольные точки) будут определены сторонами в графике производства работ (приложение № 2 к договору), который субподрядчик обязан представить на подписание подрядчику не позднее 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора. В случае нарушения сроков выполнения работ, субподрядчик обязуется обеспечить круглосуточный режим выполнения работ на объекте (раздел 3 договора).

Согласно разделу 4 договора подрядчик вправе производить субподрядчику авансовые платежи в размере до 100 % от цены договора в порядке, предусмотренном п. 4.2. договора. Оставшиеся платежи производятся подрядчиком после фактического выполнения субподрядчиком работ (части работ), с учетом погашения аванса и за вычетом сумм гарантийного удержания, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в течение 30 банковских дней с даты подписания подрядчиком без замечаний актов по форме № КС-2 и справок по форме № КС-3, при условии представления субподрядчиком всей исполнительной документации на выполненные работы, соответствующего счета на оплату и счета-фактуры, с учетом положений п. 2.3.3 настоящего договора. 

Подрядчик производит авансирование субподрядчику работ в следующем порядке: выплата аванса производится при условии предоставления субподрядчиком оригинала счета, производственной программы (по форме приложения № 11 к договору) и графика погашения аванса, при этом производственная программа и график погашения аванса должен быть согласованы и подписаны сторонами до выплаты аванса. Выплаченный субподрядчику аванс погашается путем удержания из промежуточных платежей в соответствии с согласованным сторонами графиком погашения аванса. Субподрядчик обязан представить подрядчику счет-фактуру на аванс не позднее 5 календарных дней с момента получения аванса. В случае если аванс не будет погашен в срок, установленный графиком погашения аванса, подрядчик вправе потребовать от субподрядчика возврат суммы неотработанного аванса. Субподрядчик обязан вернуть сумму неотработанного аванса не позднее 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования подрядчика. При расторжении договора или одностороннем отказе любой из сторон от его исполнения, либо при сокращении объема работ субподрядчик обязан вернуть подрядчику сумму неотработанного аванса, предусмотренного договором, в течение 10 календарных дней после прекращения действия договора, если иной срок не установлен соглашением о расторжении договора, а при сокращении объема работ - в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования от подрядчика. 

Субподрядчик в обеспечение возврата авансового платежа по отдельному письменному требованию подрядчика обязан предоставить банковскую гарантию по форме приложения № 12 к договору. Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному требованию подрядчика. Банк, предоставляющий гарантию, должен быть согласован с подрядчиком. Гарантия должна обеспечивать обязательства субподрядчика по возврату полученного от подрядчика авансового платежа в случае ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств и нарушения сроков выполнения работ, указанных в графике производства работ. Гарантия должна быть выдана на сумму авансового платежа. Срок действия гарантии должен распространяться на период авансирования плюс 1 (Один) месяц. Все затраты, связанные с получением банковских гарантий и предоставлением иного обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных Договором, несет Субподрядчик.

Субподрядчик обязан использовать аванс для оплаты расходов, связанных с мобилизацией, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с выполнением работ на объекте. Конкретные расходы в рамках авансового платежа указываются в расчете на получение такого платежа, направляемом субподрядчиком подрядчику.

Субподрядчик обязуется планировать свою хозяйственную деятельность с учетом положений договора таким образом, чтобы обеспечить безусловное исполнение своих обязательств перед контрагентами по заключенным им договорам, а также обязательств по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик не несет ответственность за убытки субподрядчика или иных лиц, вызванные неисполнением субподрядчиком своих обязательств вследствие недостаточного планирования своей хозяйственной деятельности.

С момента заключения настоящего договора подрядчик вправе производить платежи (в том числе авансирование и оплату за выполненные работы), причитающиеся субподрядчику по договору, как на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, так и на счет целевого финансирования (или отдельный лицевой счет субподрядчика в финансовом органе).

В целях обеспечения исполнения обязательств субподрядчика (указанных в настоящем пункте договора) сумма, подлежащая оплате субподрядчику за выполненные в отчетном периоде работы, уменьшается на сумму, равную 5 % от стоимости выполненных за отчетный период работ (гарантийное удержание). Сумма гарантийного удержания указывается в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На сумму гарантийного удержания проценты не начисляются и не выплачиваются. Общий размер удержанных по договору сумм не должен превышать 5 процентов от цены договора.

Гарантийное удержание является способом обеспечения следующих обязательств субподрядчика (вместе и по отдельности): по возмещению расходов подрядчику по устранению недостатков работ, выявленных в процессе производства работ и/или при приемке работ, а также обнаруженных в гарантийный период; по уплате подрядчику неустойки за просрочку устранения недостатков работ, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата работ или обнаруженных в гарантийный период; по уплате подрядчику неустойки за просрочку завершения этапа производства работ и/или просрочку окончания работ по договору: по оплате подрядчику пени, штрафных санкций, возмещению вреда, имущественных затрат, иных предусмотренных договором сумм возмещений или компенсаций. В случае неисполнения субподрядчиком обязательств, указанных выше, требования подрядчика, изложенные в письменной претензии к субподрядчику, могут быть удовлетворены за счет накопленной суммы гарантийного удержания, с уведомлением субподрядчика о таком удовлетворении требований.

Возврат гарантийного удержания (за вычетом сумм удовлетворенных требований подрядчика) производится подрядчиком в течение 30 календарных дней с даты завершения гарантийного срока, указанного в п. 9.2. договора, плюс 1 месяц, и получения счета субподрядчика на оплату суммы гарантийного удержания или оставшейся его части. Стороны также установили, что возврат гарантийного удержания может быть осуществлен подрядчиком досрочно, о чем стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к договору. При расторжении (прекращении) договора, в том числе в случае одностороннего отказа любой из сторон от его исполнения, гарантийное удержание обеспечивает исполнение субподрядчиком обязательств, в том числе гарантийных и подлежат возврату субподрядчику после окончания гарантийного срока плюс 1 месяц. Стороны установили, что зачет подрядчиком суммы гарантийного удержания в счет исполнения любых обязательств субподрядчика по договору осуществляется в одностороннем, безусловном, внесудебном порядке.

В целях обеспечения выполнения установленных договором требований к качеству и срокам выполнения работ, исходя из необходимости контроля целевого использования денежных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности города Москвы, стороны согласовали порядок расчетов по выплате заработной платы работникам субподрядчика (порядок расчетов по выплате заработной платы) и привлеченных им субподрядчиков в соответствии с приложением № 10 к договору. Субподрядчик обязуется своевременно выплачивать заработную плату работникам субподрядчика, а также обязуется совершать необходимые действия для обеспечения привлеченными им субподрядчиками своевременной выплаты заработной платы их работникам.

В случае пользования Субподрядчиком водой и электроэнергией, подрядчик и субподрядчик подписывают акт о компенсации затрат подрядчика по предоставлению коммунальных услуг (пользованию водой и электроэнергией), отражающий фактическое потребление согласно приборам учета. Акт о компенсации затрат подрядчика по предоставлению коммунальных услуг оформляется подрядчиком в каждом отчетном периоде/по окончанию работ (на усмотрение подрядчика) и передается на подписание субподрядчику. Субподрядчик обязан подписать акт и вернуть подрядчику в 1 экземпляре в течение 2 рабочих дней с момента получения от подрядчика. 

Оплата производится субподрядчиком в течение 5 банковских дней со дня получения субподрядчиком счета от подрядчика, выставленного на основании подписанного сторонами акта о компенсации затрат подрядчика по предоставлению коммунальных услуг, либо путем зачета встречных денежных требований на основании заявления одной из сторон о зачете взаимных требований (со стороны подрядчика требование по оплате за пользование водой и электроэнергией, а со стороны субподрядчика требование по оплате за выполненные работы).

В случае предоставления субподрядчику по заявке в произвольной форме строительных механизмов и/или техники подрядчика, субподрядчик оплачивает (компенсирует) подрядчику затраты последнего, связанные с предоставлением строительных механизмов/техники, на ниже изложенных условиях. Пользование субподрядчиком строительными механизмами/техникой, предоставляемыми подрядчиком, оплачивается субподрядчиком на основании акта, отражающего фактическое пользование субподрядчиком строительными механизмами/техникой. Акт оформляется подрядчиком в каждом отчетном периоде/по окончанию работ (на усмотрение подрядчика) и передается на подписание субподрядчику. Субподрядчик обязан подписать акт и вернуть его подрядчику в 1 экземпляре в течение 2 рабочих дней с момента получения от подрядчика.

Оплата производится субподрядчиком в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего счета от подрядчика, выставленного на основании подписанного сторонами акта по предоставлению строительных механизмов/техники, либо путем зачета встречных денежных требований на основании заявления одной из сторон о зачете взаимных требований (со стороны подрядчика требование по компенсации затрат за пользование строительными механизмами/техникой, а со стороны субподрядчика требование по оплате за выполненные работы) и выставленного подрядчиком счета-фактуры.

Субподрядчик обязался, в том числе: выполнить и сдать все работы подрядчику в точном соответствии с условиями настоящего договора, технической документацией, требованиями строительных норм и правил, нормативными актами г. Москвы; принять от подрядчика место производства работ (строительную площадку) по акту приема-передачи; оформить исполнительную документацию по договору и предоставлять ее подрядчику по акту приема-передачи исполнительной документации в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором, в том числе регламентом по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями (приложения № 13 к договору); неукоснительно выполнять на строительной площадке и в месте производства работ действующие на территории Российской Федерации требования по соблюдению правил техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, по обеспечению безопасности дорожного движения, промышленной безопасности, требования надзорных органов и служб (АТИ, ИГАСН, МЧС, СЭС и пр.), в том числе требования, указанные в приложении № 3 к договору, нести ответственность в случае их невыполнения; при привлечении подрядчика уполномоченными государственными органами и/или контролирующими организациями к ответственности в установленном законодательством порядке за нарушение субподрядчиком указанных в настоящем пункте требований (в т.ч. наложение штрафов и т.п.), субподрядчик по требованию подрядчика обязан возместить последнему все причиненные применением мер ответственности убытки, в т.ч. суммы выплаченных штрафов и т.п.; Подрядчик вправе удержать из любого платежа, причитающегося субподрядчику, суммы выплаченных штрафов; по запросу подрядчика предоставить заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасных условий труда, противопожарных мероприятий и сведения об аттестации рабочих мест; проводить вводный (первичный, повторный) инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности с оформлением журнала регистрации инструктажа на рабочем месте, журнала проведения инструктажа по противопожарной безопасности на рабочем месте и иных журналов; обеспечить рабочий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; в день начала производства работ предоставить подрядчику список работников субподрядчика для доступа на строительную площадку во время выполнения работ по договору, а также копии их документов, удостоверяющих личность; соблюдать установленные на объекте правила пропускного и внутриобъектового режима, правила въезда на территорию строительной площадки и выезда с нее, а также транзитного проезда через нее, правила перемещения товарно-материальных ценностей через пункты пропускного контроля, а также обеспечить соблюдение указанных правил своими работниками, привлеченными субподрядчиками и поставщиками; доставить разработанный грунт с объекта к месту приема грунтов своим и/или привлеченным автотранспортом, при этом транспортировка грунта должна производиться в соответствии с установленными правилами и нормами транспортировки для данного вида груза; оформить (получить) разрешения на перемещение грунтов, выдаваемые Департаментом строительства города Москвы; разгрузить для утилизации доставленный с объекта грунт в месте приема грунтов, при этом субподрядчик самостоятельно обязан приобрести талоны, дающие право утилизировать грунт в месте приемки грунтов; при разгрузке грунтов в на объекте приемки водители субподрядчика обязаны строго соблюдать правила техники безопасности и указания мастера-приемщика грунтов, в том числе о месте выгрузки грунта; своевременно обеспечить наличие на объекте необходимой для выполнения работ строительной техники (машин, механизмов), материалов и оборудования требуемого качества, самостоятельно осуществлять в счет цены договора приемку и их охрану, а также нести риск их случайной гибели, утери или повреждения; не использовать в ходе осуществления работ строительную технику (машины и механизмы), работа которой может привести к нарушению обязательных для сторон требований по охране окружающей среды и безопасности строительно-монтажных работ; обеспечивать размещение грунта на транспортном средстве таким образом, чтобы общая масса транспортного средства с грунтами не превышала допустимую массу грузоподъемности транспортного средства, установленную нормативно-правовыми актами в Российской Федерации; обеспечить проведение операционного контроля в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ с оформлением журнала операционного контроля, а также обеспечить ежедневное ведение общего журнала работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. 

Подрядчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в общем журнале работ, а также проверяет ведение других журналов. Если подрядчик не удовлетворен ходом работ (сроки, качество и пр.) или ведением какого-либо из журналов, он должен сделать соответствующую запись в журнале или письменно уведомить об этом субподрядчика. Записи в каждом журнале имеют статус предписания и обязательны для исполнения субподрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в нем требований. Также субподрядчик обязуется поддерживать порядок на месте производства работ, обеспечить содержание и уборку рабочих мест, помещений во временных зданиях и сооружениях, а также вывезти в течение 5 календарных дней с даты окончания работ строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, не использованные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, принадлежащее субподрядчику; ежедневно передавать под охрану имущество, требующее хранения, уполномоченному работнику службы охраны на объекте с записью в журнал охраны; за свой счет, собственными силами устранять недостатки (дефекты), допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при выполнении работ, так и на момент подписания акта о приемке выполненных работ. Выявленные в ходе приемки, проводимой с участием субподрядчика, недостатки (дефекты) и установленные подрядчиком сроки их устранения фиксируются сторонами путем подписания акта о недостатках, а при отказе субподрядчика от подписания указанного акта, путем составления и подписания подрядчиком акта о недостатках в одностороннем порядке. Субподрядчик обязуется устранить указанные недостатки (дефекты) в срок, установленный в соответствующем акте.

При возникновении между подрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков в выполненной работе или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений субподрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Субподрядчик обязуется устранить указанные недостатки (дефекты) в разумный срок, установленный подрядчиком и указанный в соответствующем акте.

При нарушении субподрядчиком срока устранения недостатков (дефектов), при отказе субподрядчика от устранения недостатков подрядчик вправе устранить их собственными силами либо силами привлеченных организаций и взыскать с субподрядчика денежные средства в размере своих расходов на устранение недостатков (дефектов). В счет цены договора в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего договора разработать и представить подрядчику на согласование проект производства работ (ППР), технологические карты в соответствии с требованиями переданной подрядчиком субподрядчику технической документации на выполняемые работы. Подрядчик в течение 2 дней с момента получения от субподрядчика вышеуказанной документации согласовывает (подписывает) ее или при наличии замечаний направляет субподрядчику перечень замечаний. Субподрядчик в течение 1 дня с момента получения от подрядчика перечня замечаний устраняет их и направляет исправленную документацию подрядчику, который рассматривает ее в вышеуказанном порядке. После утверждения ППР подрядчиком субподрядчик, в случаях предусмотренных действием законодательства Российской Федерации,  обязан согласовать ППР на соответствующий этап с уполномоченными органами г. Москвы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве»; известить подрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки (освидетельствования) выполненных скрытых работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, и проведения испытаний, не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки; приступать к выполнению последующих работ только после приемки подрядчиком скрытых работ и подписания акта освидетельствования этих работ. В случае если подрядчиком были внесены в общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, выполнение последующих работ на этом участке субподрядчиком без письменного разрешения подрядчика не допускается. Если закрытие работ выполнено без подтверждения подрядчика, в случаях, когда подрядчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку подрядчиком, а затем - восстановить ее. Приемка скрытых работ, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, подтверждается актом освидетельствования скрытых работ. Акт освидетельствования скрытых работ составляется в четырех экземплярах, один экземпляр для субподрядчика и три экземпляра для подрядчика. К каждому акту освидетельствования скрытых работ субподрядчиком должны прилагаться: исполнительные геодезические съемки, паспорта и сертификаты на использованные материалы. 

Субподрядчик обязался проводить индивидуальные испытания смонтированного оборудования и систем в присутствии представителей подрядчика и приглашенных им заинтересованных сторон, известив подрядчика предъявительским письмом о проведении испытаний не позднее, чем за 3 рабочих дня до назначенного времени проведения испытаний; оформить результаты испытаний соответствующим протоколом (в 4-х экземплярах: один - для субподрядчика, три - для подрядчика); принять участие в комплексном опробовании оборудования и систем, оказать содействие подрядчику в передаче законченного строительством объекта (в части выполненных по договору работ); немедленно известить подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: непригодности или недоброкачественности переданной подрядчиком технической документации; возможных неблагоприятных для подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных, не зависящих от субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата выполняемых работ, либо создающих угрозу их не завершения в срок. Субподрядчик обязался исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания подрядчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика, а также предоставлять по письменному запросу подрядчика сведения, касающиеся осуществления работ по договору. Субподрядчик обязан обеспечивать доступ представителей подрядчика и стороны с которой подрядчик заключил договор к помещениям субподрядчика на объекте, а также обеспечивать участие должностных лиц в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых подрядчиком и/или стороной с которой подрядчик заключил договор; принимать участие в рассмотрении государственными контролирующими (надзорными) органами выявленных в ходе выполнения субподрядчиком работ замечаний; при получении от подрядчика соответствующего уведомления совместно с подрядчиком участвовать в передаче законченного строительством объекта заказчику-генподрядчику в части предусмотренных настоящим договором работ. В случае выявления в ходе производства работ подрядчиком, или надзорными органами и контролирующими организациями нарушений качества работ, выполняемых субподрядчиком на объекте, субподрядчик, в соответствии с полученным от подрядчика предписанием (актом предписанием), обязан ознакомиться под подпись с перечнем обнаруженных нарушений и сроками, установленными на их устранение. субподрядчик в срок, установленный в предписании, устраняет все обнаруженные нарушения с составлением документов, подтверждающих устранение нарушений и подписанных со стороны лиц, выявивших такие нарушения. После устранения нарушений субподрядчик немедленно в письменном виде информирует об этом подрядчика. Устранение недостатков осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.1.9 договора.

Субподрядчик обязан компенсировать подрядчику убытки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими по вине субподрядчика вследствие выполнения субподрядчиком работ в соответствии с договором, а также вследствие действий/бездействия субподрядчика по предоставлению в ИФНС деклараций по НДС и налогу на прибыль; нести ответственность и соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Правительства Москвы. В случае выявления контролирующими органами лиц, работающих у субподрядчика без соблюдения паспортно-визового режима, установленного для г. Москвы, субподрядчик оплачивает в установленном контролирующими органами порядке, штрафные санкции в связи с применением к нему мер административной и иной ответственности. 

Субподрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего запроса подрядчика (в том числе в рамках выездных проверок, осуществляемых представителями подрядчика) представить ему копии налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (с приложением квитанции о сдаче декларации), налоговой декларации по налогу на прибыль (с приложением квитанции о сдаче декларации), бухгалтерского баланса (с приложением квитанции о сдаче декларации); справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам и страховым взносам, выданную не ранее 14 дней до даты получения запроса; доверенности или копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц, подписывающих первичные учетные документы, счета-фактуры; документы, подтверждающие квалификацию сотрудников субподрядчика, а также иные учредительные и финансовые документы субподрядчика. Субподрядчик обязался располагать квалифицированными специалистами (работники субподрядчика), состоящими в трудовых отношениях с субподрядчиком, а также средствами (техника, иное оборудование и инструменты и пр.), позволяющими выполнять работы по договору.

В случае привлечения субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 706 ГК РФ для выполнения своих обязательств по договору (или части обязательств) третьих лиц (иные субподрядные организации), субподрядчик гарантировал подрядчику, что такие третьи лица также будут отвечать указанным выше требованиям.

До заключения договоров с субподрядными организациями согласовывать с подрядчиком перечень субподрядных организаций, планируемых для привлечения к выполнению работ по настоящему договору, с указанием видов работ (описанием части работ). Субподрядчик обязуется привлекать в качестве субподрядных только те организации, которые являются квалифицированными, опытными и компетентными в соответствующей области и способны выполнять работу с соблюдением требований производственной и экологической безопасности. Субподрядчик обязан представить по запросу подрядчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования, а также подтверждающие наличие у субподрядных организаций всех необходимых для выполнения работ свидетельств и лицензий. Согласование кандидатуры субподрядной организации осуществляется в порядке, предусмотренном п. 1а.3 договора. После согласования кандидатуры субподрядной организации субподрядчик обязан письменно уведомить подрядчика о дате начала выполнения согласованной субподрядной организацией работ на объекте, а в последующем субподрядчик обязан предоставлять подрядчику по его требованию информацию по всем взаиморасчетам с субподрядными организациями (по форме, полученной от подрядчика), в том числе информацию о своевременности оплаты заработной платы (по форме отчета о фактически произведенных выплатах, полученной от подрядчика). 

В свою очередь, подрядчик обязался передать по акту субподрядчику место проведения работ и обеспечить работникам субподрядчика доступ на объект в период выполнения работ; передать субподрядчику техническую документацию в перечисленном составе; локальную смету на выполняемые работы, утвержденную заказчиком-генподрядчиком, на бумажном носителе в одном экземпляре и/или в электронном виде в формате pdf не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения подрядчиком от заказчика-генподрядчика. Подрядчик обязался производить оплату фактически выполненных субподрядчиком и принятых подрядчиком работ в порядке, предусмотренном договором; выделить на объекте помещение для хранения материалов и оборудования, обеспечить сохранность находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, при условии их передачи субподрядчиком под охрану с записью в журнал охраны; обеспечить контроль и надзор (строительный контроль) за ведением работ в соответствии с условиями договора и требованиями строительных норм и правил; обеспечить условия для беспрепятственного проезда (допуска), установки и маневрирования автомобильной техники (краны, строительные машины и т.п.) субподрядчика, необходимой для производства работ; в случае необходимости, по письменному запросу предоставлять субподрядчику во временное пользование строительные механизмы, на согласованных сторонами условиях (п. 4.9. договора); осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности строительства, культуры производства и охраны труда, в том числе указанных в п. 5.1.2 договора; в случае выявления заказчиком-генподрядчиком, или надзорными и контролирующими органами, или подрядчиком нарушений качества выполняемых работ, подрядчик обязуется немедленно передать субподрядчику предписания (акты-предписания) о необходимости устранения таких нарушений со сроками их устранения субподрядчиком.

Согласно разделу 6 договора, сдача-приемка выполненных субподрядчиком работ осуществляется в следующем порядке. Субподрядчик до 20 числа отчетного календарного месяца представляет подрядчику с сопроводительным письмом следующие документы: акт контрольного замера выполненных объемов работ, с визой строительного контроля подрядчика в 4 экземплярах на бумажном носителе; акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, завизированный представителями заказчика-генподрядчика на объекте, строительного контроля подрядчика в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel, Смета.ру (sob.sax); справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel, Смета.ру (sob.sax); журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а с визами представителя заказчика-генподрядчика и подрядчика на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel, Смета.ру (sob.sax);  исполнительную документацию и иные документы, подтверждающие фактически выполненный объем работ (в том числе талоны, подтверждающие утилизацию грунта); состав и порядок ведения исполнительной документации должен соответствовать требованиям приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128 (РД-11-02-2006), а также требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и требованиям регламента по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями (приложение № 13 к договору); акт приема-передачи исполнительной документации, подписанный со стороны субподрядчика в 2 экземплярах на бумажном носителе; счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру на имя подрядчика, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации (в случае представления подрядчику счета-фактуры, не соответствующего требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, субподрядчик обязан привести счет-фактуру в соответствие с требованиями действующего законодательства в течение 3-х дней с даты получения от подрядчика уведомления об этом, в противном случае субподрядчик обязан выплатить по требованию подрядчика штрафную неустойку в размере, указанной в счете-фактуре суммы НДС).

При надлежащем исполнении субподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.1.1 договора подрядчик в течение 20 календарных дней рассматривает, подписывает и возвращает один экземпляр представленных субподрядчиком в соответствии с пунктом 6.1.1 договора документов, или при наличии замечаний по выполненным работам (в т.ч. по комплектности, по форме, содержанию исполнительной документации; в случае отсутствия виз, предусмотренных п. 6.1.1; в случае несоответствия предъявленных к приемке работ требованиям договора и/или фактически выполненным объемам работ) в тот же срок направляет субподрядчику мотивированный отказ от подписания представленных документов и приемки выполненных работ (мотивированный отказ). В случае направления субподрядчику мотивированного отказа, сторонами в течение 3 рабочих дней с даты получения субподрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых для устранения недостатков доработок за счет субподрядчика и сроков их выполнения, установленных подрядчиком. При отказе субподрядчика от участия в составлении и подписании указанного акта, такой акт составляется и подписывается подрядчиком в одностороннем порядке и направляется субподрядчику. Субподрядчик обязан в сроки, указанные в акте, устранить соответствующие недостатки (дефекты) и повторно направить подрядчику документы, предусмотренные п. 6.1.1 договора к подписанию, а подрядчик производит их приемку в порядке, указанном в настоящем пункте. При наличии недостатков в результате работ стороны имеют права и обязанности, указанные в п. 5.1.9 договора. Подписание подрядчиком документов, предусмотренных п. 6.1.1 договора, не является приемкой работ в смысле ст. 753 ГК РФ и не означает перехода рисков случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ к подрядчику. Документом, подтверждающим выполнение работ по договору, является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору, после подписания которого подрядчик принимает результат выполненных работ под свою охрану и несет риск его случайной гибели или повреждения. До подписания данного акта сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4, риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ несет субподрядчик. Оформленный и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору (в 2-х экземплярах) субподрядчик предъявляет подрядчику в течение 5 рабочих дней с даты окончания работ. Подрядчик в течение 30 календарных дней рассматривает, подписывает и возвращает 1 экземпляр представленного субподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору или при наличии замечаний по результату выполненных работ (в т.ч. при не предоставлении, либо при предоставлении в ненадлежащем виде и составе документации, указанной в п. 6.1.1 договора), в тот же срок направляет субподрядчику мотивированный отказ от подписания и приемки результата работ.

В случае направления субподрядчику мотивированного отказа, сторонами в течение 3 рабочих дней с даты получения субподрядчиком мотивированного отказа, составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых для устранения недостатков, доработок за счет субподрядчика и сроков их выполнения, установленных подрядчиком. При отказе субподрядчика от участия в составлении и подписании указанного акта, такой акт составляется и подписывается подрядчиком в одностороннем порядке и направляется субподрядчику. Субподрядчик обязан в сроки, указанные в акте, устранить соответствующие недостатки (дефекты) и повторно направить подрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору. В случае, если в ходе сдачи-приемки результатов выполненных работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных субподрядчиком работ и объекта в соответствии с его целевым назначением, и если такие недостатки (дефекты) связаны с работами, выполнявшимися по договору субподрядчиком, субподрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных подрядчиком в ходе процедуры сдачи-приемки работ. В указанном случае приемка результата работ и соответственно подписание акта сдачи-приемки выполненных работ по форме приложения № 4 к договору не производится.

Согласно разделу 7 договора, за невыполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушение субподрядчиком обязательств по договору подрядчик вправе требовать уплаты, а субподрядчик по требованию подрядчика обязан уплатить, в том числе: в случае нарушения сроков начала и окончания работ по вине субподрядчика пени в размере 0, 03 % от цены договора за каждый день просрочки; за непредставление, несвоевременное предоставление субподрядчиком информации, предусмотренной пунктом 5.1.19, пп. а, б, в, г, д, ж п. 5.1.20 договора, - неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации, но не более 300 000 руб. по каждому факту не предоставления информации; при установлении подрядчиком факта нарушения субподрядчиком на объекте требований технической документации, требований СНИП, требований технических регламентов, требований нормативных актов Москвы и (или) Российской Федерации, а также требований договора, касающихся производства строительных работ, и направлении подрядчиком предписания с указанием сроков на устранение обнаруженного нарушения (либо оформлении соответствующей записи в общем журнале работ), в случае неустранения указанного в предписании и/или записи в общем журнале работ нарушения в установленный в предписании и/или записи срок, - штраф в размере 50 000 руб. за каждое неустраненное нарушение; при производстве скрытых работ без приглашения представителя подрядчика и иных лиц, чье присутствие является обязательным, на их освидетельствование - штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт производства скрытых работ без приглашения представителя подрядчика на их освидетельствование; за нарушение обязанности по устранению субподрядчиком недостатков (дефектов) по качеству работ (п. 5.1.9, п. 5.1.16) - штраф в размере 100 000 руб. за каждый выявленный факт нарушения по устранению недостатков (дефектов) в работах; за нарушение установленных и согласованных сторонами сроков для устранения субподрядчиком дефектов, выявленных в результатах работ при приемке работ или в период гарантийного срока – 1 % от стоимости работ, выявленных с дефектами, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленных сроков; за неисполнение субподрядчиком обязательств, указанных в п. 5.1.2 договора, - штрафы в размерах, установленных приложением № 3 к договору; за неисполнение субподрядчиком обязательств, указанных в п. 5.1.10 (о разработке и согласовании ППР) - штраф в размере 100 000 руб. за установленный факт неисполнения; за неисполнение (не надлежащее исполнение) обязанности по ведению общего журнала работ (форма КС-6) - штраф в размере 100 000 руб. за каждый факт неисполнения; за неисполнение субподрядчиком обязательств по целевому использованию денежных средств, полученных по договору, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый установленный факт неисполнения; за не предоставление, несвоевременное предоставление и/или ненадлежащее оформление субподрядчиком исполнительной документации - штраф в размере 200 000 руб. за каждый факт нарушения; в случае нарушения субподрядчиком сроков компенсации затрат подрядчика по предоставлению коммунальных услуг (пользование водой и электроэнергией) - неустойку в размере 0, 1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; за проникновение на строительную площадку/территорию объекта посторонних лиц, не являющихся участниками строительства, с использованием пропусков, оформленных на работников субподрядчика и/или субсубподрядной организации, - штраф в размере 200 000 руб. за каждое проникновение, установленное на основании акта, подписанного подрядчиком в одностороннем порядке; за нарушение целостности и/или повреждения ограждения территории строительной площадки/объекта, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый факт нарушения целостности/повреждения ограждения, установленный на основании акта, подписанного подрядчиком в одностороннем порядке; за нарушение иных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего договора и не указанных выше, - штраф в размере 100 000 руб. за каждый установленный факт нарушения.

Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает подрядчика права на возмещение в полном объеме убытков (в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пеней)), возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиком своих обязательств.

Стороны обязаны оплатить неустойки (пени, штрафы) и убытки, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством в течение 10 рабочих дней с даты получения требования об их уплате. Уплата неустойки (пени, штрафов), возмещение убытков за неисполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. В случае представления субподрядчиком искаженных и недостоверных документов и сведений о добросовестности субподрядчика, указанных в п. 5.1.19 договора, субподрядчик несет ответственность в размере претензий, предъявленных подрядчику налоговыми органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за последствия аварийных происшествий, произошедших в зоне проведения работ вследствие неудовлетворительной организации работ. Подрядчик вправе удерживать суммы штрафов, подлежащих уплате или возмещению субподрядчиком, в счет погашения обязательств подрядчика по оплате выполненных субподрядчиком работ. Требование уплаты штрафных санкций является правом, но не обязанностью сторон. Обязанность выплаты неустойки (штрафа, пени) возникает у сторон с момента предъявления требования об уплате неустойки (штрафа, пени). Сторона освобождается от ответственности за нарушение своего обязательства по договору, если такое нарушение вызвано нарушением другой стороной обязательств, по отношению к которым обязательства первой стороны являются встречными. В случае если в график производства работ сторонами вносятся изменения, ответственность субподрядчика за нарушение установленных ранее (до внесения изменений) сроков выполнения этапов работ сохраняется. К отношениям сторон, возникшим до изменения графика производства работ, применяются условия договора, действовавшие на день их возникновения (день фактического нарушения обязательства, в том числе обязательства о сроках выполнения работ либо, если невозможно применить это правило, - день направления претензии, выдачи предписания, составления акта и др., - в зависимости от того, какое событие наступило раньше).

В разделе 8 договора сторонами согласован порядок расторжения договора.

Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, а также по решению суда в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором. Каждая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора без возмещения субподрядчику убытков, причиненных прекращением договора, в случаях: нарушения субподрядчиком сроков начала и окончания работ более чем на 15 календарных дней, за исключением причин, не зависящих от субподрядчика; выполнения субподрядчиком работ с отступлением от технической документации, в соответствии с которой должны выполняться работы, без согласования таких отступлений с подрядчиком. В этом случае подрядчик имеет право не оплачивать работы, выполненные с отступлением от технической документации; неоднократного (более двух раз) не соблюдения субподрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, и этот факт был выявлен надзорными или контролирующими органами; по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При расторжении подрядчиком договора по основаниям, изложенным в п. 8.2 договора, субподрядчик обязан возвратить подрядчику в течение 15 дней с момента получения от последнего извещения об отказе от исполнения договора, все неиспользованные давальческие материалы и оборудование, а также неиспользованные авансовые денежные средства с учетом фактически выполненных и принятых подрядчиком объемов выполненных работ. При расторжении субподрядчиком договора по основаниям, изложенным в п. 8.3 договора, подрядчик обязан принять и оплатить фактически выполненный субподрядчиком надлежащим образом объем работ и возвратить всё причитающееся субподрядчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением суммы гарантийного удержания, которая подлежит возврату согласно установленному договором порядку. При расторжении договора по любым основаниям субподрядчик обязан передать, а подрядчик обязан принять работы, фактически выполненные субподрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения или отказа от исполнения договора, а также документацию, переданную субподрядчику по настоящему договору, в течение 10 рабочих дней со дня получения от субподрядчика акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3, акта сдачи-приемки документации и других документов в соответствии с требованиями договора или в тот же срок представить мотивированный отказ. В течение 15 рабочих дней с даты подписания документов, указанных в п. 8.4.3 договора, стороны производят сверку взаимных расчетов по договору с составлением акта сверки. Должник в течение 20 банковских дней со дня подписания сторонами акта сверки производит перечисление денежных средств на расчетный счет кредитора. При расторжении Договора в одностороннем порядке сторона, инициировавшая расторжение договора, обязана направить другой стороне уведомление об отказе от исполнения договора, не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от обязательств по проведению взаиморасчётов и иных обязательств сторон, обусловленных расторжением договора.

Согласно разделу 9 договора, субподрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме с высоким качеством, соответствующим технической документации, требованиям соответствующих нормативных актов, а также своевременное устранение всех недостатков и дефектов. Гарантийный срок на все составляющие результата выполненных работ составляет 5 лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме приложения № 4 к договору (п. 9.2 договора). Под гарантийным сроком для целей толкования договора понимается период времени, в течение которого субподрядчик гарантирует соответствие работ требованиям договора, действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, нормативно-технической документации в объеме и в соответствии с рабочей документацией, а также обеспечивает собственными и/или привлечёнными силами и за свой счёт устранение ненадлежащего качества выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные субподрядчиком и его субподрядчиками по договору. Указанные в настоящем пункте гарантии не распространяются на случаи повреждения объекта со стороны подрядчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта. В течение гарантийного срока в случае обнаружения недостатков (дефектов), субподрядчик за свой счёт исправляет любые недостатки (дефекты), допущенные им при выполнении работ, по уведомлению подрядчика и в сроки, указанные подрядчиком. В случае отказа субподрядчика от устранения недостатков (дефектов) или не устранения их в установленный подрядчиком срок, подрядчик вправе привлечь для их устранения третье лицо с взысканием расходов с субподрядчика. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), подрядчик должен заявить о них субподрядчику в письменном виде в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения. При возникновении между подрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных работ или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений субподрядчиком договора субподряда или причинной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Все споры и разногласия между сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. При не достижении соглашения, споры и разногласия по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. Срок рассмотрения направленной стороной по договору претензии составляет 10 рабочих дней с даты ее получения (под роспись) другой стороной по договору (раздел 10 договора).

Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по договору или прекращения действия договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Стороны извещают друг друга в течение 15 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких произошедших изменений: наименования юридического лица - стороны договора; почтового или юридического адреса, контактных телефонов, указанных в ст. 13 договора; налоговых или банковских реквизитов, указанных в ст. 13 договора; смены лица, обладающего правом без доверенности действовать от имени юридического лица - стороны договора.

Приложениями к договору являются: приложение № 1 - расчет приблизительной стоимости, приложение № 2 - график производства работ, приложение № 3 - требования по безопасности строительства, культуре производства и охране труда и штрафные санкции за их невыполнение, приложение № 4 - форма акта сдачи-приемки выполненных работ, приложение № 5 - форма отчета о выполненных работах, приложение № 6 - отчет о состоянии охраны труда за отработанный месяц на объекте (форма), приложение № 7 - отчет о доставке материально-технических ресурсов силами субподрядчика (форма), приложение № 8 - форма недельно-суточного плана, приложение №  9  - перечень  и  форма документов,   обосновывающих  привлечение  субподрядчиком субподрядных организаций, приложение № 10 - порядок расчетов по выплате заработной платы, приложение № 11 - форма производственной программы, приложение № 12 - форма банковской гарантии, приложение   № 13 - регламент по предоставлению исполнительной документации подрядными организациями, приложение № 14 - форма реестра платежных поручений, приложение № 15 - ведомость переработки давальческих материалов поставки подрядчика (форма) в отсутствии их представления при рассмотрении данного спора.

Истец направил в адрес ответчика письмо № 27-М от 17.12.2019 с указанием, что в ходе осмотра были выявлены следующие замечания: не выполнена маркировка и бирковка кабельных линий, распредкоробок, допущено примыкание кабельных линий к горючим инженерным системам, допущена совместная прокладка силовых и сигнальных кабелей, допущена   прокладка  сигнальных  кабелей  совместно  с  кабелями  системы АПС, СОУЭ, в нарушение требований РД допущена частичная прокладка кабельных линий в лотке, допущена групповая прокладка кабельных линий в нарушение требований РД, выявлены перехлесты, выявлен некачественный монтаж трубопроводов кабельных линий. Просил предпринять меры по устранению вышеуказанных замечаний и предоставить ответным письмом информацию, подтверждающую соответствие выполненных работ РД.

В письме № 497 от 19.12.2019 ответчик, со ссылкой на выявленные недостатки, указал следующее:  «Не выполнена маркировка и бирковка кабельных линий, распредкоробок» - работа будет проведена в следующий приезд бригады на объект. «Допущено примыкание кабельных линий к горючим инженерным системам» - исправления будут проведены в следующий приезд бригады. «Допущена совместная прокладка силовых и сигнальных кабелей» - все разделы РД, выданные нам в работу, предполагают питание напряжением 12В и 24В, совместная прокладка сигнальных кабелей с такими питающими кабелями разрешена РД и СП. Исключение составляет РД 79041.П-СВН, лист7, пункт 1 - требование разделить кабельные трассы F/UTP и кабеля питания ошибочно, так как это один и тот же кабель, разделение же F/UTP с кабелем питания ИК-прожекторов не предусмотрено СП, так как напряжение там менее 110В, а именно 24В. «Допущена прокладка сигнальных кабелей совместно с кабелями системы АПС, СОУЭ» - РД 79041.П-6,32-АПС, СОУЭ, а также РД 78.36.002-2010, СП 3.13130.2009, СП 5.13130, не предусматривают ограничения на совместную прокладку кабельных линий с другими слаботочными системами. «В нарушение требований РД допущена частичная прокладка кабельных линий в лотке» - РД 79041.П-6,32-АПС, СОУЭ, ЛистЗ, пунтк5: «Кабельную трассу вдоль оконной конструкции проложить по имеющимся металлическим конструкциям.»; РД 79041.П-ГГО, листб, пункт 4: «4 При совместной прокладке линий с напряжением до 60 В с линиями напряжением ПО В и более в лотках, располагать их в разных отсеках. При совместной прокладке линий с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в трубах ПВХ, прокладывать линии в отдельных трубах.» и др. не содержат запрета на прокладку кабельных трасс в лотках. «Допущена групповая прокладка кабельных линий в нарушение требований РД» - РД и СП 3.13130.2009, 5.13130.2009, 132.13330.2011 и др, не запрещают совместную групповую прокладку кабельных линий. «Выявлены перехлесты» - при прокладке кабельных линий в 2-х и более отдельных ПВХ-трубах перехлесты кабельных линий при опуске к приборам, проходе через стены, обходе других инженерных конструкций исключить невозможно. В следующий приезд бригады все возможные исправления будут проведены. «Выявлен некачественный монтаж трубопроводов кабельных линий» - требуется уточнений конкретных мест некачественной прокладки, исправления будут проведены в следующий приезд бригады.

Истец направил в адрес ответчика претензию № 52 от 22.05.2020, с указанием суммы штрафа и ссылкой на возможное обращение в суд. В письме № 54 от 29.05.2020 дополнительно были отражены выявленные недостатки. 

29.05.2020 сторонами данного спора был подписан акт приема-передачи замечаний и ТМЦ по объекту, учитывая выявленные замечания, их принятие ответчиком и согласие с ними. Также сторонами был составлен протокол совещания по выполнению строительно-монтажных работ на объекте.  Отсутствие произведенных оплат послужило основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями.

В материалы дела представлены платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств истцом в пользу ответчика. 

Ответчиком, в приложении к отзыву на иск, была представлена первичная документация (акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), свидетельствующая о приемке выполненных работ, при наличии подписи руководителя истца ФИО6 в январе 2021 года. 

Представители истца подписание первичной документации при рассмотрении дела в суде первой инстанции на оспаривали, при этом, со ссылкой на пояснительную записку бывшего руководителя истца ФИО6, просили обратить внимание, что документация подписывалась, учитывая достигнутые договоренности по фактическому устранению выявленных недостатков, в отсутствии выполнения данного обязательства ответчиком. Представителями ответчика, с учетом заявленного ходатайства истца об истребовании доказательств, были представлены трудовые договора с работниками, с учетом дополнительных соглашений к ним; штатное расписание общества, а также налоговые декларации по сотрудникам за 2019, 2020, 2021 годы, учитывая представленный реестр сотрудников за период с 01.01.2019 по 31.12.2021. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача подрядчиком результата работ заказчику (ст. 711, 746 ГК РФ, п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). 

В силу ст. 720 ГК РФ, заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Суд первой инстанции критически оценил пояснительную записку бывшего руководителя истца ФИО6, представленную представителями истца. 

Ходатайство о вызове его для дачи пояснений в качестве свидетеля не заявлялось, указанное лицо не обращалось с заявлением о вступлении при рассмотрении данного спора третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований (ст. 51 АПК РФ).

При этом, суд первой инстанции учел, что в соответствии со ст. 65, 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Из представленного в материалы дела договора следует, что он подписан уполномоченными лицами, в нем изложены все существенные условия определенные сторонами при его заключении, указанный договор в установленном законом порядке не расторгнут, не оспорен, недействительным не признан. Более того, подписание первичной документации и произведенные оплаты свидетельствуют о его фактическом исполнении. 

Таким образом, заключая и подписывая договор, стороны, в том числе истец, изъявили свою волю на его исполнение на изложенных в нем условиях. Соглашение было направлено на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей, на достижение определенного правового результата.

По условиям договора предусмотрен порядок подписания первичной документации, свидетельствующей о приемке выполненных работ. Из материалов дела следует, что выполненные работы были приняты руководителем истца, исходя из подписанных актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При этом, учитывая представленную переписку сторон относительно выявленных недостатков по выполненным работам, писем – претензий после января 2021 года (период подписания первичной документации) не имеется. 

Кроме того, условиями договора было предусмотрено проведение экспертных исследований (при возникновении между подрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков в выполненной работе или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза), при наличии вопросов по качеству их выполнения, в отсутствии представления подтверждающих документов по их совершению. 

При рассмотрении данного спора ходатайств о проведении судебной экспертизы не заявлялось. Кроме того, суд первой инстанции учел пояснения представителей истца о заявленных претензиях со стороны заказчика строительного объекта, однако, в нарушение ст. 65, 68 АПК РФ, подтверждающих документов не представлено. Также отсутствуют доказательства, что выявленные недостатки устранялись силами истца или привлечением иных субподрядных организаций.

При заключении договора, истец, располагая на преддоговорных стадиях, предшествующих его заключению и на стадии заключения полной информацией о предложенных условиях, добровольно принял на себя все права и обязанности, определенные письменной сделкой, исполняемой сторонами, в том числе относительно согласования выполненных работ, предъявления претензий по качеству и порядку их устранения, а также определению согласования подрядных организаций.

Никаких неопределенностей относительно условий исполнения договора у сторон не возникло при его заключении. При подписании договора и его исполнении никаких разногласий относительно предмета у истца не возникало. 

Суд первой инстанции учел, что истцом не представлено документального подтверждения привлечения ответчиком субподрядных организаций для выполнения спорных работ. 

Привлечение к выполнению работ определенных сотрудников, как относящихся к ответчика, так и нет, что не имеет ключевого значения при рассмотрении данного спора, не может быть подменено условиями договора № ПЭ-13-П/СП от 19.08.2019 о необходимости согласования субподрядных организаций, поскольку они таковыми не являются. 

Истец в исковом заявлении и представители истца при проведении судебных заседаний суда первой инстанции ссылались на конкретные пункты договора, которые касаются привлечения субподрядных организаций, а не работников, что исключает возможность применения ранее достигнутых сторонами условий.

В отсутствие предъявления встречных требований при рассмотрении данного спора (ст. 12 ГК РФ, ст. 132 АПК РФ), суд первой инстанции не устанавливал фактическую стоимость выполненных работ, в том числе с учетом рассмотрения заявления ООО «Энергощит-К» о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела № А65-17012/2021. Между тем, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в сумме 900 000 руб. в качестве неосновательного обогащения, исходя из представленных документов. 

Как следует из представленных документов, истец является юридическим лицом, профессионально занимающимся подрядной деятельностью, в связи с чем представленные доказательства свидетельствуют об осуществлении им повседневной профессиональной деятельности. Предпринимательская деятельность осуществляется истцом под свою ответственность, следовательно, риски и убытки от осуществления такой деятельности юридическое лицо несет самостоятельно.

С учетом сделанных судом первой инстанции выводов, учитывая условия договора и представленную первичную документацию, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии неосновательного обогащения в сумме 900 000 руб. на стороне ответчика. 

Истцом также заявлено требование о взыскании штрафов со ссылкой на пункты договора № ПЭ-13-П/СП от 19.08.2019. 2 500 000 руб. за отсутствие устранения выявленных замечаний, в отсутствии конкретной ссылки на пункты договора; 1 100 000 руб. на основании подпункта 8 п. 7.2 договора (за нарушение обязанности по устранению субподрядчиком недостатков (дефектов) по качеству работ (п. 5.1.9, п. 5.1.16) – штраф в размере 100 000 руб. за каждый выявленный факт нарушения по устранению недостатков (дефектов) в работах); 400 000 руб. на основании п. 5.1.13, подпункта 18 п. 7.2 договора (за нарушение иных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего договора и не указанных выше); 3 200 000 руб. на основании п. 4.1.2 договора и подпункта 14 п. 7.2 договора (за непредставление, несвоевременное представление и/или ненадлежащее оформление субподрядчиком исполнительной документации). 

В материалы дела представлено письмо истца № 27-М от 17.12.2019 и ответ ответчика № 497 от 19.12.2019 с указанием на устранение выявленных замечаний. 

В письме № 52 от 22.05.2020, спустя длительный срок после сложившейся переписки, указано на отсутствие устранения выявленных недостатков, при этом в материалы не представлено подтверждающих документов по их наличию и отсутствию их устранения. В том числе суд первой инстанции учел отсутствие представленных претензий со стороны основного заказчика, исходя из строительного объекта – Электродепо «Нижегородское». 

Кроме того, в материалы дела представлены письма ответчика в подтверждение невозможности надлежащего исполнения договорных обязательств ввиду отсутствия поставки истцом ТМЦ, необходимого для выполнения работ, что также привело к нарушению сроков и отсутствию возможности составления графиков производства работ. При этом, после подписания первичной документации претензии истцом в адрес ответчик не предъявлялись. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65, п. 3 ч. 1 ст. 126, ч. 7 ст. 131 АПК РФ истец и ответчик обязаны приложить к исковому заявлению и отзыву соответственно документы, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, и указать, какие доказательства в подтверждение каких фактических обстоятельств представляются. 

Доказательства, которые не были приложены к исковому заявлению и отзыву, должны быть раскрыты перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом и указанного в определении, если иное не установлено АПК РФ (ч. 2 ст. 9, ч. 3 ст. 65 АПК РФ). 

Суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о возможности начисления неустойки, исходя из достигнутых сторонами условий договора.

Исследованные в совокупности представленные истцом, ответчиком в материалы дела доказательства позволили суду первой инстанции сделать вывод о недоказанности истцом исковых требований. 

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ не является основанием признания наличия просрочки в договорных обязательствах.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований относительно взыскания договорной неустойки, не лишен возможности заявлять о применении ст. 333 ГК РФ, что не может повлечь для него правовых последствий в виде согласия с заявленными требованиями. В отсутствии правовых оснований для взыскания договорной неустойки за указанный истцом период, ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ судом первой инстанции не рассматривалось. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, руководствуясь статьями 1, 2, 6, 12, 161, 307, 309, 310, 329, 330, 333, 408, 420, 421, 422, 431, 432, 702, 720, 753, 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 8,  9, 51, 65, 68, 71, 110, 112, 126, 131, 132, 156, 167-171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктами  36, 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", пунктом 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", определением Верховного суда Российской Федерации от 18.01.2018 № 305-ЭС17-13822, суд первой инстанции правомерно и обоснованно отказал в иске. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования суда первой инстанции, который дал им надлежащую правовую оценку. Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов суда первой инстанции.

В апелляционной жалобе не приведено доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.03.2022  по делу № А65-23127/2021  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Арбитражный суд Поволжского округа.

 

Председательствующий судьяС.А. Кузнецов

Судьи             О.И.  Буртасова

                                                                                                                      О.В. Барковская