Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-11569/2024

г. Хабаровск

18 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения изготовлена 02 сентября 2024 года.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой,

рассмотрев вопрос о принятии искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Хардекс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 680032, 

<

...>)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; адрес: 125167, 

<

...>)

о взыскании 283 716  руб. 82 коп.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Хардекс» (далее – истец, ООО «Хардекс») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к федеральному государственному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (далее- ответчик, ФГУП «Госкорпорация по ОРВД») о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по договору от 24.12.2020 в размере 283 716  руб. 82 коп.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с правилами, установленными главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которого исковые требования не признает, ссылается на то, что подписание актов выполненных работ не могло быть осуществлено по вине подрядчика, работы оплачены в срок.

02 сентября 2024 арбитражный суд принял решение по делу путем подписания резолютивной части решения, приобщенной к делу, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

04.09.2024 в арбитражный суд поступило заявление ООО  «Хардекс» о составлении мотивированного решения по правилам части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение было принято судом после исследования материалов дела по следующим основаниям.

24.12.2020 между ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» (заказчик) и ООО «Хардекс» (подрядчик) заключен договор, предметом которого является: подготовка площадки к проведению монтажных работ технологического оборудования DME позиции «Муравейка», заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с техническими требованиями (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, в сроки, установленные в настоящем договоре.

В силу пункта 2.1 договора его цена составляет 5 767 287 руб. 04 коп.

Объем выполняемых Работ: в соответствии с Техническими требованиями (пункт 1.3 договора).

В разделе 3 стороны согласовали порядок расчетов.

Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

Подрядчик после подписания договора выставляет счет на оплату аванса, а заказчик после получения оригинала счета, выставленного подрядчиком, в течение 15 рабочих дней, но не позднее 15.01.2021, выплачивает подрядчику аванс в размере 30% от цены договора, что составляет 1 730 186 руб. 11 коп., НДС не облагается.

Авансовый платеж является целевым. Целевое назначение – приобретение материалов, необходимых для выполнения работ в соответствии с приложениями к техническим требованиям (пункт 3.1.1 договора).

Окончательный расчет в размере 4 037 100 руб. 93 коп., НДС облагается, за выполненные работы по договору заказчик производит в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также на основании полученного заказчиком от подрядчика оригинала счета (пункт 3.1.2 договора).

В соответствии с пунктом 5.1 договора срок выполнения (завершения) работ: до 14 июля 2021 года.

Согласно пункту 6.1 договора в срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ подрядчик передает два экземпляра документации, включающей:

- счет/счет-фактуру;

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по договору;

-  акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик письменно подтверждает заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику выполненные Работы.

Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком (пункты 6.2,6.3,6.4 договора).

В соответствии с пунктом 9.3 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Размер такой неустойки составляет 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. 

Заказчик произвел авансовый платеж на сумму 1 730 186 руб. 11 коп., что подтверждается платежным поручением № 699 от 21.01.2021.

Работы по договору были выполнены на сумму 4 596 012 руб. 54 коп., что подтверждается актами приемки выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 14.06.2021 на  сумму 14 325 руб. 49 коп., № 2 от 14.06.2021 на сумму 43 564 руб. 58 коп., № 3 от 14.06.2021 на сумму 3 457 346 руб. 51 коп., № 4 от 14.06.2021 на сумму 91 565 руб. 68 коп., № 5 от 14.06.2021 на сумму 570 897 руб. 76 коп., № 6 от 14.06.2021 на сумму 223 504 руб. 85 коп., № 7 от 14.06.2021 на сумму 124 785 руб. 05 коп., № 8 от 14.06.2021 на сумму 24 811 руб. 72 коп., № 9 от 14.06.2024 на сумму 45 210 руб. 90 коп., справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) № 10 от 14.06.2021 на сумму 4 596 012 руб. 54 коп.

Работы оплачены заказчиком в полном объеме платежным поручением № 14876 от 11.10.2021 на сумму 2 865 826 руб. 43 коп.

За нарушение сроков оплаты выполненных работ подрядчиком начислена неустойка за период с 05.07.2021 по 11.10.2021 в размере 283 716 руб. 82 коп.

07.05.2024 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об оплате неустойки за нарушение сроков оплаты работ.

Требования истца оставлены ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные доказательства, обстоятельства конкретного дела, суд пришел к следующим выводам.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (часть 1 статьи 702 ГК РФ).

В силу части 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (часть 1 статьи 746 ГК РФ).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 9.3 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором. Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Размер такой неустойки составляет 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки его исполнения, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

Истцом начислена неустойка за период с 05.07.2021 по 11.10.2021 в размере 283 716 руб. 82 коп.

Ответчиком указано на отсутствие вины в просрочке исполнения обязательств, со ссылкой на следующие доказательства.

По условиям заключенного договора, заказчик в течение пяти рабочих дней после окончания работ и предоставления подрядчиком комплекса документа, предусмотренных в пункте 6.1 договора осуществляет приемку выполненных работ в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям договора, подписывает двусторонний акт выполненных работ (форма КС-2).

В случае обнаружения заказчиком при проведении приемки работ недостатков в выполненных работах сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте (пункт 6.8 договора).

В соответствии с пунктом 6.9 договора работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Окончательный расчет за выполненные работы по договору заказчик производит в течение 15 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), а также на основании полученного заказчиком от подрядчика оригинала счета (пункт 3.1.2 договора).

Как следует из материалов дела, письмом от 15.06.2021 № 82 в адрес заказчика направлены акты приёмки выполненных работ (КС-2 № 1-11), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) на сумму 5 767 267,04 руб. и счёту на оплату № 8 от 15.06.2021 на сумму 4 037 100,93 руб.

Письмом от 16.06.2021 № исхАДВ-4804/20 заказчик направил в адрес подрядчика отказ в подписании представленных письмом от 15.06.2021 № 82 по причине отсутствия подписи уполномоченного представителя, скреплённой печатью на актах о приёмке выполненных работ (КС-2) № 1-11, документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность материалов, актов на скрытые работы с приложенными документами, письменного подтверждения о соответствии документации фактически выполненным работам, что явилось нарушением п.п. 4.4.11, 6.1, 6.2, 6.7 Договора и препятствовало приёмке выполненных работ. Предложено в срок не позднее 18.06.2021 предоставить исчерпывающий пакет документов.

Подрядчик в адрес заказчика письмом от 15.06.2021 № 82-1 направил исполнительную документацию.

Заказчик письмом от 16.06.2021 № исх. АДВ-4814/20 отказал в подписании представленной письмом от 15.06.2021 № 82-1 исполнительной документации по причине отсутствия документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность материалов, применённых в ходе выполнения работ, актов на скрытые работы с приложенными документами, письменного подтверждения о соответствии документации фактически выполненным работам, что явилось нарушением п.п. 4.4.11, 6.1, 6.2, 6.7 Договора и препятствовало приёмке выполненных работ. Предложено прибыть на совместное совещание в 14 часов 18.06.2021.

Подрядчик письмом от 19.07.2021 № 99 представил в адрес заказчика  исправленную исполнительная документация 1 Том. 4 Раздела.

Подрядчик письмом от 29.07.2021 № 107 представил в адрес заказчика уточнённые акты приёмки выполненных работ (КС -2) № 1-11, КС-3), справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 5 706 158,88 руб., и счёт на оплату № 10 от 29.07.2021 на сумму 3 975 972,77 руб.

Заказчик письмом от 11.08.2021 № ИсхАДВ-6388/20 о рассмотрении документов, предоставленных с исх. от 29.07.2021 № 107, от 10.08.2021№ 109  отказал в приемке по причине:

- отсутствие письменного подтверждения, что представленные документы полностью соответствуют фактически выполненным работам

- объёмы работ завышены и не соответствуют фактически выполненным,

- не в полном объёме устранены замечания, указанные в акте от 31.05.2021, исх. от 16.06.2021 №ИсхАДВ-4804/20 и 16.06.2021 №ИсхАДВ-4814/20.

Подрядчик в адрес заказчика направил письмо от 10.08.2021 № 109, в котором просил оплатить выполненные работы с подтверждением того, что впервые акты выполненных работ и счёт на оплату были направлены 15.06.2021, исправленные – 29.07.2021, комплект исправленной исполнительной документации был направлен 16.07.2021.

Подрядчик письмом от 29.07.2021 № 107/2 в адрес заказчика представил акты на непредвиденные и временные работы.

Заказчик письмом от 17.08.2021 № ИсхАДВ-6547/20 указал подрядчику  на недостатки в документах по непредвиденным и временным работам.

Подрядчик в адрес заказчика представил гарантийное письмо от 31.08.2021 № 126-1 об обязательстве устранения выявленных и отражённых в актах от 28.05.2021 и 10.08.2021 недостатков и представлении полного пакета исполнительной документации в срок до 31.10.2021.

Подрядчик в адрес заказчика письмом от 30.09.2021 № 135 представил уточнённые акты выполненных работ (КС -2 № 1-11, КС-3 от 14.06.2021), справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 5 188 571,81 руб. и счёт на оплату № 16 от 30.09.2021 на сумму 3 458 385,7 руб.

01.10.2021 на адрес электронной почты заказчика  поступили уточнённые акты выполненных работ (КС -2 № 1-11, КС-3 от 14.06.2021), справка о стоимости выполненных работ и затрат на сумму 4 596 012,54 руб. и счёт на оплату № 17 от 01.10.2021 на сумму 2 865 826, 43 руб.

07.10.2021 актов приёмки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) были подписаны заказчиком.

Платежным поручением от 11.10.2021 № 14876 заказчиком произведена оплата работ по счёту № 17 от 01.10.2021 в размере 2 865 826 руб. 43 коп.

Таким образом, несмотря на то, что акты выполненных работ были датированы 14.06.2021, фактически истцом в исправленном виде указанные акты были направлены только 01.10.2021, в указанную дату также был выставлен счет на оплату выполненных работ. Работы были оплачены заказчиком 11.10.2021, то есть в установленный договором срок, следовательно основание для начисления неустойки отсутствует.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, обстоятельства конкретного дела, арбитражный не усматривает оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Руководствуясь статьями 167, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                       А.Ю. Милосердова