18/2018-110973(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-13029/2018

г.Чита

14 декабря 2018 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Недра" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления судебного  акта в законную силу выполнить гарантийные обязательства по государственному  контракту на выполнение дорожных работ по реконструкции № Ф.2016.53638 от  22.04.2016 Наименование объекта: завершение работ по объекту: «Реконструкция  подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита- Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 0+000-км 21+000 в Нерчинском районе  Забайкальского края» (2 пусковой комплекс)», а именно:  

1) восстановить 70 м2 асфальтобетонного покрытия, по адресу ПК124-ПК126;  

2) восстановить асфальтобетонное покрытие в объеме 200 м2 на примыканиях и  пересечениях, по адресу ПК161+63,ПК176+00,ПК185+50;  

3) заменить листы труб на входных, выходных оголовках в количестве 4 штук,  по адресу ПК157+50-ПК184+26;  

4) восстановить разрушения асфальтовых планок в швах монолитного бетона на  укреплении выходных оголовков труб в объеме 200 погонных метров, по адресу  ПК104+72 ПК119+50 ПК124+50 ПК157+50 ПК174+00 ПК178+25 ПК184+26  

5) восстановить частичное выкрашивание асфальтобетонного лотка в трубах в  объеме 10 м3, по адресу ПК104+72 ПК119+50 ПК157+50 ПК174+00 ПК178+25  ПК184+26 ПК193+00;  

6) устранить деформацию противофильтрационного экрана на входном оголовке  трубы (установить новый) в количестве 1 штуки, по адресу ПК193+00;  

7) устранить просадку земляного полотна примыкания в объеме 7 погонных  метров, по адресу ПК161+63.  

Производство по делу в части требований об обязании общества с ограниченной  ответственностью "Недра" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выполнить  гарантийные обязательства по государственному контракту на выполнение дорожных  работ по реконструкции № Ф.2016.53638 от 22.04.2016, а именно; устранить раскрытие  продольного стыка по оси дороги, по адресу ПК92-ПК209+50; устранить поперечные  трещины на, а/б покрытии, по адресу ПК92-ПК209+50; произвести доработку откосов  

на примыкании ПК110; убрать комки в полосе отвода; произвести планировку откосов;  произвести планировку кавальера растительного грунта ПК 107 прекратить.  

Истец вправе осуществить соответствующие действия за счет ответчика со  взысканием с него необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит  решение в течение установленного срока.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Недра" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного казенного учреждения  "Служба единого заказчика" Забайкальского края (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый  арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Е.В. Гончарук