98/2018-166904(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края  г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-13511/2018

г. Хабаровск

29 ноября 2018 года

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой 

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1  

рассмотрев в заседании суда дело по иску федерального казенного  предприятия «Аэропорты Дальнего Востока» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>; место нахождения: 

<

...> Ю  Чена, 37)  

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  военно-строительное управление № 7» (ОГРН: 

<

***>; ИНН:  

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>)  

об обязании исполнить обязательства согласно перечню, указанному в  уведомлении от 09.07.2018 № 64/2983 в срок до 01.11.2018  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 21.06.2018 №  38/18 (до перерыва), ФИО3, действующего по доверенности от  13.06.2018 № 34/18 (после перерыва),  

от ответчика – ФИО4, действующего по доверенности от 16.01.2018   № 24 (до перерыва).  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 Р Е Ш И Л  Иск удовлетворить. 

 Обязать федеральное государственное унитарное предприятие «Главное  военно-строительное управление № 7» (ОГРН: 

<

***>; ИНН:  

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>) до 01 декабря 2019 в соответствии с государственным контрактом от  24.08.2015 № 242/15 выполнить следующие работы: искусственная взлетно- посадочная полоса-1 (реконструкция), искусственная взлетно-посадочная  полоса-1 (удлинение), рулежная дорожка-1, рулежная дорожка-2, перрон,  здание контрольно-пропускного пункта, ограждение аэродрома, тепловая  подстанция-1, тепловая подстанция-2, метеообслуживание, патрульная  дорога, гараж, светосигнальное оборудование, станция водоподготовки,  резервуары противопожарного запаса воды, вертикальная планировка и  благоустройство служебно-технической территории, модульно-блочная  котельная 5.22Мвт на угольном топливе со складом угля и золы, склад  горюче-смазочных материалов (ГСМ) емк. 110 куб.м., контрольно- пропускной пункт ГСМ, наружные сети теплоснабжения, технические  средства охраны аэропорта (ТСО), водостоки с локальными очистными  сооружениями, наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения,  наружные сети противопожарного водоснабжения, электрические сети  0,4/0,23 ТСО, электрические сети 0,4/23 от ТП-1 и ТП-2, электрические сети  6 кВ, наружное освещение склада ГСМ, топливозаправочной станции, линии  связи.  

 Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: 

<

***>;  ИНН: 

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>) в пользу федерального казенного предприятия «Аэропорты  Дальнего Востока» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; место  

нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 37) неустойку  в размере 90 528 491 руб. 04 коп., судебные расходы в виде уплаченной  государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

 Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: 

<

***>;  ИНН: 

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 200 000 руб.  

 Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Главное военно-строительное управление № 7» (ОГРН: 

<

***>;  ИНН: 

<

***>; место нахождения: 125212, 

<

...>) в пользу федерального казенного предприятия «Аэропорты  Дальнего Востока» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>; место  нахождения: 

<

...> Ю Чена, 37) неустойку  с 02 декабря 2019, исходя из размера 41 000 руб. за каждый день просрочки  исполнение решения по делу № А73-13511/2018 (в части обязания выполнить  работы) по день его фактического исполнения.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Л.А. Збарацкая