АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-21023/2024

 

г. Нижний Новгород                                                                          30 сентября 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября    2024  года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Левашовой Елены Алексеевны (шифр дела 34-274)

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Приволжские Электрические сети" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу "Россети Центр и Приволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о понуждении заключить договор,

при участии представителей:

 от истца:  ФИО2 (доверенность от 26.07.2023),  

от ответчика: ФИО3  (доверенность от  01.01.2024), 

УСТАНОВИЛ:

Истцом заявлено требование об обязании ответчика заключить договор об осуществлении технологического присоединения с приложениями.

Представитель истца поддержал заявленное требование.

Представитель ответчика  иск  не признал, поддержал доводы отзыва, возражал против предложенной истцом схемы подключения дополнительной электрической нагрузки.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Руководствуясь указанными правилами и учитывая отсутствие возражений сторон, суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Стороны являются смежными сетевыми организациями.

Истец подал заявку на технологическое присоединение от 28.12.2023 на увеличение максимальной мощности ТП-2611, расположенной по адресу: 

<

...> в 30 м от жилых домов №№27,35 (участок 12).

До настоящего времени проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия в адрес истца  не направлены.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте, объем свободной мощности для технологического присоединения на ПС 110/6кВ Кировская составляет 4,75 МВт.

Учитывая наличие свободной мощности на ПС 110/6кВ Кировская, уклонение ответчика от заключения договора необоснованно.

В адрес ответчика направлено письмо №61 от 14.03.2024  с проектом договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия, предусматривающие только обоснованные мероприятия.

Ответ от ответчика не поступил, договор и технические условия не согласованы.

Уклонение ответчика от заключения договора явилось основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации – далее ГК РФ).

Пункт 1 статьи 421 ГК РФ определяет, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Согласно статье 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу пункта 1 статьи 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Пунктом 2 статьи 445 ГК РФ предусмотрена возможность передачи преддоговорного спора на рассмотрение суда в случаях, если спор возник при заключении публичного договора, к числу которых в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" № 35-ФЗ от 26.03.2003 относится договор технологического присоединения.

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 ГК РФ либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда (статья 446 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии установлены Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике).

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям (далее по тексту - Правила N 861).

Пунктом 2 Правил N 861 установлено, что действие настоящих Правил распространяется на случаи:

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств, выведенных из эксплуатации (в том числе в целях консервации на срок более 1 года) в порядке, установленном Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484 "О выводе объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

изменения схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации, в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86 "Об утверждении Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации";

предусмотренные пунктом 41 настоящих Правил.

Разделом V Правил N 861 установлены особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства. В силу абз. 1-2 пункта 41 раздела V Правил № 861 сетевая организация обязана подать заявку на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации в случае, если сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, и (или) объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее объектам электросетевого хозяйства, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей или в акте об осуществлении технологического присоединения данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных обязательными требованиями.

Истец направил заявку в адрес ответчика по основаниям, предусмотренным пунктом 41 Правил N 861.

Абзацем 6 пункта 43 Правил N 861 установлено, что сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в заключении договора. 

В силу пункта 16 Правил N 861 договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей иэксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил);

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Требования  к  содержанию  технических  условий  для  заявителей  -  сетевых организаций, которые подают заявки в соответствии с пунктом 13(1) настоящих Правил установлены пунктом 25(4) Правил N 861, согласно которому - в технических условиях, должны быть указаны:

схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения;

максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;

обоснованные требования к усилению электрической сети смежной сетевой организации, в которую подана заявка (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,     расширение     распределительных     устройств,     модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения).

Согласно статье 173 АПК РФ по спору, возникшему при заключении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении к заключению договора указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

Пунктом 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" установлено, что при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

Нотариусом  города областного значения Нижнего Новгорода ФИО4 проведен осмотр карты свободных мощностей ответчика, а также таблицы с информацией о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения с сайта ответчика (https://mrsk-cp.ru/).

Согласно информации с карты свободных мощностей, зафиксированной в протоколе осмотра письменного доказательства от 28.12.2023 максимальная мощность, разрешенная при технологическом подключении для "открытых" центров питания для ПС 110/6кВ   Кировская составляет 3,62 МВА.

В соответствии с информацией о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения с сайта ответчика, зафиксированной в протоколе осмотра письменного доказательства от 28.12.2023, текущий резерв мощности для технологического присоединения к ПС 110/6кВ  Кировская составляет 3,62 МВА.

Таким образом, документально  подтверждено, что на ПС 110/6кВ Кировская, принадлежащей ответчику, есть свободная мощность для заключения договора с истцом.

Поскольку доказательств невозможности увеличение максимальной мощности ПС 110/6кВ Кировская, ответчиком не представлено, суд приходит к выводу об удовлетворении требования о понуждении заключить договор.

Расходы по уплате государственной пошлины  в порядке ч. 1 ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Понудить ПАО «Россети Центр и Приволжье»» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключить договор об осуществлении технологического присоединения с ООО «ПЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на следующих условиях:

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору «Сетевая организация» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя»(далее – технологическое присоединение): 

-трансформаторной подстанции ТП-2611, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№27, 35 (участок 12),в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

1.1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего: 2681 кВт;

1.1.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств всего: 1981 кВт;

1.1.2.Максимальная присоединяемых энергопринимающих устройств всего: 700 кВт;

1.2. Категория по надежности электроснабжения: -II (вторая);

1.3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 6 кВ.

«Заявитель» обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: «трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№27, 35 (участок 12)».

3. Технологическое присоединение осуществляется:

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»;

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская».

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

Срок действия технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет                   1 (один) год со дня заключения настоящего договора.

При нарушении «Заявителем» обязательств по оплате, в соответствии с п.11 настоящего договора, «Сетевая организация» аннулирует заявку на технологическое присоединение.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.«Сетевая организация» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Сетевую организацию» мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления «Заявителем» «Сетевой организации» о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий «Заявителем»;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня уведомления «Заявителем» о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов «Заявителя» (при необходимости), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии «Заявителя» акт об осуществлении технологического присоединения и направить его «Заявителю».

7. «Сетевая организация» при невыполнении «Заявителем» технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению «Заявителя» продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8.«Заявитель» обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на «Заявителя» мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства «Заявителя», указанные в технических условиях;

организовать уведомление о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка «Заявителя», предусмотренных техническими условиями, уведомить «Сетевую организацию» о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в «Сетевую организацию» до направления «Заявителем» в «Сетевую организацию» уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления «Сетевой организацией» фактического присоединения энергопринимающих устройств «Заявителя» к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта от «Сетевой организации»;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить «Сетевую организацию» о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9.«Заявитель» вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в «Сетевую организацию» с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

10.Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25 ноября 2022 г.                          №49/47, в следующем порядке:

P = С1.1. + С1.2.2., где:

Р – расходы на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (рублей); 

С1.1. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, 

       С1.2.2. - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанным в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

и составляет 13 816,92 (тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2 302,82 (две тысячи триста два) рубля 82 копейки:

 

P = 2 787,51 + 8 726,59 = 11 514,1 рублей (без НДС);

P = 11 514,1 * 1,2 = 13 816,92 рублей (с НДС).

 

11.Оплата по договору производится «Заявителем».

«Заявитель» обязуются надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется «Заявителем» в объеме 100 процентов, в течение тридцати календарных дней с даты заключения настоящего договора, что составляет 13 816,92 (тринадцать тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 20% в сумме 2 302,82 (две тысячи триста два) рубля 82 копейки.

 

12. Датой исполнения обязательства «Заявителя» по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет «Сетевой организации».

 IV. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

13. «Заявитель» несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. «Заявитель» вправе при нарушении «Сетевой организацией» указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение «Заявителем» установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что «Сетевой организацией» в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного «Заявителем» срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию «Сетевой организации» по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,03 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению «Заявителем» не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

         21. Настоящий договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения суда.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

22. Приложение № 1 Технические условия. 

23. Приложение № 2 Заявка на технологическое присоединение энергопринимающего устройства «Заявителя» Н/ЦЦ-НН-9677270-ПТП от 28.12.2023г.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

 

1. Сетевая организация: Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье».

2. Полное наименование «Заявителя»: Общество с ограниченной ответственностью «Приволжские электрические сети».

3. Наименование энергопринимающих устройств «Заявителя»: 

- трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№27, 35 (участок 12).  

4. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств «Заявителя»:

«трансформаторная подстанция ТП-2611, расположенной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Украинская, в 30 м от жилых домов №№27, 35 (участок 12).»  

5. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 700 кВт.

5.1. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 1981 кВт.

5.2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего: 2681 кВт.

6. Категория по надежности электроснабжения: 

- 395,9 кВт - I (первая);

- 2190,8 кВт – II (вторая);

- 94,37 – III (третья).

7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ.

8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств «Заявителя»: 2024 г.

9. Точки присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская» (1340,5 кВт, в послеаварийном режиме 2681 кВт);

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская»(1340,5 кВт, в послеаварийном режиме 2681 кВт).

10. Основной источник питания:

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»;

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская».

11. Резервный источник питания:

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская».

- ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.628 ПС 110/6 «Кировская»;

12.  Обязательства «Сетевой организации» отсутствуют.

13.  Обязательства «Заявителя»:

13.1. Выполнить разработку проектной документации на электроснабжение объекта «Заявителя» в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости, государственную экспертизу проектной документации провести в установленном законодательством порядке. Разработанную проектную документацию на электроснабжение представить в филиал «Нижновэнерго» ПАО «Россети и Приволжье».

13.2 Электроснабжение ТП-2611 с учетом полной заявленной мощности выполнить по существующей схеме от ЛЭП-6 кВ от ячейкиф.628 ПС 110/6 «Кировская», ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.605 ПС 110/6 «Кировская»; 

13.3. Выполнить проверку оборудования ТП-2611 на пропускную способность, с учетом полной заявленной мощности, при необходимости выполнить замену. Тип и маку уточнить при проектировании. 

13.4. Степень компенсации реактивной мощности для обеспечения tg? не более 0,35 и необходимость установки регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности, их количество, параметры и точки установки определить проектом и, при необходимости, реализовать проект.

13.5. Проектом определить и при необходимости выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-13 в точках присоединения к и электрическим сетям во всех нормальных, а также ремонтных/послеаварийных режимах работы прилегающей сети.

13.6. После выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ предъявить присоединенную электроустановку представителю «Сетевой организации» для осмотра.

13.7. Получить от филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» акт о выполнении технических условий. Получить, при необходимости, разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию объектов.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Взыскать с ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ПЭС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по государственной пошлине в размере 6 000 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                        Е.А.Левашова