329/2024-169848(2) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-15475/2023

город Вологда

19 марта 2024 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л :

внести изменения в контракт от 01.06.2023 № 26 на выполнение работ  «Строительство многофункциональной спортивной площадки открытого типа в  с. Рослятино» следующего содержания:  

пункт 3.2 контракта изложить в новой редакции: «Срок выполнения работ:  с 01.11.2023 по 01.07.2024. Срок исполнения контракта: с 04.12.2023 по  04.08.2024».  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в  Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Л.А. Соколова