130/2023-122420(1) 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-19480/2021

г. Хабаровск

26 июня 2023 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Архиповой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного  заседания Л.В. Олейниковой, А.С. Евдокимовой,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению муниципального  казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному  ремонту» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680028,  

<

...>)  

к Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)  

о признании недействительным представления от 13.10.2021 № 22-1475/50-6549 в части,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, общество с ограниченной ответственностью  специализированный застройщик «Градъ Сервис» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес: 680013, 

<

...>),  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования муниципального казенного учреждения  «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту»   удовлетворить.  

Признать недействительным представление Управления Федерального  казначейства по Хабаровскому краю от 13.10.2021 № 22-14-75/50-6549 в  части:  

- принятия муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика  по строительству и капитальному ремонту» в 2020 г. к оплате и оплаты  затрат на возведение временных зданий и сооружений в отсутствии  документов, фиксирующих виды и объемы фактически выполненных работ,  на общую сумму 6 344 209,70 руб., в том числе на сумму 3 003 286,41 руб. за  счет средств, источником которых является субсидия из федерального  бюджета;  

- принятия муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика  по строительству и капитальному ремонту» в 2020 г. к оплате и оплаты актов  приемки-передачи, товарных накладных, содержащих фактически  невыполненные объемы работ, непоставленные товары, на общую сумму  3 635 720,22 руб., в том числе на сумму 381 135,77 руб. за счет средств,  источником которых является субсидия из федерального бюджета.  

Обеспечительные меры, принятые определением суда от 10.12.2021, в  виде приостановления действия пункта 2 представления Управления  Федерального казначейства по Хабаровскому краю от 13.10.2021 № 22-1475/50-6549 отменить.  

Взыскать с Управления Федерального казначейства по Хабаровскому  краю (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения «Служба заказчика по строительству и капитальному  ремонту» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы в виде  уплаченной государственной пошлины в размере 3 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья К.А. Архипова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.11.2022 20:47:00

Кому выдана Архипова Кристина Александровна