АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А78-2097/2022

г.Чита

24 мая 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена  08 мая 2024 года

Решение изготовлено в полном объёме 24 мая 2024 года

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Я.А. Понуровского

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.С. Романовой

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

к Федеральному казенному учреждению «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

о взыскании задолженности по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.05.2021 № 20.7500.311.21 в сумме 29513,73 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 5 879,71 руб. за период с 21.01.2022 г. по 27.12.2023;

по встречному исковому заявлению Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ОГРН  

<

***>, ИНН  

<

***>)

об обязании исполнить обязательства по договору № 20.7500.311.21 об осуществлении технологического в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу; о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, начиная с 18.11.2021 до фактического осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 представителя по доверенности от 19.04.2022;

от ответчика – представитель не явился.

 

            Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с вышеуказанным исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к Федеральному казенному учреждению «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (далее - ответчик).

            Определением от 11.03.2022 исковое заявление принято к производству.

            04.10.2022 от Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» поступило встречное исковое заявление об обязании публичного акционерного общества «Россети Сибирь» исполнить обязательства по договору № 20.7500.311.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» - стационарное электрическое освещение на км 348+000- км 348+300 автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита-Забайкальск-граница с Китайской Народной Республикой в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, о взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору № 20.7500.311.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 0,25 процентов от общего размера платы по договору за каждый день просрочки, начиная с 18.11.2021 до фактического осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям; о взыскании расходов по оплате государственной пошлины. 

            Определением от 11.10.2022 встречное исковое заявление принято к производству суда. 

            Определением от 28.03.2023 производство по делу № А78-2097/2022 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № А78-1582/2022.

            В материалы дела № А78-2097/2022 и А78-1582/2022 со стороны Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» в обоснование своей позиции представлены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, подписанные сторонами, при этом содержание пункта 3 Договоров отличаются от содержания пункта 3 Договоров, представленных публичным акционерным обществом «Россети Сибирь».

            По делу № А78-1582/2022 публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы для установления соответствия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, представленного ответчиком в суд, договору, представленному истцом ответчику.

            24.03.2023 по делу № А78-1582/2022 назначена судебная экспертиза.

            Как следует из мотивировочной части решения по делу № А78-1582/2022 в соответствии с заключением эксперта № 1-128/23 первый и четвертый листы договора «Условия типового договора № 20.7500.421.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.04.2021» выполнены не одномоментно на одном печатающем устройстве, а выполнены на разных печатающих устройствах, либо на одном печатающем устройстве, но в разное время. 

            В договоре «Условия типового договора №20.7500.421.21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 15.04.2021» проведена замена первого листа договора.

            Протокольным определением от 11.03.2024 производство по настоящему делу было возобновлено. 

            В судебном заседании представитель истца уточнённые исковые требования поддержала в полном объеме, встречные исковые требования не признала.

            Представитель ответчика явку в судебное заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом. 

            Дело рассмотрено в соответствии с часть 3 статьи 156 АПК РФ. 

            28.02.2024 от истца поступило заявление, в котором отказывается от исковых требований в части взыскания основного долга по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.311.21 от 17.05.2021 в размере 29 513 руб. 73 коп.

Рассмотрев заявление истца в части отказа от исковых требований в части суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

В силу части 3 статьи 151 АПК РФ в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

            Таким образом, требования по первоначальному исковому заявлению о взыскании 29 513 руб. 73 коп. основного долга подлежит прекращению. 

По существу судом рассматриваются требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, обязании исполнить договор и взыскания неустойки.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд установил следующее.

            ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» обратилось в ПАО «Россети Сибирь» посредством электронного сервиса «личный кабинет» официального сайта Истца с заявкой на заключение договора на технологическое присоединение для электроснабжения линии наружного освещения автомобильной дороги общего пользования федерального значения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км 270+280-км 379+515 (т. 1 л.д. 15).

В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861), для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8 (1) настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 103 Правил № 861 договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета.

В соответствии с пунктом 105 Правил № 861 в отношении заявителей, указанных в пунктах в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя): условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами для соответствующей категории заявителей, счет, предусмотренный пунктом 103 настоящих Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 25 (1) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации, и проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица гарантирующего поставщика, указанного в заявке в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил (в случае, если заявитель указал гарантирующего поставщика в качестве субъекта, 3 у которого он намеревается приобретать электрическую энергию); инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

Размещенные в личном кабинете заявителя условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия признаются офертой, а оплата заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору - акцептом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий. В случае несогласия с размещенными сетевой организацией в личном кабинете заявителя документами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и (или) несоответствия их настоящим Правилам заявитель вправе в течение 5 рабочих дней со дня размещения сетевой организацией таких документов направить сетевой организации мотивированный отказ от заключения договора с предложением об изменении размещенных документов и требованием о приведении их в соответствие с настоящими Правилами. Размещение сетевой организацией указанных документов, приведенных в соответствие с настоящими Правилами, осуществляется с использованием личного кабинета заявителя в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

Заявители, указанные в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, после завершения процедуры технологического присоединения вправе обратиться к сетевой организации с требованием о предоставлении документов, которые были размещены сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в личном кабинете потребителя, на бумажном носителе, а сетевая организация (гарантирующий поставщик) в течение 30 календарных дней со дня обращения потребителя обязана направить такие документы, подписанные со стороны сетевой организации, на бумажном носителе заявителю.

Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.311.21 размещены сетевой организацией в личном кабинете потребителя, выставлен счет на оплату № 1600000714 от 19.02.2021 (т. 1 л.д. 23).

Счет оплачен ответчиком платежным поручением № 662020 от 17.05.2021 на сумму 3279,30 руб. (т. 1 л.д. 24).

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения определены пунктом 16 Правил № 861. Пунктом 15, подпунктом "а" пункта 16 Правил технологического присоединения установлено, что технические условия к договору об осуществлении технологического присоединения являются неотъемлемым приложением к договору.

Согласно пункту 1 статьи 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

В платежном поручении № 662020 от 17.05.2021 содержится указание о том, что платеж вносится по договору № 20.7500.311.21.

Согласно отметке банка, указанное платежное поручение исполнено 17.05.2021.

Таким образом, договор следует считать заключенным с момента внесения заявителем платы за осуществление технологического присоединения – с 17.05.2021.

В соответствии с пунктом 1 условий договора, размещенных сетевой организацией в личном кабинете потребителя, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства  (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств , урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.

Технологическое присоединение необходимо  для электроснабжения линии наружного освещения  автомобильной дороги общего пользования федерального назначения, расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Забайкальский край, Чита-Забайкальск а.д., км. 270+280 – км 379-515 (пункт 3 договора).

Срок выполнения  мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора).

Согласно пункту 7 договора сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию  мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств  заявителя, указанных в технических условиях;

- обеспечить установку и допуск в эксплуатацию прибора учета  электрический энергии и мощности;

- разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию;

- в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;

- составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных  в соответствии с техническими  условиями и акт осуществления технологического присоединения;

- уведомить заявителя о составлении и размещении  в личном кабинете заявителя акта о выполнении  технический условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с актом № 7800655034 от 10.01.2022 осуществлено технологическое присоединение

Согласно пункту 11 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 32793,03 руб.

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 3279,30 руб. вносятся в течение 5 рабочий дней со дня выставления счета Сетевой организацией;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 9837,91 руб. вносятся в течение 60 календарных дней со дня заключения договора;

- 20 % платы за технологическое присоединение в размере 6558,61 руб. вносятся в течение 180 календарных дней со дня заключения договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение в размере 9837,91 руб. вносятся в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение в размере 3279,30 руб. вносятся в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Платежным поручением № 662020 от 17.05.2021 ответчиком произведена частичная оплата услуг по договору № 20.7500.311.21 в сумме 3279,30 руб.

В полном объеме задолженность по договору оплачена ответчиком платежным поручением № 1418 от 26.12.2023 (списано со счета 27.12.2023) в сумме 29513,73 руб.

В связи с несвоевременной оплатой, истцом начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.01.2022 по 27.12.2023 в размере 5879,71 руб.

Ответчик, указывая на отсутствие технологического присоединения, обратился с требованием об обязании исполнить договор, а также взыскания неустойки начиная с  18.11.2021 по день фактического исполнения обязательств.

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вредя и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

Как следует из материалов дела, истец, как сетевая организация, оказывает услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергопринимающих установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Обязательство по совершению технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии возникает у сетевой организации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по договору об осуществлении технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимися к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В силу абзаца 2 пункта 4 и абзаца 5 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение является оказанием услуги.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила № 861).

Пункт 3 Правил № 861 обязывает сетевую организацию выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, а пункт 6 Правил устанавливает обязательность заключения для сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения.

В пункте 7 Правил № 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Согласно пункту 110 Правил № 861 по результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, - сетевой организацией и таким заявителем) сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотренной приложением № 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.

Заявитель в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения вправе представить сетевой организации замечания к составленным актам.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг, к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.01.2018 № 310-ЭС17-11570).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В договоре сторонами согласован график уплаты платежей за технологическое присоединение.

Истец исполнил свои обязательства, осуществив технологическое присоединение электросетей к электроустановкам ответчика, что подтверждается актом от 10.01.2022 № 7800655034, который размещен в личном кабинете 10.01.2022, заявителю также 10.01.2022 направлено уведомление.

Истец за несвоевременное ответчиком внесение платы за технологическое присоединение начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.01.2022 по 27.12.2023 в размере 5879,71 рублей.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчёт процентов судом не принимается по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон № 127-ФЗ) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

            Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона № 127-ФЗ на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

            Введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами как инструмент государственного регулирования экономики антикризисной направленности имеет цель минимизировать последствия санкционного режима в 2022 году, обеспечить стабильность экономики государства путем оказания поддержки хозяйствующим субъектам.

            Разъяснения, касающиеся цели и направленности моратория, вводимого в определенных случаях, даны в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

            В силу пункта 7 указанного Постановления в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

            Мораторием предусмотрен запрет на начисление неустоек, иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.

            С учетом указанных разъяснений, по расчет суда проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21.01.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 27.12.2023 составляют 4225,32 руб. 

            Таким образом, требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами подлежат удовлетворению в размере 4225,32 руб.

Суд, рассмотрев встречное исковое заявление, изучив представленные документы и оценив доказательства в совокупности, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Статья 310 ГК РФ не допускает одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Ответчик указывает на невыполнение истцом обязательств по осуществлению технологического присоединения в соответствии с условиями договора.

Вместе с тем, в материалы дела истцом представлен акт от 10.01.2022 № 7800655034, а также фото-материалы, подтверждающие фактическое исполнение им обязательств.

Согласно статьям 407 и 408 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Фактическое исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.311.21 от 17.05.2021 подтверждается со стороны истца актом от 10.01.2022 № 7800655034, со стороны ответчика платёжным поручением № 1418 от 26.12.2023.

Документов подтверждающих осуществление истцом технологического присоединение в иные сроки в материалы дела не представлено, в связи, с чем суд считает требование об обязании истца исполнить договор об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.311.21 от 17.05.2021 не подлежащим удовлетворению.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ).

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По правилам статьи 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии с абзацем 15 пункта 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора.

Договор сторонами заключен 17.05.2021.

Следовательно, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 17.11.2021.

В соответствии с пунктом 20 сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

При рассмотрении первоначального искового заявления судом установлено, что ПАО «Россети Сибирь» обязательства по осуществлению технологического присоединения выполнены, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от 10.01.2022 № 7800655034.

Таким образом, технологическое присоединение осуществлено истцом с просрочкой за период с 18.11.2021 по 10.01.2022, что составляет 4427,06 руб. неустойки.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Истец по первоначальному исковому заявлению при обращении в суд оплатил государственную пошлину в размере 2000 руб. по платежному поручению от 30.08.2021 № 18033.

Исходя из цены иска с учетом ее уточнения уплате подлежала государственная пошлина в  размере 2000 руб.

Согласно положениям статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном удовлетворении ответчиком (административным ответчиком) требований истца (административного истца) после обращения указанных истцов в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления (административного искового заявления) к производству.

Первоначальное исковое заявление принято к производству  определеним от 11.03.2022, задолженность оплачена овтетчиком 27.12.2023, таким образом, расходы оп оплате госудларсвтенной пошлины, в связи с частичным удовлетвоением первоначального иска, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 1907 руб.

При обращении в суд со встречным исковым заявлением истец оплатил государственную пошлину в сумме 6000 руб. по платежным поручениям от 14.06.2022 № 276761, № 276762.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по неимущественному требованию составляет 6000 рублей, по имущественному – 2000 руб.

В пункте 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

Таким образом, в связи с частичным удвелтвоением требований по встречному исковому заявлению, 6000 руб. государственной пошлины относятся на ответчика, 2000 руб. подлежат взысканию с истца в доход федерального бюджета. 

Согласно абзацу 2 части 5 статьи 170 АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного искового заявления в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Производство по делу в части взыскания основного долга по договору об осуществлении технологического присоединения № 20.7500.311.21 от 17.05.2021 в размере 29 513 руб. 73 коп. прекратить.

Взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4225 руб. 32 коп. процентов, 1907 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 4427 руб. 06 коп. неустойки.

В остальной части встречного иска отказать.

Путем произведенного взаимозачета взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1705 руб. 26 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины по встречному исковому заявлению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                               Я.А. Понуровский