АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-35732/2023

г. Уфа

03 апреля 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зайнуллиной  А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Аида"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании в течение 30 дней со дня  вступления решения по настоящему делу в законную силу устранить строительные  недостатки и взыскании суммы штрафа по контракту № 0801500001122000144 от  28.03.2022г. в размере 280 917 руб. 46 коп., суммы штрафа по контракту   № 0801500001122000164 от 28.03.2022г. в размере 236 715 руб. 67 коп (с учётом уточнений  исковых требований)  

третье лицо Министерство финансов Республики Башкортостан (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Аида" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления в законную силу  решения суда по настоящему делу устранить недостатки по контрактам   № 0801500001122000144 от 28.03.2022г. и № 0801500001122000164 от 28.03.2022г. в домах  по адресам Республика Башкортостан, 

<

...> Республика Башкортостан, 

<

...>, а именно произвести:  

- Монтаж москитных сеток на окнах; - Монтаж водостока на кровле; 

- Устройство армированной бетонной отмостки вокруг дома шириной не менее 1  метра;  

- Монтаж натяжных потолков; 

- предоставить паспорт на установленные в указанных домах двери.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аида" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации муниципального района  Нуримановский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) сумму штрафа по контракту № 0801500001122000144 от 28.03.2022г. в  размере 280 917 руб. 46 коп., сумму штрафа по контракту № 0801500001122000164 от  28.03.2022г. в размере 236 715 руб. 67 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аида" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета сумму государственной  пошлины в размере 19 353 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме)  через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П. Кузнецов