АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

13.07.2021Дело № А62-4142/2021

Резолютивная часть решения оглашена 06.07.2021

Мотивированный текст решения изготовлен 13.07.2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «Железнодорожная торговая компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании 112422,25 рубля, неустойки за период с 05.11.2020 по 21.04.2021 в сумме 75547,75 рубля, штрафа в размере 4496,89 рубля, 

при участии:

от истца: ФИО2, представитель (доверенность, копия диплома); 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом

У С Т А Н О В И Л :

акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» (далее по тексту – АО «ЖТК», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер»  (далее по тексту – ООО «Партнер», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 30.09.2020 № 7785 в размере 112422,25 рубля, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 05.11.2020 по 21.04.2021 в сумме 75547,75 рубля, штрафа в размере 4496,89 рубля.

Как следует из материалов дела, 30 сентября 2020 года между акционерным обществом «Железнодорожная торговая компания» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Партнер» (подрядчик) заключен договор № 7785 на выполнение работ по текущему ремонту объекта (далее по тексту – договор).

Согласно пункту 1.2 договора содержание работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

Сроки выполнения работ, определяются в Календарном плане (Приложение № 2 к договору).

В соответствии с пунктом 2.1 договора общая цена договора составляет 449 689 рублей.

Смета на выполнение работ является приложением № 3 к договору (пункт 2.2 договора).

Согласно пункту 2.4.1 договора заказчик выплачивает подрядчику на основании счета подрядчика аванс в размере 25% от цены договора в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора и получения от подрядчика счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 договора.

Кроме того, подрядчик предоставляет заказчику счет-фактуру на авансовый платеж не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения подрядчиком на расчетный счет суммы авансового платежа.

В соответствии с пунктом 2.4.2 договора оплата выполненных подрядчиком работ осуществляется единовременно с учетом выплаченного аванса на основании полного комплекта документов (подписанный обеими сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ, счет подрядчика, счет-фактура в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки и получения заказчиком от подрядчика счета, счета-фактуры, путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в разделе 15 договора.

Разделом 3 договора стороны установили порядок сдачи и приемки работ, в соответствии с пунктом 3.1 которого по завершении выполнения работ, но не позднее 5 (пяти) календарных дней подрядчик представляет заказчику результаты выполненных работ, оформленные в соответствии с Техническим заданием, подписанный со своей стороны акт-приемки в двух экземплярах.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от подрядчика акта сдачи-приемки направляет подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков (пункт 3.2 договора).

Согласно пункту 3.3 договора в случае мотивированного отказа заказчика от приемки работ он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет подрядчика с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены договора, указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть договор с применением последствий, указанных в пункте 12.5 договора. Невыполнение требования заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения договора и применения последствий, указанных в пункте 12.5 договора.

В соответствии с пунктом 3.4 договора при обнаружении заказчиком недостатков в результатах работ после их приемки заказчиком независимо от прекращения действия договора, стороны руководствуются пунктом 3.3 договора, включая право заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

Согласно пункту 9.3 договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 договора подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления заказчиком требования.

В случае ненадлежащего выполнения подрядчиком условий настоящего договора, несоответствия (результатов) работ обусловленным сторонами требованиям подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего договора (пункт 9.4 договора).

Согласно пункту 11.3 договора в случае, если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Смоленской области.

В соответствии с пунктом 12.3 договора, расторжение настоящего договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего договора) осуществляется путем направления одной стороной письменного уведомления об этом другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия договора. Настоящий договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора.

Согласно пункту 12.5 договора в случае расторжения договора (отказа от исполнения договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением подрядчиком условий договора, несоответствием результатов работ требованиям договора, подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по договору денежные средства и возместить убытки заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления заказчиком соответствующего требования.

Пунктом 13.1 договора стороны установили, что договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2020 года, а в части оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Истец перечислил ответчику авансовый платеж в размере, предусмотренном пунктом 2.4.1 договора – 112422,25 рубля (платежное поручение № 8334 от 26.10.2020).

 24.12.2020 ответчиком по завершении выполнения работ составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (449689 рублей), акт о приемке выполненных работ и счет на сумму 337266,75 рубля, однако со стороны истца, указанные документы подписаны не были, по причине наличия недостатков, возникших при выполнении работ.

ООО «Партнер» гарантийным письмом от 24.12.2020 (л.д. 23) уведомил АО «ЖТК», что устранит недостатки, возникшие при выполнении работ до 01.05.2021, ввиду зимнего периода времени и погодных условий.

Комиссия в составе представителей истца и ответчика 31.03.2021 произвела осмотр здания универмага, расположенного по адресу: 

<

...> на предмет выполненных работ по ремонту кровли по договору № 7785 от 30.09.2020, о чем составлен акт обследования объекта (л.д. 47) подписанный директором ООО «Партнер» без разногласий.

В ходе осмотра установлено, что ремонт кровли производился с техническими нарушениями, при погодных условиях, не позволяющих качественно выполнить работы, также работы выполнены не в соответствии с локальным сметным расчетом. Для устранения данных недостатков необходимо полностью заменить покрытие кровли.

08.04.2021 истцом в адрес ответчика направлена претензия, в которой сообщалось о расторжении договора, датой расторжения считать – дату получения настоящей претензии, а также о перечислении в течение 10 (десяти) календарных дней задолженности в общей сумме 186171,25 рубля, из которых: 112422,25 рубля – авансовый платеж, 4496,89 рубля – штраф, 69252,11 рубля – пени за период с 05.11.2020 по 07.04.2021.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 21400060706455 (претензия), письмо возвращено отправителю 01.07.2021 в связи с истечением срока хранения.

Ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя по договору обязательств и неудовлетворение требований, содержащихся в претензии, явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчик  отзыв (возражения) на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте такого заседания уведомлен надлежащим образом.

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяют суду считать ответчика извещенным о рассмотрении дела надлежащим образом и, руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть  дело в его отсутствие.

Представитель истца в судебном заседании поддержал предъявленные исковые требования в полном объеме.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, заслушав доводы представителя истца, суд приходит к следующему.

Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации указывает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Договор между истцом и ответчиком является договором строительного подряда, в связи с чем, он регулируется § 1 и § 3 Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с положениями договора и Приложением № 2 к нему дата начала работ установлена – не позднее чем через 3 дня после подписания договора (30.09.2020), а датой окончания – 1 (один) месяц со дня начала работ. Таким образом, датой окончания работ является – 04.11.2020.

Поскольку ответчиком выполнены работы по договору с существенными недостатками, устранение которых невозможно без демонтажа установленной им кровли, что делает недостатки существенными,  у истца на основании пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 12.5 договора возникло право на односторонний отказ от договора.

Поскольку ответчиком направленная истцом претензия от 08.04.2021 получена не была (письмо возвращено отправителю 01.07.2021 в связи с истечением срока хранения), датой расторжения договора считается 08.05.2021 (пункт 12.3 договора).

Согласно пункту 2 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Аванс представляет собой предварительную выплату части денежной суммы в счет предстоящих выполненных работ. В связи с ненадлежащим выполнением работ по договору, за которые был оплачен аванс, а также расторжением договора ответчик обязан вернуть аванс истцу (пункт 12.5 договора).

Поскольку ответчик факт получения суммы аванса не оспорил, доказательства исполнения обязательства, в том числе устранения недостатков, а также возврата истцу спорной суммы денежных средств не представил, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в указанной части.

Нормы статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают право сторон начисления неустойки (штрафа, пеней), которой признается определенная законом или договором денежная сумма, и которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 9.3 договора предусмотрено, что в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ предусмотренных Календарным планом, сроков выполнения требования заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 договора подрядчик уплачивает заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего договора за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления заказчиком требования.

Истцом начислена неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с 05.11.2020 по 21.04.2021 в размере 75 547,75 рубля.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда РФ, изложенной в пунктах 69,71 постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» в том случае, когда должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

От ответчика  ходатайства о снижении неустойки не поступало.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным, неустойка начислена до даты расторжения договора. Арифметическая правильность расчета ответчиком не оспаривается.

В случае ненадлежащего выполнения подрядчиком условий настоящего договора, несоответствия (результатов) работ обусловленным сторонами требованиям подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего договора (пункт 9.4 договора).

Размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика, за нарушение срока выполнения работ составляет  4496,89 рубля.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер»  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Железнодорожная торговая компания» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) задолженность по договору подряда от 30.09.2020 № 7785 в размере 112 422,25 рубля, неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 05.11.2020 по 21.04.2021 в размере 75 547,75 рубля, штраф в размере 4 496,89 рубля, судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины в размере 6 774 рубля. 

В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                 В.А. Печорина