СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 город Томск Дело № А03-13345/2022 Резолютивная часть постановления объявлена 29 августа 2023 года Постановление в полном объеме изготовлено 05 сентября 2023 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Чикашовой О.Н., судей Аюшева Д.Н., Ходыревой Л.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 (до перерыва), помощником судьи Атрощенко Д.А. (после перерыва), рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу (№ 07АП-6134/2023) общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» на решение от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 (судья Ли Э.Г.) по иску общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (194044, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, Большой Сампсониевский пр-кт, д. 60, литера а, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (656056, Россия, Алтайский край, город Барнаул г.о., Барнаул г., Барнаул г., Ленина пр-кт, д. 2а, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об урегулировании разногласий при заключении договора при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность от 18.07.2022) (участие путем присоединения к веб-конференции) (до перерыва), от ответчика – ФИО3 (паспорт, доверенность № 5 от 09.01.2023) (участие путем присоединения к веб-конференции) (до перерыва) У С Т А Н О В И Л: общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (далее - истец, ООО «Газпром газификация») обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ИФК «Русьэнерго» (далее - ответчик, ООО «ИФК «Русьэнерго») об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора купли-продажи будущей вещи от 13.07.2022 № 26/ДКП-05-182/2022. Исковое заявление мотивировано статьями 426, 445 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и обосновано несогласием с условиями договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Решением от 14.06.2023 Арбитражного суда Алтайского края в удовлетворении исковых требований отказано. Не согласившись с судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд, отказывая во включении в договор банковской гарантии, не оценил соразмерность меры обеспечения обязательства с защищаемым интересом; суд неверно осуществил распределение судебных расходов на оплату государственной пошлины, поскольку требования истца были удовлетворены частично, путем определения иной, отличной от предлагаемой сторонами редакции условия. В дополнениях к апелляционной жалобе истец указал, что суд первой инстанции вышел за пределы предмета спора, определив редакцию приложений к договору, спор по содержанию которых у сторон отсутствовал. В отзыве ответчик отметил, что между ООО «Газпром газификация» и ООО «ИФК «Русьэнерго» заключен договор купли-продажи будущей вещи с оплатой по этапам, результатом которого является недвижимое имущество. Фактически такой договор уже имеет обеспечение в виде не оплаченной части, а также в виде результата такого договора – недвижимое имущество. В возражениях на отзыв истец указал, что принцип свободы договора не применим в спорном случае; отсутствие количества передаваемых объектов, цены этих объектов опосредует исключение существенных условий в спорном договоре. В судебном заседании представители сторон поддержали доводы апелляционной жалобы и отзыва, соответственно. В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебном заседании объявлялся перерыв до 11 час. 35 мин. 29.08.2023. После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон. Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней, отзыва, письменных возражений, заслушав представителей сторон, проверив в порядке статьи 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд исходит из следующего. Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.12.2021 № 3603-р ООО «Газпром газификация» определено единым оператором газификации (далее - ЕОГ). ООО «ИФК «Русьэнерго» письмом от 27.01.2022 исх. № 67 направило в адрес ООО «Газпром газификация» договор купли-продажи будущей вещи № 26/ДКП-05-182/2022 от 13.07.2022 (далее - договор) с целью финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. Письмом от 15.07.2022 исх. № A3-08-09-04/8763 истцом в адрес ответчика направлен подписанный договор с протоколом разногласий от 13.07.2022 (далее - протокол разногласий). 27.07.2022 ответчиком направлен в адрес истца протокол урегулирования разногласий от 19.07.2022 года (далее - протокол урегулирования разногласий). Стороны при заключении договора не смогли урегулировать возникшие разногласия. Истец обратился с заявлением в арбитражный суд о внесении в договор следующих изменений: 1. предусмотреть способ обеспечения исполнения обязательств ответчика в виде банковской гарантии и изменить момент предоставления финансирования в виде предварительной оплаты (аванса) (пункты 2.4., 3.1.11., раздел 5 протокола разногласий); 2. установить договорную подсудность рассмотрения дел при возникновении разногласий между сторонами (пункт 9.4. протокола разногласий); 3. добавить к договору приложение, содержащее примерную форму банковской гарантии (пункт 10.1. ПР); 4. внести изменения в договор в связи с изменением порядка приложений и наличием технических опечаток; 5. установить нумерацию статей договора в соответствии с нумерацией статей протокола разногласий. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что такой вид обеспечения исполнения обязательства, как предоставление банковской гарантии, не может быть включен в условиях заключаемого между сторонами договора; правоотношения сторон не относятся к исключительной подсудности, в связи с чем стороны могли установить подсудность, предложенную ответчиком в договоре. Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, находит основания для изменения судебного акта, при этом исходит из следующего. В соответствии со статьей 412 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). В соответствии с пунктом 1 статьи 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса (заключение договора в обязательном порядке) либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. Как разъяснено в пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее - Постановление № 49), на рассмотрение суда могут быть переданы разногласия, возникшие в ходе заключения договора, при наличии обязанности заключить договор или соглашения сторон о передаче разногласий на рассмотрение суда. Такой спор подлежит рассмотрению в том же порядке, что и спор о понуждении к заключению договора (пункт 1 статьи 446 ГК РФ). Поэтому, когда заинтересованная сторона передала разногласия на рассмотрение суда, а другая сторона не возразила против этого, а также в случаях, когда для одной из сторон спора его заключение является обязательным, суд в целях достижения задач судопроизводства в арбитражных судах, установленных статьей 2 АПК РФ, защиты обратившегося лица, внесения определенности в правоотношения сторон и установления условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке, рассматривает такое исковое заявление по существу. Задача суда при разрешении преддоговорного спора заключается в создании между сторонами договорной связи, когда часть условий, о редакции которых стороны не могут договориться путем свободного согласования своих автономных воль, определяется властью суда на основании судебного понимания должного баланса интересов сторон через призму императивных и диспозитивных норм права, регулирующих спорные отношения. Разрешение судом спора сторон при возникновении разногласий по конкретным условиям договора имеет своей целью внесение определенности в правоотношения сторон и установление условий договора в соответствии с требованиями действующего законодательства (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012 № 11657/11). В силу пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее - Постановление № 16) в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом или иными правовыми актами (императивным нормам), действующими в момент его заключения (статьи 422 ГК РФ). В соответствии с правовыми позициями, изложенными в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2015 № 305-ЭС15-513, от 21.12.2015 № 305-ЭС15-11564, от 03.10.2016 № 308-ЭС16-7310, от 26.12.2016 № 308-ЭС16-7314, при отсутствии соглашения сторон по содержанию условия договора и наличии диспозитивной нормы, регулирующей спорное отношение, таковое условие должно определяться судом в соответствии с общим правилом диспозитивной нормы, содержащим наиболее оптимальный баланс интересов сторон договора. В пункте 40 Постановления № 49 разъяснено, что при наличии возражений стороны относительно определения условия договора диспозитивной нормой, выразившихся, например, в представлении иной редакции условия, суд может утвердить условие в редакции, отличной от диспозитивной нормы, указав мотивы принятия такого решения, в частности особые обстоятельства рассматриваемого спора (абзац второй пункта 4 статьи 421 ГК РФ). Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее - Правила № 1550) определен порядок взаимодействия ЕОГ и ГРО при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Так, согласно пунктам 10 и 11 Правил № 1550 финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, реализуемых ГРО, осуществляется ЕОГ или региональным оператором газификации путем заключения следующих видов договоров по выбору ГРО: договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 1 к названным Правилам; инвестиционного договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации по форме согласно приложению № 2 к Правилам; иного гражданско-правового договора по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. ООО «ИФК «Русьэнерго» направило в адрес ООО «Газпром газификация» договор купли-продажи будущей вещи с целью финансирования мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации. ЕОГ или региональный оператор газификации направляет подписанный со своей стороны договор в адрес газораспределительной организации не позднее 10 дней с даты получения договора. При несогласии с условиями договора ЕОГ или региональный оператор газификации направляет в адрес ГРО протокол разногласий. ГРО направляет подписанный ею протокол разногласий ЕОГ или региональному оператору газификации не позднее 5 рабочих дней со дня получения протокола разногласий. В случае несогласия ГРО с протоколом разногласий ГРО, или ЕОГ, или региональный оператор газификации вправе обратиться в суд для урегулирования разногласий. При этом до принятия решения суда договор считается заключенным на условиях, выбранных ГРО. В силу пункта 23 Правил № 1550 ЕОГ или региональный оператор газификации, профинансировавший по договору мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, на условиях и в порядке, установленных гражданским законодательством, по согласованию с соответствующей ГРО вправе получить от ГРО: в собственность имущество, в том числе созданное с использованием финансовых средств единого оператора газификации или регионального оператора газификации; в собственность ценные бумаги, акции, паи, доли в уставном капитале ГРО; предоставленные финансовые средства в денежной форме, в том числе получив от газораспределительной организации средства от применения ею специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Указанные положения содержат диспозитивный перечень механизмов, обеспечивающих возмещение имущественной сферы ЕОГ, предоставившего финансирование, наряду с вытекающим из существа рассматриваемого способа механизмом возврата предоставленного финансирования. Главой 23 ГК РФ установлены порядок и способы обеспечения исполнения обязательств, одним из которых является банковская гарантия. Выдача банковской гарантии является абстрактной сделкой, не зависящей от основания (каузы), для которой не характерно присущее абсолютному большинству способов обеспечения обязательств свойство, именуемое акцессорностью объема. Это значит, что кредитор в обеспечительном правоотношении (бенефициар) может истребовать исполнение у гаранта в объеме большем, чем мог бы получить от должника в основном (магистральном) правоотношении. При этом гарант не вправе выдвигать против бенефициара возражения относительно состоявшегося частичного или полного исполнения обязательства принципалом. Сказанное следует из смысла норм, содержащихся в пункте 1 статьи 368, пункте 1 статьи 370 ГК РФ. Применение подобного обеспечения также возлагает на должника необходимость несения дополнительных расходов, связанных с получением банковской гарантии. Предоставление банковской гарантии не предусмотрено положениями Правил № 1550, в связи с чем согласование такого условия сторонами настоящего спора подчинено общим правилам гражданского законодательства о заключении договора (статьи 1, 421, 422 ГК РФ). Исследовав и оценив представленные в материалы судебного дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи, исходя из специфики сложившихся между сторонами правоотношений, обусловленных реализацией государственной программы догазификации с целью подключения к газоснабжению домовладений физических лиц, проверив представленные сторонами редакции спорных условий, учтя, что способы обеспечения исполнения обязательств в рамках догазификации, ограничены положениями Правил № 1550, приняв во внимание особенности спорного правоотношения, суд первой обосновано не усмотрел оснований для включения в договор условий о способе обеспечения исполнения обязательств ответчика в виде банковской гарантии. Истец, не ссылаясь на наличие определенного стандарта поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, вступающего в спорные правоотношения, императивное закрепление спорного условия, по сути, просит о включении в договор условия об обеспечении исполнения договора ответчиком путем предоставления банковской гарантии, не учитывая его волеизъявление об обеспечении баланса интересов, в том числе иными способами: контролем за использованием предоставленных ЕОГ денежных средств с применением специального счета для целей расчетов по договору, а также предложения о передаче в собственность имущества, созданного с использованием финансовых средств ЕОГ. Указанный правовой подход согласуется с выводами суда округа, изложенными в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.05.2023 по делу № А45-19695/2022. Доводы заявителя в указанной части отклоняются как основанные на ошибочном понимании норм материального права, не учитывающем специфику сложившихся между сторонами правоотношений. Относительно требования истца об установлении договорной подсудности рассмотрения дел при возникновении разногласий между сторонами. Право на судебную защиту относится к основным, неотчуждаемым правам и свободам человека, в Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью правовой системы Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 4 статьи 15 и части 1 и 2 статьи 17 Конституции РФ). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16.03.1998 № 9-П, право каждого на судебную защиту посредством независимого и беспристрастного суда, компетенция которого установлена законом, означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным составом суда. Соответственно, часть 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Согласно положениям главы 4 АПК РФ подсудность дел арбитражным судам подразделяется на родовую (статья 34 АПК РФ), территориальную общую (статья 35 АПК РФ), альтернативную (статья 36 АПК РФ), договорную (статья 37 АПК РФ) и исключительную (статья 38 АПК РФ). По общему правилу, установленному статьей 35 АПК РФ, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Согласно статье 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35, 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству. Помимо альтернативной подсудности, то есть подачи искового заявления в арбитражный суд по выбору истца, для определенной категории дел статьей 38 АПК РФ установлена исключительная подсудность рассмотрения споров, при которой исключается возможность применять иные правила подсудности, чем те, которые установлены указанной статьей. Рассматриваемые правоотношения сторон не относятся к исключительной подсудности, в связи с чем на основании вышеуказанных норм арбитражного процессуального законодательства стороны могли установить подсудность, предложенную ответчиком в договоре. Учитывая указанные законоположения, суд первой инстанции верно указал, что, определяя договорную подсудность, истец фактически ограничивает право стороны на выбор суда при обращении с иском, в частности, иск по общему правилу может быть предъявлен в суд и по месту нахождения ответчика, что опосредовало обоснованное изменение формулировки пункта 8.4 спорного договора. Довод истца о неверном распределении расходов по государственной пошлине подлежит отклонению. В данном случае государственная пошлина правомерно была отнесена судом на истца по правилам статьи 110 АПК РФ, поскольку истец просил суд первой инстанции изложить пункт 8.4 договора в редакции изначально предложенной ООО «Газпром газификация» в самом договоре, без каких либо изменений. Однако данное условие судом первой инстанции было изложено в иной редакции. Доводы истца о выходе суда за пределы требований при урегулировании разногласий, судом апелляционной инстанции отклоняются, поскольку согласно восьмому и последнему требованию ООО «Газпром газификация», указанному в исковом заявлении (с учетом опечатки по нумерации требований) истец просит добавить приложения № 1-9 к договору и изложить в предложенной редакции. То есть, исходя из буквально токования требований, истец просит не просто об изменении нумерации, а об изменении всех приложений договора, независимо о наличии спора по ним. Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее. По смыслу статей 554, 555 ГК РФ существенными условиями договора купли-продажи недвижимого имущества являются предмет договора, который должен быть надлежащим образом индивидуализирован, содержать данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, а также цена отчуждаемой недвижимости. Если сторонами заключен договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путем указания иных сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией) (абзац 2 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54). Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 42 Постановления № 49, при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ); при этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется. Из содержания пункта 4 статьи 445 ГК РФ и приведенных разъяснений следует, что договор считается заключенным между сторонами на условиях, содержащихся в решении суда. При этом в решении должны быть указаны существенные условия договора (условия, которые позволяют считать договор заключенным и о необходимости согласования которых заявит одна из сторон), в остальном содержание прав и обязанностей сторон регулируется императивными нормами законодательства и восполняется диспозитивными нормами законодательства, если правило иное, чем определено в диспозитивной норме, прямо не указано в решении суда (пункт 4 статьи 421, пункт 1 статьи 422 ГК РФ). Данные выводы соответствуют правовой позиции, сформулированной в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.2019 № 307-ЭС19-3613 и от 25.05.2020 № 309-ЭС19-10274. Иными словами, задача суда при разрешении преддоговорного спора заключается в создании между сторонами договорной связи, когда часть условий, о редакции которых стороны не могут договориться путем свободного согласования своих автономных воль, определяется властью суда на основании судебного понимания должного баланса интересов сторон через призму императивных и диспозитивных норм права, регулирующих спорные отношения. Поэтому суд обязан внести полную ясность в правоотношение путем изложения в решении суда условий договора, аргументировав свои выводы о формулировании дискуссионной части условий в определенной судом редакции. Учитывая выше изложенные законоположения и разъяснения высшей судебной инстанции, несмотря на то, что спор между сторонами относительно содержания приложений № 1 и № 2 отсутствует, суд первой инстанции, включив в резолютивную часть указанные приложения без содержания (с пустыми графами), по существу, внес неопределенность между сторонами относительно условий договора. В рассматриваемом случае резолютивная часть оспариваемого решения суда первой инстанции не содержит условий соглашения, на которых оно должно считаться заключенным по итогам рассмотрения преддоговорного спора, а именно: в приложении № 1 к договору судом не указаны: наименование объекта, код объекта, статус включения в план-график догазификации, срок начала догазификации (месяц год), срок окончания догазификации (месяц год), плановые физические параметры объекта (протяженность), метров, плановый объем затрат на мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации, руб. без НДС, плановая стоимость объекта, руб. с НДС, планируемый объём освоения капитальных вложений, руб., ввод в состав основных фондов, дата передачи объекта в собственность покупателя, эксплуатирующая организация, а также в приложении № 2 к договору судом не указаны: код объекта, наименование объекта (недвижимого имущества), плановая стоимость объекта с НДС руб., срок платежа, сумма предварительной оплаты (аванса, не более 50% от плановой стоимости по каждому объекту), окончательная стоимость объекта с НДС руб., сумма оплаты окончательной цены объекта (аванса, не более 90% от окончательной стоимости по каждому объекту), сумма возврата. То есть резолютивная часть оспариваемого решения суда первой инстанции не содержит условий соглашения, на которых оно должно считаться заключенным по итогам рассмотрения преддоговорного спора. Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, решение суда признается законным и обоснованным тогда, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также тогда, когда в решении суда содержатся исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных судом фактов. Принцип законности судебного решения, включающий в себя в широком смысле законность, обоснованность, мотивированность, окончательность судебного акта, является основополагающим принципом российского права, поскольку только таким судебным актом устанавливается правовая определенность спорных отношений и определяются взаимные права и обязанности их участников (определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2015 № 305-ЭС14-2110). Допущенные судом первой инстанции нарушения подлежат устранению судом апелляционной инстанции. Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд при повторном рассмотрении дела усматривает основания для изменения решения суда первой инстанции, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 статьи 270 АПК РФ, как принятого при неправильном применении норм материального права. В связи с отказом в удовлетворении исковых требованиях расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя (статья 110 АПК РФ). Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пп. 4 пункта 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции П О С Т А Н О В И Л: Решение от 14 июня 2023 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 изменить в части внесения изменений в приложения № 1, № 2 к договору купли-продажи будущей вещи № 26 от 25.01.2022, изложив указанные приложения в следующей редакции: Приложение №1 к договору купли-продажи будущей вещи №26/ДКП-05-182/2022 от 13.07.2022 года Перечень недвижимого имущества (объектов), создаваемого за счет средств оператора газификации ПлановПлановый объем затрат на мероприятия по ые технологическому присоединению в рамках Планируемый объём освоения капитальных вложений, руб. физВвод в состав догазификации, руб. без НДС ичеосновных фондов Статускис е без НДС Срок Дата включпаръектактъектаначала Срок передачи ения в амеПлановая Эксплуатй пундогазиокончания объекта в ъекта*план-тры стоимость ирующая № ание субнныание обфикацдогазификацисобственобграфиобъобъекта, организаПроектненовеновии и (месяц ность аселеКодк ектПлановая СтроительнПрочие руб. с НДС ция о-аимНаим(месяц год) покупатестоимость о-капитальННдогазиа год) изыскатео. ля фикац(пробъекта, в монтажные ные Сльские в. 2022в. 2022в. 2022в. 2022…тогД. рубНии ** отят.ч. работы затраты Иработы 1 к2 к3 к4 кженность), метров 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 1 ЦентральТополиная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-12022002023«РусьЭненый45 0 0 рго» 00ООО п Алтайский пер.Звездны22-2021-Март ,,Август «ИФК 2 ЦентральПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 й,31289-22022002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО Алтайский г. ул. 8 Марта, 22-2021-Март ,,Август «ИФК 3 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул д. 13-1 289-3 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 4 Сибирская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-42022002023«РусьЭне110 0 рго» 00ООО 6-Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 5 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-52022002023«РусьЭнеый пр-д, 110 0 рго» 00ООО ул. Алтайский п. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 6 Школьная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Черницк 289-62022002023«РусьЭнед. 270 0 рго» 00ООО 6-Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 7 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-72022002023«РусьЭнеый пр-д, 5Г0 0 рго» 00ООО п Алтайский Валдайская 22-2021-Март ,,Август «ИФК 8 БельмесеПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 ул.,33289-82022002023«РусьЭнево0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Павловский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 9 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул Тракт,151В 289-9 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 10 ФИО4, д. ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-102022002023«РусьЭне33, кв. 10 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 11 ФИО5, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-112022002023«РусьЭнед. 1630 0 рго» 00ООО Алтайский г. Тюменская 22-2021-Март ,,Август «ИФК 12 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ул.,32 289-12 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО проспект Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 13 Сибирский, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-132022002023«РусьЭне280 0 рго» 00ООО п Алтайский Промышлен22-2021-Апрел,302 ,Август «ИФК 14 ЦентральПГДДекабрь 20220,00605 000,00край150 605 000,00 30 000,00 516 000,00 59 000,00 605 000,00 302 500,00 605 000,00 ная ул.,23-3289-14ь 20220500,0002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Связной 22-2021-Март ,,Август «ИФК 15 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул пр-д,2А 289-15 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский 

<

...> ,Август «ИФК 16 Воровского, ПГДДекабрь 20220,00241 000,00край50 241 000,00 10 000,00 172 000,00 59 000,00 241 000,00 120 500,00 241 000,00 Барнаул 289-16ь 20220500,0002023«РусьЭне1550 0 рго» 00ООО пр-д 5-Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 17 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-172022002023«РусьЭнеый, 80 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 18 ЦентральПроектная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-182022002023«РусьЭненый99 0 0 рго» 00ООО Алтайский с пер.Крылат22-2021-Март ,,Август «ИФК 19 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха ый,7 289-19 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 20 ФИО4, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-202022002023«РусьЭне2020 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 21 п.,ШкольнаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-212022002023«РусьЭнея ул.,420 0 рго» 00ООО Алтайский г. Красносель22-2021-Март ,,Август «ИФК 22 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ская ул.,122 289-22 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 23 ЦентральСоветская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-232022002023«РусьЭненый4б 0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 24 ПограничнаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-242022002023«РусьЭнея, 19г0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 25 БельмесеДнепровскаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-252022002023«РусьЭневоя, 45 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 26 БельмесеВалдайская, ПГДДекабрь 202234 600,0069 200,00край5 69 200,00 1 000,00 17 200,00 51 000,00 69 200,00 0,00 34 600,00 69 200,00 289-262022002023«РусьЭнево42 0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 27 АэродромнаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-272022002023«РусьЭнея, 24-20 0 рго» 00ООО Алтайский г. ул. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 28 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ФИО4, 8 289-28 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 29 ФИО6, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-292022002023«РусьЭне190 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 30 Берестовая,ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-302022002023«РусьЭне20 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 31 ПролетарскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-312022002023«РусьЭнеая, 190 0 рго» 00ООО Алтайский г. ул. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 32 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ФИО7, 9 289-32 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Кирсараевс22-2021-Март ,,Август «ИФК 33 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул кая ул.,129 289-33 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО 5-Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 34 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-342022002023«РусьЭнеый пр-д, 70 0 рго» 00ООО 6-Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 35 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-352022002023«РусьЭнеый пр-д, 2Б0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 36 Сибирская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-362022002023«РусьЭне43А0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п.,9-22-2021-Март ,,Август «ИФК 37 п ЛеснойПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 й пер.,2 289-37 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 38 ЛениногорсПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-382022002023«РусьЭнекая, 280 0 рго» 00ООО Лесной Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 39 п Леснойп.,Тенистая ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-392022002023«РусьЭнеул.,1740 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 40 БельмесеБелгородскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-402022002023«РусьЭневоая,61 0 0 рго» 00ООО п Алтайский Валдайская 22-2021-Апрел,539 ,Август «ИФК 41 БельмесеПГДДекабрь 20220,001 078 200,00край280 1 078 200,00 56 000,00 963 200,00 59 000,00 1 078 200,00 539 100,00 1 078 200,00 ул.,11289-41ь 20220100,0002023«РусьЭнево0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Ким 22-2021-Март ,,Август «ИФК 42 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ул.,36А 289-42 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО пр-кт Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 43 КоммунароПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-432022002023«РусьЭнев, 155А0 0 рго» 00ООО проезд Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 44 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-442022002023«РусьЭнеый 5-й,4А0 0 рго» 00ООО проезд Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 45 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-452022002023«РусьЭнеый 5-й,40 0 рго» 6-00ООО Алтайский г. Инициативн22-2021-Март ,,Август «ИФК 46 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ый пр-д, 289-46 2022 002023 «РусьЭне5А 0 0 рго» 00ООО проезд Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 47 ИнициативнПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-472022002023«РусьЭнеый 6-й,380 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 48 Воровского,ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-482022002023«РусьЭне920 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 49 п.,ПионерскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-492022002023«РусьЭнеая ул.,6г0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 50 ФИО6, ПГДДекабрь 202234 600,0069 200,00край5 69 200,00 1 000,00 17 200,00 51 000,00 69 200,00 0,00 34 600,00 69 200,00 Барнаул 289-502022002023«РусьЭне13а0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Кошевого 22-2021-Март ,,Август «ИФК 51 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ул.,10 289-51 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО пер. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 52 Короткий, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-522022002023«РусьЭне5-10 0 рго» 00ООО Алтайский г. Крупской 22-2021-Март ,,Август «ИФК 53 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 

<

...> 289-53 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО пр-д Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 54 Магнитный, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-542022002023«РусьЭне780 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 55 

<

...> рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 56 Ракитная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-562022002023«РусьЭне4а0 0 рго» 00ООО проспект Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 57 Сибирский, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-572022002023«РусьЭне26-10 0 рго» 00ООО п Алтайский Валдайская 22-2021-Апрел,539 ,Август «ИФК 58 БельмесеПГДДекабрь 20220,001 078 200,00край280 1 078 200,00 56 000,00 963 200,00 59 000,00 1 078 200,00 539 100,00 1 078 200,00 ул.,7289-58ь 20220100,0002023«РусьЭнево0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 59 ЦентральВологодскаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-592022002023«РусьЭненыйя,24 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 60 ЦентральНиколаевскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-602022002023«РусьЭненыйая, 5 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 61 ЦентральНиколаевскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-612022002023«РусьЭненыйая, 32 0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п.,7-22-2021-Март ,,Август «ИФК 62 

<

...> 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 63 п.,ШкольнаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-632022002023«РусьЭнея ул.,260 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 64 Сибирская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-642022002023«РусьЭне430 0 рго» 00ООО Алтайский г. ул. ФИО10,, 22-2021-Март ,,Август «ИФК 65 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 7 289-65 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Амурский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 66 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 1-й, д. 54 289-66 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО пр-д Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 67 ФИО5, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-672022002023«РусьЭне840 0 рго» 00ООО п Алтайский Сахалинска22-2021-Март ,,Август «ИФК 68 ЦентральПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 я ул.,14289-682022002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 69 ЛениногорсПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-692022002023«РусьЭнекая, 58А0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 70 БельмесеДнепровскаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-702022002023«РусьЭневоя, 48 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 71 ЦентральНиколаевскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-712022002023«РусьЭненыйая, 27 0 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 72 

<

...> 1В0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 73 Рельсовая, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-732022002023«РусьЭне240 0 рго» 00ООО Алтайский г. Смольная 22-2021-Март ,,Август «ИФК 74 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул ул.,11А 289-74 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п., 22-2021-Март ,,Август «ИФК 75 

<

...> 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Черницк Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 76 п.,НабережПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-762022002023«РусьЭненая ул.,31А0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 77 БельмесеКубанская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-772022002023«РусьЭнево31 0 0 рго» 00ООО п Алтайский пер.Звездны22-2021-Апрел,393 ,Август «ИФК 78 ЦентральПГДДекабрь 20220,00787 000,00край200 787 000,00 40 000,00 688 000,00 59 000,00 787 000,00 393 500,00 787 000,00 й, 34289-78ь 20220500,0002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Магнитный 22-2021-Апрел,575 ,Август «ИФК 79 ПГДДекабрь 20220,001 151 000,00край300 1 151 000,00 60 000,00 1 032 000,00 59 000,00 1 151 000,00 575 500,00 1 151 000,00 Барнаул пр-д,46 289-79 ь 2022 0500,00 02023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п Алтайский Промышлен22-2021-Апрел,302 ,Август «ИФК 80 ЦентральПГДДекабрь 20220,00605 000,00край150 605 000,00 30 000,00 516 000,00 59 000,00 605 000,00 302 500,00 605 000,00 ная ул.,23-1289-80ь 20220500,0002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Апрел,484 ,Август «ИФК 81 ЦентральЯнтарная, ПГДДекабрь 20220,00969 000,00край250 969 000,00 50 000,00 860 000,00 59 000,00 969 000,00 484 500,00 969 000,00 289-81ь 20220500,0002023«РусьЭненый100 0 0 рго» 00ООО п Алтайский Промышлен22-2021-Апрел,302 ,Август «ИФК 82 ЦентральПГДДекабрь 20220,00605 000,00край150 605 000,00 30 000,00 516 000,00 59 000,00 605 000,00 302 500,00 605 000,00 ная ул.,23-2289-82ь 20220500,0002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО п Алтайский Промышлен22-2021-Март ,,Август «ИФК 83 ЦентральПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 ная ул.,34289-832022002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п.,8-22-2021-Март ,,Август «ИФК 84 

<

...> 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 85 ЦентральПроектная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-852022002023«РусьЭненый74 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 86 ЦентральСвердловскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-862022002023«РусьЭненыйая, 13 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 87 ЦентральРостовская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-872022002023«РусьЭненый23 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 88 БельмесеДунайская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-882022002023«РусьЭнево50 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 89 ЦентральРостовская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-892022002023«РусьЭненый19А 0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п., 22-2021-Март ,,Август «ИФК 90 

<

...> 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 91 ЦентральТибетская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-912022002023«РусьЭненый10 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 92 БельмесеДнепровскаПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-922022002023«РусьЭневоя, 65 0 0 рго» 00ООО пр-д Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 93 Лучевой, д. ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-932022002023«РусьЭне150 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 94 ФИО5, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-942022002023«РусьЭнед. 1350 0 рго» 00ООО Алтайский г. Громовой 22-2021-Март ,,Август «ИФК 95 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул У. ул.,8 289-95 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 96 БельмесеЖитомирскПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-962022002023«РусьЭневоая, 54 0 0 рго» 00ООО Лесной Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 97 п Леснойп.,МагистраПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-972022002023«РусьЭнельная ул.,670 0 рго» 00ООО ул. Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 98 Воровского, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-982022002023«РусьЭне350 0 рго» 00ООО пр-кт Алтайский г. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 99 КоммунароПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул 289-992022002023«РусьЭнев, 1110 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 100 Юбилейная, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-1002022002023«РусьЭне60А0 0 рго» 00ООО Алтайский Лесной п., 22-2021-Март ,,Август «ИФК 101 

<

...> 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 102 ЦентральРостовская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-1022022002023«РусьЭненый21А 0 0 рго» 00ООО п ул. Алтайский 22-2021-Март ,,Август «ИФК 103 БельмесеДунайская, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 289-1032022002023«РусьЭнево43 0 0 рго» 00ООО 

<

...>,Август «ИФК 104 БельмесеПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Морская, 12289-1042022002023«РусьЭнево0 0 рго» 00ООО ул. Алтайский с 22-2021-Март ,,Август «ИФК 105 ФИО8, ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Власиха 289-1052022002023«РусьЭне1310 0 рго» 00ООО п Алтайский Валдайская 22-2021-Март ,,Август «ИФК 106 БельмесеПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 ул.,32289-1062022002023«РусьЭнево0 0 рго» 00ООО п Алтайский Звездный 22-2021-Апрел,393 ,Август «ИФК 107 ЦентральПГДДекабрь 20220,00787 000,00край200 787 000,00 40 000,00 688 000,00 59 000,00 787 000,00 393 500,00 787 000,00 пер.,25289-107ь 20220500,0002023«РусьЭненый0 0 рго» 00ООО Алтайский г. Коммунаро22-2021-Март ,,Август «ИФК 108 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00край30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 Барнаул в пр-кт,12 289-108 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Первомайскс мкр. 22-2021-Апрел,175 ,Август «ИФК 109 ПГДДекабрь 20220,00350 200,00ий р-н80 350 200,00 16 000,00 275 200,00 59 000,00 350 200,00 175 100,00 350 200,00 ФИО9,70 289-109 ь 2022 0100,00 02023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Первомайскс мкр. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 110 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00ий р-н30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 ФИО9,43 289-110 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО Первомайскс мкр. 22-2021-Март ,,Август «ИФК 111 ПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00ий р-н30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 ФИО9,57 289-111 2022 002023 «РусьЭне0 0 рго» 00ООО с Первомайскул. Дачная, 22-2021-Март ,,Август «ИФК 112 СанникоПГДДекабрь 202280 100,00160 200,00ий р-н30 160 200,00 6 000,00 103 200,00 51 000,00 160 200,00 0,00 80 100,00 160 200,00 15289-1122022002023«РусьЭнево0 0 рго» 00его24 254 1 014 17 440 5 800 24 254 ,12 127 24 254 ,Вс800,00 000,00 800,00 000,00 800,00 0400,00 0,00 12 127 400,00 800,00 24 254 800,00 00 0 Приложение №2 к договору купли-продажи будущей вещи №26/ДКП-05-182/2022 от 13.07.2022 года График платежей Сумма оплаты окончательной цены Срок Сумма предварительной оплаты (аванса, не более объекта (аванса, не более платежа 50% от плановой стоимости по каждому объекту) 90% от окончательной НаименованиПлановая Окончательнстоимости по каждому Код е объекта стоимость ая стоимость объекту) Сумма объекта (недвижимогобъекта с объекта с возврата** о имущества) НДС, руб. (в Сумма НДС, руб. Сумма Сумма формате платежа Сумма платежа Сумма (без НДС), (без дата, Сумма НДС, руб. (в т.ч. НДС, (в т.ч. руб. НДС), месяц, НДС), руб. НДС), руб. год) руб.* руб.* ул. 22-2021-Тополиная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-1 45 22-2021-пер.Звездный160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-2 ,31 22-2021-ул. 8 Марта, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-3 

<

...> 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-4 11 6-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-5 й пр-д, 11 ул. 22-2021-Школьная, д. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-6 27 6-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-7 й пр-д, 5Г 22-2021-Валдайская 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-8 ул.,33 22-2021-Павловский 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-9 Тракт,151В 22-2021-ул. ФИО4, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-10 

<

...> 22-2021-ФИО5, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-11 д. 163 22-2021-Тюменская 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-12 ул.,32 проспект 22-2021-Сибирский, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-13 28 22-2021-Промышленн302 605 000,00 10.07.22 302 500,00 0,00 605 000,00 242000 0 242000 289-14 ая 

<

...> 500,00 22-2021-Связной пр-160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-15 д,2А 

<

...> Воровского, 241 000,00 10.07.22 120 500,00 0,00 241 000,00 96400 0 96400 289-16 500,00 155 пр-д 5-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-17 й, 8 ул. 22-2021-Проектная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-18 99 22-2021-пер.Крылаты160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-19 й,7 ул. 22-2021-ФИО4, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-20 202 Черницк 22-2021-п.,Школьная 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-21 ул.,42 22-2021-Красносельск160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-22 ая ул.,122 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-23 Советская, 4б 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-24 Пограничная, 19г ул. 22-2021-Днепровская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-25 45 ул. 22-2021-Валдайская, 69 200,00 10.07.22 34 600,00 0,00 34 600,00 69 200,00 27680 0 27680 289-26 42 ул. 22-2021-Аэродромная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-27 24-2 22-2021-ул. ФИО4, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-28 8 22-2021-ул. ФИО6, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-29 19 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-30 Берестовая,2 ул. 22-2021-Пролетарская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-31 , 19 22-2021-ул. ФИО7, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-32 9 22-2021-Кирсараевска160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-33 я ул.,129 5-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-34 й пр-д, 7 6-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-35 й пр-д, 2Б ул. 22-2021-Сибирская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-36 43А 22-2021-Лесной п.,9-й 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-37 пер.,2 ул. 22-2021-Лениногорск160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-38 ая, 28 Лесной 22-2021-п.,Тенистая 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-39 ул.,174 ул. 22-2021-Белгородская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-40 ,61 22-2021-Валдайская 539 1 078 200,00 10.07.22 539 100,00 0,00 1 078 200,00 431280 0 431280 289-41 ул.,11 100,00 22-2021-Ким ул.,36А 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-42 пр-кт 22-2021-Коммунаров, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-43 155А проезд 22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-44 й 5-й,4А проезд 22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-45 й 5-й,4 6-22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-46 й пр-д, 5А проезд 22-2021-Инициативны160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-47 й 6-й,38 ул. 22-2021-Воровского,9160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-48 2 Черницк 22-2021-п.,Пионерска160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-49 я ул.,6г 22-2021-ул. ФИО6, 69 200,00 10.07.22 34 600,00 0,00 34 600,00 69 200,00 27680 0 27680 289-50 13а 22-2021-Кошевого 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-51 ул.,10 22-2021-пер. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-52 Короткий, 5-1 22-2021-Крупской 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-53 

<

...> пр-д 22-2021-Магнитный, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-54 78 Черницк 22-2021-п.Центральна160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-55 я ул.,1 22-2021-ул. Ракитная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-56 4а проспект 22-2021-Сибирский, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-57 26-1 22-2021-Валдайская 539 1 078 200,00 10.07.22 539 100,00 0,00 1 078 200,00 431280 0 431280 289-58 ул.,7 100,00 ул. 22-2021-Вологодская,160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-59 24 ул. 22-2021-Николаевская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-60 , 5 ул. 22-2021-Николаевская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-61 , 32 22-2021-Лесной п.,7-й 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-62 пер.,14 Черницк 22-2021-п.,Школьная 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-63 ул.,26 ул. 22-2021-Сибирская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-64 43 22-2021-ул. ФИО10,, 7 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-65 22-2021-Амурский 1-160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-66 й, 

<

...> 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-67 84 22-2021-Сахалинская 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-68 ул.,14 ул. 22-2021-Лениногорск160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-69 ая, 58А 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-70 Днепровская, 48 ул. 22-2021-Николаевская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-71 , 27 Черницк 22-2021-п.Центральна160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-72 я ул.,1В 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-73 Рельсовая, 24 22-2021-Смольная 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-74 ул.,11А 22-2021-Лесной п., 10-160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-75 й пер.,12 Черницк 22-2021-п.,Набережна160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-76 я ул.,31А 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-77 Кубанская, 31 22-2021-пер.Звездный393 787 000,00 10.07.22 393 500,00 0,00 787 000,00 314800 0 314800 289-78 , 34 500,00 22-2021-Магнитный 575 1 151 000,00 10.07.22 575 500,00 0,00 1 151 000,00 460400 0 460400 289-79 пр-д,46 500,00 22-2021-Промышленн302 605 000,00 10.07.22 302 500,00 0,00 605 000,00 242000 0 242000 289-80 ая 

<

...> 500,00 22-2021-ул. Янтарная, 484 969 000,00 10.07.22 484 500,00 0,00 969 000,00 387600 0 387600 289-81 100 500,00 22-2021-Промышленн302 605 000,00 10.07.22 302 500,00 0,00 605 000,00 242000 0 242000 289-82 ая 

<

...> 500,00 22-2021-Промышленн160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-83 ая ул.,34 22-2021-Лесной п.,8-й 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-84 пер.,24 ул. 22-2021-Проектная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-85 74 ул. 22-2021-Свердловская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-86 , 13 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-87 Ростовская, 23 ул. 22-2021-Дунайская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-88 50 ул. 22-2021-Ростовская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-89 19А 22-2021-Лесной п., 1-160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-90 й пер.,4 22-2021-ул. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-91 Тибетская, 10 ул. 22-2021-Днепровская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-92 65 пр-д 22-2021-Лучевой, д. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-93 15 ул. 22-2021-ФИО5, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-94 д. 135 22-2021-Громовой У. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-95 ул.,8 ул. 22-2021-Житомирская160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-96 , 54 Лесной 22-2021-п.,Магистрал160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-97 ьная ул.,67 ул. 22-2021-Воровского, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-98 35 пр-кт 22-2021-Коммунаров, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-99 111 ул. 22-2021-Юбилейная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-100 60А 22-2021-Лесной п., 1-160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-101 й пер.,68 ул. 22-2021-Ростовская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-102 21А ул. 22-2021-Дунайская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-103 43 22-2021-ул. Морская, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-104 12 ул. 22-2021-ФИО8, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-105 131 22-2021-Валдайская 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-106 ул.,32 22-2021-Звездный 393 787 000,00 10.07.22 393 500,00 0,00 787 000,00 314800 0 314800 289-107 пер.,25 500,00 22-2021-Коммунаров 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-108 пр-кт,12 22-2021-мкр. 175 350 200,00 10.07.22 175 100,00 0,00 350 200,00 140080 0 140080 289-109 Светлый,70 100,00 22-2021-мкр. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-110 Светлый,43 22-2021-мкр. 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-111 Светлый,57 22-2021-ул. Дачная, 160 200,00 10.07.22 80 100,00 0,00 80 100,00 160 200,00 64080 0 64080 289-112 15 12 127 9 701 9 701 Итого 12 127 400,00 24 254 800,00 0,00 400,00 920,00 920,00 В остальном решение от 14 июня 2023 года Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-13345/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края. Председательствующий О.Н. Чикашова Судьи Д.Н. Аюшев Л.Е. Ходырева Электронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 29.08.2023 4:27:00Кому выдана Чикашова Ольга НиколаевнаЭлектронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 4:31:00Кому выдана Ходырева Людмила ЕрастовнаЭлектронная подпись действительна.Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 27.02.2023 1:54:00Кому выдана Аюшев Дамир Нягазыфович