Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1692/2023

03 мая 2023 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  "Главстрой" городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к акционерному обществу "РИК Автодор" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об  обязании устранить недостатки,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество "РИК Автодор" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в месячный срок со дня вступления в законную силу настоящего  судебного акта безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту от  26.04.2021 № Р-15/2021 на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильных дорог  Автодорожного округа г. Якутска», а именно:  

По улице Студенческая: 

- на участке ПК0+68 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК0+90 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК1+40 устранить поперечную трещин покрытия дорожного полотна; 

- на участке ПК1+83 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК2+20 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК2+50 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК4+17 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК4+35 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; - на участке ПК4+57 убрать строительный мусор; 

- на участке ПК4+65 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; - на участке ПК4+80 убрать строительный мусор; 

- на участке ПК4+85 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК5+15 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК5+55 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК5+80 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК6+00 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК6+40 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК6+40-6+50 восстановить обочину слева; - на участке ПК6+82-6+87 восстановить обочину слева; 

- на участке ПК7+55 осуществить замену асфальтобетонного покрытии дорожного  

полотна; 

- на участке ПК7+95 осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного  

полотна; 

- на участке ПК8+15 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК9+05 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК9+53 осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК9+70 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК9+90 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК10+35 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК10+55 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке ПК10+85-10+95 устранить продольную трещину покрытия дорожного  полотна;  

- на участке 1ТК11+01 осуществить замену асфальтобетонного покрытия дорожного полотна; 

- на участке ПК11+28 устранить поперечную трещину покрытия дорожного  полотна.  

Взыскать с акционерного общества "РИК Автодор" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Главстрой" городского  округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате  государственной пошлины 6000 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  

подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья А.Б. Васильева