Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №

А21-12561/2022

г. Калининград

27

декабря

2022

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕТЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ВИТТЕНБЕРГ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании 20 020,71 рублей

установил.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СВЕТЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" обратилось в суд иском к обществу с ограниченной ответственностью "СК ВИТТЕНБЕРГ" о  взыскании неустойки в сумме 20 020,71 рублей.

Дело рассмотрено в  упрощенном порядке.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен контракт от 05.10.2021 года № 0135300007621000077.

По условиям контракта ООО "СК ВИТТЕНБЕРГ" (подрядчик) обязалось в срок до 25.10.2021 года выполнить капитальный ремонт участка тротуара по ул. Нахимова в г. Светлогорске (пункты 1.1, 2.2).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта его цена была согласована 1 250 000 рублей.

Подрядчик выполнил обязательства по контракту 27.12.2021 года на сумму 1 249 992,32 рублей.

В связи с нарушением срока выполнения работ, установленного контрактом, истец обратился в суд с иском о взыскании неустойки по положениям пункта 8.7.1 контракта за период с 26.10.2021 года по 27.12.2021 года в сумме 20 020,71 рублей.

В представленном отзыве ответчик требования не признал. 

Положения подпункта «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.218 года № 783, предусматривают, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком по исполненным контрактам  в случае, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта.

Начисленные пени составили 20 020,71 рублей, что не превышает 5 процентов цены контракта 1 249 992,32 рублей.

Пункт 11 Правил списания № 783 устанавливает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

Применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.

Таким образом, неустойка в сумме 20 020,71 рублей подлежит списанию и не может быть взыскана в судебном порядке.

Истец освобожден от уплаты госпошлины по делу, поскольку в рамках требований по контракту  является лицом, обратившимся в  арбитражный суд в  защиту государственных и (или) общественных интересов.  

Руководствуясь статьями 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

СудьяО.Н. Шкутко