10_587051 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  18.03.2021 Дело № А62-6099/2020  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г.  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Безруковой  И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

Администрации муниципального образования "Рославльский район"  Смоленской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к Управлению Федерального казначейства по Смоленской области (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>),  

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью «Неруд» (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>),  

Липовское сельское поселение Рославльского района Смоленской области в  лице Администрации Липовского сельского поселения Рославльского района  Смоленской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>),  

о признании частично недействительным представления № 63- 1.10-12/1.202136 от 26.05.2020,  

при участии: 

от истца: ФИО1 - представитель по доверенности;  от ответчика: ФИО2 - представитель по доверенности;  

от третьих лиц: не явились, извещены надлежаще; 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 201 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Признать недействительным представление № 63- 1.10-12/1.20-2136 от  26.05.2020 Управления Федерального казначейства по Смоленской области  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в части:  

- пункта 1 в отношении возложения на Администрацию  муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) обязанности устранить бюджетные  нарушения путем принятия мер, предусмотренных законодательством, по  

исполнению невыполненных объемов работ или возмещению средств,  полученных за фактически невыполненные работы в общей сумме 80172,77  руб. (в том числе: по акту о приемке выполненных работ № 1 от 06.06.2019:  по позиции 17 (за вычетом позиции 18) (работа) "укрепление откосов  земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным  способом" – 36691 руб.; по позиции 19 (материал) "Семена газонных трав" –  30362,75 руб.; по позиции 20 (работа) "Установка столбиков сигнальных  железобетонных" – 10161,40 руб.; по позиции 21 (материал) "Столбики  сигнальные железобетонные" –2957,62 руб.);  

- пункта 2 в отношении возложения на Администрацию  муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) обязанности принять меры по  устранению причин и условий бюджетных нарушений по пунктам 6 и 7  текста представления.  

В удовлетворении остальной части требований Администрации  муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области  (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Е.Г. Бажанова