1710/2023-25211(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-15145/2022  

от 07 марта 2023 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты вступления решения суда в  законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненные в рамках  государственного контракта № 0124200000620001584 от 25.05.2020, в отношении  многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Вельск,  

ул. Привокзальная, д. 48, а именно: 

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 1;  

- устранить недостаток в виде образования темных пятен под плинтусом в местах  примыкания стены к полу по всему периметру помещения кухни, коридора, комнаты в  квартире № 1;  

- выполнить работы по замене трех межкомнатных дверей в помещении кухни, комнаты и  санузла в квартире № 1;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и двух комнат в квартире № 2;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и двух комнат в квартире № 3;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 5;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 6;  

- устранить недостаток в виде образования темных пятен по стене помещения коридора и  кухни, смежной с санузлом в квартире № 6;  

- привести в соответствие с проектной документацией направление створки входной  двери жилого помещения № 6;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 8;  

- восстановить работу звонка входной двери в квартире № 11;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и трех комнат в квартире № 11;  

- устранить неисправность электророзеток в виде короткого замыкания в помещении  ванной и комнаты в квартире № 12;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 12;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 15;  

- устранить недостаток в виде образования темных пятен по стенам в маленькой и  большой комнате в углах под потолком возле окна в квартире № 16;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и трех комнат в квартире № 19;  

- устранить недостаток в виде образования трещины в отделочном слое стены туалетной  комнаты, смежной с ванной комнатой в квартире № 19;  

- устранить неисправность электророзеток в виде короткого замыкания в помещении  ванной комнаты и прихожей в квартире № 19;  

- выполнить работы по замене остекления стеклопакета в большой комнате в квартире   № 19;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 20;  

- устранить недостаток в виде некорректной работы вентиляционной системы вентиляции  в квартире № 22;  

- устранить недостаток в виде образования темных пятен по стенам в маленькой и  большой комнате в углах под потолком возле окна в квартире № 22,  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 27;  

- восстановить работу воздухоотводчика, находящегося в квартире № 39 на стояке  полотенцесушителей в квартирах № 27,31, 35,39,  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 28;  

- восстановить работу воздухоотводчика, находящегося в квартире № 40 на стояке  полотенцесушителей в квартирах № 28, 32, 36, 40;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 30;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 31;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 32;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах  примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и двух комнат в квартире № 33;  

- устранить недостаток в виде некорректной работы вентиляционной системы  вентиляции в квартире № 36; 

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 36;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах  примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 38;  

- восстановить работу воздухоотводчика, находящегося в квартире № 42 на стояке  полотенцесушителей в квартирах 30,34,38, 42;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 39;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах  примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 40;  

- в квартире № 40 устранить недостаток в виде неплотного примыкания вентиляционного  короба к вентиляционной шахте, расположенной в чердачном помещении;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и двух комнат в квартире № 41;  

- устранить недостаток в виде некорректной работы вентиляционной системы вентиляции  в квартире № 41;  

- восстановить работу звонка входной двери в квартире № 44; 

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и трех комнат квартире № 44;  

- устранить неисправность электророзетки в помещении коридора в квартире № 44;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и трех комнат в квартире № 46;  

- устранить недостаток в виде некорректной работы вентиляционной системы вентиляции  в квартире № 46;  

- выполнить работы по восстановлению примыкания полотна входной двери к дверному  коробу в квартире № 46;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах  примыкания  оконного блока к стеновой панели в помещении кухни и комнаты в квартире № 48;  

- восстановить работу воздухоотводчика, находящегося в квартире № 54 на стояке  полотенцесушителей в квартирах № 45, 48, 51, 54;  

- устранить недостаток в виде протечки на коммуникационной трубе в ванной комнате в  квартире № 48;  

- выполнить работы по перемещению звукоизвещателя звонка из тамбура в общий  коридор квартиры № 48;  

- выполнить работы по герметизации по всему периметру в местах примыкания оконного  блока к стеновой панели в помещении кухни и трех комнат в квартире № 50;  

- восстановить работу воздухоотводчика, находящегося в квартире № 53 на стояке  полотенцесушителей в квартирах № 44,47, 50, 53;  

- устранить неисправность электророзетки в виде короткого замыкания в помещении  кухни в квартире № 50;  

- устранить неисправность электророзеток в виде короткого замыкания в электрической  цепи в помещении коридора и маленькой комнаты в квартире № 47;  

- выполнить работы по добавлению дополнительного крепления в местах соединения  стояка канализации с лежнем в подвальном помещении;  

- выполнить работы по герметизации деформационного шва на фасаде здания со стороны  переулка Привокзальный, и с торца здания (с улицы Привокзальная).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 6:23:27

Кому выдана Козлова Мария Андреевна