1879/2022-232023(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-6917/2021

г. Казань

19 сентября 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания до перерыва секретарем судебного заседания ФИО1, после перерыва  помощником судьи Кибяковой А.И. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  Общества с ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский  технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании  мотивированного отказа от подписания актов о приемке выполненных работ и справки о  стоимости выполненных работ и затрат по контракту № 20/2081/Б от 20.11.2020г.  необоснованным,  

по встречному иску Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего профессионального образования "Казанский национальный  исследовательский технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании 67 286 руб. 99 коп. пени за период с 22.12.2020 по 20.07.2021, с  последующим начислением по день фактического исполнения решения суда, об обязании  истца устранить недостатки, допущенные ООО «АФД Трейд» при поставке оборудования и  выполнения монтажных работ в рамках исполнения Контракта N020/2081/Б от  20.11.2020г. в соответствии с условиями Проектной документацией и Технического задания,  которые являются неотъемлемой частью Контракта, в корпусах ФГБОУ ВО «КНИТУ»  корпуса А (ул. К.Маркса д.68), пост 4 (ул.К. Маркса д.72), пост 18 (ул. К.Маркса д.72),  корпусов О, В (ул. К.Маркса д.72), пост 19 (Сибирский тракт д. 12), пост 20 (Сибирский тракт  12).  

- требуется установить крепления в корпусе А (К.Маркса д.68), пост 4 (ул. К. Маркса  д.72), пост 18 (ул. К. Маркса д.72), пост 19 (ул. Сибирский тракт д. 12), пост 20 (Сибирский  тракт 12) в срок до 01.10.2021 г.;  

- подключить диодную ленту к электрической сети, после подведения электрического  кабеля силами ФГБОУ ВО «КНИТУ» предусмотренные проектом по всем блокираторам в  корпусах ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпуса А (ул. К.Маркса д.68), пост 4 (ул.К. Маркса д.72),  пост 18 (ул. К.Маркса д.72), корпусов О, В (ул. К.Маркса д.72), пост 19 (Сибирский тракт  д.12), пост 20 (Сибирский тракт 12) в срок до 01.10.2021 г.;  

- необходимо повторно наклеить ленты, после подключения к электричеству. Наклейки  необходимо демонтировать по всем блокираторам в корпусах ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпуса  А (ул. К.Маркса д.68), пост 4 (ул.К. Маркса д.72), пост 18 (ул. К.Маркса д.72), корпусов 0,В  (ул. К.Маркса д.72), пост 19 (Сибирский тракт д.12), пост 20 (Сибирский тракт 12) в срок до  01.10.2021 г.;  

- требуется восстановление подливки на посту 18 (ул. К.Маркса д.72) в срок до  01.10.2021 г.;  

- требуется выравнивание поверхности в местах осадки блокираторов по всем  блокираторам в корпусах ФГБОУ ВО «КНИТУ» корпуса А (ул. К.Маркса д.68), пост 4 (ул.К.  Маркса д.72), пост 18 (ул. К.Маркса д.72), корпусов О, В (ул. К.Маркса д.72), пост 19  (Сибирский тракт д.12), пост 20 (Сибирский тракт 12) в срок до 01.10.2021 г.;  

- требуется восстановление подливки в корпусе О (ул. К.Маркса д.72), в срок до  01.10.2021 г.;  

-требуется в местах отсутствия опирания, залить раствором утрамбованным песком на  подстилающий слой на посту 19 (ул. Сибирский тракт д.12) до 01.10.2021г.;  

с участием: 

от истца – ФИО2, директор, ФИО3, представитель по доверенности от  27.04.2022г., диплом представлен,  

от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 01.09.2020г., диплом  представлен,  

от экспертной организации – ФИО5, эксперт (до перерыва), 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

принять отказ от иска в части требования о признания мотивированного отказа от  подписания ФГБО УВПО "Казанский национальный исследовательский технологический  университет" актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости  выполненных работ и затрат (форма КС-3) по контракту № 20/2081/Б от 20.11.2020г.  необоснованным.  

Производство по делу в указанной части прекратить. Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский  технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  2 012 609 руб. 14 коп. долга, 25 000 руб. расходов по оплате услуг представителя.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 800 руб. расходов по  госпошлине.  

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский  технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 33 063 руб. расходов по госпошлине.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский  национальный исследовательский технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 4 977 руб. 04 коп. неустойки, 93 000 руб. расходов по судебной экспертизе, 6 141  руб. расходов по госпошлине.  

Обязать Общества с ограниченной ответственностью "АФД Трейд" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 15.10.2022г. устранить недостатки, допущенные  при поставке оборудования и выполнения монтажных работ в рамках исполнения контракта   № 20/2081-Б от 20.11.2020г., а именно:  

1) по фрагменту плана № 1 - противотаранное устройство по адресу: 

<

...> (корпус А):  

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном устройстве (п.4.17  ГОСТ Р-1.3-2018);  

- установить анкерные болты 2 шт.; 

2) по фрагменту плана № 2 - противотаранное устройство по адресу: 

<

...> (пост 4, первые зеленые ворота по ул.Горького г.Казани):  

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном устройстве  

(п.4.17 ГОСТ Р-1.3-2018); - установить анкерные болты 1 шт.; 

- установить высоту платформы над асфальтобетонным покрытием, проектное  

значение которого не превышает 110 мм (техническое задание - Приложение № 1 к контракту  

- высота устройства в сложенном состоянии: 110 мм); 

- произвести песчаную подготовку толщиной 150 мм. (подстилающий слой) под  

дорожной плитой; 

3) по фрагменту плана № 3 - противотаранное устройство по адресу: г.Казань,  

ул.К.Маркса, д.72 (пост 18): 

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном устройстве (п.4.17  

ГОСТ Р-1.3-2018); - установить анкерные болты 2 шт.; 

- установить высоту платформы над асфальтобетонным покрытием, проектное  

значение которого не превышает 110 мм (техническое задание - Приложение № 1 к контракту  

- высота устройства в сложенном состоянии: 110 мм); 

4) по фрагменту плана № 4 - противотаранное устройство по адресу:  

<

...>, В: 

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном устройстве (п.4.17  

ГОСТ Р-1.3-2018); - установить анкерные болты 2 шт.; 

- учитывать при выполнении работ высоты платформы над асфальтобетонным  

покрытием, проектное значение которого не превышает 110 мм (техническое задание -  

Приложение № 1 к контракту - высота устройства в сложенном состоянии: 110 мм);  

- произвести песчаную подготовку толщиной 150 мм (подстилающий слой) под  

дорожной плитой; 

- восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг противотаранного устройства,  

общая площадь 19,2 м² (4,0 м² х 4,80 м²) в следующем порядке: 1 слой - уплотненный грунт; 

2 слой - щебень М800, уложенный по способу заклинки с проливкой битумной  

эмульсией в верхней части по ГОСТ 8267-93 - 200 мм; 

3 слой - пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси, II марки по ГОСТ  

9128-2013 - 70 мм; 

4 слой - плотный асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси типа В, I марки по  

ГОСТ 9128-2013 - 50 мм (Проектная документация); 

5) по фрагменту плана № 5 - противотаранное устройство по адресу: г.Казань,  

Сибирский тракт, д. 12 (пост 19): 

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном устройстве  

(п.4.17 ГОСТ Р-1.3-2018); - установить анкерные болты 6 шт.; 

- учитывать при выполнении работ высоты платформы над асфальтобетонным  

покрытием, проектное значение которого не превышает 110 мм (техническое задание -  

Приложение № 1 к контракту - высота устройства в сложенном состоянии: 110 мм);  

- произвести песчаную подготовку толщиной 150 мм (подстилающий слой) под  

дорожной плитой; 

- восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг противотаранного устройства,  

общая площадь 28 м² (5,60 м² х 5,0 м²) в следующем порядке: 1 слой - уплотненный грунт; 

2 слой - щебень М800, уложенный по способу заклинки с проливкой битумной  

эмульсией в верхней части по ГОСТ 8267-93 - 200 мм; 

3 слой - пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси, II марки по ГОСТ  

9128-2013-70 мм; 

4 слой - плотный асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси типа В, I марки по  

ГОСТ 9128-2013 - 50 мм (Проектная документация); 

6) по фрагменту плана № 6 - противотаранное устройство по адресу: г.Казань,  

Сибирский тракт, д. 12 (пост 20): 

- осуществить маркировку завода-изготовителя на противотаранном  устройстве (п.4.17 ГОСТ Р-1.3-2018);  

- установить анкерные болты 2 шт.; 

- произвести песчаную подготовку толщиной 150 мм (подстилающий слой) под  дорожной плитой;  

- восстановление асфальтобетонного покрытия вокруг противотаранного устройства,  общая площадь 25,16 м² (6,29 м² х 4,0 м²) в следующем порядке:  

1 слой - уплотненный грунт; 

2 слой - щебень М800, уложенный по способу заклинки с проливкой битумной  эмульсией в верхней части по ГОСТ 8267-93 - 200 мм;  

3 слой - пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси, II марки по ГОСТ  9128-2013 - 70 мм;  

4 слой - плотный асфальтобетон из горячей крупнозернистой смеси типа В, I марки по  ГОСТ 9128-2013 - 50 мм (Проектная документация).  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский  технологический университет" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 7 345 руб. расходов по госпошлине.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Республики Татарстан Обществу с  ограниченной ответственностью «Центр судебной независимой оценки «Эталон» на  основании счета № О/1202-12/21 от 08.06.2022г. денежную сумму в размере 93 000 руб.,  перечисленную на депозитный счет Арбитражного суда Республики Татарстан ответчиком по  платежному поручению № 262572 от 01.12.2021г.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья В.В. Прокофьев 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 27.12.2021 11:24:14 

Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович