АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-8131/2017

г. Йошкар-Ола

21» сентября 2017 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Щегловой Л.М. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Бури- мовой О.А.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по иску муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»  в лице администрации муниципального образования «Горномарийский муници- пальный район»  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ с участием представителей: от истца - ФИО1 по доверенности, 

от ответчика - не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления  решения арбитражного суда в законную силу устранить следующие недостатки  по муниципальному контракту  № 0108300005616000013-0097441-02 от  08.06.2016 на объекте «Автомобильная дорога Подъезд к д. Атеево Горномарий- ского района»:  

- выполнить планировку и уплотнение щебеночного покрытия и обочин на  всем протяжении объекта.  

- с ПК 104+00 по ПК 108+73 и на разворотной площадке выполнить рас- клинцовку шлакового щебня фр. 40-70 мелкой фракцией;  

- выполнить укрепление берм щебнем, как предусмотрено проектом. 

- привести призму сопряжении автодороги с сельской улицей в состояние,  

обеспечивающей плавный заезд на устроенное щебеночное покрытие; 

- выполнить работы по планировке временно отведенных земель, обочин,  

откосов насыпи и берм; - устроить водоотводные канавы; 

- укрепить откосы монолитным бетоном у водопропускных труб по про- 

екту, устранить просадки и разрушения, демонтировать опалубку после выпол- 

нения бетонных работ; 

- привести призму сопряжения на ПК 15+00 в состояние, обеспечивающее  

плавный заезд на устроенное щебеночное покрытие. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госу- дарственную пошлину в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Л.М. Щеглова