100176_1995879 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-1556/2020

29 июня 2020 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю.Ишь при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации Арбатского  сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Динал» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков работ, выполненных по  муниципальному контракту от 18.11.2014 № 2014.323527.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 166 – 171, 174, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: 

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Динал» в целях  устранения выявленных недостатков в рамках муниципального контракта от 18.11.2014   № 2014.323527 на объекте, расположенном по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>: здание сельского Дома культуры, в срок -  тридцать календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу  безвозмездно выполнить следующие работы:  

- произвести ремонтные работы отмостки здания путем устранения трещин,  образовавшихся в бетонном покрытии;  

- произвести ремонтные работы в фундаменте здания путем устранения трещин; 

- произвести ремонтные работы наружной облицовки здания, поверхности стен в  горизонтальном исполнении по металлическому каркасу металлосайдингом с  пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ;  

- произвести ремонтные работы внутренней отделки облицовки стен по одинарному  металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой, а  также оконных коробок, дверных коробок, произвести ремонтные работы боковой  гидроизоляции, обмазочной битумной в 2 слоя по выравненной поверхности бытовой  кладки;  

- усилить крепление водонагревателя; 

- углубить и утеплить сливные трубы стальные, электросварные, ведущие к  выгребной яме канализации.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма  «Динал» в пользу в доход федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной  пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Н.Ю.Ишь