АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Воронеж                                                                                              Дело №А14-9069/2024 

«06» августа 2024 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12.07.2024.

Решение изготовлено в полном объеме  06.08.2024.                                                                        

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО», г. Нижний Новгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки по договору №РТС236В230070 (Д) от 13.04.2023

установил:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (далее – истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО» (далее – ответчик) о взыскании 1 138 261, 59 руб. неустойки за период с 16.11.2023 по 22.01.2024 по договору №РТС236В230070 (Д) от 13.04.2023 (просрочка выполнения работ по объектам расположенным по адресу: 

<

...>, 

<

...>).

Определением суда от 30.05.2024 дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон на основании пункта 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в отдельное производство выделены требования.

15.07.2024 от ответчика поступило ходатайство о составлении мотивированного решения.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. Если судья, подписавший резолютивную часть решения, отсутствует в день поступления заявления о составлении мотивированного решения или апелляционной жалобы, вопрос о составлении мотивированного решения указанным судьей разрешается в пятидневный срок, начинающий исчисляться с момента возобновления исполнения указанным судьей своих обязанностей.

Мотивированное решение изготовлено 06.08.2024 с учетом отпуска судьи.

Из материалов дела следует, что 13.04.2023 между Фондом капитального ремонта (заказчик) и ООО «ТРАНСЭНЕРГО» (подрядчик) был заключен договор № РТС236В230070(Д), по условиям которого подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - работы), расположенных по следующим адресам: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>: 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; Воронежская область, г. [Воронеж, ул. Артамонова, д. 9; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...>; 

<

...> в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Воронежской области в 2023-2025 гг. («Договор»), в соответствии со сметной документацией и графиком производства работ, прилагаемых к договору (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 1.2. договора общая стоимость выполняемых работ по договору составляет: 145 218 909, 04 руб.

В соответствии с пунктом 3.6 договора сроки выполнения работ по настоящему договору: с даты заключения договора (подписания договора на площадке электронного аукциона) по 15 ноября 2023 года.

Согласно пункту 5.5 договора датой выполнения подрядчиком своих обязательств по отдельным работам (этапам работ) настоящего договора считается дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ но форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

25.12.2023     ООО «ТРАНСЭНЕРГО» представило акты о приемкевыполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работпо форме КС-3 по многоквартирному жилому дому, расположенному поадресу: 

<

...>(за пределами конечного срока).

Согласно справки по форме КС-2, КС-3 от 25.12.2023, стоимость работ строительно-монтажных работ по адресу: 

<

...>, составляет 19 875 855 руб.

22.01.2024     ООО «ТРАНСЭНЕРГО» представило акты о приемкевыполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работпо форме КС-3 по многоквартирному жилому дому, расположенному поадресу: 

<

...>(за пределами конечного срока).

Согласно справки по форме КС-2, КС-3 от 22.01.2024, стоимость строительно-монтажных работ по адресу: 

<

...> составляет 3 415 876,80 руб.

Полагая, что ответчиком нарушен срок выполнения соответствующих работ истец претензиями от 28.02.2024 № 3635971 и от 25.03.2024 № 3648735 потребовал уплатить неустойку.

Неисполнение требований претензии послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив все в совокупности, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя из существа заявленных исковых требований и правовой природы отношений сторон, вытекающих из договора № РТС236В230070(Д) от 13.04.2023, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и нормы главы 37 ГК РФ о договорах подряда (строительного подряда).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3 указанной статьи установлено, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с пунктом 3.6 договора сроки выполнения работ по договору: с даты заключения договора (подписания договора на площадке электронного аукциона) по 15 ноября 2023 года.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1ст. 330 ГК РФ).

Согласно пунктам 8.2, 8.3 договора, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), а подрядчик обязан оплатить в течение 5 рабочих дней со дня предъявления заказчиком обоснованной претензии. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа и устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этана услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены.

Акты КС-2 и справки КС-3 датированы 25.12.2023 и 22.01.2024 соответственно.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве.

Указанные доводы не могут быть приняты судом по следующим основаниям.

В силу статей 702, 740 ГК РФ к обязанностям подрядчика относятся достижение результата (выполнение работ) и передача указанного результата заказчику. Риски передачи исполнения относятся на должника.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 3.7. договора предусмотрена обязанность по соблюдению сроков выполнения работ, сроков этапов выполнения работ, в соответствии с графиком.

Аналогичные положения об ответственности, как за нарушение срока исполнения обязательства, так и срока исполнения его этапа, предусмотрены пунктом 8.3. договора.

В соответствии с пунктом 2.5 договора окончательный расчет производится после сдачи всего комплекса работ подрядчиком заказчику приемки данных работ заказчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом и качественно, а также в сроки, установленные договором.

Пунктом 5.3 договора предусмотрено, что объем выполненных работ принимается на основании акта по унифицированной форме КС-3, подписанного и согласованного уполномоченным представителем заказчика и подрядчика, акта по форме КС-2, подписанного и согласованного уполномоченным представителем заказчика и подрядчика, организацией, осуществляющей строительный контроль на объекте по договору, органом местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе, акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией согласно приложению №4 к договору.

Заказчик принимает работу путем подписания актов по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после получения указанных документов, подписанных в соответствии с пунктом 5.3 договора (пункт 5.4 договора).

Датой выполнения подрядчиком своих обязательств по отдельным работам (этапам работ) настоящего договора считается дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (пункт 5.5 договора).

Как следует из положений статей 1, 3, 422, 431 ГК РФ и пункта 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ).

При толковании условий договора в силу абзаца первого статьи 431 ГК РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений (буквальное толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (пункт 5 статьи 10, пункт 3 статьи 307 ГК РФ), если иное значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела.

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование).

Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ).

Из совокупного буквального толкования положений пунктов 2.5, 5.3 - 5.5 договора следует, что обязательство подрядчика по выполнению работ считается выполненным и подлежащим оплате с момента передачи результата работ заказчику в установленном договором порядке. Следовательно, на подрядчика возлагается бремя ответственности за нарушение срока фактической передачи результата работ.

Тем самым, исходя из того, что ответчиком не представлено доказательств наличия оснований, с которыми закон и договор связывают освобождение его от ответственности за неисполнение обязательства, доводы ответчика об отсутствии оснований для начисления в отношении него неустойки не могут быть приняты.

По общему правилу, предусмотренному ст. 704 ГК РФ работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами, если иное не предусмотрено договором подряда. Цена в договоре подряда включает компенсацию затрат подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2 статья 709 ГК РФ).

Доказательств достижения цели договора или сдачи части работ в указанный истцом период ответчиком не представлено.

В связи с чем, судом не принимается довод об окончании периода просрочки исполнения обязательства в момент получения деклараций о соответствии.

Представленные в материалы дела письма о готовности работ и о необходимости проведения проверки объемов выполнения работ, не могут быть приняты в качестве доказательств сдачи результат работ ответчику по следующим основаниям.

В соответствии с положениями статей 328, 702, 706, 709, 711, 746, 773 ГК РФ обязательственное правоотношение, возникшее из договора подряда, состоит из встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика по выполнению определенного объема строительных работ надлежащего качества в согласованные сроки с передачей их результата генподрядчику (заказчику) и обязательства генподрядчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой.

Риски передачи исполнения по сделке относятся на обязанную сторону.

Исходя из положений статей 702, 720, 753 ГК РФ именно на подрядчика возложена обязанность по составлению актов о приемке выполненных работ с соблюдением установленных требований и по их предоставлению заказчику.

Представленные в материалы дела письма №1207/2 от 07.12.2023, №1010/6 от 09.10.2023 не содержат сведений о предоставлении актов о приемке выполненных работ. 

Письма №1215/10, №1215/1 от 15.12.2023 не содержат указаний на реквизиты переданных актов, что не может свидетельствовать, о соответствии указанных документов, подписанным сторонами, а также соответствии фактически выполненных работ, входящих в соответствующий этап, на момент передачи указанной отчетной документации. 

При этом, представленные в материалы дела акты КС-2 и справки КС-3, подписанные сторонами без возражений, датированы 25.12.2023 и 22.01.2024 и содержат указание на отчетный период выполнения работ по 25.12.2023 и 22.01.2024 соответственно, что свидетельствует о составлении документов и передачи результата подрядчиком именно на указанные даты.

С учетом изложенного, ответчиком не представлено достаточных оснований, подтверждающих выполнение работ в установленный договором срок.

Проверив расчет неустойки, судом установлено, что размер взыскиваемой неустойки находится в пределах возможной к взысканию.

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку только по обоснованному заявлению должника - коммерческой организации(пункт 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7). 

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Из материалов дела следует, что ответчики в суде первой инстанции ходатайства о снижении размера пени, равно как и доказательств ее несоразмерности, не предъявлял. 

С учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, оснований и очевидных обстоятельств для уменьшения размера пени в порядке положений статьи 333 ГК РФ судом не усматривается. 

С учетом указанных обстоятельств, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 1 138 261, 59 руб. за период с 16.11.2023 по 22.01.2024.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 24 383 руб. 

Истец при обращении в суд платежным поручением № 1262 от 21.05.2024  уплатил государственную пошлину в сумме 24 383 руб.

На основании статьи 110 АПК РФ, пункта 21 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, следует взыскать с ответчика в пользу истца 24 383 руб. расходов по государственной пошлине.

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-169, 229 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО», г. Нижний Новгород (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  1 138 261, 59 руб. неустойки за период с 16.11.2023 по 22.01.2024 по договору №РТС236В230070 (Д) от 13.04.2023,  а также 24 383 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме, в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области в порядке части 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                                           Г.В. Семенов