26110147_10938474  

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-10782/2023

16 октября 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление капитального строительства"  (628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Авалон" (453300, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании  устранить недостатки выполненной работы; о взыскании штрафа в размере 5 000 руб.,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Авалон» в течение 30 рабочих  дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные  недостатки (дефекты) выполненных работ по государственному контракту от 09.08.2022   № 056/08.22 на объекте: «Фельдшерско-акушерский пункт» д. Белогорье Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», а именно:  

 № 

Наименование работ 

Ед. 

Устранение замечания 

п/п 

измерения  

1 

Входная группа 

1 шт. 

Покрасить металлоконструкции  

(покрытие-просечка удалить следы  

ржавчины) 

2 

Электрощитовая 

Помещение 

Закрепить питающий кабель и  

 № 10 

уложить в лоток. Эл. кабеля 

уложить в общий лоток. Завершить  

пусконаладочные работы (ПНР).  

3 

Внутреннее 

система 

Заделать проходы кабеля через  

электроснабжение 

стены и перекрытия, закончить  

пусконаладочные работы(ПНР).  

4 

Электроосвещение наружное  

система 

Закончить пусконаладочные  

работы (ПНР). 

5 

Монтаж москитных сеток на  

5 шт. 

Смонтировать москитные сетки на  

окнах 

оконных проемах 

6 

Внутренние двери, замечания по 

Отрегулировать двери и замки.  

зданию 

Закрепить дверной доводчик.  

7 

Внутренняя вентиляция  

система 

Закончить пусконаладочные  

работы (ПНР), система в аварийном 

8 

Сантехприборы 

1 шт. 

сСолситвоняонйи иб,а кчлеакп уаснт аКнВоКви 1т6ь0 в в  

псоомтевщетеснтивии и № с4 у (сптраонцоевдлуерннныыйм  

9 

Техническое помещение  

газовый 

куЗанабкииртенапзеоитм)т ьб есзи ргнуачлкииз уапторра вления,  

котел 

пзаргоаиззоввеаснтнио зсатпиу, сокк рсаисситтеьм ытр иуб у  

наладить работу системы, при  

10 

Отопительные приборы  

10 шт. 

гУасзтоапнрооввиотдьа ,т енрем сорсатбааттиычвеасекти е  устройстве вентиляции нарушена  

(радиаторы) 

вгоенлотивклияц ионное оборудование  герметичность кровли, заделать  

11 

Воздушная завеса 

1 шт. 

(Вн аалваадриитйьн ормаб соотсут овеяннтииил (янцаилоандниотгьо  места проходов воздуховодов и  

ораббоортууд оввоазндиушя/сниосйт зеамвуе сы)  питающих кабелей через  

вентиляции). 

12 

Ограждение территории  

4 секции 

Зпаекррекеприыттьи як рие пстлеенныие з дсеакнциия й между  

опорами 

13 

Газонное озеленение 

419,6 м2 

Закончить гарантийные работы по  

газонному озеленению 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авалон" в пользу казенного  учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление капитального  строительства" 5 000 руб. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авалон" в доход  федерального бюджета 8 000 руб. государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья С.В. Бухарова