АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

21 октября 2025 года

Дело № А33-23718/2025

Руководствуясь статьями 49, 66, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

отказать в принятии уточнения исковых требований обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сибирская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в части указания конкретного перечня мероприятий, предусмотренных техническими условиями (с учетом принятия возражений ответчика, дублирования таких мероприятий указанным в технических условиях к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.10409.23 от 24.11.2023, абзаца 2 пункта 23 Правил № 861 (в части права сетевой организации вносить изменения в технические условия), большей вероятности исполнения судебного акта и ненарушения прав истца отказом в принятии уточнения, не влияющего на своевременность исполнения ответчиком необходимых мероприятий в рамках договора № 20.2400.10409.23 от 24.11.2023).

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сибирская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об истребовании у публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) копии акта от 17.06.2024 проверки выполнения технических условий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.10409.23 от 24.11.2023.

Отказать в удовлетворении ходатайств публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о переходе к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства, увеличении срока выполнения мероприятий до 6-ти месяцев и снижении размера договорной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Удовлетворить ходатайство публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о снижении размера судебной неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исковые требования удовлетворить частично.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение тридцати дней со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.10409.23 от 24.11.2023 для электроснабжения объекта общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сибирская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - «нежилое здание», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 

<

...> земельный участок 14А, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700252:29.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сибирская строительная компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.10409.23 от 24.11.2023 в сумме 50 763,92 руб. за период с 26.11.2024 по 22.08.2025 (75 205,81 руб. *0,25% *270 дней), а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 60 000 руб. и 1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после вступления решения суда в законную силу, по день его фактического исполнения.

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.

Судья

ФИО1