АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-6919/2022

г. Салехард

13 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 июля 2022 года.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Рахимовым Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Торгово-Перерабатывающая компания «БАЗИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 666 533 рублей 04 копеек и понуждении к исполнению обязательств,

при участии в судебном заседании:

от истца - не явились;

от ответчика - не явились,

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО ТПК «БАЗИС» о взыскании неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору на выполнение работ по рекультивации нефтезагрязнённых земель № ННГ-20/10910/00555/Р от 01.06.2020 в размере 666 533 рублей 04 копеек и обязании в срок до 15.07.2022 произвести рекультивацию 9 участков Еты-Пуровского и Вынгаяхинского месторождений.  

Стороны в предварительное судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

В отсутствие возражений сторон, суд завершил предварительное судебное заседание и перешёл к рассмотрению дела по существу.

Как следует из материалов дела, между АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и ООО ТПК «БАЗИС» заключен договор на выполнение работ по рекультивации нефтезагрязненных земель № ННГ-20/10910/00555/Р от 01.06.2020.

По условиям, предусмотренным данным Договором, Подрядчик обязуется выполнить работы по рекультивации нефтезагрязненных земель (п. 2.1 Договора) в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к Договору) и проектной документацией в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить качественно выполненные работы.

В связи с пролонгацией Договора на 2021 год и сокращением площадей участков рекультивации нефтезагрязненных земель, дополнительным соглашением №1 от 12.03.2021 стороны решили внести в договор изменения, в том числе:

- в п. 4.1 Договора: «Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2021, а в части принятых на себя обязательств до полного их исполнения. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств»;

- Изменить и изложить в редакциях к настоящему дополнительному соглашению:

А) Приложение №1 к Договору «Техническое задание на выполнение работ по рекультивации  нефтезагрязненных земель  на  территории  месторождений АО «Газпромнефть-ННГ»;

Б) Приложение №2 к Договору «График производства работ».

Согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение №1 к дополнительному соглашению №1 к Договору), Подрядчик обязуется выполнить работы по рекультивации на 9 участках.

Согласно графику производства работ (Приложение №2 к дополнительному соглашению № 1 к Договору), дата окончания работ по биологическому этапу 30.09.2021.

01.07.2021 Заказчик принял работы по биологическому этапу рекультивации на территории Вынгаяхинского и Еты-Пуровского месторождений на сумму 7 998 394,10 руб., что подтверждается актом № 193 выполненных работ по рекультивации нефтезагрязненных земель.

12.07.2021 комиссией АО «Газпромнефть-ННГ» с участием представителя ООО "ТПК "БАЗИС" проводилось натурное обследование рекультивированных участков в районе развилки дорог на куст 244Б Еты-Пуровского месторождения (площадью 1,842 га), а также вдоль дороги в 300 м. южнее куста - 1 Еты-Пуровского месторождения (площадью 0,3796 га), в результате которого установлено неисполнение Подрядчиком принятых на себя обязательств в части восстановления земельных участков, а именно на участке в районе развилки дорог на куст 244Б Еты-Пуровского месторождения выявлено наличие на всей площади фрагментарного присутствия замазученного торфа, по береговой линии водного объекта присутствует нефтезагрязненный грунт (НЗГ). также на участке вдоль дороги в 300 м. южнее куста - 1 Еты-Пуровского месторождения выявлено наличие битумных фрагментов, всходы многолетних трав слабые, менее 30%.

Согласно выводам комиссии, на участке в районе развилки дорог на куст 244Б Еты-Пуровского месторождения (площадью 1,842 га) требуется доработка участка, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения. На участке вдоль дороги в 300 м. южнее куста - 1 Еты-Пуровского месторождения (площадью 0,3796 га), требуется доработка участка, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения, требуется подсев многолетних трав.

Результаты проверки оформлены актом б/н от 12.07.2021 и прилагаемыми к акту чек-листами б/н от 12.07.2021 выявленных замечаний при натурном обследовании участков НЗЗ по периметру и прилегающей территории.

17.07.2021 комиссией АО «Газпромнефть-ННГ» с участием представителя ООО "ТПК "БАЗИС" проводилось натурное обследование следующих рекультивированных участков:

1) в  районе  развилки  дорог  на  куст  №244Б  Еты-Пуровского  месторождения (площадь 1,8420 га);

2) по периметру куста №63 Вынгаяхинского месторождения (площадь 0,3840 га);

3) с северной  стороны  куста  №11   Еты-Пуровского  месторождения,  (площадь 0,1764 га);

4) с юго-восточной стороны и в 100м на юго-запад куст №4 Вынгаяхинского месторождения (площадь 0,9983 га);

5) вдоль дороги в 300м южнее куста №1 Еты-Пуровского месторождения (площадь 0,3796 га);

6) прилегает к юго-западной стороне куста №171 Вынгаяхинского месторождения, (площадь 0,2790 га);

7) прилегает    к    северо-восточной    стороне    куста     №262    Еты-Пуровского месторождения (площадь 0,3930 га);

8) рядом с 263Р Еты-Пуровского месторождения (площадь 0,2130 га);

9) 100 м на север от 245Р Еты-Пуровского месторождения (площадь 0,4616 га).

Согласно выводам комиссии, на участке Еты-Пуровского месторождения площадью 1,8420 га требуется доработка участка, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения, а также требуется досев многолетних трав по всему участку.

На участках Вынгаяхинского месторождения площадью 0,384 га, Еты-Пуровского месторождения площадью 0,1764 га, Вынгаяхинского месторождения площадью 0,9983 га, требуется доработка технического этапа при помощи спецтехники, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения, завоз торфо-песчаной смеси, а также посев/досев многолетних трав. По указанным четырем участкам, комиссия решила доработать технический этап рекультивации с составлением подтверждающих справок на вывоз нефтезагрязненного грунта с участка, с подтверждением поступления на полигон согласно условиям технического задания к Договору и проведение биологического этапа рекультивации.

Также, согласно выводам комиссии, на участке Еты-Пуровского месторождения площадью 0,3796 га требуется доработка участка, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения, обработка биопрепаратом, подсев многолетних трав произведен, ожидание всходов.

На участке Вынгаяхинского месторождения площадью 0,2790 га требуется доработка участка, сбор и вывоз НЗГ на полигон Вынгаяхинского месторождения, обработка биопрепаратом, подсев многолетних трав, ожидание всходов.

На участках Еты-Пуровского месторождения площадью 0,3930 га, Еты-Пуровского месторождения площадью 0,2130 га, Еты-Пуровского месторождения площадью 0,4616 га требуется подсев/посев многолетних трав, ожидание всходов.

По всем указанным девяти участкам, комиссией было решено, что допустима приемка участков и оплата биологического этапа рекультивации под гарантийное письмо об устранении недостатков за подписью генерального директора ООО "ТПК "БАЗИС".

Результаты проверки оформлены актом б/н от 17.07.2021 на основании прилагаемых к акту чек листов б/н от 17.07.2021 выявленных замечаний при натурном обследовании участков НЗЗ по периметру и прилегающей территории.

Гарантийным письмом Подрядчика от 19.07.2021 №156 замечания Общества на указанные недостатки в рамках исполнения договора от 01.06.2020 № ННГ-20/10910/00555/Р приняты. Подрядчик гарантировал в кратчайшие сроки своими силами и за свой счет устранить все недостатки в рамках договорных отношений, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения договорных обязательств, не позднее 27.08.2021.

20.07.2021 работы по биологическому этапу рекультивации на территории Вынгаяхинского и Еты-Пуровского месторождений на сумму 7 998 394 рубля 10 копеек, согласно акту №193 от 01.07.2021, оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 678.

Пунктом 9.8 Приложения №1 к Договору «Техническое задание на выполнение работ по рекультивации нефтезагрязненных земель на территории месторождений АО «Газпромнефть-ННГ» установлено, что в течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов,    являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

10.09.2021, в рамках проведения рабочей встречи с генеральным директором ООО "ТПК "БАЗИС", Подрядчик также указал, что по всем участкам, на которых выявлены замечания, в данный момент ведутся работы по их устранению и будут выполнены на 100% в кратчайшие сроки, что подтверждается протоколом рабочей встречи №ПТ-02/000221.

28.09.2021, в рамках проведения рабочей встречи с генеральным директором и учредителем ООО "ТПК "БАЗИС", было установлено, что выявленные замечания в части биологического этапа рекультивации по участкам Еты-Пуровского и Вынгаяхинского месторождений (9 участков) не устранены. Установлен повторный срок для устранения замечаний - 04.10.2021 (п. 6 протокола рабочей встречи №ПТ-ГД/002317/01).

По состоянию на 28.09.2021 ООО "ТПК "БАЗИС" также полностью признало наличие неисполненных в установленный в Приложении №2 к Договору «График производства работ» срок договорных обязательств по рекультивации земель, принятых по договору № ННГ-20/10910/00555/Р от 01.06.2020.

13.10.2021, в связи с фиксацией 06.10.2021 Заказчиком несогласованной остановки работ ООО "ТПК "БАЗИС", в адрес Подрядчика было направлено письмо исх. №02/1/012564 о возобновлении работ.

15.10.2021 в письме исх. № 247 Подрядчик сообщил, что приостановка производственных работ на период с 06.10.2021 по 20.10.2021 вызвана необходимостью заключения договоров на предварительные и периодические осмотры для оформления допуска работников на объекты Общества в связи с перевахтовкой персонала.

29.10.2021, в связи с нарушением указанного в письме от 15.10.2021 №247 срока о возобновлении работ, Общество в очередной раз направило письмо исх. №10/2/013198 о необходимости возобновления работ.

Ответ на указанное письмо №10/2/013198 от ООО «ТПК Базис» не поступил.

19.11.2022 АО «Газпромнефть-ННГ» направило в адрес ООО «ТПК Базис» претензию от 18.11.2021 исх. №10/2/2/013859 об исполнении договорных обязательств и оплате неустойки с требованием о добровольном возмещении неустойки.

Поскольку замечания в части биологического этапа рекультивации по участкам Еты-Пуровского и Вынгаяхинского месторождений (9 участков) не устранены и начисленная неустойка не уплачена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд учитывает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Согласно пункту 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Исходя из конструкции договора, его существенными условиями являются условия о предмете и о сроке выполнения работ. Данные условия сторонами согласованы, то есть в силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ он считается заключенным.

В данном случае, выполнение работ по технической рекультивации относятся к существенным условиям договора.

Заключив договор, стороны приняли на себя обязательства по исполнению всех условий договора.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Техническим заданием (приложение № 1 в редакции дополнительного соглашения № 1 к договору № ННГ-20/10910/00555/Р от 01.06.2020) установлена обязанность ответчика по выполнению работ по рекультивации на 9 участках.

Неисполнение ответчиком работ по рекультивации установлены актами комиссии истца б/н от 12.07.2021, б/н от 17.07.2021.

10.09.2021, в рамках проведения рабочей встречи с генеральным директором ООО "ТПК "БАЗИС", Подрядчик также указал, что по всем участкам, на которых выявлены замечания, в данный момент ведутся работы по их устранению и будут выполнены на 100% в кратчайшие сроки, что подтверждается протоколом рабочей встречи № ПТ-02/000221.

06.10.2021 комиссией истца было установлено, что выявленные замечания, указанные в письмах и обозначенные на рабочей встрече, ответчиком не устранены.

Как указывает истец, выявленные замечания до настоящего времени не устранены, обязательства ответчика по рекультивации земель и сдаче участков комиссии АО «Газпромнефть-ННГ» по участкам Еты-Пуровского и Вынгаяхинского месторождений (9 участков) не исполнены.

В связи с просрочкой исполнения обязательств, истцом заявлено требование о взыскании неустойки.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку (штраф, пеню), определенную законом или договором.

Согласно статье 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

По условиям пункта 8.7. Договора установлена ответственность Подрядчика в случае не устранения Подрядчиком замечаний, предъявленных Заказчиком и (или) Супервайзером к выполненным Подрядчиком работам на участке, в установленный Заказчиком срок, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от общей стоимости соответствующих работ (этапа работ) на Участке.

Обстоятельства просрочки исполнения обязательств подтверждены материалами дела.

По расчёту истца неустойка за период с 01.10.2018 по 16.11.2021 составила 666 533 рублей 04 копеек.

Расчёт истца судом проверен и признан верным, соответствующим соглашению сторон.

В силу ч. 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил, о несоразмерности неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ не заявил.

Исходя из правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11, в соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

При таких обстоятельствах, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, в просительной части иска истцом указан срок по выполнению работ по рекультивации до 15.07.2022.

В соответствии с пунктом 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В данном случае, предложенный истцом срок не соответствует критерию исполнимости, поскольку судебное заседание по рассмотрению иска, с учётом графика судебных заседаний и нагрузки, было назначено на 06.07.2022.

От истца уточнений исковых требований в указанной части не поступало.

Вместе с тем, обязанность должника по исполнению решения суда наступают с момента его  вступления в законную силу.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным установить разумный срок на выполнение работ по технической рекультивации - в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу настоящего решения суда. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью Торгово-Перерабатывающая компания «БАЗИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение тридцати календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу провести рекультивацию следующих 9 участков Еты-Пуровского и Вынгаяхинского месторождений:

- участок в районе развилки дорог на куст № 244Б Еты-Пуровского месторождения (площадь 1,8420 га);

- участок по периметру куста № 63 Вынгаяхинского месторождения (площадь 0,3840 га);

- участок, прилегающий к северной стороне куста № 11 Еты-Пуровского месторождения, (площадь 0,1764 га);

- участок с юго-восточной стороны и в 100 м на юго-запад куст № 4 Вынгаяхинского месторождения (площадь 0,9983 га);

- участок вдоль дороги в 300 м южнее куста № 1 Еты-Пуровского месторождения (площадь 0,3796 га);

- участок, прилегающий к юго-западной стороне куста № 171 Вынгаяхинского месторождения, (площадь 0,2790 га);

- участок, прилегающий к северо-восточной стороне куста № 262 Еты-Пуровского месторождения, (площадь 0,3930 га);

- участок, расположенный рядом с 263Р Еты-Пуровского месторождения, (площадь 0,2130 га);

- участок, расположенный в 100 м на север от 245Р Еты-Пуровского месторождения, (площадь 0,4616 га).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Торгово-Перерабатывающая компания «БАЗИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штрафную неустойку за нарушение исполнения обязательств по договору на выполнение работ по рекультивации нефтезагрязнённых земель № ННГ-20/10910/00555/Р от 01.06.2020 в размере 666533 рублей 04 копеек и расходы по уплате государственной пошлины в размере 22331 рубля 00 копеек. Всего взыскать 688864 рубля 04 копейки. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://yamal.arbitr.ru.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

О.Н. Никитина