И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                             Дело № А40-226159/22-151-1721

20.04.2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 15.03.2023

Решение в полном объеме изготовлено 20.04.2023

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В.

при ведении секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «АВИАСПЕКТР» (ОГРН 

<

***>)

к ответчику ПАО «ИЛ» (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 2 815 918,10 руб.

при участии

от истца: представитель не явился

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 19.01.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании:

- неустойки, предусмотренную п. 9.3. Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, предусмотренных п. 3.3. Договора, в размере 61 254,48 (шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре и 48 копеек) рубля.

- задолженность за выполненные дополнительные работы, произведенные на ВС Ан-2Т, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, по дополнительным соглашениям № 2 от 25.12.2020 г. и № 3 от 25.02.2020 г., заключенных в рамках исполнения Договор № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., в размере 703 500 (семьсот три тысячи пятьсот) рублей, в том числе: 

- по Дополнительному соглашению № 2 от 25.12.2020 г., в размере 343 500 (триста сорок три тысячи пятьсот) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ;

- Дополнительному соглашению № 3 от 25.12.2020 г., в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ.

- неустойку (пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате произведенных дополнительных работ в размере 43 291,72 рубль (сорок три тысячи двести девяносто один и 72 коп.), в том числе:

- за нарушение сроков оплаты дополнительных работ, указанных в дополнительном соглашении № 1 от 25.12.2020 г., в размере 7 272,52 (семь тысяч двести семьдесят два и 52 коп.) рубля;

- за неоплату дополнительных работ по дополнительному соглашению № 2 от 25.12.2020 г. в размере – 17 587,20 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь и 20 коп.) рублей;

- за неоплату дополнительных работ по дополнительному соглашению № 3 от 25.12.2020 г. в размере – 18 432 восемнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля.

- убытки в виде реального ущерба в размере 70 264 (семьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля, из которых:

- расходы по уплате банку вознаграждения за предоставление банковской гарантии № ЮЛ/15-20/БГ-1 от 19.06.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору № У015/20-076,7 в размере 69 084,00 (шестьдесят девять тысяч восемьдесят четыре и 00 коп.) рубля; 

- расходы по дополнительной пересылке Заказчику банковской гарантии, в размере 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

- задолженность за предоставленные услуги по ТО и хранению ВС Ан-2Т, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, в размере – 1 937 607,90 рублей (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот семь рублей и 90 коп.), из которых:

- стоимость услуг по обеспечению хранения самолета Ан-2Т, борт. RA-71217 на территории общества за период с 25.02.2021 г. по 26.07.2022 г. (517 календарных дня/суток) составляет 961 200 (девятьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей;

- стоимость услуг по осуществлению ТО ВС при хранении для поддержания его в исправном состоянии (включая авиатопливо) за период с 26.12.2020 г. по 26.07.2022 г. (721 нормо/час) составляет 976 407,90 рублей (девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семь и 90 копеек).

- неустойку (пени) до момента фактической оплаты задолженности, в соответствии с п. 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7.

Надлежащим образом извещенный представитель истца в судебное заседание не явился, в порядке ст. 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Между ООО «АВИАСПЕКТР» (Ставропольский край, г. Минеральные Воды) – «Исполнитель» и ПАО «ВАСО» (г. Воронеж) – «Заказчик», в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующим гражданским законодательством РФ, 22.06.2020 г. был заключен Договор № У015/20-0767 на производство капитального ремонта самолета АН-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217 (далее – ВС). Работы выполняются Исполнителем согласно технологии ремонта, утвержденного разработчиком ВС, а также в соответствии с Приложением № 1 к Договору (Спецификация).

01.11.2021 г. в отношении ПАО «ВАСО» (394029, 

<

...>) завершена реорганизация в форме присоединения к ПАО «Ил» (125190, 

<

...>). Деятельность ПАО «ВАСО» прекращена. Правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «ВАСО» с 01.11.2021 г. является Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «ИЛ»).

Согласно уведомление о завершении реорганизации исх. № 89 от 09.11.2021 г. взаимодействие по договорам, заключенным с ПАО «ВАСО» осуществляется с Филиалом ПАО «Ил» - ВАСО (394029, 

<

...>).

Таким образом, в соответствии с нормами ст.ст. 58, 55 ГК РФ, правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «ВАСО», в том числе по заключенному с ООО «АВИАСПЕКТР» Договору № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., является ПАО «Ил» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>).

Согласно условий Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г. (далее – Договор) ООО «АВИАСПЕКТР» обязуется по заданию ПАО «ВАСО» (01.11.2021 г. – филиал ПАО «Ил», далее по тексту - «Заказчик») произвести капитальный ремонт воздушного судна Заказчика – самолета Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217 (далее – «ВС»), произвести замену агрегатов ВС, а также, выполнить необходимые дополнительные работы, без проведения которых дальнейший ремонт ВС невозможен, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить выполненные ООО «АВИАСПЕКТР» работы.

Пунктом 9.3. Договора предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки платежа в размере 0,01 % от неоплаченной суммы.

Заказчиком - ПАО «ВАСО» (с 01.11.2021 г. – ПАО «Ил») нарушены сроки оплаты, предусмотренные п. 3.3 Договора, а именно:

Стоимость работ по ремонту ВС, на дату заключения Договора, составила 3 838 000,00 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч и 00 коп.) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ (п. 3.1. Договора).

Согласно п.п. 3.3.1. подписанного сторонами Договора, ПАО «ВАСО», как Заказчик ремонтных работ, перечисляет аванс в размере 30% от стоимости ремонта ВС (т.е. 1 151 400 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей), в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения счета от ООО «АВИАСПЕКТР».

Счет № 53 от 29.06.2020 г., на оплату заказываемых ПАО «ВАСО» ремонтных работ, по Договору № У015/20-0767 от 22.06.2020 г. получен Заказчиком 29.06.2020 г. (повторно, в связи с неоплатой, 22.07.2020 г., 03.09.2020 г.).

Следовательно, аванс, предусмотренный п. 3.3.1. Договора, должен был быть перечислен Исполнителю до 20.07.2020 г. включительно. Однако авансовый платеж Заказчиком произведен только 23.12.2020 г. (пл./поручение № 6423).

Следовательно, просрочка по оплате аванса в размере 30 % стоимости ремонта, предусмотренного пп. 3.3.1. Договора, составила 156 дней (период с 21.07.2020 г. по 23.12.2020 г. включительно).

Таким образом, размер неустойки (пени), предусмотренной п. 9.3. Договора, за нарушение сроков оплаты авансового платежа, предусмотренного п.п. 3.3.1 Договора, составляет 17 961,84 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один и 84) рубль (1 151 400 руб. x 0,01% x 156 дн. = 17 961,84 рублей).

Согласно п.п. 3.3.2 подписанного сторонами Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 30 % - (т.е. 1 151 400 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей) в течение 30 (тридцати) календарных дней после начала работ на основании выставленного счета.

ВС Заказчика принято в ремонт согласно приемо-сдаточного акта (ПСА) и технического акта приемки ВС Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217 для выполнения капитального ремонта, составленных в присутствии представителя Заказчика и подписанных им - 14.07.2020 г. (п. 5.2. Договора).

Счет № 53 от 29.06.2020 г. получен заказчиком 29.06.2020 г.

Следовательно, аванс, предусмотренный пп. 3.3.2. Договора, должен был быть перечислен Исполнителю до 13.08.2020 г. включительно. Однако, в нарушение п.п. 3.3.2. Договора, оплата Заказчиком произведена только 23.12.2020 г. (пл./поручение № 11557).

Следовательно, просрочка по оплате аванса в размере 30 % стоимости ремонта, предусмотренного пп. 3.3.2. Договора, составила 132 дня (период с 14.08.2020 г. по 23.12.2020 г. включительно).

Таким образом, размер неустойки (пени), предусмотренной п. 9.3. Договора, за нарушение сроков оплаты авансового платежа, предусмотренного п.п. 3.3.2 Договора, составляет 15 198,48 (пятнадцать тысяч сто девяносто восемь и 48 копейки) рублей (1 151 400 руб. x 0,01% x 132 дн. = 15 198,48 рублей).

В соответствии с пп. 3.3.3. Договора окончательный расчет за произведенные работы производится заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании работ и получения счета на проведение окончательного расчета.

Пунктом 3.1 Договора установлено, что стоимость работ по ремонту ВС на дату заключения Договора составляет 3 838 000,00 (три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей.

Пунктом 3.6. Договора предусмотрено, что в стоимость ремонта ВС включены все расходы необходимые для выполнения работ, предусмотренных ремонтной документацией, кроме работ, перечень которых приведен в указанном пункте, стоимость которых не входит в стоимость ремонта и которые оплачиваются Заказчиком дополнительно.

Договором предусмотрено, что перечень дополнительных работ, не предусмотренных типовой ремонтной документацией, их стоимость, порядок оплаты и срок выполнения согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях (п. 2.3. Договора).

Следовательно, окончательный расчет за проведенные Исполнителем ремонтные работы, предусмотренные типовой ремонтной документацией и включенные в стоимость ремонта ВС на дату заключения Договора (п. 3.1. Договора), без учета стоимости проведенных дополнительных работ (п. 2.3., п. 3.6. Договора), должен был быть произведен Заказчиком в соответствии с п. 3.3.3. Договора - в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании работ и получения счета на проведение окончательного расчета.

Счет за ремонт ВС Заказчика, по договоренности сторон, был выставлен один на дату заключения Договора, на всю стоимость ремонтных работ, без учета стоимости дополнительных работ (счет № 53 от 29.06.2020 г., получен заказчиком 29.06.2020 г.).

06.11.2020 г., в адрес ПАО «ВАСО», было направлено письмо исх. № 88АС (получено заказчиком 09.11.2020 г.), о завершении на ВС Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217, принадлежащем Заказчику, капитального ремонта и выполнении испытательного полета, а так же, сообщалось о необходимости сообщения даты прибытия тех.состава для приемки ВС после проведенного капитального ремонта.

Однако ответа на письмо ООО «АВИАСПЕКТР» от 06.11.2020 г. исх. № 88АС от Заказчика не поступило. 16.11.2020 г. в адрес ПАО «ВАСО» было повторно направлено аналогичное письмо исх. № 93АС от 16.11.2020 г. (получено Заказчиком 16.11.2020 г.).

Следовательно, окончательный расчет за выполненные работы, а именно 1 535 200,00 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи двести) рублей, без учета стоимости проведенных дополнительных работ, должен был быть произведен ПАО «ВАСО» до 21.12.2020 г. включительно. Однако, в нарушение п.п. 3.3.3. Договора, оплата Заказчиком была произведена только 22.06.2021 г. (платежное поручение № 3977 от 22.06.2021 г.).

Следовательно, просрочка по оплате стоимости ремонта, предусмотренного пп. 3.3.3. п. 3.3. Договора, составила 183 дня (период с 22.12.2020 г. по 22.06.2021 г. включительно).

Таким образом, размер неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.п. 3.3.3. п. 3.3. Договора, составляет 28 094,16 (двадцать восемь тысяч девяносто четыре и 16 копеек) руб. (1 535 200,00 руб. x 0,01% x 183 дн.).

На основании изложенного выше, общий размер неустойки, предусмотренной п. 9.3. Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., за ненадлежащее исполнение Заказчиком принятых на себя договорных обязательств по оплате, предусмотренных п. 3.3. Договора, на момент предъявления претензии составляет 61 254,48 (шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре и 48 копеек) рубля.

2.         Согласно условий заключенного Договора Исполнитель – ООО «АВИАСПЕКТР» помимо капитального ремонта ВС Заказчика – ПАО «ВАСО», выполняет необходимые дополнительные работы, не предусмотренные типовой ремонтной документацией, без проведения которых дальнейший ремонт ВС невозможен.

Стоимость, порядок оплаты и срок выполнения дополнительных работ согласовывается сторонами в дополнительных соглашениях к Договору (п. 2.3. Договора).

Так, в соответствии с п. 3.6. Договора не входят в стоимость ремонта и оплачиваются Заказчиком дополнительно следующие работы: - выполнение доработок ВС по бюллетеням промышленности, согласованным с Заказчиком; - дополнительные затраты на ремонт ВС, в связи с его неудовлетворительным состоянием по результатам дефектации; - продление ресурсов и сроков службы ВС, агрегатов; - ремонт пассажирского оборудования; - замена агрегатов и комплектующих изделий, выработавших назначенный ресурс, агрегатами из фонда Исполнителя и проч.

Пунктом 3.2. Договора предусмотрено, что в случае изменения стоимости ремонта сумма Договора устанавливается сторонами дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора.

В процессе выполнения ремонтных работ на ВС Заказчика, Исполнителем была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ, не предусмотренных типовой ремонтной документацией, без проведения которых дальнейший ремонт ВС невозможен.

О необходимости проведения дополнительных работ при ремонте ВС и их согласовании с Заказчиком Исполнитель уведомлял Заказчика письменно (письма от 11.09.2020 г. № 66АС, от 16.09.2020 г. № 308, от 18.09.2020 г. № 313, от 24.09.2020 г. № 71АС, от 01.10.2020 г. № 77АС, от 25.09.2020 г. № 323, от 29.09.2020 г. № 325, от 05.10.2020 г. № 336, от 15.10.2020 г. № 345, от 16.10.2020 г. № б/н, от 06.11.2020 г. № 88АС, от 16.11.2020 г. № 93АС).

Письмами № 1429 от 14.09.2020 г., № 1466 от 21.09.2020 г., № 1492 от 24.09.2020 г., № 1538 от 02.10.2020 г., № 1544 от 05.10.2020 г., № 1550 от 06.10.2020 г., № 1592 от 15.10.2020 г., № 85 от 22.10.2020 г., направленными в адрес ООО «АВИАСПЕКТР», Заказчик подтверждал необходимость проведения дополнительных работ на ВС Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217, за дополнительную плату за счет ПАО «ВАСО».

Основным Договором предусмотрено, что порядок оплаты дополнительных работ, согласовывается сторонами в дополнительном соглашении (п. 2.3. Договора).

На основании достигнутых договоренностей ООО «АВИАСПЕКТР» выставило и направило в адрес Заказчика счета на оплату части произведенных и согласованных с Заказчиком дополнительных работ (счет № 65 от 07.09.2020 г. на сумму 80 000 рублей отправлен ПАО «ВАСО» 07.09.2020 г., счет № 69 от 25.09.2020 г. на сумму 600 000 рублей отправлен ПАО «ВАСО» 25.09.2020 г.).

На основании письма ПАО «ВАСО» № 1538 от 02.10.2020 г. ООО «АВИАСПЕКТР» согласовало условия, подготовило и направило в адрес Ответчика дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. к Договору № У015/20-0767 о проведении, в связи с производственной необходимостью, дополнительных работ на самолете Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, на общую сумму 680 000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

В сопроводительном письме (исх. № 335 от 05.10.2020 г.) к указанному дополнительному соглашению ООО «АВИАСПЕКТР» указало, что выставленные ранее счета № 65 от 07.09.2020 г. и № 69 от 25.09.2020 г., аннулируются, т.к. указанные в счетах дополнительные работы включены в дополнительное соглашение № 1 к основному Договору и выставлен новый общий, для этих работ, счет № 71 от 05.10.2020 г.

Пунктом 5.6. основного Договора предусмотрено, что Заказчик подписывает соответствующее дополнительное соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

Дополнительное соглашение № 1 от 05.10.2020 г. и счет № 71 от 05.10.2020 г. были получены ПАО «ВАСО» 05.10.2020 г. (эл.письмо от 05.10.2020 г.), однако, Заказчиком подписаны не были и не были оплачены.

15.10.2020 г. ООО «АВИАСПЕКТР» было подготовлено и отправлено в адрес ПАО «ВАСО» дополнительное соглашение № 2 о проведении, в связи с производственной необходимостью и на основании писем Заказчика, дополнительных работ на самолете Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217. Общая стоимость дополнительных ремонтных работ, указанных в данном дополнительном оглашении, составила 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Выставлен счет № 72 от 15.10.2020 г. на оплату указанных в данном дополнительном соглашении работ.

Указанное дополнительное соглашение и соответствующий счет на оплату получено Ответчиком 15.10.2020 г.

В нарушение п. 5.6 Договора дополнительное соглашение № 2 от 15.10.2020 г. Заказчиком не было подписано. Счет № 72 от 15.10.2020 г. не оплачен.

В соответствии с нормами п. 2.3. основного Договора, Дополнительными соглашениями № 1 от 05.10.2020 г. и № 2 от 15.10.2020 г. предусмотрено, что оплата указанных в дополнительных соглашениях работ производится на основании выставленного Исполнителем и направленного Заказчику счета, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания соответствующего соглашения и выставления счета.

Однако, в нарушение принятых при подписании Договора, обязательств ПАО «ВАСО» полученные Дополнительные соглашения не подписало и счета не оплатило.

Так как Договор № У015/20-0767 был заключен Сторонами в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующего гражданского законодательства РФ, ООО «АВИАСПЕКТР», в целях надлежащего исполнение принятых на себя ремонтных обязательств и соблюдения сроков ремонта ВС, предусмотренных Договором, а так же для исключения любой возможности попадания в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, осуществляло ремонтные работы на ВС Заказчика за счет собственных средств.

В рамках урегулирования имеющихся вопросов (оплаты основных работ, подписания дополнительных соглашений о проведенных дополнительных работах и их оплате) ООО «АВИАСПЕКТР» неоднократно путем направления в адрес ПАО «ВАСО» писем (напоминание от 16.09.2020 г. исх. № 308, претензия от 29.09.2020 г., письмо 15.12.2020 г. исх. № 410 и проч.), осуществления телефонных переговоров и направления писем-напоминаний по электронной почте, пыталось разрешить сложившуюся ситуацию.

В декабре 2020 г., на основании писем Исполнителя о завершении капитального ремонта на ВС Ан-2 заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217 (письма исх. № 88АС от 06.11.2020 г., № 93АС от 16.11.2020 г.), в ООО «АВИАСПЕКТР» прибыл представитель Заказчика - ПАО «ВАСО» - ФИО3 (доверенность № 37 от 19.06.2020 г.) для принятия ВС после проведенного капитального ремонта.

Согласно приемо-сдаточного акта (ПСА), подписанного представителем Заказчика – ФИО3, ВС Ан-2 заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, был принят из ремонта 24.12.2020 г. без претензий по объему выполненных на ВС работ, качеству результата работ и срокам их выполнения.

25.12.2020 г. представитель Заказчика подписал Акт приема-сдачи дополнительных работ, выполненных при выполнении в процессе проведения капитального ремонта самолета, согласно технологии ремонта, утвержденного разработчиком ВС, без проведения которых, ремонт ВС был невозможен.

Стоимость всех выполненных дополнительных работ, увеличивающих стоимость ремонта ВС, составила 1 059 996,00 (один миллион пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть и 00) рублей.

Указанные в Акте дополнительные работы также были полностью приняты представителем Заказчика, без претензий по объему их выполнения, качеству результата работ и срокам их выполнения.

На момент приемки ВС из ремонта, направленные ранее в адрес Заказчика дополнительные соглашения № 1 от 05.10.2020 г. и № 2 от 15.10.2020 г. о согласованных ранее, своевременно проведенных Исполнителем и принятых представителем Заказчика дополнительных работах, без проведения которых ремонт ВС был невозможен, в адрес ООО «АВИАСПЕКТР», как Исполнителя указанных работ, с подписью Заказчика, не поступали, работы не были оплачены.

14.01.2021 г. ООО «АВИАСПЕКТР», по электронной почте, был получен проект дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2020 г. в редакции Заказчика - ПАО «ВАСО».

В данном проекте Заказчик – ПАО «ВАСО» предлагал изменить ряд условий заключенного Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., а именно: - изменение стоимости работ, указанной в п. 3.1., в сторону их увеличения за счет включения в нее стоимости произведенных ООО «АВИАСПЕКТР» дополнительных работ, предусмотренных п. 3.6. Договора; - изменение п. 11.1 Договора, в части продления срока его действия до 31.12.2021 г..

Письмом от 02.02.2021 г. исх. № 27 ООО «АВИАСПЕКТР» уведомило ПАО «ВАСО» о неприемлемости предложенных изменений, так как они противоречат условиям заключенного Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., в частности п. 3.6. Договора, в котором указано, что в стоимость ремонта не включены дополнительные работы (перечень их приведен в п. 3.6.), которые оплачиваются Заказчиком отдельно, на основании Дополнительного соглашения (п. 2.3 Договора). Следовательно, изменение стоимости работ, указанной в п. 3.1., в сторону их увеличения за счет включения в нее стоимости произведенных ООО «АВИАСПЕКТР» дополнительных работ, предусмотренных п. 3.6. Договора, будет противоречить существенным условиям Договора, согласованным сторонами ранее при заключении договора на электронной площадке.

Кроме того, в дополнительном соглашении № 1 от 25.12.2020 г., в редакции Заказчика, были указаны работы, которые ООО «АВИАСПЕКТР», в соответствии с указаниями ПАО «ВАСО» не производило (проверка радиомаяка тестером Т406Н, замена заборника воздуха МШ2002-282).

В письме исх. № 27 от 02.02.2021 г. ООО «АВИАСПЕКТР» указало, что полностью выполнило принятые на себя обязательства по качественному ремонту ВС АН-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, принадлежащему ПАО «ВАСО», в сроки оговоренные сторонами в Договоре, с учетом времени приостановки ремонтных работ и времени проведения необходимых дополнительных ремонтных работ, при этом ПАО «ВАСО» существенно нарушает обязательства по оплате, в связи с чем, ООО «АВИАСПЕКТР» обоснованно считает неприемлемым, в сложившейся ситуации, предложенный ПАО «ВАСО» вариант изменения п. 11.1 Договора, в части продления срока его действия до 31.12.2021 г..

Для урегулирования сложившейся ситуации, Сторонами неоднократно проводились телефонные переговоры. В результате ООО «АВИАСПЕКТР», по просьбе Заказчика, подготовило, в очередной редакции, и направило Заказчику по электронной почте (с досылом почтой РФ), дополнительные соглашения № 1, 2, 3 от 25.12.2020 г.. (в этот раз Заказчик указывал на необходимость разделение перечня выполненных и принятых представителем Заказчика, по Акту приема-передачи дополнительных работ от 25.12.2020 г., дополнительных работ и включения их в каждое из дополнительных соглашений, с таким учетом, чтобы общая сумма каждого из дополнительных соглашений не превышала 400 000 (четыреста тысяч) рублей).

Таким образом, ООО «АВИАСПЕКТР» сформировало и подготовило по просьбе Заказчика, следующие дополнительные соглашения о проведенных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных ремонтных работах на самолете Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, без проведения которых, ремонт ВС был бы невозможен:

- Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2020 г., на сумму 356 496, 00 (триста пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ;

- Дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2020 г., на сумму 343 500 (триста сорок три тысячи пятьсот) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ;

- Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2020 г., на сумму 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ.

На основании Акта приема-сдачи дополнительных работ от 25.12.2020 г., подписанного представителем ПАО «ВАСО», и вновь сформированных дополнительных соглашений № 1, 2, 3от 25.12.2020 г., ООО «АВИАСПЕКТР», подготовило и направило в адрес ПАО «ВАСО» соответствующие Акты №№ 91, 92, 93 от 25.12.2020 г. о стоимости выполненных дополнительных работ и выставило соответствующие счета к ним (№ 89, 90, 91 от 25.12.2020 г.)..

Дополнительные соглашения № 1, 2, 3 от 25.12.2020 г., Акты №№ 91, 92, 93 от 25.12.2020 г. и соответствующие им счета № 89, 90, 91 от 25.12.2020 г. были получены ПАО «ВАСО» 02.02.2020 г. - по эл.почте, оригиналы отправлены почтой РФ и получены согласно почтового уведомления 08.02.2021 г.. (Дополнительные соглашения направлены в адрес Заказчика эл.почтой повторно24.02.2021 г., в связи с неответом).

Пунктом 5.6. основного Договора предусмотрено, что Заказчик подписывает соответствующее дополнительное соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

Однако, в нарушение п. 5.6. Договора, Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2020 г., полученное ПАО «ВАСО» по эл.почте 02.02.2021 г., согласно почтового уведомления – 08.02.2021 г., было подписано со стороны ПАО «ВАСО» лишь 16.04.2021 г.

Дополнительные соглашения № 2 и № 3 от 25.12.2020 г., также полученные Заказчиком (по эл.почте 02.02.2021 г., согласно почтового уведомления – 08.02.2021 г.), с подписью Заказчика до настоящего времени в адрес ООО «АВИАСПЕКТР» не поступили.

Согласно п. 3. указанных Дополнительных соглашений оплата работ поименованных в них производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем и направленных Заказчику счетов на оплату, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня их получения.

Следовательно, оплата дополнительных работ указанных в Дополнительных соглашениях № 1, 2, 3 от 25.12.2020 г. должна была быть произведена Заказчиком до 02.03.2021 г. включительно.

Оплата произведенных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ, указанных в Дополнительном соглашении № 1 от 25.12.2020 г. произведена Заказчиком, в нарушение п. 3. указанного Дополнительного соглашения, лишь 22.09.2021 г. (платежное поручение № 6267 от 22.09.2021 г.). Просрочка платежа составила 204 (двести четыре) календарных дня.

Оплата произведенных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ, указанных в Дополнительных соглашения № 2 и № 3 от 25.12.2020 г. до настоящего времени не произведена.

Таким образом, задолженность Заказчика - ПАО «Ил» (до 01.11.2021 г. – ПАО «ВАСО») перед ООО «АВИАСПЕКТР» за выполненные дополнительные работы, произведенные на ВС Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, по дополнительным соглашениям №№ 2, 3 от 25.12.2020 г., заключенных в рамках исполнения Договор № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., составляет 703 500 (семьсот три тысячи пятьсот) рублей, в том числе:

- по Дополнительному соглашению № 2 от 25.12.2020 г., в размере 343 500 (триста сорок три тысячи пятьсот) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ;

- Дополнительному соглашению № 3 от 25.12.2020 г., в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ.

В связи с тем, что указанные в дополнительных соглашениях работы, выполняемые ООО «АВИАСПЕКТР» при ремонте ВС Заказчика были предварительно согласованы сторонами в направляемых друг другу письмах, а потом включены в дополнительные соглашения, полученные Заказчиком, обоснованно считаем, что неоднократным изменением Заказчиком условий дополнительных соглашений, их не подписание в срок, предусмотренный п. 5.6. Договора и не направлением их Исполнителю, Заказчик намеренно затягивал процесс оплаты и сознательно уклоняется от их оплаты, нарушая тем самым законные права Общества на получение оплаты за произведенные работы.

Пунктами 9.1., 9.2. заключенного Договора предусмотрено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны несут ответственность на основании действующего гражданского законодательства РФ, ответственность сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии

Заказчиком нарушены сроки оплаты, предусмотренные п. 3. Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3 от 25.12.2020 г..

ООО «АВИАСПЕКТР» неоднократно письменно обращалось к Заказчику - ПАО «ВАСО» (с 01.11.2021 г. – ПАО «Ил») с требованием о погашении имеющейся задолженности. Последняя из направленных претензий (исх. № 227 от 26.07.2022 г.) была получена ПАО «Ил», согласно почтового уведомления, 05.08.2022 г., однако имеющаяся задолженность до настоящего момента не погашена, ответа на полученную претензию в адрес Исполнителя не поступило.

Пунктом 9.3. основного Договора предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки платежа в размере 0,01 % от неоплаченной суммы.

Так как оплата произведенных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ, указанных в Дополнительном соглашении № 1 от 25.12.2020 г. произведена Заказчиком, лишь 22.09.2021 г. (платежное поручение № 6267 от 22.09.2021 г.), то просрочка платежа составила 204 (двести четыре) календарных дня.

Таким образом, на основании изложенного, руководствуясь пунктами 3, 7 Дополнительного соглашения, п. 9.3. основного Договора, следует, что размер неустойки (пени) за нарушение сроков оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ, указанных в дополнительном соглашении № 1 от 25.12.2020 г., составляет 7 272,52 (семь тысяч двести семьдесят два и 52 коп.) рубля (356 496 руб. x 0,01% x 204 дн. = 7 272,52 рубля).

В связи с тем, что задолженность Заказчика за выполненные Исполнителем дополнительные работы, указанные в Дополнительных соглашениях №№ 2, 3 от 25.02.2020 г. (получены Заказчиком почтой РФ 08.02.2021 г.), в общей сумме 703 500 (семьсот три тысячи пятьсот) рублей, на настоящий момент не оплачены, неустойка (пени) за нарушение сроков оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ, рассчитанная в соответствии и на основании п.п. 3, 7 Дополнительных соглашений, п. 9.3 основного Договора, составляет:

- по дополнительному соглашению № 2 от 25.12.2020 г.: оплата в размере 343 500 (триста сорок три тысячи пятьсот) рублей, должна была быть произведена до 02.03.2021 г. включительно, следовательно, просрочка оплаты, на дату предъявления претензии (26.07.2022 г., включительно), составляет 512 календарных дней, таким образом, размер неустойки составляет – 17 587,20 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь и 20 коп.) рублей (343 500 руб. x 0,01% x 512 дн. = 17 587,20 рублей).

- по дополнительному соглашению № 3 от 25.12.2020 г.: оплата в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей, должна была быть произведена до 02.03.2021 г. включительно, следовательно, просрочка оплаты, на дату предъявления претензии (26.07.2022 г., включительно), составляет 512 календарных дней, таким образом, размер неустойки составляет – 18 432 восемнадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля (360 000 руб. x 0,01% x 512 дн. = 18 432 рубля).

Таким образом, общий размер неустойки, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате произведенных Исполнителем и принятых Заказчиком дополнительных работ по дополнительным соглашениям №№ 1, 2, 3 от 25.12.2020 г., на дату предъявления претензии (26.07.2022 г. включительно), составляет 43 291,72 (сорок три тысячи двести девяносто один и 72 коп.) рубль.

3.         В ходе телефонных переговоров, проводимых с целью урегулирования вопроса неисполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору № У015/20-0767, со стороны последнего была озвучена причина неисполнения своих обязательств по оплате – это отсутствие у Заказчика оригинала банковской гарантии, полученной ООО «АВИАСПЕКТР» в целях заключения Договора № У015/20-0767.

Однако считаем возможным обратить Ваше внимание на тот факт, что указанный выше Договор заключался в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и действующего гражданского законодательства РФ.

В соответствии с п. 3.1. ст. 3, п. 20 ст. 3.2. Федерального закона № 223-ФЗ конкурентные закупки осуществляются, в том числе, путем запроса котировок в электронной форме, под которым понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

Согласно п. 29. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

В документах Заказчика, а именно, п. 4.20.9. подразд. 4.20. разд. 4 «Заключение договора» «Извещения об осуществлении закупки по запросу котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту воздушного судна (ВС) самолет АН-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217 (далее – ВС), согласно технологии ремонта, утвержденного разработчиком ВС» (далее - Извещение о проведении запроса котировок), предусмотрено, что лицо, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения проекта договора направляет заказчику, в том числе, следующие документы: (1) подписанный со своей стороны проект договора; (2) обеспечение исполнения договора (если такое требование было установлено в соответствии с п. 34 информационной карты) в размере, порядке и форме, предусмотренными подразделом 4.21 с учетом, при необходимости, требований к выполнению антидемпинговых мероприятий.

Пунктом 34 Информационной карты (раздел 6 «Информационная карта» Извещения о проведении запроса котировок) предусмотрено, что обеспечение исполнения договора требуется, в размере 60% от цены договора, НДС не облагается.

В п. 4.21.3. подразд. 4.21. «Обеспечение исполнения договора» Извещения о проведении запроса котировок, предусмотрено, что документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора, должен быть предъявлен заказчику до момента заключения договора в сроки, предусмотренные п. 4.20.9. Извещения о проведении запроса котировок.

Согласно п. 4.20.12 подразд. 4.20. Извещение о проведении запроса котировок, Договор по итогам закупки заключается только после предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, предусмотренными извещением, документацией о закупке.

В соответствии с п. 4.21.4. подразд. 4.21. «Обеспечение исполнения договора» Извещения о проведении запроса котировок, обеспечение исполнения договора может быть предоставлено:

- в виде безотзывной независимой (банковской) гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным в п.4.21.6.;

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет заказчика в соответствии с требованиями проекта договора (разд. 8).

Выбор способа предоставления обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки (Исполнителем по Договору) самостоятельно.

ООО «АВИАСПЕКТР» было признано победителем запроса котировок на оказание услуг по производству капитального ремонта ВС самолета АН-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, принадлежащего ПАО «ВАСО».

Одним из условий заключения указанного договора, в соответствии с указанными выше нормами, было предоставление Исполнителем – ООО «АВИАСПЕКТР» Заказчику – ПАО «ВАСО» обеспечения исполнения договора (п. 12.1. Договора).

Для обеспечения исполнения обязательств по Договору Общество получило и представило Заказчику оригинал банковской гарантии № ЮЛ/15-20/БГ-1, выданной ПАО Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» (ПАО Ставропольпромстройбанк), уплатив банку соответствующее комиссионное вознаграждение в размере 69 084,00 (шестьдесят девять тысяч восемьдесят четыре) рубля.

После чего, Договор № У015/20-0767 был подписан сторонами и самолет ВС АН-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, принадлежащий ПАО «ВАСО», поступил для проведения капитального ремонта в ООО «АВИАСПЕКТР», о чем, комиссионно, в присутствии представителей сторон, составлен приемо-сдаточный акт.

Из изложенного выше следует, что Договор признан обеими сторонами заключенным, действующим и обязательным к исполнению.

Тем не менее, в целях урегулирования возникшего вопроса и получения оплаты по исполненному Договору, ООО «АВИАСПЕКТР» запросило в банке и 18.09.2020 г. повторно направило Заказчику, курьерской службой Major Express, оригинал банковской гарантии (экспедиторская расписка № 14 3019 3381 от 18.09.2020 г.), о чем уведомило ПАО «ВАСО» письмом, направленным на адрес электронной почты Заказчика - admin@air.vrn.ru. Отправление доставлено адресату 21.09.2020 г. Стоимость отправки составила 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей.

Однако Заказчик, в нарушение п. 3.3. Договора, произвел оплату, за выполненные Исполнителем работы (без оплаты дополнительных работ) только 23.12.2020 г. (оплата авансов по п. 3.3.1. и п. 3.3.2. Договора соответственно) и 22.06.2021 г. (окончательный расчет по п. 3.3.3. Договора, без оплаты стоимости дополнительных работ).

Действуя подобным образом, Заказчик злоупотребил своими правами, умышленно затягивая процесс оплаты, тем самым нарушив права и законные интересы ООО «АВИАСПЕКТР».

Таким образом, ООО «АВИАСПЕКТР» обоснованно, в соответствии с нормами ст.ст. 15, 393 ГК РФ, считает, что понесенные обществом расходы в общей сумме 70 264 (семьдесят тысяч двести шестьдесят четыре) рубля (из которых: - 69 084,00 (шестьдесят девять тысяч восемьдесят четыре и 00 коп.) рубля - уплата банку вознаграждения за предоставление банковской гарантии № ЮЛ/15-20/БГ-1 от 19.06.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств по Договору № У015/20-0767 и - 1 180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей - стоимость расходов по дополнительной пересылке 18.09.2020 г. Заказчику банковской гарантии), являются убытками (реальным ущербом) Исполнителя, и подлежат возмещению за счет Заказчика – ПАО «Ил» (с 01.11.2021 г. правопреемник ПАО «ВАСО»).

4.         Согласно приемо-сдаточного акта, подписанного представителем ПАО «ВАСО» ФИО3 (доверенность № 37 от 19.06.2020 г.), ВС Ан-2 заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, был принят из ремонта 24.12.2020 г.

Однако, в связи тем, что оплата за произведенные по Договору № У015/20-0767 работы по капитальному ремонту ВС Ан-2, включая дополнительные работы, не была произведена, а также, в связи с отсутствием у Заказчика сертификата летной годности гражданского воздушного судна (далее - СЛГ) и просьбой Заказчика, ВС Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217 был принят ООО «АВИАСПЕКТР» на ответственное хранение, с подписанием сторонами соответствующего Акта приемки ВС от 25.12.2020 г.. Данный Акт получен уполномоченным представителем ПАО «ВАСО» ФИО3 - 25.12.2020 г..

При принятии Заказчиком ВС после проведенного капитального ремонта и передачи ВС на хранение исполнителю (25.12.2020 г.) сторонами была достигнута устная договоренность о следующем:

- о безвозмездном хранении Исполнителем ВС Заказчика в течение двух месяцев с даты принятия ВС на ответственное хранение (т.е. с 25.12.2020 г. до 25.02.2021 г.), с целью получения Заказчиком СЛГ на ВС для его убытия и погашения Заказчиком задолженности по оплате за все выполненные Исполнителем работы на ВС;

- об осуществлении ООО «АВИАСПЕКТР» необходимого периодического технического обслуживания ВС Заказчика, в указанный период, за счет Заказчика, в соответствии с Регламентом технического обслуживания самолета Ан-2 при его хранении.

Кроме того, стороны согласовали, что в случае не выполнения Заказчиком достигнутых договоренностей за указанный период, стороны заключат договор хранения и технического обслуживания ВС Заказчика на территории ООО «АВИАСПЕКТР» по соответствующим тарифам общества, с оплатой технического обслуживания ВС с момента фактического принятия его на хранение, т.е. с 25.12.2020 г..

В связи с тем, что задолженность за выполненные по Договору № У015/20-0767 работы по капитальному ремонту ВС Ан-2, включая дополнительные работы, не была произведена до 25.02.2021 г., ООО «АВИАСПЕКТР» подготовило договор хранения и технического обслуживания ВС (договор № 10 от 25.02.2021 г.) и направило его почтой, в том числе эл.почтой, в адрес ПАО «ВАСО» с сопроводительным письмом от 25.02.2021 г. исх. № 51.

Договор № 10 от 25.02.2021 г. получен ПАО «ВАСО» эл.почтой - 25.02.2021 г.; почтой РФ, согласно уведомления о вручении, – 03.03.2021 г. (До настоящего времени подписанный со стороны Заказчика экземпляр указанного договора в адрес ООО «АВИАСПЕКТР» не поступил).

В связи с не поступлением от Заказчика подписанного договора хранения и технического обслуживания ВС, ООО «АВИАСПЕКТР» неоднократно (более 10 раз) направляло в адрес Заказчика письма и претензии с напоминанием, в том числе, о необходимости подписания и направления в адрес общества полученного Заказчиком Договора хранения и технического обслуживания ВС № 10 от 25.02.2021 г. и погашении всей имеющейся задолженности (письмо от 25.02.2021 г. № 51, эл.письмо от 02.03.2021 г, претензии исх. № 89 от 02.04.2021 г., эл.письма от 12.05.2021 г., от 13.05.2021 г., от 17.05.2021 г., письма исх. № 142 от 14.05.2021 г., исх. № 219 от 12.07.2021 г., исх. № 268 от 15.09.2021 г., исх. № 308 от 16.09.2020 г., исх. № 310 от 15.10.2021 г., исх. № 24 от 27.01.2022 г., иск исх. № 1641 от 27.05.2022 г., исх. № 227 от 26.07.2022 г.).

В письме-ответе на претензию ООО «АВИАСПЕКТР» от 15.09.2021 г. исх. № 268 ПАО «ВАСО» указывало, в том числе, на отсутствие у ООО «АВИАСПЕКТР» оснований для взыскания расходов, связанных с хранением и техническим обслуживанием ВС, ввиду отсутствия договорных обязательств между обществами, иные требования ООО «АВИАСПЕКТР» изложенные в претензии Общества ПАО «ВАСО» не оспаривает (исх. № 232/237-16юр от 23.09.2021 г.).

Письмом от 15.10.2021 г. исх. № 310 ООО «АВИАСПЕКТР», по существу изложенных Заказчиком в ответе на претензию доводов (исх. № 232/237-16юр от 23.09.2021 г.), обоснованно пояснило о заблуждении Заказчика по данному вопросу, а именно.

Стоимость авиатоплива использованного при ТО ВС (бензин марки Б-91/115, масло марки МС-20) в указанные периоды составляет: бензин Б-91/115 – 140,42 руб./литр; масло МС-20 – 450,35 руб./литр (справка от 16.05.2022 г. о стоимости бензина и масла).

Согласно Перечня выполнения технического обслуживания при хранении для поддержания в исправном состоянии самолета Ан-2 Т, зав.№ 1Г20060, борт. № RA-71217, за отчетный период с 26.12.2020 г., на дату предъявления претензии (26.07.2022 г.) на указанном ВС фактически находящийся на хранении в ООО «АВИАСПЕКТР» с 25.12.2020 г., были выполнены работы предусмотренные ч. 2 п. 3.02.00.00, ч. 2 п. 3.03.01.00, ч. 2 п. 3.04.00.00 - п. 4.00.00 Регламента технического обслуживания самолета Ан-2, в объеме 721 нормо/час, а также затрачено необходимое авиатопливо (бензин Б-91/115 – 295 литров, масло МС-20 – 240 литров).

Следовательно, задолженность Заказчика за предоставленные услуги по ТО и хранению ВС по состоянию 26.07.2022 г. включительно (на дату предъявления последней полученной и неоплаченной Заказчиком претензии) составляет – 1 937 607,90 рублей (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот семь рублей и 90 коп.), из которых:

стоимость услуг по обеспечению хранения самолета Ан-2Т, борт. RA-71217 на территории общества за период с 25.02.2021 г. по 26.07.2022 г. (517 календарных дня/суток) составляет 961 200 (девятьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей, из которых:

- за период 25.02.2021 г. по 23.09.2021 г. (211 календарных дней/суток)- составила 379 800 (триста семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей (из расчета - 1800 р./сутки*211 кал.дня/суток);

- за период с 24.09.2021 г. по 26.07.2022 г. включительно (306 календарных дней) – составила 581 400 (пятьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей (из расчета - 1 900 р/день*306 кал.дня/суток).

2. стоимость услуг по осуществлению ТО ВС при хранении для поддержания его в исправном состоянии (включая авиатопливо) за период с 26.12.2020 г. по 26.07.2022 г. (721 нормо/час) составляет 976 407,90 рублей (девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста семь и 90 копеек), из которых:

А) стоимость ТО при хранении ВС за период с 26.12.2020 г. по 26.07.2022 г. (721 нормо/ч., без учета авиатоплива) составляет 826 900 (восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот) рублей, из которых:

- за период с 26.12.2020 г. по 23.09.2021 г. (383 нормо/часа) составила – 421 300 (четыреста двадцать одна тысяча триста) рублей (из расчета 383 норма/ч.*1100 руб./нормо/ч.);

- за период с 24.09.2021 г. по 26.07.2022 г. (338 нормо/часов) составила – 405 600 (четыреста пять тысяч шестьсот) рублей;

Б) стоимость авиатоплива (бензин Б-91/115 и масло МС-20) составила – 149 507,90 (сто сорок девять тысяч пятьсот семь и 90 коп.) рублей, из которых:

- бензин Б-91/115 (295 л.) – 41 423,90 (сорок одна тысяча четыреста двадцать три и 90 коп.) рубля (из расчета: 295 л.*140,42 руб./литр);

- масло МС-20 (240 л.) – 108 084 (сто восемь тысяч восемьдесят четыре) рубля (из расчета: 240 л.*450,35 руб./литр).

Пунктом 9.5. Договора, предусмотрен досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – не более 30 календарных дней.

Письмами, напоминаниями и претензиями направленными на эл.почту и на почтовый адрес, ООО «АВИАСПЕКТР» неоднократно напомнило ПАО «ВАСО» о необходимости произвести оплату, по заключенному Договору № У015/20-0767, Дополнительным соглашениям № 2 и № 3 от 25.12.2020 г., в том числе оплатить неустойки, а также произвести оплату за оказываемые Исполнителем услуги по хранению и ТО ВС Заказчика. (исх. № 325 от 29.09.2020 г., исх. № 89 от 02.04.2021 г., исх. № 219 от 12.07.2021 г., исх. № 268 от 15.09.2021 г., исх. № 308 от 16.09.2020 г., исх. № 310 от 15.10.2021 г., исх. № 24 от 27.01.2022 г.; исх. № 227 от 26.07.2022 г.).

Однако оплаты не последовало и до настоящего времени денежные средства на счет Исполнителя не поступили.

27.05.2022 г. ООО «АВИАСПЕКТР» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с соответствующем исковым заявлением исх. № 1641(дело № А14-9308/2022, судья Завидовская Е.С.). 17.06.2022 г. во исполнение Определения суда от 16.06.2022 г. ООО «АВИАСПЕКТР» направило уточнение к иску исх. № 184.

Определением от 19.07.2022 г. Арбитражный суд Воронежской области, на основании ст.ст. 35-37 АПК РФ, возвратил ООО «АВИАСПЕКТР» исковое заявление и приложенные к нему документы, в связи с неподсудностью спора данному арбитражному суду.

Все претензии и письма с указанием о необходимости исполнения договорных обязательств и погашения имеющейся задолженности, ООО «АВИАСПЕКТР», в соответствии с п. 11.5. Договора, направляло посредством электронной почты на все известные исполнителю электронные адреса Заказчика: admin@air.vrn.ru (указан в разделе 14 «Юридические адреса и реквизиты сторон» Договора), aon_vaso@mail.ru, umts-do@air.vrn.ru, info@air.vrn.ru, info@ilyushin.org, с последующим досылом отправленных электронной почтой оригиналов писем почтой РФ.

Каких-либо оповещений/уведомлений от Заказчика о невозможности своевременного исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны-Исполнителя, в адрес Исполнителя не поступало.

ООО «АВИАСПЕКТР» добросовестно и полностью выполнило принятые на себя обязательства по качественному ремонту ВС Ан-2, заводской номер 1Г20060, бортовой номер RA-71217, ПАО «ВАСО», в сроки предусмотренные сторонами в Договоре № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., с учетом времени приостановки ремонтных работ и времени проведения необходимых дополнительных ремонтных работ.

При этом встречные обязательства (обязательства по оплате) выполнялись Заказчиком с существенным нарушением предусмотренных и согласованных Сторонами сроков оплаты; дополнительные работы, согласованные с Заказчиком, выполненные Исполнителем при ремонте ВС и полностью принятые представителем Заказчика, оплачены частично; дополнительные соглашения № 2 и № 3 от 25.12.2020 г. о проведенных дополнительных работах на ВС, полученные Заказчиком, не подписаны, не направлены в адрес Исполнителя и не оплачены; хранение и ТО ВС не оплачено в полном объеме.

В связи с тем, что с 01.11.2021 г. ПАО «ВАСО» реорганизовано путем присоединения к ПАО «Ил» (уведомление о завершении реорганизации исх. № 89 от 09.11.2021 г.), то в соответствии с нормами ст.ст. 58, 55 ГК РФ, правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «ВАСО», в том числе по заключенному с ООО «АВИАСПЕКТР» Договору № У015/20-0767 от 22.06.2020 г., является ПАО «Ил».

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 15, 309, 310, 330, 393, 401, 421, 431, 779, 781 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Требование ООО «АВИАСПЕКТР» о взыскании неустойки за неисполнение Заказчиком обязательств по оплате основано на согласованных сторонами при заключении Договора № У015/20-0767 от 22.06.2020 г. условиях, а именно, на п. 3.3., п. 9.3. Договора и на нормах действующего законодательства РФ (ст.ст. 781, 309, 310, 330 ГК РФ).

Пунктом 3.3. Договора предусмотрено, что «ОПЛАТА стоимости Ремонта ВС производиться Заказчиком в рублях РФ, платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

3.3.1. Аванс в размере 30% стоимости Ремонта согласно п. 1 Договора, если иное не установлено Дополнительным соглашением, перечисляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения счета от Исполнителя.

3.3.2. 30 % - через 30 (тридцать) календарных дней после начала работ на основании выставленного счет.

3.3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента получения уведомления Исполнителя об окончании работ и счета на проведение окончательного расчета.».

Пунктом 9.3. Договора предусмотрено, что «за нарушение сроков ОПЛАТЫ Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки платежа в размере 0,01 % от неоплаченной суммы.».

Таким образом, при заключении Договора стороны согласовали условия о порядке оплаты (авансовые платежи) и ответственность за их нарушение (взыскание пени за каждый день просрочки платежа).

Договор № У015/20-0767 от 22.06.2020 г. был заключен Сторонами в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и действующего гражданского законодательства РФ. Проект заключенного Договора, в том числе формулировки его условий, был подготовлен и размещен Заказчиком на электронной площадке.

Таким образом, в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства РФ, разъяснениями Пленума ВС РФ, сложившейся судебной практики, условиями заключенного сторонами Договора, условия которого были подготовлены и предложены Заказчиком, ООО «АВИАСПЕКТР», как добросовестный Исполнитель, обоснованно требует с Ответчика – ПАО «Ил» взыскание неустойки (пени), в соответствии с п. 9.3. Договора, за ненадлежащее исполнение Заказчиком принятых на себя договорных обязательств по оплате, предусмотренных п. 3.3. Договора, в размере 61 254,48 (шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят четыре и 48 копеек) рубля.

В связи с чем, с ответчика в пользу истца суд взыскивает неустойку в размере 61 254, 48 руб.

Пунктом 5.6. Договора предусмотрено, что стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения Заказчиком.

Работы по капитальному ремонту ВС, выполненные Истцом, в рамках заключенного сторонами Договора, на самолете Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217 (далее – ВС), в том числе проведенных дополнительных работ, не предусмотренных типовой ремонтной документацией, без проведения которых дальнейший ремонт ВС был бы невозможен, были полностью приняты представителем Заказчика в момент приемки ВС из ремонта, сторонами подписан 24.12.2020 г. соответствующий ПСА (приемо-сдаточный акт) и дополнительно 25.12.2020 г. Акт приема-сдачи дополнительных работ, выполненных при выполнении капитального ремонта самолета Ан-2, заводской № 1Г20060, бортовой № RA-71217, согласно технологии ремонта, утвержденной разработчиком ВС, без проведения которых, ремонт ВС был невозможен.

Указанные в Акте дополнительные работы были полностью приняты представителем Заказчика 25.12.2020 г., без претензий по объему их выполнения и качеству результата работ.

Согласно приемо-сдаточного акта (ПСА), подписанного представителем Заказчика – ФИО3, ВС был принят из ремонта без претензий по объему выполненных на ВС работ, качеству результата работ и срокам их выполнения.

Принятые Заказчиком дополнительные работы были согласованы с Заказчиком до их проведения, о чем Заказчику направлялись соответствующие письма и направлялись соответствующие дополнительные соглашения, акты и счета на оплату, неоднократно переделываемые по просьбе Заказчика. (Изначальные дополнительные соглашения № 1 от 05.10.2020 г, дополнительное соглашение № 2 от 15.10.2020 г. и соответствующие им акты и счета, аннулированные по просьбе Ответчика, в связи с изменением дополнительных соглашений, имеются в материалах дела.)

Перечень дополнительных работ, их стоимость, порядок оплаты и срок выполнения дополнительных работ согласовывается сторонами в дополнительных соглашениях к Договору (п. 2.3. Договора).

Ответчик не отрицает тот факт, что Дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2020 г., (содержащее часть из перечня выполненных Истцом и принятых Ответчиком 25.12.2020 г. дополнительных работ, их стоимость и порядок оплаты), акт № 91 от 25.12.2020 г. и счет на оплату № 89 от 25.12.2020 г. к нему он получил по почте еще 08.02.2021 г., а так же подтверждает тот факт, что подписал его только 16.04.2021 г.

Дополнительные соглашения ответчиком получены, в нарушение п. 5.6 договора не подписаны, при этом не заявлено возражений, отказа от выполненных дополнительных работ, без проведения которых выполнение ремонта было невозможно, о чем заказчик был уведомлен и дал согласие на проведение дополнительных работ. Стоимость дополнительных принятых заказчиком работ им не оспорена, результат принят и имеет для заказчика потребительскую ценность, ввиду чего подлежит оплате.

В связи с изложенным, с ответчика в пользу истца суд взыскивает задолженность по ДС №2 от 25.12.2020 в размере 343 500 руб. и по ДС №3 от 25.12.2020 в размере 360 000 руб.

Отказывая во взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств: за нарушение сроков оплаты дополнительных работ по ДС №1 от 25.12.2020 в размере 7 272, 52 руб.; неоплату дополнительных работ по ДС №2 от 25.12.2020 в размере 17 587, 20 руб.; по ДС №3 от 25.12.2020 в размере 18 432 руб., суд отмечает, что с учетом изменения условий договора по п. 11.1 дополнительным соглашением, начисление неустойки после прекращения действия договора (срок договора до 31.12.2020) – не правомерно.

Отказывая во взыскании убытков в сумме 70 264 руб., суд учитывает следующее.

Исходя из смысла статей 15 и 393 Гражданского кодекса для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего в себя наступление вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между возникшим вредом и действиями указанного лица, а также вину причинителя вреда. Требование о возмещении вреда может быть удовлетворено только при доказанности всех названных элементов в совокупности.

Требуя возмещения реального ущерба, лицо, право которого нарушено, обязано доказать размер ущерба, причиненную связь между ущербом и действиями лица, нарушившего право, а в случаях когда законом или договором предусмотрена презумпция невиновности должника – также вину.

Для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности фактов. Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения требований.

Причинно-следственная связь между действиями/бездействиями ответчика и убытками, возникшими на стороне истца суду убедительно не доказана, в связи с чем, в удовлетворении требований истца о взыскании убытков в размере 70 264 руб. суд отказывает.

Отказывая во взыскании задолженности в размере 1 937 607, 90 руб. , из которых: 961 200 руб. – стоимость услуг по обеспечению хранения самолета АН-2Т, борт. RA-71217 за период с 25.02.2021 по 26.07.2022; 976 407, 90 руб. за период с 26.12.2020 по 26.07.2022 по осуществлению ТО ВС при хранении для поддержания его в исправном состоянии – суд отмечает, что сторонами не согласованы сроки и стоимость оказания услуг.

Учитывая изложенное, правовых оснований для взыскания неустойки до момента фактической оплаты задолженности судом не установлено.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает ко вниманию в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 8, 10, 12, 15, 309, 310, 330, 393, 401, 421, 431, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ПАО «ИЛ» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «АВИАСПЕКТР» (ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 61 254 руб. 48 коп., задолженность в размере 703 500 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 10 070 руб. 

В остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                    К.В. Вольская