АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-29494/2023

28 октября 2024 года

город  Симферополь

Резолютивная часть решения оглашена  14.10.2024             

Полный текст решения изготовлен  28.10.2024

Арбитражный  суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Криницын И.О., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  К ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕГА-КРЫМ» О ВЗЫСКАНИИ

Участники процесса не явились,

          Обстоятельства дела:  Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением об обязании ответчика предоставить обеспечение гарантийных обязательств в сумме 1 482 661,03 руб.

Исковые требования обосновываются нарушением условий Контракта.

Ответчиком отзыва не представлено.

Рассмотрев материалы дела, суд

                                                      УСТАНОВИЛ:

21.02.2022 между Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районный краеведческий музей» Красногвардейского района Республики Крым (далее Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Вега-Крым» (далее Подрядчик) был заключен контракт № 3/2022 от года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция районного краеведческого музея по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана. 22 на сумму 29 653 220 (двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 62 копейки, без НДС.

В связи с увеличением объемов работ, дополнительным соглашением от 30.05.2023 года цена контракта была увеличена до 32 153 410,00 (Тридцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста десять) рублей 00 копеек.

Выполненные Подрядчиком работы приняты и оплачены Заказчиком в полном объеме.

Согласно п. 10.1 Контракта гарантийных срок на объект устанавливается сроком на 5 лет с момента подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

Гарантийный срок устранения недостатков распространяется на все выполненные работы, применяемые материалы и конструкции с момента подписания сторонами акта приемки законченных работ по ремонту.

В соответствии с п. 7.4.18. Контракта после получения заключение органа государственного строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации Подрядчик направляет Заказчику для подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств.

Подрядчик отказался от выполнения требования предусмотренного вышеуказанным пунктом и направил Заказчику только Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 14.2. Контракта Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта является предоставление Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств.

Пунктом 14.2.1 Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере 5% от максимальной цены контракта и составляет 1 482 661 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 03 копейки.

Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта подписан Заказчиком 29.12.2022 года. Гарантийных срок действует с 29.12.2022 года по 29.12.2027 года включительно.

На момент подписания вышеуказанного акта, Подрядчик не предоставил обеспечение гарантийных обязательств.

Заказчиком неоднократно (от 16.05.2023, 27.06.2023, 03.10.2023) направлялись письма в адрес Подрядчика с требованием о предоставлении обеспечения, гарантийных обязательств, Подрядчик требования не исполнил.

Ответным письмом от 15.06.2023 года Подрядчик указал на то, что в соответствии с п. 14.2 Контракта условием подписания Акта сдачи приемки законченного строительством объекта является предоставление Подрядчиком гарантийных обязательств. Данное требование является несущественным условием Контракта и что во время приемки этот пункт был не учтен. Таким образом, отказался от выполнения данного пункта.

Кроме того, в период эксплуатации здания музея, после реконструкции, проведенной Подрядчиком, в августе 2023 года появились нарушения целостности здания, появилась течь крыши, о чем был составлен акт от 18.08.2023 года и направлено уведомление Подрядчику в соответствии с условиями контракта о необходимости устранить выявленные нарушения.

22.09.2023 года все недостатки были устранены в полном объеме, о чем составлен акт. ]

В соответствии с п. 10.1 гарантийный срок на объект устанавливается на 5 лет с момента подписания Акта об устранении недостатков строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция районного краеведческого музея по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, 22» № 1 в рамках гарантийных обязательств, то есть с 22.09.2023 года.

В соответствий с п. 1 ст. 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному контракту подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их муниципальному заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Как предусмотрено п. 1 ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

В соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества устанавливаются заказчиком при необходимости.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.

В силу ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Согласно ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Указанная правовая позиция, соответствует правовым позициям, изложенным в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского Округа от 19.04.2024 по делу                А82-5385/2023, в Определении Верховного суда Российской Федерации от 01.11.2023 по делу А71-2742/2022.

Обстоятельства, изложенные в исковом заявлении ответчиком не оспорены.

Согласно ч. 3-1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании вышеизложенного, а также  руководствуясь статьями  110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Крым,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

          Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Вега-Крым» предоставить обеспечение гарантийных обязательств в суме 1 482 661 (Один миллион четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят один) рубль 03 копейки по Контракту от 21.02.2022 № 3/2022   на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция районного краеведческого музея по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт: Красногвардейское, ул. Тельмана. 22» в течении пяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

          Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в  Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

          Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                     В.И. Гайворонский