АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Мотивированное 

решение

 (в порядке ст. 229 АПК РФ)

Дело № А40-283374/22-148-1470

г. Москва

13 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2023 года Полный текст решения изготовлен 13 марта 2023 года 

Арбитражный суд в составе судьи Нариманидзе Н.А.  

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ 

дело по исковому заявлению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ" (107140, 

<

...>, Э/ПОМ/К/ОФ 6/38/5/3, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.07.2011, ИНН: 

<

***>, КПП:  770801001)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  МОСКВА" (117420, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2002, ИНН: 

<

***>, КПП:  772801001)  

о взыскании стоимости выполненных, но не оплаченных работ по первому и второму  этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ в размере 440 791 руб. 40  коп., неустойку по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ  за период с 12.11.2022 по 13.12.2022 в порядке статьи 395 ГК РФ в размере 2 893 руб. 35  коп., неустойку по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ в  порядке статьи 395 ГК РФ с 14.12.2022 по дату фактической уплаты неустойки  

без вызова сторон, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ" обратилось в  Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  МОСКВА" о взыскании стоимости выполненных, но не оплаченных работ по первому  и второму этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ в размере 440  791 руб. 40 коп., неустойку по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала  Белоусовское ЛПУМГ за период с 12.11.2022 по 13.12.2022 в порядке статьи 395 ГК РФ  в размере 2 893 руб. 35 коп., неустойку по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала  Белоусовское ЛПУМГ в порядке статьи 395 ГК РФ с 14.12.2022 по дату фактической  уплаты неустойки.  

Определением от 22.12.2022 г. исковое заявление принято к рассмотрению в  порядке упрощённого производства по правилам главы 29 АПК РФ.  

Лица, участвующие в деле, извещены о рассмотрении настоящего дела по  правилам упрощенного производства, в порядке ст. 123 АПК РФ.  

Все документы и доказательства размещены в сети Интернет в режиме  ограниченного доступа. Дело на основании статьи 9, части 3¹ статьи 70 и статьи 228  АПК РФ рассматривается по имеющимся в деле доказательствам.  

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, на  основании которого возражал в удовлетворении исковых требований.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2  ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон.  

27.02.2023 г. изготовлена резолютивная часть решения в порядке ч. 1 ст. 229  АПК РФ.  

07.03.2023 г. от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного  решения.  

В соответствии с абз. 3 ч. 2 ст. 229 АПК РФ мотивированное решение  арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица,  участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной  жалобы.  

Исследовав и оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ все  имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что  требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим  основаниям.  

Из искового заявления следует, между ответчиком и истцом заключен договор  подряда № 3-05-03-158-18 от 31 октября 2018 г. на выполнение кадастровых работ по  установлению охранных зон распределительных газопроводов, объектов  электросетевого хозяйства и объектов связи ООО «Газпром трансгаз Москва».  

Сроки, а также стоимость выполнения отдельных этапов работ в составе  комплекса работ по Договору установлены в календарном плане.  

Согласно пункту 7.2 Договора, по завершению выполнения работ по каждому  филиалу Заказчика, согласно календарному плану, организация предоставляет  Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, завизированного уполномоченным  работником филиала ЛПУМГ, в зоне которого выполнялись работы, счет, счет-фактуру  с приложением результатов выполненных работ.  

В соответствии с п. 7.4 Договора в случае неполучения мотивированного  обоснованного отказа от приемки работ и подписания акта в течение 30 рабочих дней с  даты их получения, акты выполненных работ считаются подписанными.  

Согласно п. 3.1. Договора, оплата выполненных Исполнителем и принятых  Заказчиком работ производится Заказчиком на основании подписанного сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного согласно Приложению № 6 к  Договору, при наличии счета, составленного надлежащим образом, счета-фактуры,  составленного с учетом требований законодательства РФ.  

Согласно п. 3.2. Договора, оплата производится Заказчиком путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати)  календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки  выполненных работ.  

Письмом исх. № 127 от 20.05.2022 ПАО «МБКР» в адрес филиала ООО «Газпром  трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ были направлены отчетные материалы в  отношении объектов, расположенных в зоне ответственности Белоусовского ЛПУМГ, а  также во исполнение п. 7.2. Договора с данным письмом был направлен на визирование  уполномоченным работником филиала ЛПУМГ акт сдачи-приемки выполненных работ  в двух экземплярах. Письмо получено адресатом 03.06.2022 (трек № 12519070020511).  

Письмом исх. № 42-01/1100 от 22.06.2022 филиал ООО «Газпром трансгаз  Москва» Белоусовское ЛПУМГ отказал в визировании Акта сдачи-приемки  выполненных работ ввиду наличия в отчетных материалах замечаний оформительского  характера.  

Ответным письмом исх. № 169 от 27.06.2022 ПАО «МБКР» сообщило об  изменении наименований трёх файлов в образе технического отчета на CD диске (в  наименование трёх файлов добавлен символ «@»), а также предоставило пояснения на  замечания относительно отсутствия фотоизображений зон с особыми условиями  использования территорий (далее -ЗОУИТ) в отчете на бумажном носителе (отсутствие  фотоизображений ЗОУИТ на бумажном носителе обусловлено отсутствием  соответствующего требования в Приложении № 2 к Договору, а содержащиеся на CD- 

диске фотоизображения ЗОУИТ представлены как дополнительный материал по  просьбе куратора работ ООО «Газпром трансгаз Москва», озвученной по телефону).  Относительно замечания об отсутствии документа, подтверждающего внесение  сведений о ЗОУИТ объекта ООО «Газпром трансгаз Москва» -электрохимзащита ГРС  Товаркино (инв. 0017413) (письмо ФГБУ «ФКП» Росреестра от 17.07.2022 № 0265612/22), ПАО «МБКР» пояснило, что указанное письмо содержалось в бумажной версии  технического отчета на предпоследней странице.  

Письмо получено адресатом 05.07.2022 (трек № 12519070032989). До  настоящего момента мотивированного отказа в приемке отчетных материалов и  визировании Акта сдачи-приемки выполненных работ, переданных письмом исх. № 169  от 27.07.2022 от Белоусовского ЛПУМГ в адрес ПАО «МБКР» не поступало. В связи с  чем, Акт сдачи-приемки выполненных работ (Белоусовское ЛПУМГ) считается  завизированным.  

Письмом исх. № 136 от 31.05.2022 ПАО «МБКР» передало результат работ, а  также акт сдачи-приемки выполненных работ (Белусовское ЛПУМГ) в 2-х экз. в ООО  «Газпром трансгаз Москва». Письмо получено адресатом 03.06.2022 (трек номер  12519070020511).  

Письмом исх. № 04/10590 от 29.06.2022 ООО «Газпром трансгаз Москва»  отказало в приемке выполненных работ, сославшись на наличие замечаний, указанных  Белоусовским филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» в письме исх. № 42-01/1100  от 22.06.2022.  

Письмом исх. № 203 от 22.08.2022 ПАО «МБКР» повторно передало результат  работ с учетом замечаний оформительского характера, изложенными в письме исх. №  42-01/1100 от 22.06.2022., а также сообщило, что ПАО «МБКР» ранее направило  письмо исх. № 169 от 27.06.2022 в адрес Белоусовского ЛПУМГ с разъяснениями  относительно замечаний оформительского характера, однако ответ в адрес ПАО  «МБКР» от филиала не поступал. Передача Заказчику результата работ подтверждается  накладной № 10.  

Также ПАО «МБКР» передало: Акт сдачи-приемки выполненных работ  (Белоусовское ЛПУМГ) на сумму 440 791 руб. 40 коп., счет-фактуру № 100 от  20.05.2022, счет № 123 от 20.05.2022. Письмо получено 31.08.2022 (трек номер  12519073034249).  

Так как мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ (Белоусовское ЛПУМГ) от Ответчика в адрес ПАО «МБКР» не  поступило, то датой подписания акта, согласно п. 7.4 Договора, считается 12.10.2022.  

Согласно п. 3.2. Договора, работы должны быть оплачены до 11.11.2022. 

Таким образом, в нарушение условий Договора, а также действующего  законодательства, фактически выполненные и переданные, а также имеющие для  Заказчика потребительскую ценность работы по 1 и 2 этапам в зоне ответственности  филиала Белоувсовское ЛПУМГ (440 791, 40 рублей) по состоянию на 13.12.2022  Заказчиком не оплачены.  

Подрядчик направил заказчику соответствующую претензию (исх. № 270 от  17.11.2022) об оплате стоимости выполненных работ по 1 и 2 этапам в зоне  ответственности филиала Брянское ЛПУМГ. Претензия получена Заказчиком  24.11.2022.  

Также истцом заявлены ко взысканию проценты за пользование чужими  денежными средствами с момента просрочки Заказчиком своих обязательств по оплате  выполненных работ по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское  ЛПУМГ- с 12.11.2022 по 13.12.2022 составляют 2 893 руб. 35 коп.  

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с  настоящим исковым заявлением.  

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего. 

По смыслу требований ст. ст. 421, 422, 431 Гражданского кодекса Российской  Федерации свобода граждан в заключении договора означает свободный выбор  

стороны договора, условий договора, свободу волеизъявления на его заключение на  определенных сторонами условиях. Стороны договора по собственному усмотрению  решают вопросы о заключении договора и его содержании.  

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при этом  односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить результат  работы.  

Ответчик в своих Объяснениях указывает, что Заказчик в лице Белоусовского  ЛПУМГ письмом исх. № 42-01/1716 от 05.10.2022 мотивированно и обоснованно  отказался от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, так как указанные  акты, по мнению Ответчика, содержали ошибки оформительского характера.  

При этом Акт сдачи-приемки выполненных работ, переданный в адрес филиала  ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовский ЛПУМГ (далее - Белоусовское  ЛПУМГ) письмом исх. № 169 от 27.06.2022, завизирован, а акт переданный письмом  исх. № «203 от 22.08.2022 в адрес Заказчика ООО «Газпром трансгаз Москва»  подписан.  

В обоснование своей позиции, Ответчик утверждает, что письмом ООО  «Газпром трансгаз Москва» в лице Белоусовского ЛПУМГ исх. № 42-01/1716 от  05.10.2022 «Об актуальных реквизитах доверенности» Ответчик мотивированно и  обоснованно отказался от подписания акта сдачи приемки-выполненных работ, однако  Ответчик не учитывает, что согласно п. 7.2 условий Договора, направленный в адрес  филиала Заказчика акт, визируется, а не подписывается уполномоченным работником  филиала, в зоне которого выполнялись работы.  

Согласно п. 7.4 условий Договора, Акт подписывается Заказчиком в течение 30  рабочих дней со дня его получения.  

Согласно пункту 7.2 Договора, по завершению выполнения работ по каждому  филиалу Заказчика, согласно календарному плану, организация предоставляет  Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, завизированного уполномоченным  работником филиала ЛПУМГ, в зоне которого выполнялись работы, счет, счет-фактуру  с приложением результатов выполненных работ.  

В соответствии с п. 7.4 Договора в случае неполучения мотивированного  обоснованного отказа от приемки работ и подписания акта в течение 30 рабочих дней с  даты их получения, акты выполненных работ считаются подписанными.  

ПАО «МБКР» письмом исх. № 127 от 20.05.2022 направляло в адрес  Белоусовского ЛПУМГ отчетные материалы в отношении объектов, расположенных в  зоне ответственности Белоусовского ЛПУМГ, а также во исполнение п. 7.2. Договора с  данным письмом был направлен на визирование уполномоченным работником филиала  ЛПУМГ акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.  

Во исполнение требований Белоусовского ЛПУМГ об исправлении замечаний к  переданному результату работ, изложенных в письме исх. № 42-01/1100 от 22.06.2022,  ПАО «МБКР» письмом исх. № 169 от 27.06.2022 направило откорректированные  отчетные материалы с пояснениями в адрес филиала.  

Согласно сведений почты России, письмо получено адресатом 05.07.2022. 

30-дневный срок для направления Белоусовским ЛПУМГ мотивированного  обоснованного отказа от приемки работ и визирования акта в силу п. 7.4. Договора  истек 16.08.2022.  

Таким образом, письмо исх. № 42-01/1716 от 05.10.2022 Белоусовского ЛПУМГ  направлено в адрес Истца за пределами 30-ти дневного срока.  

Ответчиком не представлены в материалы дела доказательства направления в  адрес Истца отказа Белоусовского ЛПУМГ от визирования акта в соответствии с п. 7.4  Договора в 30-дневный срок с даты его получения, то есть до 16.08.2022,  следовательно, Акт считается завизированным.  

Среди указанных Ответчиком замечаний к переданным отчетным материалам,  указанных в письме исх. № 42-01/1100 от 22.06.2022, отсутствовали замечания  относительно необходимости внесения актуальных реквизитов доверенности  подписанта Акта сдачи-приемки выполненных работ со стороны Заказчика.  

Вместе с тем, как следует из письма филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»  Белоусовское ЛПУМГ исх. № 42-01/1716 от 05.10.2022, каких-либо замечаний к  переданному письмом ПАО «МБКР» исх. № 169 от 27.06.2022 результату работ,  Ответчиком не предъявлено, а также согласно представленному Ответчиком письму  ПАО «МБКР» исх. № 250 от 12.10.2022, копия доверенности с актуальными  реквизитами лица, подписывающего Акт со стороны Ответчика в адрес Истца не  поступала.  

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания  денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат  уплате проценты на сумму долга.  

Судом расчет проверен и признан обоснованным. 

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в арбитражном  процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в  обоснование своих требований и возражений.  

С учетом изложенных обстоятельств, требования истца удовлетворены судом в  полном объеме.  

В связи с удовлетворением требований по делу расходы по оплате  государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 27, 67, 68, 71, 75, 123, 156,  167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пп. 37,  38, 39, 41, 42, 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского  процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве», суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" (ОГРН: 

<

***>) в  пользу ПАО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ" (ОГРН:  

<

***>) стоимость выполненных, но не оплаченных работ по первому и  второму этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ в размере  440 791 (четыреста сорок тысячи семьсот девяносто один) руб. 40 коп., неустойку по 1 и  2 этапам в зоне ответственности филиала Белоусовское ЛПУМГ за период с 12.11.2022  по 13.12.2022 в порядке статьи 395 ГК РФ в размере 2 893 (две тысячи восемьсот  девяносто три) руб. 35 коп., неустойку по 1 и 2 этапам в зоне ответственности филиала  Белоусовское ЛПУМГ в порядке статьи 395 ГК РФ с 14.12.2022 по дату фактической  уплаты неустойки, а также расходы по оплате госпошлины в размере 11 874  (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления  мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном  объеме.  

 СУДЬЯ Н.А. Нариманидзе