АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Воронеж Дело № А14-4979/2017 

«21» июня 2018 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Гладневой Е.П.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  

заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж  к обществу с ограниченной ответственностью «Алтиус Инжиниринг и  

Констракшн» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж,  об обязании устранить недостатки выполненных работ  

при участии в судебном заседании:  от истца: ФИО2 – представитель, доверенность № 004 от 29.05.2018;  

ФИО3 – представитель, доверенность № 005 от 11.07.2017;  от ответчика: не явился, извещен надлежаще;  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Алтиус  Инжиниринг и Констракшн» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  г.Воронеж, в течение 111 календарных дней с даты вступления в законную  силу решения суда безвозмездно устранить недостаток работ по договору  подряда № AEC-V2-GP-2012/SS от 17 сентября 2012 года, а именно:  произвести полный демонтаж существующего пола -2 и -3 этажей на  площади 1424 кв.м. и последующее устройство нового покрытия полов -2 и  -3 этажей на площади 1424 кв.м. объекта «четырехзвездочная гостиница по  адресу: 

<

...>», с соблюдением проектных  уклонов, указанных в рабочей документации AEC-2CC-PR-2012-P-AP  «план-схема полов -2 и -3 этажей объекта «четырехзвездочная гостиница по  адресу: 

<

...> учетом требований СП  71.13330.2017, СП 29.13330.2011.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтиус  Инжиниринг и Констракшн» (ОГРН 1113668040056, ИНН 3664114096),  г.Воронеж, в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» (ОГРН 1033600035149, ИНН 3650000613), г.Воронеж, 6 000  руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины,  91 943 руб. 00 коп. судебных издержек.  

На основании пункта 3 статьи 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью  «Стройсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж,  вправе осуществить соответствующие действия за счет общества с  ограниченной ответственностью «Алтиус Инжиниринг и Констракшн»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж, со взысканием с него  необходимых расходов в случае, если общество с ограниченной  ответственностью «Алтиус Инжиниринг и Констракшн» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Воронеж не исполнит решение в  течение установленного срока.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Воронежской  области.  

Судья Е.П. Гладнева