АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

Дело №А48-1096/2018

г. Орёл

4 мая 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 25 апреля 2018 года

В полном объеме решение изготовлено 4 мая 2018 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Волковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (

<

...>; ОГРН 

<

***>) к ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» (

<

...>, ОГРН 

<

***>) о взыскании пени в сумме 11052,88 руб. и штрафов в сумме 426439,95 руб., при участии в судебном заседании: от истца – представителя ФИО2 (доверенность № 9 от 06.02.2018), от ответчика – представителя ФИО3 (доверенность от 21.03.2018),

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение "Управление коммунальным хозяйством г. Орла" (далее – истец, МКУ «УКХ г. Орла») обратилось в арбитражный с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» (далее – ответчик, ООО «СК «МОНОЛИТ») 1) об обязании предоставить истцу обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 в размере 222200,30 руб. в виде банковской гарантии, выданной банком сроком по 29.11.2021 или обеспечение путем внесения денежных средств в размере 222200,30 руб. и об обязании предоставить обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 в размере 205239,65 руб. в виде банковской гарантии, выданной банком сроком по 29.11.2021 или обеспечение путем внесения денежных средств в размере 205239,65 руб.

Также истец просил взыскать с ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 штраф в размере 222200,30 руб., пени за период с 29.11.2017 по 25.01.2018 в размере 3329,30 руб. и по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 штраф в сумме 205239,65 руб. и пени за период с 29.11.2017 по 25.01.2018 в размере 3075,17 руб.

Поскольку ответчиком были предоставлены банковские гарантии истцу, до рассмотрения спора по существу истец уточнил предмет иска и просит взыскать с ответчика: - по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 штраф в сумме 222200,30 руб. и пени за период с 30.11.2017 по 16.03.2018 в сумме 5745,73 руб.; - по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 штраф в сумме 205239,65 руб. и пени за период с 30.11.2017 по 16.03.2018 в сумме 5307,15 руб.

В порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял уточненные исковые требования, что отражено в протоколе судебного заседания от 02.04.2018.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в отзыве на иск (л.д. 101-104), а также просит на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ снизить размер штрафных санкций (л.д. 109-110).

Выслушав представителей сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

7 ноября 2017 года между МКУ «УКХ г. Орла» (заказчик) и ООО «СК «МОНОЛИТ» (подрядчик) заключен муниципальный контракт № 182 по ремонту УДС в Заводском районе г. Орла по адресу: на участке от ул. Энгельса  до ул. 1-я Посадская под Тургеневским мостом (л.д. 8-19).

В соответствии с п.3.1 муниципального контракта № 182 от 07.11.2017 начало работ – со дня заключения контракта. Окончание работ  - в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

7 ноября 2017 года между теми же сторонами заключен муниципальный контракт №183 по ремонту УДС в Железнодорожном районе г. Орла по адресу: по ул. Герцена  на участке автодороги под мостом «Октябрьский» (л.д. 20-31) на аналогичных условиях.

Пунктом 6.5 контрактов предусмотрено, что на момент подписания Акта приемки объекта ремонта подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Подрядчик вправе самостоятельно выбрать любой способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств из нижеперечисленных. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более, чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Сумма обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 5% от цены контракта. Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту составляет четыре года.

Согласно п. 9.5 контрактов за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

В соответствии пунктом 9.1 контрактов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

Размеры штрафов по муниципальным контрактам № 182 от 07.11.2017 и № 183 от 07.11.2017  установлены в виде фиксированных сумм: 222200,30 руб. и 205239,65 руб. соответственно.

 Между сторонами были подписаны акты выполненных работ по ремонту УДС в Заводском районе г. Орла: на участке от ул. Энгельса  до ул. 1-я Посадская под Тургеневским мостом – 29.11.2017, и по ремонту УДС в 

<

...> на участке автодороги под мостом «Октябрьский» – 29.11.2017 (л.д. 32-37).

Истец направил ответчику  письмо истца № 8188 (л.д. 41) о необходимости в течение 10 дней со дня получения данного письма предоставить обеспечения гарантийных обязательств в размере 222200,30 руб. по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 и в размере 205239,65 руб. по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017.

В адрес ответчика 30.01.2018 истцом направлена претензия № 516 от 30.01.2018 с требованиями предоставить обеспечение, а также оплатить начисленные штрафные санкции (л.д. 42-45). 

Поскольку претензия была оставлена без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. При этом добровольное удовлетворение требований истца о предоставлении банковских гарантий после его обращения в арбитражный суд послужило основанием для отказа истца от иска в части обязании предоставить банковские гарантии в обеспечение гарантийных обязательств.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 369 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент возникновения правоотношений) банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства (пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

На основании пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчиком не исполнены надлежащим образом обязанности по своевременному предоставлению обеспечения исполнения гарантийных обязательств по спорным муниципальным контрактам, при подписании актов о приемке объектов банковское гарантии не представлены, допущена просрочка в их представлении.

Как и любое иное обязательство, дополнительное обязательство может быть обеспечено неустойкой (пункт 1 статьи 329 и пункт 1 статьи 330 Кодекса), поскольку гражданское законодательство никаких исключений для данного вида обязательства не содержит и обеспечение неустойкой не является несовместимым с характером обязательства.

Поскольку факты предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств по спорным муниципальным контрактам с просрочкой подтверждены представленными доказательствами и не оспорены ответчиком, начисление истцом пени в соответствии с п. 9.5 спорных муниципальных контрактов судом признается правомерным.

Истец представил расчеты пени по контрактам. Суд проверил представленные расчеты и признал их правильным.

Таким образом, размер пеней за период с 30.11.2017 по 16.03.2018  по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 составляет 5745,73 руб.; по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 – 5307,15 руб., а всего – 11052,88 руб.

Также истцом заявлено требование о взыскании штрафов, предусмотренных п. 9.1  муниципальных контрактов.

Неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 6.5 контрактов, ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривалось.

С учетом изложенного, начисление истцом штрафов за нарушение требований по обеспечению гарантийных обязательств  признано судом обоснованным.

В ходе судебного разбирательства ответчиком заявлено ходатайство о снижении размеров штрафов на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения договора), если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, отраженным в п. 77 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 15.07.2014 № 5467/14 по делу № А53-10062/2013, неустойка как способ обеспечения обязательства должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения должником своего обязательства перед кредитором. Привлечение к гражданско-правовой ответственности должно осуществляться только за неисполненное или ненадлежащим образом исполненное обязательство.

В силу правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отраженной в пункте 9 Постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента.

В соответствии с пунктом 8 названного Постановления в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом, основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные меры, предусмотренные законом.

Включение в проект контрактов явно несправедливого договорного условия, ухудшающего положение более слабой стороны в договоре (исполнителя), оспаривание которого осложнено особенностями процедуры, предусмотренной Законом о размещении заказов, поставило заказчика в более выгодное положение и позволило последнему извлечь необоснованное преимущество.

Принимая во внимание то, что в рассматриваемом случае в контракты было включено условие, ставящее заказчика в более выгодное положение и позволяющее ему извлечь необоснованную выгоду, суд счел неправомерным начисление истцом штрафов на общую сумму контрактов, без учета обязанности ответчика перечислить обеспечение гарантии в размерах 5% от цен контрактов, в связи с чем, считает  возможным снизить штрафы за нарушение требований по обеспечению гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 – до 22220,00 руб.; по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 – до 20523,00 руб., исходя из ставки 10% от суммы обеспечения гарантийных обязательств.

Таким образом, требования истца удовлетворяются частично, с ответчика в пользу истца взыскивается по муниципальному контракту № 182 от 07.11.2017 – пени за период с 30.11.2017 по 16.03.2018 в сумме 5745,73 руб. и штраф в сумме 22220,00 руб.; по муниципальному контракту № 183 от 07.11.2017 – пени за период с 30.11.2017 по 16.03.2018  в сумме 5307,15 руб. и штраф в сумме 20523,00 руб. В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины. Таким образом, поскольку истец освобожден от уплаты госпошлины, госпошлину в размере 1445,00 руб. следует взыскать с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Орловской области

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» (

<

...>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (

<

...>; ОГРН 

<

***>) пени за период с 30.11.2017 по 16.03.2018 в сумме 11052,88 руб. и штрафы в сумме 42743 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с ООО «Строительная компания «МОНОЛИТ» (

<

...>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 1445,00 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с момента его принятия. 

 

Судья                                                                                                           Е.Н. Волкова