Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

гор. Москва  17 апреля 2023 года Дело № А41-9194/22  

Резолютивная часть объявлена 13 апреля 2023 года.  

Полный текст решения изготовлен 17 апреля 2023 года. 

Судья Арбитражного суда Московской области Р.С. Солдатов ,  при ведении протокола секретарем А.Н. Руш  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-9194/22  по исковому заявлению  

ООО "ВОЛГА МК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ЗАО "ИНФАПРИМ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности в размере 7 435 030, 13  руб.,  

по встречному иску ЗАО "ИНФАПРИМ" об: 

- уменьшении цены договора подряда № ВМК10-2021 от 03.08.2021г., заключенного между  ООО "ВОЛГА МК" и ЗАО "ИНФАПРИМ" до 24 678 832, 00 руб.;  

- взыскании с ООО "ВОЛГА МК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ЗАО  "ИНФАПРИМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в  размере 11 321 168, 00 руб.  

При участии в судебном заседании - согласно протоколу. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ВОЛГА МК" (далее – истец, исполнитель) обратилось в Арбитражный суд  Московской области с исковым заявлением (с учетом заявления об уменьшении исковых  требований заявленного в соответствии с ч.1 ст. 49 АПК РФ и принятых судом к своему  производству) о взыскании с ЗАО "ИНФАПРИМ" (далее – ответчик, заказчик)  задолженности в размере 6 653 768,04 руб.,  

До принятия судебного акта которым заканчивается рассмотрение спора по существу  заявленных требований ЗАО "ИНФАПРИМ" обратилось со встречным исковым заявлением  к ООО "ВОЛГА МК" (с учетом принятых судом уточнений) о/об:  

- уменьшении цены договора подряда № ВМК10-2021 от 03.08.2021 г., заключенного  между ООО «Волга МК» и ЗАО «Инфаприм» до 28.136.903,76 (двадцати восьми миллионов  ста тридцати шести тысяч девятистам трех) руб. 76 коп.;  

- обязании ООО «Волга МК» предоставить ЗАО «Инфаприм» надлежащим образом  оформленные акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости  выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру на сумму 20.659.593,31 рубля;  

- взыскании с ООО «Волга МК» в пользу ЗАО «Инфаприм» неосновательное  обогащение в размере 7.863.094,24 (семь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи  девяносто четыре) рубля 24 копейки;  

Определением от 23.05.2022 г. Арбитражный суд Московской области принял к  своему производству встречное исковое заявление ЗАО "ИНФАПРИМ" для совместного  рассмотрения с исковыми требованиями ООО "ВОЛГА МК" по правилам, установленным  ст.130 АПК РФ.  

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном  объеме. Просил исковые требования удовлетворить по основаниям, изложенным в иске и  отказать в удовлетворении встречных исковых требований отказать по основаниям  изложенным в отзыве.  

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных исковых  требований по основаниям, изложенным в отзыве. Просил встречные исковые требования  удовлетворить.  

Исследовав в полном объеме все представленные в материалы дела письменные  доказательства, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный  суд установил следующее.  

Между обществом с ограниченной ответственностью «Волга МК» и закрытым  акционерным обществом «Инфаприм» 03 августа 2021 года заключён Договор подряда   № ВМК 10-2021.  

В соответствии с пунктом 1.1. указанного Договора, ООО «Волга МК» (подрядчик)  обязался в установленный договором срок, по заданию ЗАО «Инфаприм» (заказчика)  выполнить комплекс работ по устройству временного склада-ангара на объекте:  «Реконструкция существующего производственного корпуса завода по производству сухих  адаптированных молочных смесей (заменителей женского молока) и сухой "молочной  основы", расположенном по адресу: 

<

...>.  

Строительно-монтажные работы, начатые 03 августа 2021 года были завершены 16  октября 2021 года, о чем в адрес ЗАО «Инфаприм» по электронной почте (info@infaprim.ru,  filatov@infaprim.com, cherstvov@infaprim.com, kazarianas@acd-group.ru) 17 октября 2021  было направлено уведомление об окончании работ по Договору № ВМК10-2021 от  03.08.2021 года, а также 18.10.2021 года было передано уведомление об окончании работ на  бумажном носителе, представителю со стороны Заказчика вручены формы КС-2 и КС-3  (руководителю проекта ЗАО «Инфаприм» ФИО1), на что 27.10.2021  года был получен отказ в принятии работ и отказ подписать акты КС-2 и КС-3,  мотивированный тем, что работы, якобы, выполнены не в полном объеме.  

Согласно п.1.2 Перечень, объемы и виды Работ определяются в соответствии с  Техническим заданием Заказчика, согласованным Подрядчиком (Приложение № 1), и  Локальным сметным расчетом (Приложение № 2). Согласно п. 3.1 В случае изменения  объёмов работ составляется Дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой  частью настоящего Договора. При оформлении Дополнительного соглашения сумма  Договора может быть пересмотрена.  

В процессе выполнения строительно-монтажных работ, по просьбе Заказчика был  выполнен ряд дополнительных работ, изменение и замена работ, ранее отражённых в  Техническом задании Заказчика, согласованном Подрядчиком (Приложение № 1), и  Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), что повлекло за собой значительные  изменения в объёме работ (Приложение № 1), (Приложение № 2), к договору подряда   № ВМК10-2021 от 03.08.2021г.  

Все изменения и дополнительные работы были письменно согласованны Заказчиком,  о чем свидетельствуют письма и схемы с письменным согласованием Заказчика.  

Полный комплект исполнительной документации передавался в адрес Заказчика  неоднократно, о чем так же есть подтверждающие документы о принятии на рассмотрение,  а именно реестры передачи исполнительной документации от 22.10.2021 года, от 08.11.2021  года, от 19.11.2021 года.  

27.10.2021 года ЗАО «Инфаприм», в ответ на Уведомление о завершение работ от  ООО «Волга МК» от 16.10.2021 года, прислало письмо об отказе от приемки работ и от  подписания актов КС-2 и КС-3 по причине «неполного выполненного объема работ», указав  при этом работы изначально не входящие в предмет договора, а возникшие в процессе  дополнительно, по желанию Заказчика, и являющиеся дополнительными работами и,  ссылаясь снова на ведомость недоделок и замечаний, направленных в адрес ООО «Волга  МК» 25.10.2021 года.  

Неоднократно ООО «Волга МК» направляло в адрес ЗАО «Инфаприм» акты КС-2 и  КС-3, последний раз они были переданы ответчику по реестру 10.12.2021 года, какого-либо  ответа не последовало, от подписания ЗАО «Инфаприм» уклоняется до настоящего  времени.  

При этом, часть работ ответчиком принята, часть актов и справок по форме КС-2 и  КС-3 подписаны сторонами.  

Стоимость фактически выполненных на настоящее время работ, обоснованных  исполнительной документацией, составляет 42 653 768, 04 рублей.  

ЗАО «Инфаприм» перечислило на расчетный счет ООО «Волга МК» денежные  средства в сумме 36000000 рублей.  

Поскольку ответа на претензию от ответчика не поступило, ООО "ВОЛГА МК"  обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Спорные отношения, возникшие в связи с исполнением договора, по своей правовой  природе являются подрядными, подлежат регулированию общими гражданско-правовыми  нормами об обязательствах, специальными положениями главы 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы.  

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик  обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный  объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать  подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить  обусловленную цену.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Согласно статьям 711, 746 ГК РФ обязанность заказчика по оплате подрядчику  обусловленной договором цены возникает с момента сдачи результатов выполненных  работ.  

Возражая по существу заявленных требований требований ответчик ссылался на  ЗАО «Инфаприм» направляло ООО «Волге МК» обоснованные отказы от приемки  выполненных работ в виду ненадлежащего качества их выполнения. Указанные недостатки  не были устранены ООО «Волга МК» до даты прекращения Договора подряда.  

При таких обстоятельствах для установления фактического объема и стоимости  работ, качества выполненных ООО «Волга МК» работ требовались специальные познания  в области строительно-технической экспертизы.  

В этой связи определением суда от 15.12.2022 по ходатайству истца и ответчика  была назначена судебная экспертиза на предмет определения фактического объема и  стоимости работ, качества выполненных ООО «Волга МК» работ, производство которой  было поручено Обществу с ограниченной ответственностью "Центр Экспертизы и Оценки"  а именно эксперту: ФИО2.  

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: 

"Определить фактический объем и стоимость работ, выполненных ООО «Волга МК»  по договору № ВМК10-2021 от 03.08.2021 г. на объекте строительства «Временный склад- ангар (ЛСТК) по адресу: 

<

...>»?";  

"Соответствуют ли выполненные ООО «Волга МК» работы на объекте «Временный  склад-ангар (ЛСТК) по адресу: 

<

...>»:  

условиям Договора подряда № ВМК 10-2021 от 03.08.2021 г.,  рабочей документации, разработанной ООО «ИЗЛК-РУС»; обязательным строительным нормам и правилам?"; 

"Имеются ли недостатки в выполненных ООО «Волга МК» работах? Какова  причина возникновения недостатков (некачественное выполнение работ, нарушения при  эксплуатации, некачественные материалы и т.д.).";  

"Являются ли выявленные недостатки неустранимыми и/или существенными?  Препятствовали ли выявленные недостатки и/или невыполненные ООО «Волга МК»  работы использованию Объекта по назначению?";  

"Какова стоимость работ, которые ООО «Волга МК» должно было выполнить в  соответствии с условиями договора № ВМК10-2021 от 03.08.2021 г., но не выполнило или  выполнило некачественно?".  

Из выводов, изложенных в экспертном заключении ФИО2 № 11-02/23 от  21.02.2023 (далее – Заключение) следует, что фактический объем и стоимость работ,  выполненных ООО «Волга МК» по договору № ВМК10-2021 от 03.08.2021 г. отражены в  Таблице 1 Заключения. Стоимость фактически выполненных работ по договору № ВМК10- 2021 от 03.08.2021 г. на объекте строительства «Временный склад-ангар (ЛСТК) по адресу:  

<

...>»?" составляет 28 136 903, 76 руб.  

Выполненные ООО «Волга МК» работы на объекте «Временный склад-ангар  (ЛСТК) по адресу: 

<

...>» частично не  соответствуют условиям Договора подряда № ВМК 10-2021 от 03.08.2021 г., рабочей  документации, разработанной ООО «ИЗЛК-РУС», обязательным строительным нормам и  правилам.  

Выполненные ООО «Волга МК» работы имеют ряд недостатков, появившихся в  результате некачественного выполнения работ тили невыполнения работ,  предусмотренных договором.  

Выявленные недостатки являются существенными, без устранения недостатков  невозможно использование Объекта по назначению.  

Стоимость работ, которые ООО «Волга МК» должно было выполнить в  соответствии с условиями договора № ВМК10-2021 от 03.08.2021 г., но не выполнило или  выполнило некачественно составляет 11 863 096,25 руб.  

Суд полагает, что исследование экспертами проведено объективно, на научной и  практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном  объеме, заключение основывается на положениях, дающих возможность проверить  обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и  практических данных. Экспертами в полной мере соблюдены базовые принципы судебно-экспертной деятельности: научной обоснованности, полноты, всесторонности и  объективности исследований, установленные статьей 8 Федерального закона от 31.05.2001   № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  

Таким образом, суд полагает, что содержание Заключения соответствует положениям  статьи 86 АПК РФ и с очевидностью позволяет установить выводы экспертов и то, какие  именно исследования ими проведены, и что положено в основу тех или иных выводов, а  выраженные ответчиком по первоначальному иску критические замечания к Заключению  убедительно опровергнуты опрошенным в судебном процессе экспертом.  

В соответствии с частью 2 статьи 64 АПК РФ заключение эксперта является одним из  доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном в статье 71  АПК РФ, в совокупности с иными допустимыми доказательствами по делу.  

Таким образом, посредством полученного судом надлежащего и достоверного  доказательства – Заключения установлено отсутствие доказательств надлежащего  выполнения и сдачи выполненных работ заказчику.  

Отклоняя заявленное ответчиком ходатайство о вызове эксперта в судебное заседание  для дачи пояснений, суд отмечает, что Ответчиком не обоснован вызов эксперта,  проводившего экспертизу, а также не указано, какие обстоятельства он подтвердит или  опровергнет.  

Вопреки доводам истца ЗАО «Инфаприм» обоснованно отказалось от приемки  некачественно выполненных работ, а в последствии обоснованно в одностороннем порядке  расторгло договор подряда.  

Согласно п.3.1. Договора сторонами согласована цена выполняемых работ в размере  40.000.000,00 рублей. Цена является твердой и изменению не подлежит. Изменение объемов  выполняемых работ, а также их стоимости должно подтверждаться дополнительным  соглашением к Договору подряда. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика  на выполнение Работ по настоящему Договору.  

В силу положений ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом  принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.  

Таким образом, стороны однозначно и недвусмысленно согласовали именно твердую  цену Договора подряда и порядок ее изменения исключительно путем заключения  дополнительных соглашений.  

Согласно ст. 743 ГК РФ Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с  ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание  работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.  При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что  подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.  

В силу ст. ст. 740, 743 ГК РФ предметом договора подряда являются работы, которые  необходимо определять путем описания видов, объема, качества работ, результата и  функционального назначения результата работ, которые должен выполнить подрядчик в  соответствии со сметой, определяющей цену работ.  

В п. л. 10 и 12 Информационного письма от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики  разрешения споров по договору строительного подряда" Президиум ВАС РФ указал  следующее: подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения  дополнительных работ, не вправе требовать оплаты этих работ.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые  установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии  соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии  со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно п. п. 1, 2 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене,  установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора  допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в  установленном законом порядке.  

В соответствии с п. 6 ст. 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать увеличения  твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения  договора полряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих  выполнению работ или необходимых для этого расходов.  

Дополнительное соглашение к Договору подряда сторонами не заключалось.  Подрядчиком в адрес Заказчика дополнительное соглашение об увеличении цены Договора  подряда не направлялось.  

В части довода ООО «Волга МК» об изменении стоимости выполняемых работ в связи  с изменением ЗАО «Инфаприм» технического задания, суд учитывает положения п. 1 ст. 744  

ГК РФ, согласно, которому Заказчик вправе вносить изменения в техническую  документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не  превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не  меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.  

Истцом не представлено каких-либо подтверждающих документов, доказывающих  изменение характера строительных работ и/или превышение их объема более чем на 10%.  Площадь объекта (1024 кв.м.) осталась неизменной.  

Об увеличении стоимости работ ЗАО «Инфаприм» узнало только при предъявлении  ООО «Волга МК» работ по увеличенной стоимости.  

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК  РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в  том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или  возражений.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд  оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

На основании вышеизложенного Арбитражный суд Московской области полагает,  что требования по первоначальному иску не подлежат удовлетворению.  

Выслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, Арбитражный суд  Московской области приходит к выводу о частичном удовлетворении встречных исковых  требований, по следующим основаниям.  

В соответствии с заключением эксперта № 11-02/23 от 21.02.23 г. стоимость работ,  выполненных ООО «Волга МК» по Договору подряда № ВМК 10-2021 от 03.08.2021 г.,  составляет 28.136.903,76 рублей. Стоимость невыполненных или некачественно  выполненных работ составляет 11 863 096,25 руб.  

ЗАО «Инфаприм» на расчетный счет ООО «Волга МК» был перечислен аванс в размере  36.000.000,00 рублей:  

- 12.000.000,00 рублей платежным поручением № 3752 от 09.09.2021 г.;  - 12.000.000,00 рублей платежным поручением № 3465 от 19.08.2021 г.;  - 12.000.000,00 рублей платежным поручением № 3365 от 05.08.2021 г.  

Сумма аванса была получена ООО «Волга МК» в полном объеме, что подтверждается в  том числе письменными пояснениями.  

Следовательно, размер неосновательного обогащения (неотработанного аванса),  подлежащего возврату Заказчику составляет 7 863 094,24 рубля  

Согласно п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его  заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами  

В соответствии с п.5.1., п.5.2. Договора подряда приемка выполненных работ  Заказчиком осуществляется на основании представленного Подрядчиком комплекта  документов: Акта сдачи приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости  выполненных работ по стоимости КС-3 и счета-фактуры.  

Между тем ООО «Волга МК» направило ЗАО «Инфаприм» комплект документов на  часть работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от  15.09.2021 г. на сумму 7.477.310,45 рублей. Комплект документов на выполненные работы,  стоимость которых определена в экспертном заключении, Подрядчиком Заказчику не  передавался.  

С учетом позиции, изложенной СКЭС Верховного Суда РФ в Определении № 307- ЭС22-12537 от 28.10.2022 г. по делу № А56-29482/2020, у Заказчика отсутствует комплект  документов, с наличием которых закон и Договор связывают статус работ как «выполненных,  принятых и подлежащих оплате» на сумму 20.659.593,31 рубля. Достижение правового  баланса интересов Заказчика и Подрядчика возможно только при предоставлении  Подрядчиком указанного комплекта документов как основания для приемки работ  Заказчиком и возникновения обязанности по оплате выполненных работ.  

В отсутствии подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ большая часть  платежей, оплаченных ЗАО «Инфаприм» останется в статусе «аванса» и будет подлежать  возврату как неосновательное обогащение ООО «Волга МК».  

Таким образом, исходя из положений статьи 8 ГК РФ, у истца возникло право  получить полезный результат выполненных работ, а у ответчика – обязанность по их сдачи  заказчику в порядке и сроки, согласованные в вышеперечисленных пунктах Договора и  приложениях к нему.  

Вместе с тем, по утверждению истца, работы в полном объеме выполнены не были,  на стороне ответчика образовалась задолженность в сумме 3 000 000 руб.  

Из существа спора следует, что правоотношения сторон, по своей правовой природе,  являются подрядными, регулируются, помимо общих норм об обязательствах,  положениями главы 37 ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено  договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так  и промежуточных сроков выполнения работы.  

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а  при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  принятых на себя обязательств не допускается.  

 Из пункта 2 статьи 715 ГК РФ следует, что если подрядчик не приступает  своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно,  что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от  исполнения договора.  

В соответствии с частью 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

В связи с неисполнением ответчиком обязанностей по выполнению работ в  установленные договором сроки, истцом предъявлена ответчику письменная претензия с  требованием о возврате суммы задолженности..  

Доказательств выполнения работ в установленный сторонами срок путем передачи  их результата истцу в порядке, установленном названной нормой материального права,  ответчиком суду также не представлено.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица  (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения  его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно  сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда  закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (ч. 2 ст. 1105 ГК РФ).  

Учитывая изложенное, суд считает, что представленными в материалы дела  

доказательствами подтверждается факт того, что ответчик свои обязательства не исполнил  – оплаченные работы в установленный договором срок не произвел, доказательств возврата  денежных средств не предъявил, следовательно, требование о взыскании суммы  неосновательного обогащения в размере 7 863 094,24 признаются судом законными и  обоснованными.  

В то же время относительно требования об уменьшении цены договора суд  отмечает следующее.  

Статья 451 ГК РФ предусматривает изменение и расторжение договора в связи с  существенным изменением обстоятельств.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение  обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является  основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором  или не вытекает из его существа.  

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились  настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы  ими заключен или был заключен на значительно отличающихся условиях.  

Согласно пункту 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о  приведении договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или  о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным  пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при  наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны  исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение  обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть  после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее  требовалась по характеру договора и условиям оборота; исполнение договора без  изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее соотношение  имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой  ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать  при заключении договора; из обычаев делового оборота или существа договора не  вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.  

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена  подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с  иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности  для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или  договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:  

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика  устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).  

Согласно пунктам 3, 4 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе  строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим  необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости  строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от заказчика ответа на  свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда  не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие  работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик  освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в  проведении дополнительных работ. Подрядчик, не выполнивший обязанности,  установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты  выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не  докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с  

тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта  строительства.  

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка  его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из  сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой  стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан  судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны  им обоснованными.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных  работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма  Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51  "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").  

Согласно пункту 13 указанного Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации подписание актов выполненных работ без  возражений и замечаний не препятствует заказчику впоследствии оспаривать качество  выполненных работ, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 720 ГК РФ, когда  заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы,  которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) в  том случае, если иное не предусмотрено договором подряда.  

Частью 1 статьи 4 АПК РФ установлено, что заинтересованное лицо вправе  обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и  законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за  нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного  акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

В силу положений п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из  оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий  граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами,  но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские  права и обязанности.  

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в  соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным  законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд (п. 1 ст. 11 ГК РФ).  

Защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными статье 12  ГК РФ. При этом избираемый истцом способ защиты права должен соответствовать  характеру нарушения и обеспечивать восстановление нарушенных прав.  

Истец свободен в выборе способа защиты своего нарушенного права, однако  избранный им способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и  спорного правоотношения, характеру нарушения. Необходимым условием применения того  или иного способа защиты является обеспечение восстановления нарушенного права и  соответствие способа защиты требованиям закона. Избрание неверного способа защиты  является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.  

Необходимым условием применения того или иного способа защиты является  обеспечение восстановления нарушенного права и соответствие способа защиты  требованиям закона.  

Таким образом, обстоятельства надлежащего исполнения договорных обязательств  между контрагентами, соблюдения порядка сдачи-приемки работ, подлежат исследованию  и судебной оценке при предъявлении материально-правового требования в деле о расчетах.  

В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений. При этом согласно ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Согласно ст. ст. 8, 9 АПК  

РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск  наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в  том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований  или возражений.  

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и  непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд  оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями  8, 307, 310, Гражданского кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской  области полагает, что заявленные встречные исковые требования подлежат частичному  удовлетворению.  

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются между сторонами в  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО "ВОЛГА МК" отказать.  Взыскать с ООО "ВОЛГА МК" в доход Федерального бюджета Российской  

Федерации госпошлину в размере 56 269 руб. 

Взыскать с ООО "ВОЛГА МК в пользу ЗАО "ИНФАПРИМ" неосновательное  обогащение в размере 7 863 094,24 руб., а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 62315 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить ЗАО "ИНФАПРИМ" из Федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению № 1909 от 05.05.2022 г.  в размере 5291 руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья Р.С. Солдатов