Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-310955/18-105-1768

23 мая 2019 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2019г. 

Решение в полном объеме изготовлено 23 мая 2019г. 

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) 

истец:

        ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН" (123060 МОСКВА ГОРОД ПРОЕЗД ВОЛОКОЛАМСКИЙ 3-Й ДОМ 12КОРПУС 1 ПОМЕЩЕНИЕ II. КОМНАТА 9,  ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>, Дата регистрации 08.07.2014) в лице конкурсного управляющего ФИО2

ответчик:

        ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ" (117393 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА АКАДЕМИКА ПИЛЮГИНА ДОМ 8КОРПУС 2 ПОМЕЩЕНИЕ I-КОМНАТЫ С 1 ПО 11, ,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата регистрации  17.02.2016)

О взыскании задолженности в размере 1 797 200 руб.

При участии:

от истца- ФИО3 дов. от 01.11.2018 г.

от ответчика- не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ" (далее – ответчик) взыскании задолженности в размере 1 797 200 руб. по договорам №КП-205 от 01.08.2017г., №КП-207 от 01.08.2017г. 

Исковые требования мотивированы статьями 309, 310, 702, 709 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, отзыв не представил.  В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение  ответчика о времени и месте судебного разбирательства. При таких обстоятельствах дело рассматривалось в отсутствие представителя  ответчика в порядке, предусмотренном ст. 156 АПК РФ.

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно действующему гражданскому законодательству (ст. ст. 9, 10 ГК РФ) лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий уклонения от состязательности (непредставление доказательств, неявка в судебное заседание), поскольку это может повлечь принятие решения только по доказательствам, представленным другими лицами.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, установил следующее.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 апреля 2018 г. по делу №А40-27234/2018 -70-34 «Б» в отношении ООО "САПСАН"  (ОГРН 

<

***>) введена процедура наблюдения.

Решением от 02.10.2018 Арбитражного суда г. Москвы ООО "САПСАН"   признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначен ФИО2

Из материалов дела следует, что между ООО "САПСАН"  (далее-подрядчик) и   ООО "ТИ ДЖИ ВИ" (далее- генподрядчик) заключен договор №КП-205 от 01.08.2017г.,  по условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 8  к договору) и проектной документацией своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных интернатов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов), по адресу (-ам): 

<

...> включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж временных   зданий   и   сооружений,   поставку   Материалов,   Изделий,   Конструкций, Оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного   срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.  Генподрядчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, после приемки выполненных работ на Объекте(-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Пунктом 3.1 договора установлена цена договора,  которая составляет  8 960 000 руб., в том числе НДС 18%- 1 366 779 руб. 66 коп. 

В соответствии с п. 3.5. договора сцелью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик представляет Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, а также представляет Отчет о выполненных работах по форме согласно Приложения № 6 к настоящему Договору. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют. Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы и уведомляет Подрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.5, 7.6 настоящего Договора либо направляет обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их

устранения. Неполучение Подрядчиком отказа Генподрядчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

Согласно условиям договора, оплата принятых работ производится в размере 70 % в 2017г., оставшаяся часть в размере 30 % оплачивается в 2018г. 

Факт выполнения истцом работ по договору  подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2  от 30.09.2017г. подписанный   ответчиком без замечаний.

Согласно справке по форме  КС-3 от 30.09.2017г., стоимость работ и затрат составила 8 960 000 руб.

С учетом частичной оплаты задолженность за выполненные работы по договору  №КП-205 от 01.08.2017г. составляет 840 000 руб. 

Между ООО "САПСАН"  (далее-подрядчик) и   ООО "ТИ ДЖИ ВИ" (далее- генподрядчик) заключен договор №КП-207 от 01.08.2017г.,  по условиям которого Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 8  к договору) и проектной документацией своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных интернатов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного(-ых) дома(-ов), по адресу (-ам): 

<

...> включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте(-ах), сооружение и демонтаж временных   зданий   и   сооружений,   поставку   Материалов,   Изделий,   Конструкций, Оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки выполненных работ по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного   срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ.  Генподрядчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим  Договором, после приемки выполненных работ на Объекте(-ах) комиссией по приемке выполненных работ.

Пунктом 3.1 договора установлена цена договора,  которая составляет 4 267 200 руб.,    в том числе НДС 18%- 650 928 руб. 81 коп. 

В соответствии с п. 3.5. договора сцелью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик представляет Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) не менее, чем в 4 (четырех) экземплярах, а также представляет Отчет о выполненных работах по форме согласно Приложения № 6 к настоящему Договору. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 должны быть оформлены в строгом соответствии с действующими требованиями к оформлению указанных документов; пометки, исправления, подчистки не допускаются, такие документы юридической силы не имеют. Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения документов рассматривает представленные документы и уведомляет Подрядчика о готовности объекта к приемке выполненных работ в соответствии с п. 7.5, 7.6 настоящего Договора либо направляет обоснованный отказ с указанием замечаний и сроков их

устранения. Неполучение Подрядчиком отказа Генподрядчика в установленный срок не влечет за собой признание работ принятыми.

Согласно условиям договора, оплата принятых работ производится в размере 70 % в 2017г., оставшаяся часть в размере 30 % оплачивается в 2018г.

Факт выполнения истцом работ по договору  подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2  от 30.09.2017г. подписанный   ответчиком без замечаний.

Согласно справке по форме  КС-3 от 30.09.2017г., стоимость работ и затрат составила 4 267  200 руб. 

С учетом частичной оплаты задолженность за выполненные работы по договору  №КП-207 от 01.08.2017г.  составляет 957 200 руб. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку срок оплаты истек, и ответчик не представил доказательств оплаты в полном объеме выполненных истцом работ по договорам, требование истца о взыскании 1 797 200 руб.  долга в   соответствии со ст.ст. 309, 310, 702, 709, 711  ГК РФ подлежит удовлетворению.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, ст.ст. 309, 310, 330, 702, 709 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 176, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ"  в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН" задолженность  в размере 1 797 200  руб. (Один миллион семьсот девяносто семь тысяч двести рублей).

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ"  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 30 972  руб. (Тридцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля).

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.И. Никонова