Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-90653/2019

17 января 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  26 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  17 января 2020 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКАТЕЛЬ" (адрес:  Россия 195220, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ЛИТ. А/52Н, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" (адрес:  Россия 194100, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...>/ЛИТЕРА А, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании 19290355.67

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 20.03.19, ФИО2 по доверенности от 05.12.16 г.

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 11.11.18, 

 

установил:

АО "ИСКАТЕЛЬ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к АО "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" и после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать 17 923 323 руб. 76 коп. задолженности по договору №154/18-А от 06.08.18 и 1 367 034 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.12.19.

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве.

В заседании 26.12.19 ответчик заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела для заключения мирового соглашения.

Истец возражал.

Ходатайство отклонено судом, так как мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса.

Судом установлено:

Между АО «Искатель» (далее - подрядчик) и АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (далее - заказчик) был заключен договор подряда № 154/18-А от 06.08. 2018 г. (далее по тексту - Договор) по проверке дна акватории и суши на наличие взрывоопасных предметов на объекте «Приморский УПК, расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское Лесничество, Приморское участковое лесничество в кварталах 155, 159-162, а также в границах порта Приморск». 

В соответствии с п. 3.3 Договора общая стоимость работ составила 23 904 154 руб. 70 коп.

Истец выполнил работы надлежащим образом, что подтверждается подписанными сторонами без замечаний актами №1 «сдачи-приемки работ этапов 1 и 2» и актами №2 «сдачи-приемки работ этапов 3 и 4» от 21.12.2018 года. 

Заказчик работы оплатил частично в размере 4 780 830 руб. 94 коп.

В настоящее время задолженность по оплате работ составляет 17 923 323 руб. 76 коп.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 26.12.19 г. в размере 1 367 034 руб. 88 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика. В связи с увеличением суммы иска с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 2 858 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с акционерного общества "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" в пользу акционерного общества "ИСКАТЕЛЬ" 19 290 355 руб. 67 коп., из них: 17 923 323 руб. 76 коп. задолженности и 1 367 031 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 116 594 руб. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с акционерного общества "ИНВЕСТИЦИИ. ИНЖИНИРИНГ. СТРОИТЕЛЬСТВО" в доход федерального бюджета 2 858 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.