АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 (резолютивная часть)

Дело № А59-1893/2018

г. Южно-Сахалинск

04 сентября 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  администрации муниципального образования «Макаровский городской  округ» Сахалинской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Стройград» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании устранить недостатки  работ по муниципальному контракту от 11.09.2014,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174 и 176 АПК РФ, 

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройград» в  течение 90 календарных дней со дня вступления решения в законную силу:  

1. Устранить строительные недостатки для прекращения процесса  намокания стен и биологического поражения с внутренней стороны  наружных стен дома, а именно: произвести утепление стен жилого дома №  13 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области с внешней  стороны наружных стен, а также демонтировать внутреннее утепление,  обработать внутреннюю поверхность наружных стен биозащитными  составами и восстановить внутреннюю отделку жилья;  

2. Устранить строительные недостатки для прекращения протекания  воды из вентиляционных каналов через вентиляционные решетки в  санузлах, кухнях, через стены в санузлах, а именно: осуществить демонтаж  стен санузлов, кухонь, произвести утепление вентиляционных каналов,  выполненных из пластиковых трубопроводов, восстановить стены  санузлов, кухонь, внутреннюю отделку стен санузлов, кухонь, а также  произвести утепление вентиляционных коробов на чердаке и крыше  

жилого дома № 13 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской  области;  

3. Произвести работы по монтажу облицовочного покрытия на  карнизах кровли с северной и восточной стороны жилого дома № 13 по ул.  50 лет ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области;  

4. Произвести работы по замене кафельной плитки в санузлах квартир   № 5, 11, 17, 18, в кухнях квартир № 11, 15 жилого дома № 13 по ул. 50 лет  ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области;  

5. Произвести ремонт механизма открытия и закрытия дверцы  электрической плиты, установленной в квартире № 5 жилого дома № 13 по  ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области;  

6. Выполнить работы по восстановлению отделки фасада с северной и  восточной стороны, по восстановлению отделки наружных оконных  откосов с восточной стороны фасада жилого дома № 13 по ул. 50 лет  ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области;  

7. Выполнить работы по ремонту сливного бачка унитаза, по  выравниванию линолеума в квартире № 8 жилого дома № 13 по ул. 50 лет  ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области;  

8. Выполнить работы по герметизации стыков между подоконником и  оконными блоками в целях исключения попадания осадков на лоджию  квартиры № 13 жилого дома № 13 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Макаров,  Сахалинской области;  

9. Восстановить внутреннюю отделку жилья квартир жилого дома №  13 по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Макаров, Сахалинской области, а именно  выполнить работы по устранению:  

- микротрещин и отслоения шпаклевочного слоя на потолке в зальной  комнате, на стенах санузла, по устранению следов подтеков на  канализационной трубе, в квартире № 5;  

- следов плесени на стыках стен, на стыках между стеной и потолком,  следов подтеков с канализационной трубы и с вентиляционной решетки в  санузле, по устранению отслоения шпаклевочного слоя на потолке кухни в  квартире № 6;  

- микротрещин на стене между кухней и лоджией в квартире № 8; 

- микротрещин в стыках стен, в стыках между стеной и потолком в  санузле в квартире № 11;  

- трещин в стыках стен, в стыках между стеной и потолком, на  внешней стене в санузле в квартире № 14;  

- микротрещин на стене в санузле в квартире № 13; 

- отслоения шпаклевочного слоя у канализационной трубы, по  устранению микротрещин на стене в ванной комнате, в зальной комнате, в  кухне в квартире № 15;  

- микротрещин на стене, следов подтеков по канализационной трубе в  квартире № 17;  

- микротрещины на стене в санузле в квартире № 18. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» в  доход федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев