Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2764/2023 27.04.2024 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Р. В. Есина, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А. И. Шаманаевой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Отдела капитального  строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского  округа (ИНН 6505005925 ОГРН 1136509000913)  

к индивидуальному предпринимателю Гусейнову Руслану Чингиз-оглы (ИНН  650503181249 ОГРНИП 316650100051710)  

об обязании в срок не превышающий 2 месяцев после вступления решения суда в  законную силу, произвести в здании центра адаптивной физической культуры,  расположенного по адресу: гор. Невельск, ул. Сельская, 1 работы по устранению недостатков  выявленный в период гарантийного срока; взыскании убытков в сумме 116 203,74 руб.,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора –  муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Отдела культуры,  спорта и молодежной политики Администрации Невельского городского округа» ИНН  6505999755,  

при участии: 

от истца – О. А. Петренко, по доверенности от 11.05.2023 № 387, паспорт;  от ответчика – не явился (извещен);  

от третьего лица – не явился (извещен). 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать индивидуального предпринимателя Гусейнова Руслана Чингиз-оглы (ИНН  650503181249 ОГРНИП 316650100051710) в срок, не превышающий 2 месяцев после  вступления решения суда в законную силу, устранить следующие замечания в рамках  исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 186-22 от 15.11.2022:  

- в кабинете № 1 (актовый зал) проклеить место стыкования линолеума между первой и  второй полосами, расположенными в трех метрах от входа в помещение, размером 6*1 м.; на  потолке в правом углу с северо-западной стороны от входа в актовый зал, снять отслоившийся  штукатурный слой размером 0,4 * 0,3 м., произвести выравнивание потолка в указанном месте  и окрасить его поверхность;  

- произвести переустановку дверного короба эвакуационного выхода, расположенного с  северной стороны центра адаптивной физической культуры, путем пропенивания дверного  короба по всему периметру;  

- в коридоре центра, расположенного на 2 этаже, проклеить место стыкования линолеума  между первой и второй полосами от входа, размером 2,6 * 0, 05 м; в местах соединения  потолка и стен по всему периметру коридора, произвести окрашивание участка размером 15 *  0,01 м.;  

- в раздевалке (каб. б/н) в местах соединения потолка и стен по всему периметру  произвести окрашивание участка размером 8,5 * 0,01 м.  

В остальном, исковые требования удовлетворению не подлежат. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гусейнова Руслана Чингиз-оглы (ИНН  650503181249 ОГРНИП 316650100051710) в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с момента его изготовления в полном объеме, путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Р. В. Есин