АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-30763/2023

город Саратов

26 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 110,112,167-170,176-180,181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «КОММУНЭНЕРГО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Саратовская область, город  Шиханы - удовлетворить.  

Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Саратовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) г. Саратов устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта крыши многоквартирного дома № 12 по улице Ленина в городе Шиханы  Саратовской области в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу,  выполнив следующие ремонтно-строительные работы:  

демонтаж водоизоляционного покрытия в карнизной части кровли с последующим  выравниванием укланообразующего слоя и устройством кровельного покрытия в два слоя;  

расчистку поверхности стальной конструкции кровельного ограждения от следов  коррозии с устройством нового защитного покрытия в соответствии с требованиями сметной  и нормативно-технической документации (1 слой грунтовки +2 окрасочных слоя);  

дополнительная герметизация узлов сопряжений опорных конструкций кровельного  ограждения и крыши приклейкой дополнительного слоя кровельного покрытия.  

Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Саратовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) г. Саратов устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта крыши многоквартирного дома № 10 по улице Молодежная в городе Шиханы  Саратовской области в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу,  выполнив следующие ремонтно-строительные работы:  

демонтаж водоизоляционного покрытия в карнизной части кровли с последующим  выравниванием укланообразующего слоя и устройством кровельного покрытия в два слоя;  

расчистка поверхности стальной конструкции кровельного ограждения от следов  коррозии с устройством нового защитного покрытия в соответствии с требованиями сметной  и нормативно-технической документации (1 слой грунтовки +2 окрасочных слоя);  

ремонт кирпичной кладки поврежденного вентиляционного канала;  

устройство узлов примыкания кровельного покрытия к парапетам в соответствии с  требованиями нормативно-технической документации;  

смену верхнего слоя кровельного покрытия на Техноэласт: ЭКП.  

Обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Саратовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) г. Саратов устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта крыши многоквартирного дома № 23 по улице Молодежная в городе Шиханы  Саратовской области в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу,  выполнив следующие ремонтно-строительные работы:  

демонтаж водоизоляционного покрытия в карнизной части кровли с последующим  выравниванием укланообразующего слоя и устройством кровельного покрытия в два слоя;  

расчистка поверхности стальной конструкции кровельного ограждения от следов  коррозии с устройством нового защитного покрытия в соответствии с требованиями сметной  и нормативно-технической документации (1 слой грунтовки +2 окрасочных слоя);  

ремонт кирпичной кладки поврежденного вентиляционного канала; 

устройство узлов примыкания кровельного покрытия к парапетам в соответствии с  требованиями нормативно-технической документации;  

смену крышек парапетов из оцинкованной стали. 

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Саратовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) г. Саратов в пользу общества с ограниченной ответственностью  «КОММУНЭНЕРГО» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) Саратовская область, город  Шиханы расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., расходы на  проведение технического исследования крыш в многоквартирном доме № 12 по ул. Ленина г.  Шиханы Саратовской области, в многоквартирных домах № 10, 23 по ул. Молодежная г.  Шиханы Саратовской области в размере 45 000 руб.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в  течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1