Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Москва 

«28» июня 2024 года Дело № А41-10840/2024  

Резолютивная часть решения объявлена «29» мая 2024 года. Решение изготовлено в полном объеме  «28» июня 2024 года.  

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Абрамовой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "ПОЛАТИ" к ООО "РЕНОВАЦИЯ" о  взыскании 10013947 руб. 32 коп.,  

при участии: от истца от ответчика, 

установил:

ООО "ПОЛАТИ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в  Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "РЕНОВАЦИЯ" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании 9221567 руб. 20 коп. основного долга по договору  выполнения работ № 691-06/2022 от 09.06.2022 г., 792380 руб. 12 коп. неустойки, а также  неустойки, начисленной на сумму основного долга с 06.02.2024 г. по дату фактической  оплаты основного долга исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения  обязательства от неуплаченной в срок суммы долга.  

Иск заявлен на основании ст. ст. 307, 309, 310, 314, 329, 330, 702, 711, 746, 753 ГК РФ.  

В обоснование заявленных требований истец указал, что им по вышеназванному  договору были выполнены работы, в результате ненадлежащей оплаты которых образовалась  взыскиваемая сумма основного долга. Неустойка начислена в соответствии с пунктом 7.2  договора в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки за период с 31.07.2023  по 05.02.2024, а также с 06.02.2024 по дату фактической оплаты основного долга.  

Ответчик в отзыве на исковое заявление указал, что заказчиком работ является  ПАО «Нижнекамскнефтехим», и ответчик зависит от факта приемки работ заказчиком и их  оплаты. При таких обстоятельствах, у ответчика отсутствовала возможность своевременно  оплачивать истцу платежи. Ответчик указал на неверное включение истцом в расчет  неустойки нерабочего дня, ввиду чего с применением положений ст. 193 ГК РФ сумма  неустойки не может составлять более 759713 руб. 43 коп. Также ответчик заявил ходатайство  о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ.  

В судебное заседание представители сторон, извещённые надлежащим образом о  месте и времени его проведения, не явились. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК  РФ в их отсутствие.  

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные  доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, отзыве на него,  

ходатайстве о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, арбитражный суд находит  исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.  

Как установлено материалами дела, 09.06.2022 между истцом (исполнителем) и  ответчиком (заказчиком) в редакции дополнительного соглашения был заключен договор  выполнения работ № 691-06/2022, согласно которому исполнитель обязуется произвести  монтаж, демонтаж строительных лесов на объекте строительства в соответствии с условиями  договора, графика выполнения работ, а также иных приложений к договору и передать  результат работ заказчику, а заказчик обязуется оплатить выполненные работы в  соответствии с условиями договора.  

Цена работ согласована сторонами в приложении № 5 к договору (калькуляция). 

Согласно п. 5.2 договора оплата выполненных работ, а равно, как и оплата этапов  работ, если такие согласованы в договоре, производится заказчиком на основании  подписанного сторонами акта выполненных работ за определенный сторонами период, счет-фактуры и счета в течение 10 календарных дней с момента подписания акта о приемке  выполненных работ обеими сторонами.  

В соответствии с п. 7.2 договора при неоплате выставленных исполнителем счетов по  договору, либо нарушении сроков оплаты, предусмотренных договором, по требованию  исполнителя заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый  день просрочки.  

Факт исполнения истцом принятых на себя обязательств по указанному договору на  сумму 9221567 руб. 20 коп. подтверждается представленными в материалы дела  подписанными сторонами актами сдачи-приемки работ (л.д. 30-42).  

Ответчиком факт выполнения исполнителем работ не оспаривается (ч. 3.1 ст. 70 АПК  РФ), однако работы в полном объеме им оплачены не были, в связи с чем, у ответчика перед  истцом образовалась задолженность в размере 9221567 руб. 20 коп.  

Оставление ответчиком без удовлетворения претензии истца о выплате указанной  суммы основного долга послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.  

Отношения сторон по настоящему спору регулируются положениями главы 37 ГК  РФ.  

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится  заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены  законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний  в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего  Кодекса.  

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной  работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену  после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711  ГК РФ).  

Данные требования закона и договорного обязательства ответчиком выполнены  надлежащим образом не были.  

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ в арбитражный суд ответчиком не  представлено доказательств погашения взыскиваемой задолженности.  

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ  заказчика от оплаты уже выполненных по договору работ не допускается (ст. ст. 310, 702,  711 ГК РФ).  

При этом доводы ответчика о том, оплата выполненных истцом работ зависит от  факта приемки и оплаты работ заказчиком ПАО «Нижнекамскнефтехим», отклоняются  судом по следующим основаниям.  

В пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ  от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного  подряда» разъяснено, что оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком  работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному  подрядчику.  

В силу п. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или  назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени,  который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может  определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.  

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении  своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих  законодательству условий договора.  

Таким образом, исходя из содержания пункта 5.2 договора, учитывая положения  статьей 190, 711 ГК РФ, а также пункта 9 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору  строительного подряда», арбитражный суд полагает, что обязанность по оплате работ по  договору выполнения работ № 691-06/2022 от 09.06.2022 в данном случае возникла у  ответчика по факту их выполнения.  

Кроме того, пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору  строительного подряда» также предусмотрено, что подписание акта заказчиком  свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими  воспользоваться.  

Судом установлено, что работы были приняты ответчиком, претензий по качеству,  срокам или объемам выполненных работ от заказчика не поступало.  

Доказательств того, что выполненные истцом по договору работы не имеют  потребительской ценности для ответчика, последним в материалы дела не представлено  (ст. 65 АПК РФ).  

В соответствии с ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих  требований и возражений.  

Согласно ч. 2 ст. 9 АПК РФ участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий и последствий несоблюдения  установленных судом процессуальных сроков.  

Исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ представленные сторонами в  материалы дела доказательства, руководствуясь нормами гражданского законодательства,  учитывая конкретные обстоятельства спора, принимая во внимание, что ответчик не  представил доказательств оплаты суммы долга в указанном размере, арбитражный суд  считает требование истца о взыскании 9221567 руб. 20 коп. обоснованным, документально  подтверждённым и подлежащим удовлетворению.  

Кроме того, истцом заявлены требования о взыскании 792380 руб. 12 коп. неустойки,  а также неустойки, начисленной на сумму основного долга с 06.02.2024 г. по дату  фактической оплаты основного долга исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения  обязательства от неуплаченной в срок суммы долга.  

Поскольку ответчиком были нарушены сроки оплаты выполненных работ, требования  истца о взыскании неустойки, основанные на условиях договора (п. 7.2 договора),  соответствуют положениям ст. ст. 330, 331 ГК РФ.  

Представленный истцом расчет неустойки за период с 31.07.2023 по 05.02.2024 на  сумму 792380 руб. 12 коп. судом проверен.  

Между тем, судом установлено, что истцом расчет неустойки выполнен неверно,  ввиду чего с учетом произведенного судом перерасчета сумма неустойки за период с  31.07.2023 по 05.02.2024 составляет 783618 руб. 97 коп.  

При этом в соответствии со статьей 333 ГК РФ суд вправе уменьшить неустойку, если  подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.  

Ответчик заявил о применении положений данной статьи и уменьшении заявленной  истцом неустойки.  

В данном случае при рассмотрении настоящего спора суд полагает возможным  применить нормы ст. 333 ГК РФ.  

Статьей 333 ГК РФ предусмотрено, что если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  

В соответствии с пунктом 2 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 17 основанием для  применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки  последствиям нарушения обязательств.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае может  быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммой неустойки  суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность  неисполнения обязательств и другие обстоятельства.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе  (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ  только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик  должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые  могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной  неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы,  подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Поскольку в силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ по требованию об уплате неустойки  кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, он может в опровержение  заявления ответчика о снижении неустойки представить доказательства, свидетельствующие  о том, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора,  действующего в гражданском обороте разумно и осмотрительно при сравнимых  обстоятельствах, в том числе основанные на средних показателях по рынку (изменение  процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в  соответствующий период, колебания валютных курсов и т.д.). Доводы ответчика о  невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения; о  неисполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими  кредиторами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о  непоступлении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью  или в части на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых  функций; о наличии у должника обязанности по уплате процентов за пользование  денежными средствами (например, процентов по договору займа) сами по себе не могут  служить основанием для снижения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.  

При этом арбитражный суд обращает внимание, что в Определении  Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указано на то, что  гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения  исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или  ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях  устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств. В  соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации именно законодатель  устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод гражданина в  целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и свободы договора при  

определении на основе федерального закона таких его условий, как размеры неустойки - они  должны быть соразмерны указанным в этой конституционной норме целям.  

Также названным Судом разъяснено, что предоставленная суду возможность снижать  размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения  обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые  направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то  есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не  должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333  ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между  применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не  возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.  

В пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского  кодекса Российской Федерации» разъяснено, что разрешая вопрос о соразмерности  неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя  величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из  двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого  нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной  последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить  доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение  оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам  предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения  обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в  тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера  допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может  быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной  учетной ставки Банка России.  

Принимая во внимание компенсационный характер неустойки, принцип ее  соразмерности последствиям неисполнения обязательств должником, а также принимая во  внимание размер возможных убытков в связи с несвоевременной оплатой заказчиком  выполненных по договору работ, учитывая чрезмерно высокий размер неустойки,  предусмотренный договором, арбитражный суд полагает возможным применить положения  ст. 333 ГК РФ и взыскать с ответчика неустойку в размере 333699 руб. 41 коп., рассчитав ее в  порядке ст. 395 ГК РФ, применив однократную ключевую ставку Банка России,  действующую в соответствующие периоды.  

Суд считает сумму 333699 руб. 41 коп. справедливой, достаточной и соразмерной,  принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение  обязательства, а не средством обогащения за счет должника.  

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 65 постановления  Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О  применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ истец вправе  требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в  частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения  работ).  

В отношении требования о взыскании неустойки, начисленной на сумму основного  долга с 06.02.2024 по дату фактической оплаты основного долга, арбитражный суд пришел к  выводу о его удовлетворении на основании п. 65 постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств».  

Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки подлежат частичному  удовлетворению.  

Судебные расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика  пропорционально удовлетворенным требованиям (ст. 110 АПК РФ). При этом в силу п. 9  Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" если размер заявленной неустойки  снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления  ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной  суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком, исходя из суммы неустойки,  которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.  

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "РЕНОВАЦИЯ" в пользу ООО "ПОЛАТИ" 9221567 руб. 20 коп.  основного долга, 333699 руб. 41 коп. неустойки и 73006 руб. 07 коп. в возмещение расходов  по уплате государственной пошлины.  

Взыскать с ООО "РЕНОВАЦИЯ" в пользу ООО "ПОЛАТИ" неустойку, начисленную  на сумму основного долга с 06.02.2024 г. по дату фактической оплаты основного долга  исходя из 0,1 % за каждый день просрочки исполнения обязательства от неуплаченной в срок  суммы долга.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских