62_10108380 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации   РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-104467/19

08 октября 2020 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.В.  Сороченковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в дело по первоначальному  иску ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" к ООО "ГРАНУМ" о взыскании 955 000 руб.  31 коп., а также по встречному иску ООО "ГРАНУМ" в пользу ООО "КДЕ- ИНЖИНИРИНГ" (с учетом принятого судом изменения) 1 991 009 руб. 43 коп.  При участии в судебном заседании – представителя ООО "ГРАНУМ" согласно  протоколу  

Руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "ГРАНУМ" в пользу ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ"  948 160 руб. 51 коп. – задолженности за выполненные работы по договору, 136  руб. 80 коп. – неустойки (пени) за просрочку оплаты за 26.11.2019 г. (1 день),  22 019 руб. – расходов по государственной пошлине.  

Во взыскании остальной части неустойки отказать.  

Встречный иск удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" в пользу ООО "ГРАНУМ"  

1 991 009 руб. 43 коп. – неустойки (пени) за нарушение сроков выполнения  

работ (с 30.11.2018 по 04.08.2020). 

Взыскать с ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" в доход федерального бюджета  

32 910 руб. – государственной пошлины. 

Произвести зачет первоначального и встречного требования, по  

результатам которого: 

Взыскать с ООО "КДЕ-ИНЖИНИРИНГ" в пользу ООО "ГРАНУМ"  1 020 693 руб. 12 коп. – неустойки.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Т.В. Сороченкова