АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-33263/2023

г. Казань

11 декабря 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Галеевой Ю.Н,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Иск в отношении Муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал", г.Казань (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать Муниципальное унитарное предприятие города Казани "Водоканал", г.Казань (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу судебного акта восстановить нормальные условия эксплуатации системы канализации, предназначенной для обслуживания объектов капитального строительства: административно-бытовое здание по адресу: ул. Портовая, 25 и административно-бытовое здание по адресу: ул. Меховщиков, д.40а, путем подключения существующей канализационной трубы д1400мм к колодцу К1-27, обеспечивающей водоотведение сточных вод по ул. Портовая, д. 25 и ул. Меховщиков, д. 40 на новую линию, выполненного в рамках строительства объекта «Участок дороги от ул. Техническая до Кировской дамбы развития Большого Казанского кольца на территории муниципального образования г. Казани Республики Татарстан. Улица Меховщиков на участке от ул. Магистральная до ул. Девятаева» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной АО «Институт «Татдорпроект» и Техническими условиями, выданными МУП «Водоканал» исх. № 07-15/2169 от 03.02.2021г., для чего выполнить следующие работы:  

- установить шпунтовое ограждения типа «Ларсен 5-УМ» с двух сторон от колодца К127 (вдоль тротуара) общей площадью S=72 м2;  

-выемку грунта песчаного под котлован с размером по верхней части 10,25x10,25 м и глубиной 5,5 м с откосами в три стороны под 45 градусов, V=289м3;  

- работы по устройству песчаной подушки с уплотнением толщиной 150 мм: S=5,25 м2 (0,7875 м3);  

- работы по замене старого (короткого, т.е. недоведенного до колодца К1-27 участка) трубы (чугунной д 400 мм, с выполнением присоединения данной трубы к колодцу К1-27: L=6m  

-выполнить обратную засыпку котлована местным (ранее извлеченным) грунтом с послойным уплотнением V=289м3  

- работы по извлечению шпунтового ограждения типа: «Ларсен 5-УМ» общей площадью S=72 м2  

- провести работы по прочистке участка трубы д 400 мм длиной в интервале 33-38м от твёрдой фракции канализационных стоков (L=35,5 м).  

В иске в отношении Государственного казенного учреждения "Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве Транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан", г.Казань (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) и Общества с ограниченной ответственностью "Волгадорстрой", г.Казань, (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) отказать.  

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал", г.Казань (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Кентро", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 371 750 руб. судебных расходов.  

 Взыскать с Муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал", г.Казань (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АИР Плюс", г. Казань, (ИНН 

<

***>) 371 750 руб. судебных расходов.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.  

Председательствующий судья Ю.Н. Галеева