Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-114767/2021

01 апреля 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  01 апреля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Новиковой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Баурама» (адрес:  198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, к. 3, литера А, офис 26; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСУРС" (адрес:  160004, 

<

...> здание 44а, офис 27; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАУРАМА» (далее – компания, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СК Ресурс» (далее – общество, ответчик) о взыскании неотработанного аванса в размере 1672288 руб. 05 коп., а также стоимости переданных и невозвращенных товарно-материальных ценностей в размере 460463 руб. 60 коп.

В настоящем судебном заседании истец поддержал заявленные требования.                      

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился.

Арбитражный суд в порядке статей 123, 156, пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, признав надлежащим уведомление ответчика, с учетом мнения истца, завершил предварительное слушание дела и перешел к рассмотрению спора по существу.

            Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между компанией (подрядчик) и обществом (субподрядчик) заключен договор субподряда № СП/7 от 09.02.2021 (далее – договор), по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по заданию подрядчика выполнить комплекс строительных работ, предусмотренных настоящим договором, на объекте «Производственный рыбный комплекс с технологией УЗВ по выращиванию атлантического лосося, мощностью 2500 тонн товарной рыбы в год» по адресу: Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Грибково, и передать результат работ подрядчику в сроки, указанные в разделе 3 договора, а подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ.

В соответствии с пунктом 2.1 договора объем, сроки и отдельные этапы выполнения работ, выполняемых субподрядчиком по настоящему договору определяются Графиком производства работ. В силу пункта 2.2 договора (с учетом подписанного сторонами протокола разногласий от 09.02.2021 к договору) датой начала выполнения работ по каждому этапу в соответствии с графиком производства работ является дата подписания акта приема-передачи фронта работ по каждому отдельному этапу работ в соответствии с графиком производства работ.

Акты приема-передачи строительной площадки и фронта работ подписаны сторонами 09.02.2021 и 19.02.2021, акты приема-передачи рабочей документации – 10.02.2021, 18.03.2021 и 29.03.2021. С учетом дат подписания актов приема-передачи фронта работ, срок окончания выполнения работ по договору истекал 30.10.2021.

Согласно пункту 3.1 договора сдача-приемка результатов выполненных субподрядчиком работ производится ежемесячно и оформляется соответствующими актами (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)).

В силу пункта 3.2 договора перед приемкой отдельных видов работ производится приемка скрытых работ, предусмотренных технической документацией, СНиП и ТСН. Порядок приемки скрытых работ предусмотрен данным пунктом договора.

Объемы фактически выполненных работ по настоящему договору фиксируются субподрядчиком ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от технической документации (пункт 3.4 договора).

Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ предусмотрен пунктами 3.5 и 3.5.1. договора.

Субподрядчик при выполнении работ предъявляет подрядчику фактически выполненные работы, с представлением соответствующих документов, оформленных сопроводительным письмом: акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3); счета; счета-фактуры.

При этом объемы выполненных работ должны быть предварительно подтверждены исполнительными геодезическими съемками и согласованны геодезистом подрядчика, начальником участка подрядчика, руководителем проекта подрядчика. На основании согласованной исполнительной геодезической съемки, субподрядчик оформляет акты выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). После оформления указанных актов, субподрядчик обязан получить подтверждение (визу начальника участка и руководителя проекта на актах выполненных работ) от подрядчика видов и объемов фактически выполненных работ. После чего полный пакет документов направляется подрядчику (пункт 3.5.1. договора).

Во исполнение принятых на себя обязательств ООО «СК БАУРАМА» перечислило ООО «СК РЕСУРС» 5227662 руб. 12 коп. аванса по договору по платежным поручениям от 12.02.2021 № 487, от 04.03.2021 № 851, от 14.04.2021 № 1328, от 28.04.2021 № 1484, от 21.05.2021 № 1647, от 11.06.2021 № 1942.

В нарушение условий договора надлежащим образом оформленные первичные учетные документы и документация подрядчику на сумму перечисленного аванса субподрядчиком не передавались.

Работы по договору приняты на сумму 3555374 руб. 07 коп., о чем сторонами подписаны акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 от 28.02.2021 № 1 на сумму 1546375 руб. 22 коп. и от 31.03.2021 № 2 на сумму 2008998 руб. 85 коп.

В силу пункта 5.4.2 договора подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если субподрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Поскольку субподрядчик не выполнил работы на сумму перечисленного аванса и не сдал результат работ подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные договором, ООО «СК БАУРАМА» письмом от 30.09.2021 № 631 уведомило ООО «СК РЕСУРС» об одностороннем отказе от исполнения договора на основании п. 5.4.2. договора, пункта 2 статьи 715 ГК РФ и потребовало возвратить неотработанный аванс (РПО 19734963002785). В этом же письме ООО «СК БАУРАМА» в ответ на письмо ООО «СК Ресурс», направленное последним согласно штампу Почты России 03.08.2021, уведомило ООО «СК Ресурс» о мотивированном отказе от подписания актов КС-2 и справок КС-3 от 31.05.2021 № 5 на сумму 2977938 руб. 41 коп., КС-2 и КС-3 от 30.04.2021 № 4 на сумму 367165 руб. 81 коп., КС-2 и КС-3 от 30.04.2021 № 3 на сумму 1293663 руб. 37 коп.

В соответствии с пунктом 4.5 договора подрядчик вправе предоставить субподрядчику на время выполнения работ по договору СИЗы, оборудование и инструмент необходимый для выполнения работ. Переданное имущество (СИЗы), оборудование и инструмент подлежат возврату в рабочем и пригодном состоянии по окончанию срока выполнения работ (досрочного прекращения работ) либо досрочного прекращения договора по любому из оснований, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ. В случае поломки инструмента и оборудования, но при условии возможности его ремонта субподрядчик осуществляет ремонт данного оборудования за свой счет и возвращает его подрядчику в рабочем состоянии и пригодном для его дальнейшего использования. В случае не возможности ремонта и полного уничтожения переданного оборудования и инструмента (СИЗы) подрядчик осуществляет безакцептное удержание в размере 100% стоимости переданного оборудования и инструмента из стоимости выполненных субподрядчиком работ, а в случае невозможности по каким-либо причинам удержания указанных расходов, субподрядчик компенсирует указанные затраты подрядчику на основании выставленного подрядчиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления.

В силу пункта 4.5.1 договора подрядчик вправе предоставить спец.одежду для работников субподрядчика, с последующим безакцептном удержании в размере 100% от стоимости соответствующих расходов из стоимости выполненных работ субподрядчиком, а в случае невозможности по каким-либо причинам удержания указанных расходов, субподрядчик компенсирует указанные затраты подрядчику на основании счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета.

В случае прекращения работы на объекте до истечения 6 месяцев с момента начала выполнения работ по основаниям, связанным с ненадлежащим исполнением субподрядчиком обязательств по договору, в том числе в случае одностороннего отказа подрядчика от исполнения договора по любому из оснований, предусмотренных договором и/или действующим законодательством РФ, у субподрядчика удерживается 100% от стоимости расходов на спец.одежду, а в срок от 6 до 12 месяцев работы -50% стоимости, а при условии полного выполнения всего объемы работ по договору – стоимость спец.одежды не удерживается.

Во исполнение условий пунктов 4.5, 4.5.1 договора и на основании соответствующих заявок от 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 11.02.2021, 12.02.2021, 24.02.2021, 29.03.2021, 07.04.2021, 09.04.2021, 01.05.2021, 06.05.2021 подрядчик выдал со склада уполномоченным представителям субподрядчика товарно-материальные ценности для производства работ по договору.

Поскольку после оставления строительной площадки ООО «СК Ресурс» не возвратило ООО «СК БАУРАМА» переданные для производства работ товарно-материальные ценности на общую сумму 460463 руб. 60 коп., а также учитывая невозможность удержания указанной суммы затрат из стоимости выполненных работ (ввиду отсутствия таковых) в соответствии с пунктами 4.5, 4.5.1 договора, подрядчик в соответствии с условиями договора выставил субподрядчику счет на оплату от 30.09.2021 № 300906 на сумму 460463 руб. 60 коп. и направил его вместе с письмом от 30.09.2021 № 631 (РПО 19734963002785), потребовав произвести оплату в течение 5 рабочих дней с момента получения требования.

В добровольном порядке ООО СК Ресурс» не исполнило требования, содержащиеся в письме исх. № 631 от 30.09.2021, не возвратило неотработанный по Договору аванс и не возместило расходы ООО «СК БАУРАМА» в виде стоимости переданных и невозвращенных товарно-материальных ценностей.

Отказ общества удовлетворить названные требования послужил основанием для обращения компании в суд с настоящим иском. 

Ответчик позицию по спору не представил.

 Заслушав доводы представителя истца, изучив материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении иска. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

Из разъяснений, данных в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", следует, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Кроме того, как следует из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 24.08.2015 № 302-ЭС15-8288, подрядчик в подтверждение факта выполнения и сдачи работ должен представить суду доказательства уведомления истца о готовности сдать результат работ, а также акт приема-передачи.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным. 

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований. 

Факт перечисления истцом ответчику денежных средств по спорному договору подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Компания отказалась от договора по причине ненадлежащего исполнения обществом принятых на себя обязательств и нарушения сроков выполнения работ, направив ответчику соответствующее уведомление письмом от 30.09.2021 исх. № 631 согласно почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо (РПО 19734963002785) и уведомив об отказе от подписания актов КС-2 и справок КС-3 от 31.05.2021 № 5 на сумму 2977938 руб. 41 коп., КС-2 и КС-3 от 30.04.2021 № 4 на сумму 367165 руб. 81 коп., КС-2 и КС-3 от 30.04.2021 № 3 на сумму 1293663 руб. 37 коп.

Отказ от подписания названных документов мотивирован следующим: работы, указанные в актах по форме КС-2 от 30.04.2021 № 3, от 30.04.2021 №4 и от 31.05.2021 №5 не принимались ответственными представителями ООО «СК БАУРАМА» на объекте в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.1 договора; в нарушение пунктов 2.8, 3.2 договора не производилась приёмка скрытых работ в порядке, предусмотренным договором; в нарушение пунктов 2.7 и 3.4 договора ООО «СК Ресурс» не вело журналы производства работ, таким образом, не подтверждены как объемы работ, указанные в актах КС-2, так и сам факт их выполнения; объемы и виды работ, указанные в актах КС-2 не подтверждены исполнительной документацией; акты КС-2 не соответствуют отчётному периоду на момент предоставления, а именно: направлены спустя три и четыре месяца после окончания предусмотренного договором отчетного периода.

Исходя из условий договора и положений действующего гражданского законодательства РФ, подрядчик вправе требовать от субподрядчика возврата исполненного обязательства по договору, включая неотработанный аванс, в качестве неосновательного обогащения в том случае, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленных авансов.

Поскольку договор подряда расторгнут, а работы на сумму аванса ответчиком не выполнены, у него отсутствуют законные основания для удержания денежных средств, перечисленных на его счет истцом.

В материалы дела ответчиком не представлено относимых и допустимых доказательств в опровержение факта перечисления денежных средств, как и не представлено доказательств выполнения работ по договору в полном объеме либо возврата истцу полученных денежных средств, в связи с чем, ответчика следует признать лицом, неосновательно удерживающим денежные средства истца в размере 1672288 руб. 05 коп.

Факт передачи ООО «СК БАУРАМА» товарно-материальных ценностей для производства ООО «СК Ресурс» работ по договору подтверждается представленными в материалы дела заявками на выдачу ТМЦ со склада, подписанными уполномоченными представителями субподрядчика.

Доказательств возврата товарно-материальных ценностей, перечисленных в счете на оплату от 30.09.2021 № 300906 на сумму 460463 руб. 60 коп., либо оплаты данного счета в соответствии с пунктом 4.5.1 договора, ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, оценив фактические обстоятельства дела с учетом принципов равноправия и состязательности арбитражного процесса, суд признал недоказанным факт выполнения ответчиком работ по договору на всю сумму перечисленного истцом аванса, а также возврата либо возмещения стоимости невозвращенных товарно-материальных ценностей.

Принимая во внимание, что суду не представлены документы, опровергающие исковые требования истца, в деле отсутствуют доказательства оплаты долга, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме. 

При обращении с настоящим иском в суд истцу предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины.

В соответствии с частью 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации и статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Ресурс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАУРАМА» неотработанный аванс в размере 1672288 руб. 05 коп. и стоимость переданных и невозвращенных товарно-материальных ценностей в размере 460463 руб. 60 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Ресурс» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 33664 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Новикова Е.В.