АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-9741/2024

г. Белгород

10 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2025 года Полный текст решения изготовлен 10 апреля 2025 года 

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Кощина В. Ф. при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Недорубко С. А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Дирекция пространственного развития "10" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) к МБУ "УБГБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании договорной неустойки,  

в судебном заседании участвуют: от истца– Беспалов С.Г., представитель по доверенности, диплом, паспорт; от ответчика - ФИО1, представитель по доверенности, диплом, паспорт. 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Дирекция пространственного развития "10" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к МБУ "УБГБ" о взыскании 3 044 688 руб. пени по контракту, расходов по оплате госпошлины в размере 38 223 руб.  

11.12.2024 года от ответчика поступило возражение на исковое заявление, в котором просит снизить размер неустойки до 434 016 руб.  

От истца поступило возражение на отзыв, в котором считает, что отзыв ответчика не обоснован, противоречит закону и удовлетворению не подлежит.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.  

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Исследовав материалы дела, оценив в силу статей 71, 162 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, выслушав пояснения явившихся представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующему.  

Из материалов дела следует, что в соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0126300035821000948 от 22.11.2021 года, с ООО «Дирекция пространственного развития «10» в порядке, установленном п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, был заключен Контракт № 2021.948 на поставку  

товаров для нужд бюджетного учреждения (далее - Контракт), подписанный 03.12.2021 года.  

Согласно п. 1.1. Контракта, Поставщик обязуется осуществить поставку и установку плавающего арт-объекта на реке Везелка в г. Белгороде, далее - Товар, в количестве и ассортименте, согласно Приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

В соответствии с п. 6.4. Заказчик в течение 2-х рабочих дней с даты поставки и установки Товара подписывает Акт приемки-передачи поставленного товара и установки (без претензий), представленный и подписанный уполномоченным лицом Поставщика, либо направляет мотивированный отказ от подписания такого документа.  

Акт приема-передачи и УПД (статус 2) № 28 от 20 декабря 2021 г. были направлены истцом в адрес ответчика письмом от 10.01.2022 о подписании актов по Контракту № 2021.948 заказным письмом с описью вложения (квитанция и опись вложения отправления 30803367506687).  

Согласно отчета об отслеживании отправления 30803367506687, 18.01.2022 года указанные документы были получены адресатом.  

В соответствии с п. 3.4. Контракта Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара (без претензий) приложение № 3 к контракту, но не позднее 29.12.2021.  

Оплата Контракта должна была быть произведена в течение 15 рабочих дней с момента получения Акта приемки-передачи товара (без претензий) приложение № 3к контракту, то есть с 19.01.2022 + 15 рабочих дней = 08.02.2022 года.  

При отсутствии оплаты пеня начисляется с 09.02.2022 по день исполнения обязательства.  

Платежным поручением № 175484 от 22.08.2024 года в ходе исполнения судебного решения долг был оплачен.  

Пунктом 7.2. Контракта установлено: Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Период просрочки исполнения обязательства - с 09.02.2022 по 22.08.2024 (включительно).  

Размер пени, подлежащей оплате, составляет: 3 044 688.00 руб. 

Претензия № 56 от 23.8.2024 об оплате пени была направлена в адрес ответчика (квитанция и опись вложения отправления 19000087051962).  

С целью принудительного взыскания неустойки ООО "Дирекция пространственного развития "10" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.  

Согласно пункту 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда,  

вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.  

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из государственного контракта от 03.12.2021 N 2021.948 на поставку и установку плавающего арт - объекта на реке Везелка в г. Белгороде, в связи с чем, правоотношения сторон регулируются главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон N 44-ФЗ).  

В соответствии со статьей 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.  

В соответствии со статьей 506 ГК РФ, по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (статья 526 ГК РФ).  

В силу требований части 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В соответствии со статьей 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему проданного товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.  

Срок наступления ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства наступает с момента, когда указанное обязательство должно быть исполнено (статья 314 ГК РФ).  

Согласно положениям статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В рассматриваемом случае обязательства сторон возникли из государственного контракта от 15.02.2022 N 08592000011220000200001 на поставку сенсоров глюкозы, в связи с чем, правоотношения сторон регулируются главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормами Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту - Закон N 44-ФЗ).  

В силу статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.  

Согласно части 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В силу части 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая  

пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

В силу части 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона N 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.  

С соответствии с частью 9 статьи 34 Закона о контрактной системе сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (часть 9.1 статьи 34 Закона о контрактной системе).  

Правила списания заказчиком неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 (далее - Правила N 783).  

Согласно пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, Правила списания неустоек имеют целью оказать государственную поддержку предприятиям, заключающим государственные и муниципальные контракты. При этом списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.  

В ходе исполнения судебного решения платежным поручением № 175484 от  

22.08.2024 года долг был оплачен.  

Однако, пунктом 7.2. Контракта установлено: Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Ответчик в свою очередь указывает в отзыве на то, что расчет неустойки должен быть произведен с даты вступления решения суда в законную силу, т. е. с 12.04.2024 г. (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда) по дату фактической оплаты долга, а так же истец не применил при расчете неустойки мораторий в период с 01.04.2022 г. № 98-ФЗ.  

Принимая во внимание приведенные ответчиком расчеты и учитывая действие моратория на начисление неустоек за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, установленного Постановлением N 497, а также положения п. 3 ст. 9.1, п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве, обращаясь к разъяснениям, изложенным в п. 7 Постановления N 44, суд исходит из отсутствия оснований для начисления ответчику пени в период с 01.04.2022 по 01.10.2022.  

С учетом применения моратория суд произвел перерасчет неустойки по требованиям, возникшим до введения в действие моратория (октябрь 2020 - март 2022 годов), и определил ее размер, равным 2 272 008 руб.  

В связи с изложенным суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании неустойки в размере 2 272 008 руб.  

 При обращении в арбитражный суд с исковым заявлением истцом уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 04.09.2024 N 72 в сумме 38223 руб. 00 коп. Судебные расходы в соответствии с положениями ст. 110 АПК РФ подлежат отнесению на ответчика в сумме 28522 руб. пропорционально удовлетворенным требованиям.  

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "Дирекция пространственного развития "10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить в части.  

Взыскать с МБУ "УБГБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "Дирекция пространственного развития "10" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени по контракту № 2021.948 за период с 02.10.2022 по 22.08.2024 в размере 2 272 008 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 28 522 руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Кощин В. Ф.