Арбитражный суд Хабаровского края

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5417/2025

г. Хабаровск

18 июля 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи К.А. Полегкого,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «РемстройГарант»                      (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический комбинат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 883 320 руб. 09 коп.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «РемстройГарант»                  (далее – ООО «РСГ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Амурский гидрометаллургический комбинат» (далее – ООО «АГМК») о взыскании неосновательного обогащения в общем размере 810 395 руб. 75 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере в общем размере 72 924 руб. 34 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, начиная с 04.04.2025 по день фактической возвращения суммы неосновательного обогащения.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии главой 29 АПК РФ.

Ответчик предъявленные требования не признал, в направленном отзыве на иск указал на несостоятельность позиции процессуального оппонента по делу, полагал доказанными факты допущенных им нарушений условий спорных договоров и наличие в данном случае оснований для зачетов встречных однородных требований.

Арбитражный суд принял решение путем подписания резолютивной части решения, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Впоследствии через систему электронной подачи документов                   «Мой арбитр» в суд поступило заявление стороны о составлении мотивированного решения по правилам части 2 статьи 229 АПК РФ.

Решение принято судом после исследования материалов дела по следующим основаниям.

Между ООО «АГМК» (заказчик) и ООО «РСГ» (подрядчик) заключен договор строительного подряда от 21.04.2023 № АГМК 17(01-1-1606),                     в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы антикоррозийной защиты трубопроводов и устройство тепловой изоляции на объекте(ах) – «Корпус CIL». Конкретные виды и объёмы работ указаны в рабочей документации и расчёте договорной цены (сметном расчёте) (приложение № 1 к договору). Подрядчик обязуется выполнить весь объём работ: предусмотренный рабочей документацией, даже если работы прямо не поименованы в расчёте договорной цены (сметном расчёте), подлежащий выполнению в соответствии с технологией и организацией строительства, даже если такие работы прямо не поименованы в рабочей документации. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке, предусмотренном договором (пункт 1.4 договора).

Подрядчик обязуется выполнить работы с соблюдением сроков, указанных в графике выполнения работ (приложение № 2 к договору)             (пункт 2.1 договора от 21.04.2023).

Приложением № 2 к договору сторонами согласованы следующие сроки выполнения работ: начало – 10.07.2023; окончание – 30.08.2023.

Согласно пункту 3.1 договора от 21.04.2023 приблизительная общая стоимость работ и порядок определения окончательной общей стоимости работ определены на основании расчёта договорной цены (сметного расчёта) (приложение № 1 к договору).

Приложением № 1 общая стоимость работ определена в размере 3 282 520 руб. 54 коп.

Заказчик   обязуется   произвести   оплату   по   договору   в   следующем    порядке: уплатить подрядчику денежные средства в размере            30% от приблизительной стоимости работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора сторонами, при условии получения заказчиком счета на оплату (3.2.1); уплачивать подрядчику денежные средства в размере 90% от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в отчётном месяце (далее – оплачиваемая доля) за вычетом суммы аванса (пункт 3.2.1 договора), подлежащего зачёту в порядке, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта договора, в течение 15 рабочих дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком работ за отчётный месяц (с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ за отчётный месяц, в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 приложения № 5 к договору). Зачёт аванса, уплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 3.2.1 договора, в счёт стоимости фактически выполненных подрядчиком за отчётный месяц работ производится в размере 30% от оплачиваемой доли, до момента полного погашения суммы аванса (3.2.2); уплатить подрядчику денежные средства в размере разницы между окончательной стоимостью работ и суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с пунктами 3.2.1 – 3.2.2 договора, в течение 15 рабочих дней с даты сдачи-приёмки работ по договору в целом (с даты подписания сторонами акта о полном исполнении обязательств подрядчиком (пункт 1.10 приложения № 5 к договору) (3.2.3) (пункт 3.2 договора от 21.04.2023).

В силу пункта 3.4 договора от 21.04.2023 все расчёты по договору осуществляются в российских рублях путём безналичного перечисления денежных средств заказчиком платёжными поручениями на расчётный счёт подрядчика. Обязательства заказчика по оплате по договору считаются исполненными с даты списания соответствующей суммы денежных средств с расчётного счёта заказчика в пользу подрядчика. Обязательство  по оплате  заказчика  может быть  прекращено  путём  проведения  зачёта однородных встречных требований, путём направления заказчиком подрядчику заявления о зачёте. Зачёт считается совершённым в момент получения подрядчиком заявления заказчика о зачёте.

Права и обязанности сторон, порядок взаимодействия сторон в ходе исполнения договора, определены в приложениях №№ 1-5 к договору             (пункт 4.1 договора от 21.04.2023).

Исходя из пункта 1.1 приложения № 5 сдача-приёмка фактически выполненных подрядчиком объёмов работ производится сторонами ежемесячно. Отчётным периодом, для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком, признаётся полный календарный месяц, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта. Отчётным периодом для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком в последнем календарном месяце выполнения работ по договору, является период с первого числа месяца по дату фактического окончания работ подрядчиком. Отчётные периоды определённые во втором и третьем абзаце настоящего пункта, по тексту договора и приложений к нему именуются – «отчётный месяц» или «отчётный период». Одновременно со сдачей объёмов выполненных работ подрядчик не позднее одного дня с даты окончания соответствующего отчётного месяца, обязуется передавать заказчику: акт о приёмке выполненных работ (с указанием в нём объёмов, видов и стоимости выполненных работ) за отчётный месяц, составленный в двух экземплярах, подписанный подрядчиком со своей стороны, оформленный по форме, предоставленной заказчиком (1.1.1); справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, в двух экземплярах, подписанную подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной заказчиком (1.1.2); отчёт об использовании материалов заказчика за отчётный месяц, оформленный по форме, предусмотренной пунктом 1.1.7 приложения № 3 к договору (1.1.3); исполнительную и исполнительно-техническую документацию за отчётный месяц (1.1.4).

Заказчик обязуется осуществить приёмку объёмов работ, выполненных подрядчиком в отчётном месяце, в течение пяти календарных дней с даты окончания соответствующего отчётного периода, но в любом случае не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным, и передать подрядчику подписанные со своей стороны акт о приёмке выполненных работ за отчётный месяц и справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, или в такой же срок отказаться от приёмки указанных объёмов работ и направить подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных работ за отчётный месяц с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения                                (далее – уведомление об отказе от приёмки) (пункт 1.2 приложения № 5).

Пунктом 1.4 приложения № 5 установлено, что факт сдачи подрядчиком и приёмки заказчиком объёмов работ, выполненных в соответствующем отчётном месяце, подтверждается актом о приёмке выполненных работ за соответствующий отчётный месяц, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон.

Факт окончания выполнения работ в целом, факт сдачи подрядчиком результатов выполненных работ по договору в целом заказчику, факт приёмки результатов выполненных работ заказчиком, факт исполнения подрядчиком обязательств по договору в полном объёме, подтверждается соответствующим актом, составленным по форме, приведённой в приложении № 6 к договору (по тексту договора и приложений к нему – акт о полном исполнении обязательств подрядчиком) (пункт 1.10 приложения           № 5).

Как следует из пункта 5.8.6 приложения № 5 подрядчик обязуется обеспечить соблюдение работниками подрядчика установленного заказчиком режима нахождения в месте выполнения работ, порядка въезда и выезда, предоставлять возможность службе охраны заказчика производить досмотр и обследование сумок, коробок и иных вещей работников подрядчика, не допускать нахождение работников подрядчика в состоянии алкогольного и/или наркотического, и/или иного токсического опьянения в пути следования до/от места выполнения работ, не допускать ввоз и/или изготовление, и/или хранение, и/или употребление алкогольных, наркотических и иных токсических веществ в месте выполнения работ, не допускать курение в неположенных местах в месте выполнения работ, а также в пути следования до/от места выполнения работ.

В случае выявления уполномоченным представителем заказчика фактов курения в необорудованных местах и/или ввоза, и/или изготовления, и/или хранения, и/или употребления спиртных напитков и/или наркотических и/или иных токсических веществ работниками подрядчика и/или работниками привлечённых подрядчиком третьих лиц, (а равно установления фактов их алкогольного, и/или наркотического и/или иного токсического опьянения) в месте выполнения работ и/или в пути следования до/от места выполнения работ, уполномоченный представитель заказчика составляет акт о нарушении работниками подрядчика порядка нахождения в месте выполнения работ, о чем уведомляет уполномоченного представителя подрядчика (пункт 5.12 приложения № 5).

На основании пункта 6.1 приложения № 5 в случае просрочки подрядчиком на срок свыше 5 календарных дней сроков начала и/или окончания выполнения соответствующих работ по отношению к срокам, предусмотренным графиком выполнения работ (приложение № 2                         к договору), подрядчик обязуется уплатить заказчику, по требованию заказчика, пеню в размере 0,1% от приблизительной стоимости работ               (пункт 3 приложения № 1 к договору), за каждый календарный день просрочки (начиная с первого дня просрочки начала и/или окончания выполнения подрядчиком соответствующих работ, предусмотренных графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору), если такая просрочка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, но не более 20% от приблизительной стоимости работ.

В случае выявления заказчиком факта хищения (или попыток хищения) имущества заказчика, ввоза и/или изготовления, и/или хранения, и/или употребления алкогольных, наркотических или любых токсических веществ в месте выполнения работ, а равно нахождения в состоянии алкогольного или наркотического, или токсического опьянения в месте выполнения работ и/или в пути следования до/от места выполнения работ, зафиксированного актом о нарушении работниками подрядчика порядка нахождения в месте выполнения работ, составленного и подписанного заказчиком, подрядчик обязуется уплатить заказчику по требованию заказчика штраф в размере            100 000 руб. за каждый выявленный факт нарушения. В случае повторного совершения работниками подрядчика действий, указанных в первом абзаце настоящего пункта приложения, подрядчик обязуется уплачивать заказчику по требованию заказчика штраф в размере 500 000 руб., за каждый выявленный факт нарушения. Примечание: под состоянием алкогольного опьянения признается положительный результат повторного исследования выдыхаемого воздуха на наличие этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения (пункт 6.11.1 приложения № 5).

В соответствии с пунктом 6.19 приложения № 5 в случае выявления заказчиком факта нарушения подрядчиком (работниками подрядчика) условий договора, ответственность за которое предусмотрена разделом 6 настоящего приложения, заказчик обязуется направить подрядчику акт, подписанный заказчиком, а в случаях, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего приложения, - акт, подписанный заказчиком совместно с подрядчиком, в течение 5 рабочих дней с даты составления соответствующего акта, и/или требование об уплате неустойки (штрафа и/или пени). Нарушение считается признанным подрядчиком, обязательство по уплате подрядчиком неустойки (штрафа и/или пени) считается возникшим: либо с момента получения от подрядчика письменного подтверждения признания подрядчиком факта нарушения; либо если по истечении 15 календарных дней с даты получения подрядчиком от заказчика документов, предусмотренных предыдущим абзацем настоящего пункта приложения, заказчиком не будет получено письменное возражение подрядчика по факту нарушения.

Подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку (штраф и/или пени), предусмотренные договором, в течение 10 рабочих дней с момента возникновения обязательства подрядчика по оплате (пункт 6.19 настоящего приложения). В случае неисполнения подрядчиком обязанности по оплате в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта приложения, заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа и/или пени) из сумм, подлежащих оплате заказчиком подрядчику за выполненные работы               (пункт 6.20 приложения № 5).

Договор считается заключённым с даты подписания договора обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, фактически возникшие с даты, указанной в заголовке на первой странице договора. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства подрядчика, предусмотренные приложением № 5 к договору) (пункт 6.1 договора                   от 21.04.2023).

Платежными поручениями от 08.06.2023 № 5423, от 27.12.2023                    № 12356, от 24.12.2024 № 11689, от 24.01.2025 № 603 заказчик в счет оплаты выполняемых работ перечислил подрядчику авансовый платеж на общую сумму 1 563 142 руб. 71 коп.

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты в полном объеме без замечаний работы на общую сумму 2 173 538 руб. 46 коп., что подтверждается представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ формы КС-2 от 30.11.2023 № 1 и                  № 2, а также акте о полном исполнении обязательств от 25.12.2024, подписанных и скрепленных печатями сторон.

Вместе с тем, указанные работы выполнены подрядчиком за пределами согласованных сторонами сроков, в связи с чем, заказчиком начислена неустойка за просрочку исполнения обязательств на общую сумму                 610 395 руб. 75 коп., подробный расчет которой приведен в соответствующих претензионных письмах, требования которых с учетом произведенных корректировок и исключения периодов объективной невозможности выполнения ООО «РСГ» возложенных обязательств оставлены подрядчиком без удовлетворения (от 24.10.2024 № АГМК-8106-1476, от 26.12.2024                   № АГМК-8/06-1716).

Впоследствии указанная сумма неустойки удержана заказчиком в счет оплаты выполненных работ путем проведения зачета встречных однородных требований (заявление о проведении зачета от 16.01.2025 № АГА00000003 (получено подрядчиком 06.02.2025 согласно соответствующему входящему штемпелю).

Также ООО «АГМК» начислена неустойка в размере 100 000 руб.            за нахождение сотрудника подрядчика в состоянии алкогольного опьянения на месте производства работ, что зафиксировано в подписанном обеими сторонами без возражений акте от 24.11.2023, а также акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения от 24.11.2023 № 363, с которым ознакомлен сотрудник ответчика, находившиеся в состоянии опьянения с фиксацией в нем показателей 0,407 и 0,379 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

Направленной в адрес ООО «РСГ» претензией от 29.01.2024 № АГМК-8/06-118 заказчик потребовал оплатить начисленную неустойку, которая также добровольное не погашена ООО «АГМК».

Впоследствии указанная сумма неустойки удержана заказчиком в счет оплаты выполненных работ путем проведения зачета встречных однородных требований (заявление о проведении зачета от 23.07.2024 № АГА00000628 (получено подрядчиком 31.03.2025 согласно соответствующему входящему штемпелю).

03.07.2023 сторонами заключен договор строительного подряда                   № АГМК 17(01-1-1649), в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по теплоизоляции трубопроводов, защиты теплоизоляции на объекте(ах) - «Эстакада инженерных сетей (тепловые сети, водопровод, электрические сети). Реконструкция», «Напорный трубопровод ливневой канализации», «Насосная станция горячего водоснабжения с резервуарами запаса воды», «Насосная станция производственно-пожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения. Реконструкция». Конкретные виды и объёмы работ указаны в рабочей документации и расчёте договорной цены (сметном расчёте) (приложение № 1 к договору). Подрядчик обязуется выполнить весь объём работ: предусмотренный рабочей документацией, даже если работы прямо не поименованы в расчёте договорной цены (сметном расчёте), подлежащий выполнению в соответствии с технологией и организацией строительства, даже если такие работы прямо не поименованы в рабочей документации. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке, предусмотренном договором (пункт 1.4 договора от 03.07.2023).

Подрядчик обязуется выполнить работы с соблюдением сроков, указанных в графике выполнения работ (приложение № 2 к договору)             (пункт 2.1 договора от 03.07.2023).

Согласно пункту 3.1 договора от 03.07.2023 приблизительная общая стоимость работ и порядок определения окончательной общей стоимости работ определены на основании расчёта договорной цены (сметного расчёта) (приложение № 1 к договору).

Приложением № 1 общая стоимость работ (с учетом НДС) установлена в размере 26 132 696 руб. 56 коп.

Заказчик   обязуется   произвести   оплату   по   договору   в   следующем   порядке: уплатить подрядчику денежные средства в размере 30% от приблизительной стоимости работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора сторонами, при условии получения Заказчиком счета на оплату (3.2.1); уплачивать подрядчику денежные средства в размере 90% от стоимости фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в отчётном месяце (далее – оплачиваемая доля) за вычетом суммы аванса (пункт 3.2.1 договора), подлежащего зачёту в порядке, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта договора, в течение 15 рабочих дней с даты приёмки заказчиком выполненных подрядчиком работ за отчётный месяц (с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ за отчётный месяц, в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 приложения № 5 к договору). Зачёт аванса, уплаченного заказчиком в соответствии с пунктом 3.2.1 договора, в счёт стоимости фактически выполненных подрядчиком за отчётный месяц работ производится в размере 30% от оплачиваемой доли, до момента полного погашения суммы аванса (3.2.2); уплатить подрядчику денежные средства в размере разницы между окончательной стоимостью работ и суммой денежных средств, уплаченных заказчиком в соответствии с пунктами 3.2.1 – 3.2.2 договора, в течение 15 рабочих дней с даты сдачи-приёмки работ по договору в целом (с даты подписания сторонами акта о полном исполнении обязательств подрядчиком (пункт 1.10 приложения № 5 к договору) (3.2.3) (пункт 3.2 договора от 03.07.2023).

В силу пункта 3.4 договора от 03.07.2023 все расчёты по договору осуществляются в российских рублях путём безналичного перечисления денежных средств заказчиком платёжными поручениями на расчётный счёт подрядчика. Обязательства заказчика по оплате по договору считаются исполненными с даты списания соответствующей суммы денежных средств с расчётного счёта заказчика в пользу подрядчика. Обязательство по оплате заказчика может быть прекращено путём проведения зачёта однородных встречных требований, путём направления заказчиком подрядчику заявления о зачёте. Зачёт считается совершённым в момент получения подрядчиком заявления заказчика о зачёте.

Права и обязанности сторон, порядок взаимодействия сторон в ходе исполнения договора, определены в приложениях №№ 1-5 к договору            (пункт 4.1 договора от 03.07.2023).

Исходя из пункта 1.1 приложения № 5 сдача-приёмка фактически выполненных подрядчиком объёмов работ производится сторонами ежемесячно. Отчётным периодом, для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком, признаётся полный календарный месяц, если иное не предусмотрено следующим абзацем настоящего пункта. Отчётным периодом для целей сдачи-приёмки работ, выполненных подрядчиком в последнем календарном месяце выполнения работ по договору, является период с первого числа месяца по дату фактического окончания работ подрядчиком. Отчётные периоды определённые во втором и третьем абзаце настоящего пункта, по тексту договора и приложений к нему именуются - «отчётный месяц» или «отчётный период». Одновременно со сдачей объёмов выполненных работ подрядчик не позднее одного дня с даты окончания соответствующего отчётного месяца, обязуется передавать заказчику: акт о приёмке выполненных работ (с указанием в нём объёмов, видов и стоимости выполненных работ) за отчётный месяц, составленный в двух экземплярах, подписанный подрядчиком со своей стороны, оформленный по форме, предоставленной заказчиком (1.1.1); справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, в двух экземплярах, подписанную подрядчиком со своей стороны, оформленную по форме, предоставленной заказчиком (1.1.2); отчёт об использовании материалов заказчика за отчётный месяц, оформленный по форме, предусмотренной пунктом 1.1.7 приложения № 3 к договору (1.1.3); исполнительную и исполнительно-техническую документацию за отчётный месяц (1.1.4).

Заказчик обязуется осуществить приёмку объёмов работ, выполненных подрядчиком в отчётном месяце, в течение пяти календарный дней с даты окончания соответствующего отчётного периода, но в любом случае не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным, и передать подрядчику подписанные со своей стороны акт о приёмке выполненных работ за отчётный месяц и справку о стоимости выполненных работ и затрат за отчётный месяц, или в такой же срок отказаться от приёмки указанных объёмов работ и направить подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных работ за отчётный месяц с указанием перечня недостатков выполненных работ и сроков их устранения (далее – уведомление об отказе от приёмки) (пункт 1.2 приложения № 5).

На основании пункта 1.4 приложения № 5 факт сдачи подрядчиком и приёмки заказчиком объёмов работ, выполненных в соответствующем отчётном месяце, подтверждается актом о приёмке выполненных работ за соответствующий отчётный месяц, подписанным уполномоченными представителями обеих сторон.

Факт окончания выполнения работ в целом, факт сдачи подрядчиком результатов выполненных работ по договору в целом заказчику, факт приёмки результатов выполненных работ заказчиком, факт исполнения подрядчиком обязательств по договору в полном объёме, подтверждается соответствующим актом, составленным по форме, приведённой в приложении № 6 к договору (по тексту договора и приложений к нему –              акт о полном исполнении обязательств подрядчиком) (пункт 1.10 приложения № 5).

Как следует из пункта 5.8.5 приложения № 5 подрядчик обязуется перед началом выполнения работ по договору обеспечить прохождение работниками подрядчика медицинского освидетельствования (с включением флюорографического обследования), в том числе при необходимости (в связи с работой в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним районах),            с предоставлением заказчику не позднее срока начала выполнения работ по договору соответствующих доказательств прохождения медицинского освидетельствования и флюорографического обследования.

В случае выявления заказчиком факта предоставления подрядчиком и/или работниками подрядчика недействительного медицинского освидетельствования (в т.ч. флюорографического обследования) подрядчик обязуется уплатить заказчику по требованию заказчика штраф в размере 100 000 руб. за каждое выявленное недействительное медицинское освидетельствование (в т.ч. флюорографическое обследование) (пункт 6.11.2 приложения № 5).

Согласно пункту 6.19 приложения № 5 в случае выявления заказчиком факта нарушения подрядчиком (работниками подрядчика) условий договора, ответственность за которое предусмотрена разделом 6 настоящего приложения, заказчик обязуется направить подрядчику акт, подписанный заказчиком, а в случаях, предусмотренных соответствующими пунктами настоящего приложения, - акт, подписанный заказчиком совместно с подрядчиком, в течение 5 рабочих дней с даты составления соответствующего акта, и/или требование об уплате неустойки (штрафа и/или пени). Нарушение считается признанным подрядчиком, обязательство по уплате подрядчиком неустойки (штрафа и/или пени) считается возникшим: либо с момента получения от подрядчика письменного подтверждения признания подрядчиком факта нарушения; либо если по истечении 15 календарных дней с даты получения подрядчиком от заказчика документов, предусмотренных предыдущим абзацем настоящего пункта приложения, заказчиком не будет получено письменное возражение Подрядчика по факту нарушения.

Подрядчик обязуется уплатить заказчику неустойку (штраф и/или пени), предусмотренные договором, в течение 10 рабочих дней с момента возникновения обязательства подрядчика по оплате (пункт 6.19 настоящего приложения). В случае неисполнения подрядчиком обязанности по оплате в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта приложения, заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа и или пени) из сумм, подлежащих оплате заказчиком подрядчику за выполненные работы               (пункт 6.20 приложения № 5).

Договор считается заключённым с даты подписания договора обеими сторонами, распространяет своё действие на отношения сторон, фактически возникшие с даты, указанной в заголовке на первой странице договора. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства подрядчика, предусмотренные приложением № 5 к договору) (пункт 6.1 договора                 от 03.07.2023).

Во исполнение условий названной сделки подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты в полном объеме без замечаний работы на общую сумму 20 920 098 руб. 41 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работы формы КС-2 от 31.08.2023 № 1, от 30.11.2023 № 2, от 31.01.2024 № 3, от 29.02.2024 № 4, от 30.06.2024 № 5, от 31.08.2024 № 6, от 30.09.2024 № 7,            а также актом о полном исполнении обязательств от 16.12.2024, подписанными и скрепленными печатями сторон.

Заказчик оплату указанных работ произвел в полном объеме посредством перечисления соответствующих сумм денежных средств в размере 20 205 278 руб. 42 коп. платежными поручениями от 30.08.2023                № 8377, от 06.10.2023 № 8524, от 27.12.2023 № 12463, от 20.02.2024 № 1444, от 28.03.2024 № 2604, от 01.04.2024 № 2681, от 18.07.2024 № 6271,                        от 19.09.2024 № 8461, от 14.01.2025 № 87, а в оставшиеся части – путем произведения зачетов встречных однородных требований, уведомления по которым получены подрядчиком: заявление о зачете от 23.07.2024                        № АГА00000628; заявление о зачете от 23.07.2024 № АГА00000629; заявление о зачете от 16.01.2025 № АГА00000003.

Также ООО «АГМК» начислена неустойка в размере 100 000 руб., поскольку при осуществлении контроля по соблюдению порядка прохождения обязательного медицинского осмотра (обследования) работниками подрядных организаций, осуществляющих производство работ на территории заказчика по договору № 1649, ООО «АГМК» был установлен факт предоставления подложного заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) от имени                      ГБУЗ Амурской области «Бурейская больница» на работника                    ООО «РСГ». Согласно письму от 21.11.2023 № 1230 главный врач                      ГБУЗ Амурской области «Бурейская больница» сообщил, что медицинское заключение ФИО1 подлинным не является.

Направленной в адрес ООО «РСГ» претензией от 29.01.2024 № АГМК-8/06-120 заказчик потребовал оплатить начисленную неустойку, которая также добровольное не погашена ООО «АГМК».

Впоследствии указанная сумма неустойки удержана заказчиком в счет оплаты выполненных работ путем проведения зачета встречных однородных требований (заявление о проведении зачета от 23.07.2024 № АГА00000629 (получено подрядчиком 31.03.2025 согласно соответствующему входящему штемпелю).

Не согласившись с удержанием из оплаты выполненных работ по договорам от 21.04.2023, от 03.07.2023 на основании произведенных зачетов, истец направлял в адрес ответчика досудебную претензию с требованиями возвратить неосновательно сбереженные денежные средства, которые оставлены без удовлетворения.

Невозможность урегулировать возникшие между сторонами спора разногласия послужила причиной их обращения в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу положений статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ определено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.                         По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу положений пункта 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 ГК РФ).

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, а часть 2 статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Как следует из материалов настоящего дела и сторонами фактически не оспаривалось, подрядчиком работы в рамках заключенных с заказчиком договоров выполнены в полном объеме, которые оплачены последним в полном объеме с учетом произведенных зачетов встречных однородных требований. 

Суд, оценив фактические обстоятельства по настоящему делу, приходит к выводу об отсутствии неосновательного обогащения на стороне ответчика ввиду следующего.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).   

Статьей 8 ГК РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе вследствие неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого кодекса.

Обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех условий: если имело место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение произведено за счет другого лица (за чужой счет); отсутствие правовых оснований, а именно приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, прежде всего договоре, то есть происходит неосновательно. 

Недоказанность хотя бы одного из названных условий влечет за собой отказ в удовлетворении исковых требований.

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством (пункт 3 статьи 1103 ГК РФ). 

В рассматриваемом случае заказчиком правомерно начислены суммы соответствующих неустоек (пени и штрафов) с учетом имеющихся в материалах дела доказательств, подтверждающих факты допущенных истцом нарушений ранее взятых на себя перед ответчиком обязательств.

Доводы ООО «РСГ» об обратном отклоняются судом по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

В пункте 8 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7                   «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7) разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Таким образом, если иное не установлено законами, для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать: наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы; наличие причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств; непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы; добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.

При рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут приниматься во внимание соответствующие документы (заключения, свидетельства), подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченными на то органами или организациями.

Согласно пункту 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).

Вместе с тем, в данном случае подрядчиком не доказан как сам факт существования обстоятельств непреодолимой силы в спорный период просрочки исполнения обязательств по договору от 21.04.2023 на основании которого начислена неустойка в размере 610 395 руб. 75 коп., так и их продолжительность, а также не обоснована степень влияния указанных им обстоятельств на возможность для подрядчика в полном объеме и своевременно исполнить ранее взятые на себя обязательства. 

Одновременно суд отмечает, что ссылка ООО «РСГ» на невозможность выполнения работ до подтверждения строительной готовности трубопроводов была учтена ООО «АГМК» при корректировке расчета начисленной пени.

Кроме того, в материалы настоящего дела не представлено доказательств уведомления заказчика о возникновении указанных обстоятельств, влияющих на конечные сроки сдачи работ, а равно об их приостановлении в связи с этим, что с учетом приведённого выше нормативного регулирования исключает для истца возможность на них ссылаться при рассмотрении настоящего спора.

Также судом не может быть принят довод истца о недоказанности факта нахождения его сотрудника в период исполнения обязательств по спорному договору в состоянии алкогольного опьянения, за который начислена неустойка в размере 100 000 руб.

Арбитражный суд в соответствии с требованиями части 1 статьи 64, статей 71, 168 АПК РФ на основании имеющихся в деле доказательств устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства.

Согласно статье 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

В силу статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает содействие в реализации лицами, участвующими в деле, их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В силу закрепленного в АПК РФ принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, собрать и представить в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции, арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд не может обязать сторону спора представлять доказательства, как в обоснование своей позиции, так и в обоснование правовой позиции другой стороны, поскольку в силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, самостоятельно доказывает обстоятельства, на которых основывает свои требования и возражения, а в силу положений части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что они с достаточной степенью определенности подтверждают нарушение подрядчиком согласованных сторонами условий выполнения подрядных работ по спорному договору, а именно факт нахождения сотрудника истца в состоянии алкогольного опьянения в период выполнения работ. Относимых, допустимых и достоверных доказательств иного истцом в материалы настоящего дела не представлено, в порядке статьи 161 АПК РФ доказательства, представленные ответчиком, не оспорены. 

Противоположная позиция истца по данному вопросу со ссылкой на отсутствие полномочий представителя ООО «РСГ» - ФИО2                 на подписание каких-либо актов, фиксирующих нарушения подрядчика, прямо опровергается представленным в материалы дела приказом                          от 18.11.2022 № 90/1, дающий основания заказчику в момент обнаружения сотрудника истца в состоянии алкогольного опьянения, полагать о действиях указанного лица от имени и в интересах подрядчика (его полномочия для ответчика явствовали из обстановки). Более того согласно указанному приказу  ФИО2 имел право подписи первичных документов, иного лица, уполномоченного при производстве работ на объектах от имени и в интересах подрядчика совершать эти действия последним не указано.

Более того, суд отмечает, что даже в случае обоснованности указанного довода, он в любом случае не опровергает совокупности иных установленных по делу обстоятельств, в том числе результаты медицинского обследования, позволяющие для суда констатировать факт нарушения со стороны работника подрядчика при исполнении обязательств по спорному договору.

Доказательств обратного, с учетом положений статей 9, 65 АПК РФ и бремени доказывания, истцом в материалы настоящего дела не представлено, позиция истца по приведенным вопросам носит предположительный (вероятностный) характер.

По тем же основаниям судом отклоняются доводы истца о недоказанности факта предоставления его работником недействительного медицинского освидетельствования. 

При этом ссылка истца на не указание медицинским учреждением в какой именно части документ не является подлинным, по существу не имеет правового значения, поскольку сами по себе приведенные обстоятельства исключат возможность принятия такого доказательства как достоверного. 

Иным образом истец указанные обстоятельства не оспорил, своими процессуальными правами, в том числе в порядке статьи 161 АПК РФ             не воспользовался, что исключило для суда возможность прийти к иным выводам по приведенным вопросам.

Также суд отмечает, что заявленные истцом нарушения порядка направления документов для уплаты начисленных сумм неустоек ответчиком, не нашли своего подтверждения при рассмотрении настоящего спора и в любом случае, для целей квалификации допущенных ООО «РСГ» нарушений не имеют определяющего значения, по существу не отменяя факты их совершения. 

Иной подход к разрешению приведенных вопросов, по мнению суда, нивелировал бы саму суть согласованного сторонами способа обеспечения исполнения обязательств, призванного компенсировать кредитору расходы или уменьшить неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением должником своих обязательств.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны (статья 410 ГК РФ).

Согласно статье 410 ГК РФ для прекращения обязательств зачетом, по общему правилу, необходимо, чтобы требования сторон были встречными, их предметы были однородными и по требованию лица, которое осуществляет зачет своим односторонним волеизъявлением (далее - активное требование), наступил срок исполнения. Указанные условия зачета должны существовать на момент совершения стороной заявления о зачете. Например, встречные требования сторон могут в момент своего возникновения быть неоднородными (требование о передаче вещи и требование о возврате суммы займа), но к моменту заявления о зачете встречные требования сторон уже будут однородны (требование о возмещении убытков за нарушение обязанности по передаче вещи и требование о возврате суммы займа) (пункт 10 Постановления Пленума ВС РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 6).

Пунктом 14 Постановления Пленума ВС РФ № 6 предусмотрено, что согласно статье 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ. Наличие условий для зачета без заявления о зачете не прекращает и не изменяет обязательства сторон. До заявления о зачете стороны не вправе отказаться от принятия надлежащего исполнения по встречным требованиям, стороны также не вправе требовать возврата исполнения, предоставленного до заявления о зачете.

Для прекращения обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной (пункт 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований»).

В данном случае, учитывая наличие у сторон спора встречных однородных денежных требований друг к другу (у ООО «РСГ» - задолженности по оплате за выполненные работы; у ООО «АГМК» - задолженности по оплате начисленных неустоек (штрафов и пени)), которые по своей правовой природе являются денежными, однородными и вытекающими из обязательств по одним и тем же договорам, ответчик, действуя в рамках своих полномочий в соответствии с условиями спорных сделок, правомерно в одностороннем порядке направил в адрес своего контрагента уведомления о зачетах.

При этом возражения истца о недопустимости заявленных зачетов как односторонних сделок судом отклоняются по следующим основаниям.

Согласно статье 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется предусмотренными ГК РФ способами, в том числе путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки.

Зачет как односторонняя сделка (пункт 2 статьи 154 ГК РФ) может быть признан судом недействительным, в частности, по основаниям, предусмотренным главой 9 ГК РФ (пункт 17 Постановления Пленума ВС РФ № 6).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В пунктах 74, 75 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25     «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25) разъяснено, что договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность.

Учитывая, что материалами дела подтверждается правомерность начисления заказчиком неустоек за допущенные подрядчиком нарушения ранее взятых на себя обязательств в рамках действия заключенных договоров на общую сумму 810 395 руб. 75 коп., суд также приходит к выводу о правомерности действий ООО «АГМК», связанных с удержанием указанных денежных средств из оплаты выполненных работ с учетом совершенных односторонних сделок по зачету встречных однородных требований.

Настаивая на порочности приведенных односторонних сделок                ООО «АГМК» по признаку не наступления срока исполнения соответствующих обязательств, истец вместе с тем, основывает свои выводы в указанной части на неправильном понимании и толковании соответствующих нормативных положений, регулирующих спорные правоотношения, а также без учета конкретных фактических обстоятельств настоящего спора.

Изложенное в совокупности исключило для суда возможность удовлетворения иска в какой-либо его части.

Расходы по оплате государственной пошлины возлагаются на истца с учетом итогового результата рассмотрения настоящего дела и положений статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                            К.А. Полегкий