РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело №А40-71859/2023-52-586

24 октября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 24 октября 2023 года.

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «БАРСТТ» (117587, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2012, ИНН: 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (125039, 

<

...>, Э/ПОМ/К/ОФ 11/97/2/159, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2020, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 2 930 164,66 руб., пени в размере 167 785,93 руб., далее по день фактической оплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 19 868,92 руб., далее по день фактической оплаты,

 

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. от 09.01.2023 №2),

от ответчика – представитель не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «БАРСТТ» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 2 930 164,66 руб., пени в размере 167 785,93 руб., далее по день фактической оплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 19 868,92 руб., далее по день фактической оплаты.

Истец заявленные требования поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился.

Вместе с тем, за период рассмотрения дела мотивированный отзыв на исковое заявление в дело не представил. Также Общество не доказало наличие объективных препятствий заявить возражения против иска при рассмотрении спора по существу.

Доводов о невозможности использовать процессуальные права, предоставленные сторонам нормами статей 8, 9, 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик не привел.

Непредставление мотивированного отзыва на иск и доказательств, опровергающих исковые требования, является процессуальным риском самого ответчика (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения истца, оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об удовлетворении требований в полном объеме на основании нижеследующего.

07.07.2021 Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Барстт» заключили государственный контракт № 0148200005421000163, на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала Первомайский (Контракт № 1), расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19.

01.07.2021 Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика по ремонтным работам Министерства здравоохранения Московской области» (Заказчик) и Общество с ограниченной ответственностью «Барстт» заключили государственный контракт № 0148200005421000176, на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Королевская городская больница», филиал Юбилейный поликлиника смешенного приема (Контракт № 2), расположенной по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10.

Согласно п. 5.3.6. Контракта № 1, Подрядчик имеет право привлечь к исполнению их обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

12.05.2022, Общество с ограниченной ответственностью «Барстт» (Подрядчик) и Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (Субподрядчик) заключили договор субподряда (рамочный) № 37/05-22СМР на выполнение собственными силами, без привлечения иных субподрядчиков и третьих лиц и по отдельным локальным сметам, сметным расчетам, спецификациям, заданиям, работы.

Согласно п. 1.2. Договора, субподрядчик обязуется осуществить Работы, указанные в п. 1.1. Договора на строительных объектах Подрядчика.

В соответствие с п. 1.3. Договора, виды Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость работ, определяются на основании заключенных отдельных (дополнительных) соглашений между Сторонами (Далее - Дополнительное соглашение) с отраженными в приложениях к Дополнительным соглашениям сметных расчетов или в локальных сметах, видов и стоимости работ.

Согласно п. 1.4. Договора, работы выполняются в соответствии с действующими СНиП и ГОСТами.

Моментом выполнения обязанности Подрядчика по оплате работ Субподрядчика считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Подрядчика, (п. 2.10. Договора). Подрядчик определил, что оплата может производиться на условиях авансирования работ, производимых Субподрядчиком

Согласно п. 2.3. Договора, цена Работ по Договору состоит из стоимости непосредственно Работ, выполняемых Подрядчиком, и стоимости поставляемых Подрядчиком материалов. Стоимость Работ исполнения Договора конкретизируется и определяется Сторонами в заключаемых между ними отдельными (дополнительными) соглашениями (Соглашение).

Согласно дополнительному Соглашению № 1 от 20.05.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР, было определено что, Субподрядчик обязался выполнить по заданию Подрядчика гидроизоляционные, демонтажные, строительные работы, согласно Локальной смете 01-01-01 «Демонтажные работы», 02-01-02 «Конструктивные решения», 01-01-01 «Демонтажные работы», 02-01-02 «Конструктивные решения» и Сметному расчету 02-01-02 «Конструктивные решения. Устройство пирога пола в подвале» в соответствии с перечнем Работ, на объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19 и сдать результат Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном в разделе 3 Соглашения.

Срок выполнения Работ: начало – 20.05.2022, окончание – 01.08.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ согласно Соглашению 2 938 206,97 руб., в том числе НДС 20% - 489 701,16 руб.

Согласно п. 3.1. Дополнительного соглашения, в течении 5 рабочих дней, с даты заключения настоящего Соглашения Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 100% от суммы общей стоимости Работ, закреплённой в пункте 2 настоящего Соглашения, что составляет 2 938 206,97 руб., в том числе НДС 20% - 489 701,16 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 2 от 08.06.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР, было определено что, Субподрядчик обязался выполнить по заданию Подрядчика устройство пола 1-го этажа, устройство пола 2-го этажа, устройство пола 3-го этажа, гидроизоляционные работы, согласно Локальным сметам 02-01-01 «Архитектурные решения, устройство пирога пола 1-го этажа», 02-01-01 «Архитектурные решения, устройство пирога пола 2-го этажа», 02-01-01 «Архитектурные решения, устройство пирога пола 3-го этажа» 02-01-02 «Конструктивные решения» и Сметному расчету 02-01-02 «Конструктивные решения. Устройство пирога пола в подвале», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы.

Срок выполнения Работ: начало – 08.06.2022, окончание – 08.07.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ согласно Соглашению 3 294 159,99 руб., в том числе НДС 20% - 549 026,66 руб.

Согласно п. 3.1. Договора в течении 5 рабочих дней, с даты заключения настоящего Соглашения Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 17,05% от суммы общей стоимости Работ, закреплённой в пункте 2 настоящего Соглашения, что составляет 561 794,03 руб., в том числе НДС 20% - 93 632,17 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 3 от 08.06.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР, было определено что, Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика работы по усилению плит перекрытия, согласно Сметному расчету 01-01-01 «Демонтажные работы. Усиление плит перекрытия», 02-01-02 «Конструктивные решения. Усиление плит перекрытия», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы.

Срок выполнения Работ: начало – 08.06.2022, окончание – 29.06.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ составляет 702 000 руб., в том числе НДС 20% - 117 000 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 4 от 26.06.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР было определено что, Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика работы по усилению плит перекрытия, согласно Сметному расчету 02-01-01 «Архитектурные решения. Устройство пирога пола в подвале», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном в разделе 3 Соглашения.

Срок выполнения Работ: начало – 26.06.2022, окончание – 03.07.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ составляет 136 500 руб., в том числе НДС 20% - 22 750 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 5 от 29.06.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР было определено что, Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить штукатурные работы, согласно Сметному расчету 02-01-01 «Архитектурные решения», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Первомайский», расположенной по адресу: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская, д. 19 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном в разделе 3 Соглашения.

Срок выполнения Работ: начало – 29.06.2022, окончание – 17.07.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ согласно Соглашению, составляет 2 216 001,50 руб., в том числе НДС 20% - 369 333,58 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 6 от 01.07.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР было определено что, Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика гидроизоляционные работы, согласно локальной смете 02-01-02 «Конструктивные решения», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Юбилейный», поликлиника смешенного приема, расположенной по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы.

Срок выполнения Работ: начало – 01.07.2022, окончание – 30.09.2022 (включительно).

Общая стоимость Работ составляет 1 227 840 руб., в том числе НДС 20% - 204 640 руб.

В соответствие с п. 3.1. Соглашения, оплата производится в течении 5 рабочих дней, с даты заключения настоящего Соглашения Подрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере 70% от суммы общей стоимости Работ, закреплённой в пункте 2 настоящего Соглашения, что составляет 859 488 руб., в том числе НДС 20% - 143 248 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 7 от 18.07.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР было определено что, Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика гидроизоляционные работы, согласно Локальной смете 02-01-02 «Конструктивные решения/Монолитные конструкции, в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Юбилейный», поликлиника смешенного приема, расположенной по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы.

Срок выполнения Работ: начало – 18.07.2022, окончание – 22.08.2022 (включительно).

Согласно п. 2. Соглашения, общая стоимость Работ составляет 2 090 000 руб., в том числе НДС 20% - 348 333,33 руб.

Согласно дополнительному Соглашению № 8 от 22.07.2022 к Договору субподряда от 12.05.2022 № 37/05-22СМР было определено что, Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика устройство полусухих стяжек, согласно Локальной смете 02-01-01 «Архитектурные решения/Устройство пирога пола в подвале», в соответствии с перечнем Работ, на Объекте Подрядчика: в здании ГБУЗ МО «Королевская городская больница», поликлиника филиала «Юбилейный», поликлиника смешенного приема, расположенной по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 8/10 и сдать результаты Работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результаты Работ и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном в пункте 4 Соглашения.

Согласно п. 1. Соглашения, срок выполнения Работ: начало – 22.07.2022, окончание – 29.07.2022 (включительно).

Согласно п. 2. Соглашения, общая стоимость Работ составляет 455 000 руб., в том числе НДС 20% - 75 833,33 руб.

Всего между ООО «Барстт» и ООО «СтройГарант» было заключено дополнительных соглашений на выполнение работ на общую сумму 13 054 708,46 руб.

Согласно акту сверки между Истцом и Ответчиком в период с 16.05.2022 по 31.08.2022 на расчетный счет Ответчика с расчетного счета Истца были перечислены денежные средства на сумму 12 266 488 руб., что подтверждается платежными поручениями за период с 16.05.2022 по 31.08.2022.

Согласно п. 1.5. Договора, работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием материалов и оборудования, комплектацию которых обеспечивает Подрядчик.

Согласно представленным актам выполненных работ:

1. В соответствие с локальной сметой 01-01-01 «Демонтажные работы», локальной сметой 02-01-02 «Конструктивные решения», согласно Соглашению № 1 от 20.05.2022, Субподрядчиком был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 15.08.2022 № 1, на сумму 2 111 950,68 руб., в т.ч. НДС 20% - 351 991,78 руб.; КС-2 от 28.09.2022 № 2, на сумму 92 891,77 руб., в т.ч. НДС 20% - 15 481,96 руб. отчет о переработанном сырье № 39 от 15.08.2022.

2. В соответствие с локальной сметой 02-01 -02 «Конструктивные решения», локальной сметой 02-01-01 «Архитектурные решения», согласно Соглашению № 2 от 08.06.2022, Субподрядчиком был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 15.08.2022 № 1/1 на сумму 2 215 146,14 руб., в т.ч. НДС 20% - 352 524,36 руб.; КС-2 от 15.08.2022 № 1/2, на сумму 301 800 руб., в т.ч. НДС 20% - 50 300 руб.; КС-2 от 28.09.2022 № 2 на сумму 345 029,90 руб., в т.ч. НДС 20% - 57 504,98 руб.; КС-2 от 28.09.2022 № 3 на сумму 16 203,98 руб., в т.ч. НДС 20% - 2 700,66 руб.

3. Согласно локальной смете 01-01-01 «Демонтажные работы», локальной смете 02-01-02 «Конструктивные решения», согласно Соглашению № 3 от 08.06.2022 был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 15.08.2022 на сумму 650 621,74 руб., в т.ч. НДС 20% - 108 436,96 руб.

4. В соответствие с локальной сметой № 02-01-01 «Архитектурные решения. Устройство полов», согласно Соглашению № 4 от 26.06.2022, Субподрядчиком был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 15.08.2022, на сумму 136 500 руб., в т.ч. НДС 20% - 22 750 руб., справка № 1 по форме КС-3 от 15.08.2022, на сумму 136 500 руб., в т.ч. НДС 20% - 22 750 руб.

5. Согласно локальной смете 02-01-01 «Архитектурные решения. Отделочные работы», согласно Соглашению № 5 от 29.06.2022, был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 15.08.2022 № 1 на сумму 345 247,50 руб., в т.ч. НДС 20% - 57 541,25 руб.; КС-2 от 28.09.2022 № 2, на сумму 1 543 996,98 руб., в т.ч. НДС 20% - 257 332,83 руб.; КС-2 от 28.09.2022 № 3, на сумму 108 849 руб., в т.ч. НДС 20% - 18 141,50 руб.

6. Согласно локальной смете 02-01-01 «Конструктивные решения. Устройство вертикальной гидроизоляции», согласно Соглашению № 6 от 01.07.2022, был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 23.09.2022 № 1, на сумму 650 121,40 руб., в т.ч. НДС 20% - 108 353,57 руб., справка № 2 по форме КС-3 от 23.09.2022, на сумму 1 416 429,36 руб., в т.ч. НДС 20% - 236 071,56 руб.

7. Согласно локальной смете 02-01-02 «Конструктивные решения. Монолитные конструкции», согласно Соглашению № 7 от 18.07.2022, был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 23.09.2022 № 1, на сумму 347 057,96 руб., в т.ч. НДС 20% - 57 842,99 руб.; КС-2 от 01.10.2022 № 2, на сумму 151 656,29 руб., в т.ч. НДС 20% -25 276,05 руб.

8. Согласно локальной смете 02-01-01 «Архитектурные решения», согласно Соглашению № 8 от 22.07.2022, был представлен акт выполненных работ по форме КС-2 от 23.09.2022 № 1, на сумму 419 250 руб., в т.ч. НДС 20% - 69 8757,99 руб.

Всего представлено актов по выполненным работам по форме КС-2 на общую сумму 9 336 323,34 руб.

Предоставлено отчетных документов на полученные материалы на общую сумму 2 923 602,40 руб.

Как пояснил истец,  на момент направления претензии, а именно 06.02.2023, не выполнены в полном объеме Работы согласно сметам, сметным расчетам по Соглашениям 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. По состоянию на 01.02.2023, Ответчиком Работы выполнены частично.

Истец уведомил Ответчика о расторжении в одностороннем порядке Договора № 37/05-22СМР от 12.05.2022, Соглашений к Договору № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 с 06.02.2023 и потребовал оплатить денежную сумму в размере 2 930 164,66 руб., выплаченную за выполнение предстоящих работ в виде авансов и оплатить согласно п. 7.4. Договора, неустойку в виде пени в размере 167 785,93 руб., за невыполнение обязательств в срок, согласно Договору и Соглашениям к Договору №1,2, 3, 5, 6, 7, 8.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 2 930 164,66 руб. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Наряду с изложенным, истцом предъявлено требование о взыскании неустойки на общую сумму 167 785,93 руб.

По Соглашению № 1 от 20.05.2022 просрочка составила 188 дней, с 02.08.2022 по 06.02.2023 на сумму 35 238,17 руб.

По Соглашению № 2 от 08.06.2022 просрочка составила 212 дней, с 09.07.2022 по 06.02.2023 на сумму 28 507,89 руб.

По Соглашению № 3 от 08.06.2022 просрочка составила 221 день, с 30.06.2022 по 06.02.2023 на сумму 2 985,07 руб.

По Соглашению № 4 от 26.06.2022 просрочка составила 42 дня, с 04.07.2022 по 06.02.2023 на сумму 1 708,53 руб.

По Соглашению № 5 от 29.06.2022 просрочка составила 203 дня, с 18.07.2022 по 06.02.2023 на сумму 11 418,38 руб.

По Соглашению № 6 от 01.07.2022 просрочка составила 128 дней, с 18.07.2022 по 06.02.2023 на сумму 7 219,33 руб.

По Соглашению № 7 от 18.07.2022 просрочка составила 167 дня, с 23.08.2022 по 26.09.2023 на сумму 67 550,08 руб.

По Соглашению № 8 от 22.07.2022 просрочка составила 60 дней, с 30.07.2022 по 06.02.2023 на сумму 1 746,39 руб.

16.01.2023 в адрес Ответчика были направлены акты по выполненным работам формы КС-2, КС-3.

Согласно п. 6.7. Договора, в случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере 1/300, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договор и фактически исполненных Подрядчиком (п. 6.8. Договора).

Расчет ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела и условиям договора. Ответчиком контррасчет не представлен. О применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено.

Таким образом, требование истца о взыскании неустойки в общем размере 167 785,93 руб., далее по день фактической оплаты, подлежит удовлетворению в заявленном размере как законное и обоснованное.

Наряду с изложенным, истцом предъявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 19 868,92 руб. за период с 16.02.2023 по 20.03.2023, далее по день фактической оплаты.

В силу п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Представленный истцом расчет подлежащих взысканию процентов, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

В соответствии с п.48 Постановления Пленума Верховного суда от 24.03.2016 № 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Таким образом, Истец вправе требовать присуждения процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации по день фактического исполнения Ответчиком обязательства.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.02.2023 по 20.03.2023 в размере 19 868,92 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 21.03.2023 по дату фактического исполнения обязательств подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАРАНТ» (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «БАРСТТ» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 2 930 164,66 руб., пени в общем размере 167 785,93 руб., далее по день фактической оплаты, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19 868,92 руб. за период с 16.02.2023 по 20.03.2023, далее по день фактической оплаты, госпошлину в размере 23 689,75 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

Р.Е. Галиева