АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-15716/2021

город Вологда

17 июня 2022 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 17 июня 2022 года.

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Поповой С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента лесного комплекса Вологодской области к обществу с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» об обязании провести работы по рекультивации лесного участка по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выдела №№ 12, 14, 16, 17,  19, на площади 26.38 га в соответствии с проектами освоения лесов, разработанными к договорам аренды лесных участков № 11/77 от 22.05.2008, № 11/691 от 24.01.2014, № 06-02-11/365-2020 от 06.03.2020, и сдать их на основании акта выполненных работ до 01.10.2022 года, после чего передать лесной участок Департаменту лесного комплекса Вологодской области по акту приема-передачи,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, 

при участии от истца ФИО2 по доверенности от 06.05.2022, 

у с т а н о в и л:

Департамент лесного комплекса Вологодской области (далее - Департамент, Истец) обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» (далее – Общество, ответчик) об обязании провести работы по рекультивации лесного участка по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выдела №№ 12, 14, 16, 17,  19, на площади 26.38 га в соответствии с проектами освоения лесов, разработанными к договорам аренды лесных участков № 11/77 от 22.05.2008, № 11/691 от 24.01.2014, № 06-02-11/365-2020 от 06.03.2020, и сдать их на основании акта выполненных работ до 01 октября 2022 года, после чего передать лесной участок Департаменту лесного комплекса Вологодской области по акту приема-передачи (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Ответчик, третьи лица о времени и месте  судебного заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представителей не направили.  

Ответчик в отзыве возражал против предъявленных требований по основаниям, указанным в отзыве на иск. 

Дело рассмотрено по существу в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по имеющейся явке. 

Исследовав и оценив доказательства по делу, заслушав пояснения представителя истца, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, 22 мая 2008 года между Департаментом лесного комплекса Вологодской области (далее – Арендодатель, Департамент) и обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» (далее – Арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 11/77 (далее – Договор № 11/77), зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 07 марта 2013 года за № 35-35-05/015/2012-380.

В  соответствии  с  пунктами  1.1,  1.2  Договора № 11/77  Арендодатель на основании приказа Департамента от 22 мая 2008 года № 216 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящиеся в федеральной собственности, расположенный на территории Вологодской области, Грязовецкого муниципального района, Грязовецкого лесничества, Грязовецкого сельского участкового лесничества (КСП «Ростиловский»), квартала № 27, выделов №№ 12, 16, 17, площадью 12,00 га.

Согласно пункту 1.4 Договора № 11/77 Арендатору передается лесной участок в целях разработки месторождения полезных ископаемых с целью разведки и последующей добычи строительных песков на месторождении «Никола-Пенье» для строительства КС «Новогрязовецкая» и вдольтрассовых проездов Северо-Европейского газопровода и в объемах согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. 

14 февраля 2020 года Договор № 11/77 по соглашению сторон расторгнут. По акту приема-передачи лесного участка от 14 февраля 2021 года Арендатор сдал, а Арендодатель принял лесной участок площадью 12,00 га, имеющий следующее местоположение: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество (КСП «Ростиловский»), квартал № 27, выделы №№ 12, 16, 17.

В соответствии  с пп. «л» п. 3.4 Договора № 11/77 Арендатор обязан сдать по окончании сроков выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов на арендуемом лесном участке согласно Приложению № 6 к настоящему Договору указанные работы на основании Акта выполненных работ с подписанием данного Акта уполномоченными представителями сторон настоящего Договора.

Приложением № 6 к Договору № 11/77 утверждены объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке, согласно которым рекультивация, предусмотренная проектом освоения лесов на площади 12,00 га должна была быть исполнена после окончания разработки. 

В соответствии с пп. «м» п. 3.4 Договора № 11/77 Арендатор в случае прекращения действия настоящего Договора обязан передать лесной участок Арендодателю по акту приема-передачи лесного участка, форма которого аналогична форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования.

24 января 2014 года между Департаментом и обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс»  заключен договор аренды лесного участка № 11/691 (далее – Договор № 11/691), зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области 10 апреля 2014 г. за № 35-35-28/003/2014-223.

В соответствии с пунктами 1.1, 1.2 Договора № 11/691 Арендодатель на основании приказа Департамента от 21 января 2014 года № 59 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящиеся в федеральной собственности, расположенный на территории Вологодской области, Грязовецкого муниципального района, Грязовецкого лесничества, Грязовецкого сельского участкового лесничества, КСП «Ростиловский», квартала № 27, выделов №№ 12, 14, 16, 19, площадью 10,30 га.

Согласно пункту 1.4 Договора № 11/691 Арендатору передается лесной участок в целях разработки месторождения полезных ископаемых с целью разведки и последующей добычи строительных песков на месторождении «Никола-Пенье» и заготовки древесины в объемах согласно Приложению № 3  к Договору. 

14 февраля 2020 года Договор № 11/691 по соглашению сторон расторгнут. По акту приема-передачи лесного участка от 14 февраля 2021 года Арендатор сдал, а Арендодатель принял лесной участок площадью 10,30 га, имеющий следующее местоположение: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 12, 14, 16, 19.

В соответствии  с пп. «л» п. 3.4 Договора № 11/691 Арендатор обязан сдать по окончании сроков выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов на арендуемом лесном участке согласно Приложению № 6 к настоящему Договору указанные работы на основании Акта выполненных работ с подписанием данного Акта уполномоченными представителями сторон настоящего Договора.

Приложением № 6 к Договору № № 11/691 утверждены объемы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов на арендуемом лесном участке, согласно которым рекультивация, предусмотренная проектом освоения лесов на площади 10,30 га должна была быть исполнена после окончания разработки. 

В соответствии с пп. «м» п. 3.4 Договора № 11/691 Арендатор в случае прекращения действия настоящего Договора обязан передать лесной участок Арендодателю по акту приема-передачи лесного участка, форма которого аналогична форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на момент завершения пользования.

6 марта 2020 года между Департаментом и обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» заключен договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых № 06-02-11/365-2020 (далее – Договор № 06-02-11/365-2020). По настоящему Договору Арендодатель на основании приказа Департамента от 6 марта 2020 года № 204 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование части лесного участка, находящиеся в государственной собственности, расположенные на территории:

- Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 12ч, 14ч, 16ч, 19ч, площадь 11,30 га, кадастровый номер: 35:28:0000000:440/113;

 - Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 16ч, 17ч, площадь 1,35 га, кадастровый номер: 35:28:0601001:462/чзу.

Согласно пункту 1.3 Договора № 06-02-11/365-2020 Арендатору передается лесной участок в целях разведки и добычи строительных песков на месторождении «Никола-Пенье» для строительства КС «Новогрязовецкая» и вдольтрассовых проездов Северо-Европейского газопровода.

Срок действия Договора № 06-02-11/365-2020 установлен пунктом 6.1 настоящего Договора и составляет 11 месяцев. 

Подпунктом «л» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/365-2020 предусмотрена обязанность арендатора осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов. 

Подпунктом «т» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/365-2020 Арендатор обязан по истечению срока действия настоящего Договора или в случае досрочного прекращения срока действия настоящего Договора освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства Российской Федерации.

Подпунктом «р» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/365-2020 Арендатор обязан в день окончания срока действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора.

5 февраля 2021 года по акту приема-передачи лесного участка Арендатор сдал, а Арендодатель принял лесной участок площадью 12,65 га, имеющий местоположение:

- Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 12ч, 14ч, 16ч, 19ч, площадь 11,30 га, кадастровый номер: 35:28:0000000:440/113;

 - Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 16ч, 17ч, площадь 1,35 га, кадастровый номер: 35:28:0601001:462/чзу.

8 февраля 2021 года между Департаментом и обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» заключен договор аренды лесного участка для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых № 06-02-11/462-2021 (далее – Договор № 06-02-11/462-2021). По настоящему Договору Арендодатель на основании приказа Департамента от 8 февраля 2021 года № 132 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное пользование лесной участок, находящийся в государственной собственности, расположенный на территории: Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выделы №№ 12ч, 14ч, 16ч, 19ч, кадастровый номер: 35:28:0000000:440/113, площадью 11,30 га

Согласно пункту 1.3 Договора № 06-02-11/462-2021 Арендатору передается лесной участок в целях разведки и добычи строительных песков на месторождении «Никола-Пенье» для строительства КС «Новогрязовецкая» и вдольтрассовых проездов Северо-Европейского газопровода.

Срок действия Договора № 06-02-11/462-2021 установлен пунктом 6.1 настоящего Договора и составляет 5 месяцев 9 дней. 

Подпунктом «л» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/462-2021 предусмотрена обязанность арендатора осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесном участке в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов, проектом лесовосстановления и проектом лесоразведения.

Подпунктом «т» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/462-2021 Арендатор обязан по истечению срока действия настоящего Договора или в случае досрочного прекращения срока действия настоящего Договора освободить лесной участок от объектов недвижимого имущества, обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства Российской Федерации.

Подпунктом «р» пункта 3.4 Договора № 06-02-11/462-2021 Арендатор обязан в день окончания срока действия настоящего Договора передать Арендодателю лесной участок по акту приема-передачи лесного участка, форма которого предусмотрена приложением № 5 к настоящему Договору, в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства, с характеристиками лесного участка, установленными проектом освоения лесов на день окончания срока действия настоящего Договора.

В ходе проведения патрулирования 19 августа 2021 года представителями Департамента был осмотрен лесной участок общей площадью 12,65 га: в выделах12ч, 14, 16ч, 19 квартала 27 леса КСП «Ростиловский», Грязовецкого сельского участкового лесничества, на площади 11,3 га с кадастровым номером 35:28:0000000:440/113, в выделах 16ч, 17ч квартала 27 леса КСП «Ростиловский», Грязовецкого сельского участкового лесничества, на площади 1,3 га с кадастровым номером 35:28:0601001:462,  ранее использовавшегося по договору аренды лесного участка от 06.03.2020 № 06-02-11/365-2020 с целью разведки и добычи полезных ископаемых, заключенного с ООО «Газкомплектресурс». Осуществлен осмотр лесного участка в выделах 12ч, 14ч, 16ч, 19ч квартала 27 леса КСП «Ростиловский», Грязовецкого сельского участкового лесничества, на площади 11,3 га с кадастровым номером 35:28:0000000:440/113, ранее использовавшегося по договору аренды лесного участка от 08.02.2021 № 06-02-11/462-2021 с целью осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, заключенного с ООО «Газкомплектресурс». Границы участка частично совпадают с договором аренды лесного участка от 06.03.2020  № 06-02-11/365-2020. Осуществлен осмотр лесного участка в выделах 12, 14, 16, 19 квартала 27 леса КСП «Ростиловский», Грязовецкого сельского участкового лесничества, на площади 10,3 га, ранее использовавшегося по договору аренды лесного участка от 24.01.2014 № 11/691 с целью разведки и последующей добычи строительных песков на месторождении «Никола-Пенье» и заготовки древесины, заключенного с ООО «Газкомплектресурс».  Осуществлен осмотр лесного участка в выделах 12, 16, 17 квартала 27 леса КСП «Ростиловский», Грязовецкого сельского участкового лесничества, на площади 12,00 га, ранее использовавшегося по договору аренды лесного участка от 22.05.2008 № 11/77 с целью разработки месторождения полезных ископаемых. 

Общая разработанная площадь карьера по вышеуказанным договорам аренды лесных участков с учетом фактического наложения площадей по разным договорам, на момент проверки составляет 26,38 га, в том числе: выдел 12 – 8,7 га, выдел 14 – 3,19 га, выдел 16 – 8,09 га, выдел 17 – 6 га, выдел 19 – 0,4 га. На момент патрулирования работы по разработке карьера, рекультивации карьера не ведутся.

В ходе патрулирования выявлены следующие нарушения: рекультивация лесного участка не осуществлена, на участке имеются отвалы почвенно-растительного слоя и вскрышных пород от карьерной выемки. Глубина карьерной выемки в среднем составляет 10 м. Работы по выполаживанию откосов бортов карьерной выемки до угла 18 градусов, подсыпка грунта на дно и борта и карьерной выемки и последующая планировка поверхности карьерной выемки не проведены.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства, указанные в договорах аренды, истец обратился с настоящим иском в суд. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со статьей 1 Лесного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов лесного законодательства является обеспечение охраны и защиты лесов.

В силу статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры на землях лесного фонда.

Согласно статьи  43 Лесного кодекса Российской Федерации для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.18 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» (далее - Правила)) устанавливают порядок проведения рекультивации и консервации земель, а также особенности рекультивации земель, указанных в ч. 2 ст. 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, и в равной мере распространяются на земли и земельные участки.

Разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель, разработка проекта консервации земель и консервация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (п. 3 Правил).

Согласно пункту 8 Правил рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.

В соответствии с п. 26 Правил лица, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, указанные в п.п. 3 и 4 настоящих Правил, обязаны обеспечить разработку проекта рекультивации земель (за исключением случаев разработки такого проекта в составе проектной документации на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства) и приступить к рекультивации земель в срок, установленный решением или договором, на основании которых используются земли или земельный участок, проектной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а в случаях, если указанными документами этот срок или проведение рекультивации земель не предусмотрены, или произошло нарушение земель лицами, не использующими земли или земельные участки на законном основании, или нарушение земель в результате природных явлений, в срок не позднее чем 7 месяцев:

а) со дня окончания лицом или органом государственной власти, органом местного самоуправления деятельности, осуществление которой привело к деградации земель и (или) снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

б) со дня совершения действия, в результате которого произошла деградация земель;

в) со дня выявления деградации земель;

г) со дня получения предписания, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, о необходимости проведения рекультивации земель.

Согласно статье 83 Лесного кодекса Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия Российской Федерации в области лесных отношений но предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, а также заключению договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организации и проведению соответствующих аукционов, а также осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах.

В соответствии с Положением о Департаменте лесного комплекса Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 24.09.2012 № 1108 Департамент является постоянно действующим органом исполнительной государственной власти области в сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда, ведения государственного лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития лесопромышленного комплекса области.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Обязанность ответчика по выполнению работ по рекультивации предусмотрена договорами, проектами освоения лесов, ответчиком не исполнена.

Обоснованных доказательств надлежащего исполнения договорных обязательств ответчиком в материалы дела не представлено.

При этом доводы ответчика о том, что разработка карьера не завершена судом не могут быть признаны обоснованными, поскольку договоры аренды расторгнуты, у ответчика на момент рассмотрения дела разрешения на пользование недрами не имеется.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 07.12.2021 по делу №А13-9477/2021, вступившим в законную силу, ответчику отказано в признании незаконными решения от 05.07.2021 № 140 об отказе в продлении срока действия разрешения на пользование недрами. 

Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 ГК РФ, является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В силу статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В связи с удовлетворением иска и с учетом того, что истец освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска, по правилам статьи 110 АПК РФ государственную пошлину следует взыскать с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

 

р е ш и л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» провести работы по рекультивации лесного участка по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий муниципальный район, Грязовецкое лесничество, Грязовецкое сельское участковое лесничество, КСП «Ростиловский», квартал № 27, выдела №№ 12, 14, 16, 17,  19, на площади 26.38 га в соответствии с проектами освоения лесов, разработанными к договорам аренды лесных участков № 11/77 от 22.05.2008, № 11/691 от 24.01.2014, № 06-02-11/365-2020 от 06.03.2020, и сдать их на основании акта выполненных работ до 01 октября 2022 года, после чего передать лесной участок Департаменту лесного комплекса Вологодской области по акту приема-передачи. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Газкомплектресурс» госпошлину в сумме 6 000 руб. в доход федерального бюджета.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца после его принятия.  

Судья          С.В. Попова