Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-26748/2024

23 июня 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  23 июня 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семиным Д.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭТЛ СТРОЙ" (197342, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. УШАКОВСКАЯ, Д. 3, К. 1 СТР1, ОФИС 507, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА МЕТАЛЛ" (196650, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 33, ЛИТЕР А, 4Н ПОМЕЩ 34, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 28.09.2023);

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СЭТЛ СТРОЙ» (далее – Общество «СЭТЛ СТРОЙ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АЛЬФА МЕТАЛЛ» (далее – Общество «АЛЬФА МЕТАЛЛ») о взыскании по договорам от 01.08.2022 № НСЗ/11-06/22-ОТ2, от 10.03.2023 № НС3-ОТ10.2/123456, от 06.06.2022 № НСЗ-ОТ10/3А, от 09.09.2022 № НС3-ОТ41-5.2/6, от 25.10.2022 № Ф-10/22-Ф1, от 01.08.2022 № ССтр-АМ/НСЗ-ОТД*НС3/11-06/22-ОТ2, от 10.03.2023 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-ОТ10.2/123456, от 06.06.2022 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-ОТ10/ЗА, от 09.09.2022 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-41-5.2/6, от 25.10.2022 № ССтр-АМ/ФОРФ-ФАС*Ф-10/22-Ф1 (далее – Договоры): 61 384 612,54 руб. задолженности. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Общества «СЭТЛ СТРОЙ» (генеральный подрядчик, поставщик) и «АЛЬФА МЕТАЛЛ» (подрядчик) заключили Договоры.

В обоснование заявленных требований истец указал следующее.

1. Между ООО «Сэтл Строй» («Генеральный подрядчик», «Истец») и ООО «Альфа Металл» («Подрядчик», «Ответчик») был заключен договор подряда № НСЗ/11-06/22-ОТ2 от 01.08.2022 (далее - Договор-1), согласно условиям которого Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс отделочных работ корпуса 8.1 секций 6-10 с устройством теплого пола в санузлах квартир, на объекте строительства «Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (Корпус 8.1, 8.2, 8.3)», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008501:10812, (далее «Объект»), а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

Цена Договора определена Расчетом стоимости и составляет 116 363 686 (Сто шестнадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС. 

Сторонами было заключено дополнительное соглашение № 3 от 02.10.2023 к названному договору, об уменьшении объемов отделочных работ корпуса 8.1, в связи с чем стороны согласовали изменение цены договора. Стороны договорились об уменьшении общей стоимости выполняемых по договору работ на 70 211 635 (семьдесят миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС и внесении нижеследующих изменений в Договор: 

-содержание полного комплекса отделочных работ корпуса 8.1 с устройством теплого пола в санузлах квартир на Объекте, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, определяется составляет 46 152 050 (сорок шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС 

-сумма перечисленного ответчику авансового платежа составляет 23 272 737 (двадцать три миллиона двести семьдесят две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 36 копеек в т.ч. НДС, сумма неотработанного Подрядчиком аванса на дату подписания Соглашения составляет 14 042 327 (четырнадцать миллионов сорок две тысячи триста двадцать семь) рублей 18 копеек в т.ч. НДС. 

-в связи с расторжением договора в части, сумма авансового платежа, превышающая общую стоимость работ (с учетом уменьшения объемов по настоящему Соглашению), что составляет 9 027 687 (девять миллионов двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек в т.ч. НДС, является неосновательным обогащением и подлежит возврату Генеральному подрядчику в течение 15 дней с даты заключения Соглашения.

Кроме того, сторонами зафиксирована следующая задолженность, ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй»:

-по оплате стоимости услуг, оказанных генеральным подрядчиком - 19 700,63 рублей; 

-по возмещению затрат генерального подрядчика - 24 193,55 рублей. 

Таким образом, общая задолженность ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй» по договору № НСЗ/11-06/22-ОТ2 от 01.08.2022 составляет 9 071 581,18 рублей, обязательства Ответчика по погашению задолженности не исполнены. 

2. Между ООО «Сэтл Строй» («Генеральный подрядчик», «Истец») и ООО «Альфа Металл» («Подрядчик», «Ответчик») был заключен договор подряда № НСЗ-ОТ10.2/123456 от 10.03.2023 (далее -Договор-2) согласно условиям которого Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс отделочных работ (без учета технических помещений) с устройством теплого пола в санузлах квартир Корпуса 10.2 Секции 1,2,3,4,5,6, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (Корпуса ЮЛ, 10.2)», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Красносельский район, муниципальный округ Сосновая поляна, на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008501:10804, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

Сторонами было заключено Соглашение от 22.09.2023 о расторжении названного договора. Соглашением зафиксирована задолженность ООО «Альфа Металл» в размере 5 716 225 (Пять миллионов семьсот шестнадцать тысяч двести двадцать пять) рублей 26 копеек по возврату неотработанного аванса, а также задолженность перед ООО «Сэтл Строй»: 

-по оплате стоимости услуг, оказанных генеральным подрядчиком - 96 105, 00 рублей; 

-по возмещению затрат генерального подрядчика - 4 800, 00 рублей. 

Срок погашения задолженности составляет 90 календарных дней.

Таким образом, общая задолженность ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй» по договору № НСЗ-ОТ10.2/123456 от 10.03.2023 составляет 5 817 130,26 рублей.

3. Между ООО «Сэтл Строй» («Генеральный подрядчик», «Истец») и ООО «Альфа Металл» («Подрядчик», «Ответчик») был заключен договор подряда № НСЗ-ОТ10/ЗА от 06.06.2022 (далее – Договор 3), согласно условиям которого Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс отделочных работ с устройством теплого пола в санузлах квартир Секций 1-4, 10 Корпуса 7.1, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (Корпуса 7.1, 7.2)», расположенном по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008501:10816, (далее именуемый «Объект»), а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

15 августа 2023г. сторонами подписано дополнительное соглашение, являющееся расторжением договора в части. ООО «Альфа Металл» имеет по названному договору задолженность перед ООО «Сэтл Строй»: 

- по оплате стоимости услуг, оказанных генеральным подрядчиком -518 883,76 рублей; 

- по возмещению затрат генерального подрядчика - 228 176, 96 рублей. 

Таким образом, общая задолженность ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй» по договору № НСЗ-ОТ10/ЗА от 06.06.2022 составляет 747 060,72 рублей. 

Обязательства Ответчика по погашению задолженности не исполнены.

4. Между ООО «Сэтл Строй» («Генеральный подрядчик», «Ответчик») и ООО «Альфа Металл» («Подрядчик», «Истец») был заключен договор подряда № НСЗ-ОТ41-5.2/6 от 09.09.2022 (далее – Договор 4), согласно условиям которого, Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по отделке помещений в Корпусе 5.2, секции 6, перечень которых указан в п. 1.2 Договора и в Акте разграничения от 08.09.2022 года на объекте строительства «Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (Корпуса 5.1,5.2,5.3) (участок 41 по ППТ)», расположенном по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008501:10841, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

Сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 27.02.2023 к названному договору в соответствии с условиями которого часть объема работ, подлежащих выполнению ООО «Альфа Металл» была уменьшена, что фактически является прекращением обязательств сторон в части. 

В результате у ООО «Альфа Металл» возникло неосновательное обогащение (неотработанный аванс) в размере 83 537,97 рублей, подлежащее возврату ООО «Сэтл Строй». Кроме этого, ООО «Альфа Металл» имеет по названному договору задолженность перед ООО «Сэтл Строй»: 

- по оплате стоимости услуг, оказанных генеральным подрядчиком - 156 342, 38 рублей; 

- по возмещению затрат генерального подрядчика - 82 626,41 рублей. 

Таким образом, общая задолженность ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй» по договору № НСЗ-ОТ41-5.2/6 от 09.09.2022 составляет 322 506, 76 рублей.

5. Между ООО «Сэтл Строй» («Генеральный подрядчик», «Истец») и ООО «Альфа Металл» («Подрядчик», «Ответчик») был заключен договор подряда № Ф-10/22-Ф1 от 25.10.2022 (далее по тексту-Договор 5), согласно условиям которого Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный Договором срок выполнить полный комплекс строительных работ по устройству фасадов корпуса 8.1, перечень которых указан в п. 1.2 Договора, на объекте строительства «Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями (Корпус 8.1, 8.2, 8.3)», расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, на земельном участке с кадастровым номером 78:40:0008501:10812, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

В связи с нарушением Подрядчиком обязательств по Договору, Стороны пришли к соглашению об исключении объемов работ по устройству фасадов (Корпус 8.1) и уменьшении общей стоимости по договору на 60 374 399 (шестьдесят миллионов триста семьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 97 копеек, в т.ч. НДС 

Общая стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, составила 62 935 009 (Шестьдесят два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч девять) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС. ООО «Альфа Металл» имеет по названному договору задолженность перед ООО «Сэтл Строй»: 

- по оплате стоимости услуг, оказанных генеральным подрядчиком - 944 025,14 рублей; 

- по оплате штрафных санкций, предусмотренных договором - 60 000, 00 рублей. 

Таким образом, общая задолженность ООО «Альфа Металл» перед ООО «Сэтл Строй» по договору № Ф-10/22-Ф1 от 25.10.2022 составляет 1 004 025, 14 рублей.

 6. Согласно условиям вышеуказанных договоров подряда, а именно пункту 3.1 (условия договоров подряда идентичны и являются типовыми), работы выполняются иждивением Ответчика, как с использованием материалов, изделий, конструкций, механизмов, агрегатов и оборудования Ответчика, так и с использованием строительных материалов, поставляемых Истцом для Ответчика на основании договора поставки.

Ответчиком принято на себя обязательство не позднее 2 дней с даты подписания Договора заключить с Истцом договоры поставки материалов, указанных в Приложении № 10 к Договора, по форме, утвержденной Генеральным подрядчиком.           Условия поставки, стоимость материалов, сроки поставки определяются указанным договором поставки с учетом положений настоящего Договора.

Во исполнение указанных условий договора были заключены договоры поставки:  от 01.08.2022 № ССтр-АМ/НСЗ-ОТД*НС3/11-06/22-ОТ2, от 10.03.2023 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-ОТ10.2/123456, от 06.06.2022 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-ОТ10/ЗА, от 09.09.2022 № ССтр-АМ/НС3-ОТД*НС3-41-5.2/6, от 25.10.2022 № ССтр-АМ/ФОРФ-ФАС*Ф-10/22-Ф1.

Стоимость поставленных материалов по указанным договорам составила 84 739 938,15 руб.

Поставленные на указанную сумму материалы частично были оплачены в порядке статьи 410 ГК РФ путем зачета денежных средств, подлежащих оплате Ответчику за выполненные работы по договорам подряда в счет погашения задолженности за поставленные материалы. Ответчик в рамках исполнения обязательств по договорам поставки оплату денежными средствами не производил, оплата осуществлялась только путем зачета встречных однородных требований по договорам поставки и договорам подряда. 

Итого задолженность Ответчика по оплате материалов по указанным договорам поставки составила 81 319 596,63 руб.

Обязательство ООО «Альфа Металл» по оплате поставленных материалов на сумму 81 319 596, 63 руб. не исполнено.

Также, в связи с вышеперечисленными обстоятельствами, прекращения исполнения обязательств сторон по договорам подряда Ответчиком не исполнены обязательства по погашению неотработанного аванса 14 743 912,26 руб.

В связи с наличием встречной задолженности по оплате работ и прекращением со стороны Ответчика исполнения обязательств по договорам, в адрес контрагента после требования о погашении задолженности было направлено уведомление о сальдировании обязательств в связи с прекращением обязательств по договорам.

Согласно уведомлению о сальдировании № 2025 от 11.03.2024 размер зачитываемых в одностороннем порядке встречных однородных требований по вышеперечисленным обязательствам составляет 36 752 487,49 руб.., в т.ч. НДС сумма итогового сальдо состоит из: 

-задолженности по возврату неотработанного аванса ООО «Альфа-Металл» в размере 14 743 912,26 руб. в т.ч НДС; 

-задолженности по оплате материалов, полученных ООО «Альфа-Металл» по договору поставки № ССтр-АМ/ФОРФ-ФАС*Ф-10/22-Ф1 от 25.10.2022 в размере        22 008 575, 23 руб.

-остаток задолженности Ответчика по договору поставки № ССтр-АМ/ФОРФ-ФАС*Ф-10/22-Ф1 от 25.10.2022 составляет сумму в размере 5 187 470,42 руб. 

Таким образом, после подведения итогового сальдо встречных однородных требований задолженность Ответчика по договорам поставки - 59 311 021,40 руб., задолженность по договорам подряда  - 2 218 391,17 руб.

В связи с неоплатой денежных средств, в претензии от 30.01.2024 № 673 Общество «Сэтл Строй» потребовало от Общества «Альфа-Металл» погасить задолженность в размере 61 384 512,54 руб.

Поскольку претензия была оставлена без удовлетворения, Общество «Сэтл Строй» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата  работ заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В соответствии с частью 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Воспользовавшись указанным правом, истец отказался от договоров, такой отказ в установленном порядке не спорен.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 Гражданского кодекса Российской Федерации), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Факт перечисления истцом ответчику денежных средств подтверждается материалами дела.

Надлежащие доказательства выполнения работ по договору в полном объеме, либо возврата перечисленных денежных средств в материалы дела не представлены.

Согласно пункту 1 статьи 704 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки; если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (пункт 1 статьи 516 ГК РФ).

Факт поставки товара подтверждается представленными истцом и исследованными судом доказательствами.

Доказательств оплаты поставленного товара в полном объеме ответчиком не представлено.

Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Суд учитывает, что истцом направлено в адрес ответчика уведомление о сальдировании от 11.03.2024№ 2025, в результате зачета встречных однородных требований, задолженность ответчика перед истцом составила 61 384 612,54 руб.

При указанных обстоятельствах, требование о взыскании 61 384 612,54 руб. задолженности надлежит удовлетворить в полном объеме.

На основании изложенного требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АЛЬФА МЕТАЛЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СЭТЛ СТРОЙ" 61 384 612,54 руб. задолженности, 200 000 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.