401/2018-184237(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

30 июля 2018 года Дело № А33-14723/2018  

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 26 июля 2018 года. В полном объёме решение изготовлено 30 июля 2018 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  

«СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 

к краевому государственному казенному учреждению «Управление капитального  

строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 

о взыскании задолженности,  в присутствии в судебном заседании: от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 20.03.2018 № 128, 

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности от 14.06.2018 № 82,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к краевому государственному  казенному учреждению «Управление капитального строительства» (далее – ответчик) о  взыскании 61 526 563 руб. 17 коп. задолженности за выполненные дополнительные работы  по государственному контракту от 24.12.2015 № 1102-01.4-15 на выполнение комплекса  строительно-монтажных, пусконаладочных работ, приобретение монтируемого  оборудования по объекту «Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны,  Богучанский район».    

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 04.06.2018  возбуждено производство по делу.  

В отзыве на иск ответчик пояснил, что в ходе производства работ по государственному  контракту от 24.12.2015 № 1102-01.4-15 подрядчик выполнил дополнительные работы,  которые не были учтены проектной сметной документацией, однако необходимость их  выполнения с согласия заказчика была обусловлена, прежде всего, целью соблюдения  технологического процесса выполнения работ, обязательных требований нормативных  правовых актов и сдачи объекта в завершенном, безопасном и качественном виде, так как без  выполнения данных работ подрядчик был лишен возможности продолжать какие-либо иные  работы по возведению объекта. Выполнение предъявленных к взысканию работ  подрядчиком, их объему, стоимости и качеству выполненных работ, на которые претендует  истец, ответчик не оспаривает. Следует учитывать специфику отношений, складывающихся  в сфере строительства, которая уже в силу своего существа создает возможность выявления в  ходе исполнения обязательства дополнительных работ и в связи с этим обуславливает  приоритетную необходимость применения норм статьи 743 Гражданского кодекса  

Российской Федерации наряду с положениями Закона о контрактной системе, что  согласуется с правовой позицией Президиума Верховного суда Российской, отраженной в  пункте 12 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда Российской  Федерации 28 июня 2017 г.). Выполнение Подрядчиком дополнительных работ,  превышающих 10 % цены контракта в настоящем случае допустимо, так как направлено  исключительно на сохранение годности и прочности результата выполняемой работы, без их  выполнения подрядчик не мог приступать к другим работам, а также продолжать уже  начатые, достичь предусмотренного контрактом результата. Оснований полагать, что  выполнение работ в сложившейся ситуации иным лицом было бы возможно без увеличения  их стоимости, не имеется.  

Представители лиц, участвующих в деле, представили в материалы дела соглашение по  фактическим обстоятельствам дела.  

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 11 час. 15 мин. 26.07.2018, о чем  вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) на основании протокола  рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 23.12.2015 для закупки №  0119200000115005586 заключен государственный контракт от 24.12.2015 № 1102-01.4-15 на  выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ, приобретение  монтируемого оборудования по объекту «Реконструкция центральной районной больницы в  с. Богучаны, Богучанский район» (далее – контракт), согласно пункту 1.1 которого  подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по объекту «Реконструкция центральной  районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район» (далее - объект), в объеме,  предусмотренном описанием объекта закупки (техническим заданием) (приложение № 1 к  контракту), в соответствии с утвержденной заказчиком проектной и рабочей документацией,  в том числе: комплекс строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, приобретение  монтируемого оборудования.  

Результатом выполненных работ по контракту является законченный строительством  объект, который полностью подготовлен к вводу в эксплуатацию и в отношении которого  подписан акт приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме №  КС-11, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100. Для  надлежащего ввода объекта в эксплуатацию подрядчик обязуется представить:  тепловизионный отчет контроля качества тепловой защиты здания, исследование кратности  воздухообмена помещений, энергетический паспорт, составленный на стадии завершения  строительных работ (пункт 1.2 контракта).  

Адрес объекта: 

<

...>  (пункт 1.7 контракта).  

Пунктом 1.6 контракта установлено, что существенными условиями контракта для  сторон являются, в том числе: цена, срок выполнения работ, качество работ, гарантии  качества, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательства по контракту в  период действия контракта в документальной форме.  

Пунктом 1.3 контракта установлено, что заказчик обязуется создать подрядчику  необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить результат работ в  соответствии с условиями настоящего контракта.  

Подрядчик обязался выполнить все работы в полном объеме, предусмотренном  техническим заданием в соответствии с проектно-сметной документацией, с качеством  выполняемых работ в соответствии с нормами и правилами, действующими на момент  

выполнения работ, выполнить комплекс работ необходимый для ввода объекта в  эксплуатацию (пункт 7.2.5 контракта).  

Подрядчик обязался в соответствии с контрактом завершить все работы в сроки,  установленные пунктом 2.2 контракта (пункт 1.4 контракта).  

Пунктом 2.2 контракта установлена дата окончания выполнения работ: «01» декабря  2017 года.  

Виды и сроки выполнения работ указываются в графике выполнения работ (приложение   № 2), который разрабатывается подрядчиком в соответствии с техническим заданием,  рабочей и проектной документацией и условиями контракта, утверждается заказчиком и  является неотъемлемой частью контракта. Сроки приобретения и монтажа оборудования  указываются в графике поставки монтируемого оборудования (приложение № 7 к  контракту). Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком проекты графиков  выполнения работ/поставки оборудования. Согласованные графики подписываются вместе с  контрактом (пункт 2.3 контракта).  

Подрядчик обязался незамедлительно известить заказчика и до момента получения  указаний от заказчика приостановить работы при обнаружении неучтенных в технической  документации работ и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ, а  также увеличения сметной стоимости строительства (пункт 7.2.1.7 контракта).  

Пунктом 3.1 контракта установлено, что стоимость работ, поручаемых Подрядчику по  настоящему контракту, составляет 929 866 451 руб., с учетом НДС 18%. Цена контракта  является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

Цена контракта включает в себя стоимость полного комплекса работ, предусмотренного  проектной документацией и описанием объекта закупки (техническим заданием)  (приложение № 1 к контракту), стоимость работ в соответствии с предметом контракта, в  том числе и затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в  соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения подрядчиком  своих обязательств по контракту (пункт 3.2 контракта).  

Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств  подрядчика в соответствии с документацией открытого конкурса (пункт 1.5 контракта).  

Согласно пункту 3.7 контракта, затраты на производство работ по контракту  финансируются за счет средств краевого бюджета.  

Пунктом 3.5 контракта предусмотрено, что изменение цены контракта также возможно  по соглашению сторон в случае увеличения или уменьшения по предложению заказчика  предусмотренного контрактом объема работы не более чем на 10%. Увеличение цены  производится пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в  контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.  

Внесение изменений и дополнений в контракт в случаях, не противоречащих  действующему законодательству, возможно путем заключения дополнительного  соглашения, подписанного сторонами (пункт 10.1 контракта).  

В силу пункта 3.8 контракта, оплата работ производится заказчиком на основании  подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат  (унифицированная форма № КС-3) и актов комиссионной приемки выполненных работ.  

Сторонами подписано и судом принято соглашение о признании сторонами следующих  обстоятельств:  

 «Истец общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в лице генерального  директора ФИО4, действующего на основании Устава, и ответчик краевое  государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в лице  руководителя ФИО5, действующего на основании Устава,  являющиеся сторонами по делу № А33-14723/2018 о взыскании 61 526 563 руб. 17 коп.  задолженности за выполненные дополнительные работы по государственному контракту от  24.12.2015 № 1102-01.4-15, в соответствии с частью 2 статьи 70 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации достигли соглашения о признании  следующих обстоятельств по делу в качестве фактов, не требующих доказывания:  

1) В ходе выполнения своих обязанностей по государственному контракту от 24.12.2015   № 1102-01.4-15 на выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ,  приобретение монтируемого оборудования по объекту «Реконструкция центральной  районной больницы в с. Богучаны Богучанского района» Истцом были выполнены  следующие работы со следующей стоимостью:  

 № пункта 

Наименование работ 

Стоимость без НДС, руб. 

Стоимость с  НДС, руб.  

1 

 Установка поручней для инвалидов в санузлах .  Родильное отделение СМР  

93 783,68 

110 664,74 

 Установка поручней для инвалидов в санузлах.  Родильное отделение МАТ  

5 636,73 

6 651,34 

Установка поручней для инвалидов в санузлах  Стационар СМР  

294 134,82 

347 079,09 

Установка поручней для инвалидов в санузлах  Стационар МАТ  

19 139,71 

22 584,86 

2 

Внутренняя отделка ЛК № 11 в Родильном  отделении СМР  

137 942,56 

162 772,22 

Внутренняя отделка ЛК № 11 в Родильном  отделении МАТ  

64 934,77 

76 623,03 

3 

Обваловка наружных сетей ВК (доп. грунт) 

9 549 717,40 

11 268 666,53 

4 

Подключение огнезадерживающих клапанов в  Родильном отделении СМР  

138 149,33 

163 016,21 

Подключение огнезадерживающих клапанов в  Родильном отделении мат  

46 873,86 

55 311,15 

5 

Устройство слуховых окон Стационара  

357 046,84 

421 315,27 

Устройство слуховых окон Стационара  

76 459,95 

90 222,74 

6 

Участок монолитный 5 эт. Корпус Стационар  СМР  

109 480,22 

129 186,66 

Участок монолитный 5 эт. Корпус Стационар  МАТ  

325 644,77 

384 260,83 

7 

Фундамент под ДЭС. Прокладка кабельных  линий от ДЭС СМР  

822 513,08 

970 565,43 

Фундамент под ДЭС. Прокладка кабельных  линий от ДЭС МАТ  

987 299,78 

1 165 013,74 

8 

22 сваи под крыльца. Стационар СМР  

238 154,09 

281 021,83 

22 сваи под крыльца. Стационар МАТ  

69 438,76 

81 937,74 

9 

Кирпичная кладка армированных перегородок в  подвале Родильного отделения СМР  

361 424,97 

426 481,46 

Кирпичная кладка армированных перегородок в  подвале Родильного отделения МАТ  

280 308,20 

330 763,68 

10 

 Пробивка проемов и устройство инженерных  отверстий в подвале Родильное отделение СМР  

114 631,49 

135 265,16 

 Пробивка проемов и устройство инженерных  отверстий в подвале Родильное отделение МАТ  

81 817,99 

96 545,23 

11 

Хромированное ограждения крылец Здание  стационара  

1 706 436,85  

2 013 595,48  

Хромированное ограждения крылец Родильное  отделение  

307 628,81  

363 002,00  

12 

Автоматизация тепловых пунктов АТП3.1  

73 646,08 

86 902,37 

Автоматизация тепловых пунктов АТП3.1  

112 842,48  

133 154,13  

Автоматизация тепловых пунктов АТП3.2  

94 377,02 

111 364,88  

Автоматизация тепловых пунктов АТП3.2  

121 104,29  

142 903,06  

13 

Пост дистанционного контроля ПДК  Стационар 5-и этажное здание.  

9 987,89 

11 785,71 

Пост дистанционного контроля ПДК  Стационар 5-и этажное здание.  

54 722,13 

64 572,11 

14 

Общестроительные работы выше 0.00.  Дополнительные работы монтажа  передаточных окон СМР  

329 375,62  

388 663,23  

Общестроительные работы выше 0.00.  Дополнительные работы монтажа  передаточных окон МАТ  

4 477,02 

5 282,88 

15 

Водоснабжение и канализация здание  стационера СМР Дополнительные работы  

200 414,07  

236 488,60  

Водоснабжение и канализация здание  стационера МАТ Дополнительные работы  

8 207,87 

9 685,29 

16 

Подключение пароувлажнителей к  электрической сети. Стационар СМР  

267 452,50  

315 593,95  

Подключение пароувлажнителей к  электрической сети. Стационар МАТ  

2 192 202,51  

2 586 798,96  

17 

Устройство сцены в пом № 100 СМР  

114 586,54  

135 212,12  

Устройство сцены в пом № 100 МАТ  

142 042,00  

167 609,56  

18 

Монтаж металлических балок БМ4* в рсях К/1 - С ;10-16 над 5 этажом СМР  

78 123,10 

92 185,26 

Монтаж металлических балок БМ4* в рсях К/1 - С ;10-16 над 5 этажом МАТ  

438 945,74  

517 955,97  

19 

Монтаж дополнительных оконных блоков в  здании стационат СМР  

13 458,03  

15 880,48 

Монтаж дополнительных оконных блоков в  здании стационат МАТ  

721 941,95  

851 891,50  

20 

Устройство площадки для парковки  автотранспорта  

3 933 466,62  

4 641 490,61  

Устройство площадки для парковки  автотранспорта  

555 438,16  

655 417,03  

21 

Монтаж и подключение пожарных извещателей  Стационар СМР  

395 488,08  

466 675,93  

Монтаж и подключение пожарных извещателей  Стационар МАТ  

446 838,96  

527 269,97  

22 

Устройство перегородок с утеплением СМР к  протоколу 49  

1 091 511,86  

1 287 983,99  

Устройство перегородок с утеплением СМР к  протоколу 49  

631 008,10  

744 589,56  

23 

Утепление стен венкамеры 3-эт. Часть мат к  протоколу 48  

741 027,72  

874 412,71  

Утепление стен венкамеры 3-эт. Часть смр к  протоколу 48  

1 070 511,22  

1 263 203,24  

24 

Монтаж и подключение блоков питания РИП-12- 2/7 Стационар СМР  

858 805,71  

1 013 390,74  

Монтаж и подключение блоков питания РИП-12- 2/7 Стационар МАТ  

661 511,17  

780 583,18  

Монтаж и подключение блоков питания РИП-12- 2/7 Родильное отделение СМР  

46 352,44  

54 695,88 

Монтаж и подключение блоков питания РИП-12- 2/7 Родильное отделение МАТ  

53 535,45  

63 171,83 

25 

подпольный канал Родильное отделение СМР к  акту 73  

44 662,32  

52 701,54 

подпольный канал Родильное отделение МАТ к  акту 73  

30 440,14  

35 919,37 

26 

Автоматическая система управления  вентиляцией родильное отделение  Дополнительная прокладка кабельной продукции  в гофрированной трубе  

1 269 702,65  

1 498 249,13  

Автоматическая система управления  вентиляцией родильное отделение  Дополнительная прокладка кабельной продукции  в гофрированной трубе  

1 088 913,75  

1 284 918,23  

27 

на 12-01 Статическое испытание свай к  протоколу 34  

347 652,29  

410 229,70  

28 

зашивка ГКЛ 4 5 ти этажка Стационар СМР к  акту 145  

1 571 982,41  

1 854 939,24  

зашивка ГКЛ 4 5 ти этажка Стационар МАТ к  акту 145  

1 835 811,94  

2 166 258,09  

29 

Водосточка козырьков СМР к акту 152  

29 136,59  

34 381,18 

Водосточка козырьков МАТ к акту 152  

166 854,40  

196 888,19  

30 

на Смр жалюзийные решетки к акту 153  

14 527,84  

17 142,85 

на ма жалюзийные решетки к акту 153  

80 954,95  

95 526,84 

31 

Утепление труб канализации на чердаке  

47 476,19  

56 021,90 

Утепление труб канализации на чердаке  

71 191,81  

84 006,34 

32 

Отделка стен облицовочной плиткой (СМР)  стационар  

89 270,70  

105 339,43  

Отделка стен облицовочной плиткой (МАТ)  стационар  

52 879,18  

62 397,43 

33 

Укладка линолеума (дополнительный объем  завод на стену) стационар (СМР)  

88 254,83  

104 140,70  

Укладка линолеума (дополнительный объем  завод на стену) стационар (МАТ)  

292 525,61  

345 180,22  

34 

Пробивка инженерных отверстий под систему  вентиляции здание стационар СМР  

10 185,67  

12 019,09 

Пробивка инженерных отверстий под систему  вентиляции здание стационар МАТ  

32 157,23  

37 945,53 

35 

устройство Вытяжной шахты, по осям 20В  здание Стационар  

85 539,85  

100 937,02  

устройство Вытяжной шахты, по осям 20В  здание Стационар  

60 331,89  

71 191,63 

36 

Освещение электрощитовой Здание стационар  СМР  

237 902,37  

280 724,80  

Освещение электрощитовой Здание стационар  МАТ  

491 986,74  

580 544,35  

37 

 доп обвязка ИБП Здание стационар СМР  

202 104,19  

238 482,94  

 доп обвязка ИБП Здание стационар МАТ  

345 737,42  

407 970,16  

Обвязка ИБП в родильном отделении  

124 088,97  

146 424,98  

Обвязка ИБП в родильном отделении  

304 832,92  

359 702,85  

38 

устройство Подземного канала с вытяжной  шахтой здание Стационар  

39 690,85  

46 835,20 

устройство Подземного канала с вытяжной  шахтой здание Стационар  

39 834,69  

47 004,93 

39 

на охранно-пожарную сигнализацию Стационар  СМР  

435 979,04  

514 455,27  

на охранно-пожарную сигнализацию Стационар  материалы и оборудование  

104 203,38  

122 959,99  

40 

на охраннопожарную сигнализацию Монтажные  устройства для ДИП Стационар  

51 728,46  

61 039,58 

на охраннопожарную сигнализацию Монтажные  устройства для ДИП Стационар  

67 532,88  

79 688,80 

41 

Устройство форкамер (подвал) (СМР)  

170 863,94  

201 619,45  

Устройство форкамер (подвал) (МАТ)  

150 771,29  

177 910,12  

Устройство форкамер (чердак) (СМР)  

92 561,04  

109 222,03  

Устройство форкамер (чердак) (МАТ)  

85 485,91  

100 873,37  

42 

На настройку оборудования Сети связи  Родильное отделение  

72 801,02  

85 905,20 

На настройку оборудования систем охранного  наблюдения Родильное отделение  

145 611,03  

171 821,02  

На настройку оборудования Сети связи  Стиационар  

509 634,11  

601 368,25  

На настройку оборудования Систем охранного  наблюдения Стационар  

1 080 328,30 

1 274 787,39  

43 

на электросиловое оборудование СМР  Стационар (5ти этажная часть)  

916 458,58  

1 081 421,12  

на электросиловое оборудование СМР  Стационар (5ти этажная часть)  

396 342,13  

467 683,71  

44 

Устройство монолитных участков перекрытия на  отм. +9,690, +13,010. Здание стационара (5-ти  этажная часть) СМР  

262 508,00  

309 759,44  

 Устройство монолитных участков перекрытия  на отм. +9,690, +13,010. Здание стационара (5-ти  этажная часть) МАТ  

933 009,17  

1 100 950,82  

45 

Расширение и пробивка проемов в подвале  Стационар СМР  

1 677 453,09  

1 979 394,65  

Расширение и пробивка проемов в подвале  Стационар МАТ  

1 204 866,77  

1 421 742,79  

46 

Площадки под кондиционеры 

286 951,81  

338 603,14  

Площадки под кондиционеры 

192 161,25  

226 750,28  

47 

устройство приямков смр родильное отделение  

113 211,07  

133 589,06  

устройство приямков мат родильное отделение  

59 648,65 

70 385,41 

устройство приямков смр здание стационар  

674 753,44  

796 209,06  

устройство приямков мат здание стационар  

1 707 659,49  

2 015 038,20  

Итого: 

52 141 155,23 

61 526 563,17  

(далее указанные работы) 

Стороны признают выполнение указанных работ в объемах, отраженных в актах  принятых работ, а также то, что указанные работы выполнены с необходимым качеством.  

2) Стороны признают, что указанные работы были необходимы для обеспечения  годности и прочности результата выполняемой работы по государственному контракту от  24.12.2015 № 1102-01.4-15.  

3) Стороны признают, что указанные работы исходя из имеющейся информации на  момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть  учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их  выполнения истец не мог приступить к другим работам или продолжить уже начатые, либо  ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.  

Сторонам известно, что обстоятельства, признанные и удостоверенные настоящим 

Соглашением, в случае его принятия арбитражным судом не проверяются им в ходе  дальнейшего производства по делу».  

Ссылаясь на то, что ответчик принял дополнительные работы, но не оплатил их, истец  просит о взыскании 61 526 563 рублей 17 копеек долга.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе,  гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок,  предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных  законом, но не противоречащих ему.  

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  

должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными предъявляемыми требованиями.  

Статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

Из материалов дела следует, что отношения сторон основаны на государственном  контракте от 24.12.2015 № 1102-01.4-15 на выполнение комплекса строительно-монтажных,  пусконаладочных работ, приобретение монтируемого оборудования по объекту  «Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район»,  являющемся по своей правовой природе договором строительного подряда, и регулируются  положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным  законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный  закон N 44-ФЗ).  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения  работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного  подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе  жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о  договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту  зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы  (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных  нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на  выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1  статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором  подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной  

сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при  отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик  обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.  

Части 3 - 5 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации регулируют  отношения, которые возникают в связи с необходимостью выполнения дополнительных  работ.  

В соответствии с частью 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации  работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения  сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от  заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором  строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан  приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на  счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет  отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.  

Часть 5 указанной статьи предусматривает, что при согласии заказчика на проведение и  оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в особых  случаях (когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не  могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам).  

Как следует из материалов дела, при производстве работ по контракту подрядчиком  были выявленные дополнительные объемы работ, не учтенные проектной сметной  документацией, но необходимые для выполнения и завершения основных работ по  контракту, последующей эксплуатации объекта, соблюдения технологического процесса  выполнения работ и сдачи объект в завершенном, безопасном и качественном виде.  

В рассматриваемом случае истец (подрядчик), обнаруживший не учтенные в  технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения  дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, предупредил об этом  ответчика (заказчика).  

В данном случае цена контракта не менялась, поскольку дополнительные работы в смету  контракта и дополнительного соглашения к нему не вошли. Вместе с тем, выполнение  дополнительных работ обеспечивало выполнение контракта в целом.  

В соглашении о признании сторонами обстоятельств дела установлено, что истец  выполнил дополнительные работы общей стоимостью 61 526 563 рублей 17 копеек,  отраженные в актах принятых работ, с необходимым качеством. Указанные работы были  необходимы для обеспечения годности и прочности результата выполняемой работы по  государственному контракту от 24.12.2015 № 1102-01.4-15. Стороны признают, что  указанные работы исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и  заключения контракта объективно не могли быть учтены в технической документации, но  должны быть произведены, поскольку без их выполнения истец не мог приступить к другим  работам или продолжить уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь  предусмотренного контрактом результата.  

В силу части 2 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, признанные сторонами в результате достигнутого между ними соглашения  обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не требующих  дальнейшего доказывания.  

Таким образом, из материалов дела и пояснений сторон следует, что все дополнительные  работы, заявляемые истцом в настоящем деле, выполнены в полном объеме, у заказчика  претензий по качеству и объему дополнительных работ не имеется.  

Указанные дополнительные работы не охвачены объемом работ, согласованным  сторонами по условиям государственного контракта от 24.12.2015 № 1102-01.4-15.  

Поскольку наименование и объемы дополнительных работ согласованы сторонами,  фактически приняты ответчиком без замечаний, материалами дела подтверждена их  необходимость для достижения целей контракта, дополнительные работы выполнены истцом  с согласия ответчика, суд приходит выводу о наличии у ответчика обязательства об их  оплате в размере стоимостью 61 526 563 рублей 17 копеек.  

Указанная стоимость выполнения дополнительных работ признана ответчиком в  соглашении о признании сторонами обстоятельств дела.  

Исходя из изложенного, суд удовлетворяет заявленный обществом с ограниченной  ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» иск о взыскании 61 526 563 рублей 17 копеек  стоимости дополнительных работ.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы истца по уплате государственной пошлины за рассмотрение  искового заявления в арбитражном суде относятся на истца, согласно его заявлению.  

 Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) 61 526 563 рублей 17 копеек основного долга.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева