РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-103089/22-12-738

г. Москва

16 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 августа 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 16 августа 2022 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «ПромСтройМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ИП ФИО2

о взыскании неотработанного аванса по договору №СУБ-5/К от 08.04.2021 г. в размере 2.200.000 рублей, неустойки в размере 54.427,39 рублей, неустойки по день фактического возврата, неустойки в размере 1.860.000 рублей,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ПромСтройМонтаж» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ИП ФИО2 (далее – ответчик) в пользу истца неотработанного аванса по договору №СУБ-5/К от 08.04.2021 г. в размере 2.200.000 рублей, неустойки в размере 54.427,39 рублей, неустойки по день фактического возврата, неустойки в размере 1.860.000 рублей.

Заявление мотивировано тем, что ответчик не выполняет обязательства по возврату денежной суммы, в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Ответчик представителей в судебное заседание не направил, отзыв не представил.

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 08 апреля 2021 г. между ООО «ПромСтройМонтаж» (Истец, Подрядчик) и ИП ФИО2 (Ответчик, Субподрядчик) был заключен Договор субподряда № СУБ-5/К (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора субподрядчик обязуется в установленный Договором срок на основании рабочей документации утвержденной Подрядчиком, выполнить комплекс монтажных работ по шифру проекта 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ1, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ2, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМЗ, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ4, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ5, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ6, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ7, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ10, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ11, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.5-ЭМ13, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.6.3.3-Э02, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.6-Э01, 12- 4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.6-Э02, 12-4016-Р-ТПК ЮУ-21.5.3.6-ЭОЗ, на объекте строительства: «Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», станционный комплекс «Калужская» (далее - «Объект»), а Подрядчик обязуется принять результат выполненной работы и уплатить установленную Договором цену.

В силу п. 3.1. Договора, стоимость работ (Цена Договора), выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору, определяется па основе утвержденных Подрядчиком, Заказчиком и Заказчиком- Генподрядчиком локальных смет, с учетом коэффициентов (индексов) пересчета базовой цены в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ в нормах и цепах ТСЫ-2001 (Территориальные сметные нормативы для Москвы), утвержденных Москомэкспертизой на дату производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ, и составляет 21 453 392 рубля.

Согласно п. 1.3. Договора, Субподрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать в установленном порядке результат работ в сроки, установленные п. 5.1 Договора, а именно: в период с 08.04.2021 г. по 28.06.2021 г.

Подрядчиком был уплачен аванс в размере 2 200 000 руб. рублей платежными поручениями № 98 от 19.04.2021, № 654 от 04.05.2021, № 862 от 28.05.2021, № 1094 от 15.06.2021.

В соответствии с п. 8.1.1. к Договору, Субподрядчик принял на себя обязательство выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, сдать результат работ Подрядчику с качеством, соответствующим Рабочей документации со штампом Подрядчика «В производство работ» и условиям Договора, однако по состоянию па 11.05.2022 г. работы Субподрядчиком не завершены.

Согласно п. 19.6 Договора, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без возмещения Субподрядчику убытков, причиненных прекращением Договора, если Субподрядчик прямо продемонстрировал намерение прекратить выполнение своих обязательств по Договору или уклонялся от исполнения своих обязательств по Договору в течение 5 (Пяти) календарных дней;

При этом положениями п. 4.3. Договора установлено, что при расторжении настоящего Договора или одностороннем отказе любой из Сторон от его исполнения, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику сумму необработанного аванса, предусмотренного Договором в течение 5 (Пяти) рабочих дней после прекращения действия Договора. В случае несвоевременного возращения суммы неотработанного аванса на указную сумму начисляются проценты по правилам ст. 395 Гражданского Кодекса РФ.

В связи с просрочкой исполнения Ответчиком обязательств по производству работ в сроки, установленные Договором, «14» марта 2022 г. Истцом было направлено уведомление исх. № 74 об отказе от исполнения Договора субподряда № СУБ-5ЛС от 08 апреля 2021 г. с требованием выплатить денежные средства, письмо Ответчиком не получено, прибыло в место вручения 16.03.2022 г., по состоянию на 11.05.2022 г. неотработанный аванс Ответчиком уплачен не был, таким образом Подрядчик имеет право применить неустойку, предусмотренную положениями ст. 395 ГК РФ.

Согласно расчету истца сумма процентов составила 54.427,39 рублей.

В соответствии с п. 8.1.15, 8.1.23, 8.1.25, 8.1.31 Договора, Субподрядчик принял на себя обязательства по представлению Подрядчику следующей информации:

- ежедневно, не позднее 09-30, информацию о строящемся Объекте (по форме, предоставленной Подрядчиком (в формате Excel или ином редактируемом формате)) - всего с даты начала выполнения работ -340 отчетов,

- ежемесячно, не позднее 15-го числа отчетного месяца, информацию о переработке давальческих материалов Подрядчика за отчетный период по форме Приложения № 2 к Договору (в формате Excel), данная информация также направляется на бумажном носителе вместе с формами КС-2 и КС-3, заверенная печатью Субподрядчика и за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика - всего с даты начала выполнения работ -12 отчетов,

- ежедневно, не позднее 9-00, информацию о произведенных работах в свободной форме (в формате Exel) - всего с даты начала выполнения работ -340 отчетов,

- еженедельно, не позднее 10-00 каждого понедельника, предоставлять Подрядчику сведения за отчетную неделю: о результатах проверок, проведенных органами государственного строительного надзора; о выявленных указанными органами нарушениях; сроках устранения нарушений; об устранении/не устранении нарушений; о наложенных указанными органами административных штрафах, а также копии документов, подтверждающих их оплату. Указанные сведения предоставляются в электронном виде на электронную почту, а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Субподрядчика - всего с даты начала выполнении работ -48 отчетов,

- ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды за отработанный месяц (в формате Word), данная информация также направляется на бумажном носителе, за подписью уполномоченного представителя Субподрядчика - всего с даты начала выполнении работ -12 отчетов.

Субподрядчик обязан еженедельно, не позднее 9-00 каждой пятницы, если иной день не будет указан Подрядчиком в отдельном уведомлении, предоставлять Подрядчику недельно-суточный план на следующую неделю. Указанный план составляется и предоставляется в электронном виде на электронную почту - всего с даты начала выполнении работ -48 отчетов

Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 4-го числа каждого месяца предоставлять Подрядчику план работ на следующий месяц. Указанный план составляется и предоставляется в электронном виде на электронную почту (в формате Excel и сканированная копия плана, подписанного уполномоченным лицом Субподрядчика, в формате PDF), а также на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица Субподрядчика - - всего с даты начала выполнении работ-12 отчетов

Субподрядчик обязан ежедневно, не позднее 9-00, предоставлять Подрядчику недельно-суточный план с указанием объемов работ, выполненных за прошедшие сутки. Указанный план составляется и предоставляется в электронном виде на электронную почту- всего с даты начала выполнении работ-340 отчетов.

Однако, в нарушение условия Договор Субподрядчиком в адрес Подрядчика такой информации не поступало.

В соответствии с п. 11.4. Договора, за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной и иной информации, указанной в п. 8.1.13, п. 8.1.15 Договора, а также отчетов, предусмотренных п. 8.1.15., 8.1.23., 8.1.25., 8.1,31. Договора, или предоставление информации в формате, несоответствующем требованиям Подрядчика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту не предоставлении информации, но не более 300 000,00 (Триста тысяч) рублей по каждому факту непредставления информации;

Таким образом, размер штрафа за непредоставление информации по каждому факту, указанному выше, составит:

340 * 10 000 = 3 400 000, с учетом ограничения - 300 000 рублей

12 * 10 000 = 120 000 рублей

340 * 10 000 = 3 400 000, с учетом ограничения - 300 000 рублей

48 * 10 000 = 480 000, с учетом ограничения - 300 000 рублей

12 * 10 000 = 120 000 рублей

48 * 10 000 = 480 000, с учетом ограничения - 300 000 рублей

12 * 10 000 = 120 000 рублей

340 * 10 000 = 3 400 000, с учетом ограничения - 300 000 рублей

Итого, размер штрафа составит 1 860 000 (Один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.

На основании вышеизложенных обстоятельств истец обратился в суд.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Согласно ч. 3 ст. 1103 ГК РФ, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Ответчиком не представлено доказательств выполнения работ. Ответчик не подтвердил факт сдачи результатов работ в пользу истца надлежащего качества и имеющего потребительскую ценность.

Факт невыполнения ответчиком обязательств по возврату денежных средств, в связи с неисполнением обязательств по договору подтверждается материалами дела, доказательств оплаты задолженности суду не представлены.

В  связи с изложенным, требование истца о взыскании суммы неосвоенного аванса по договору подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, ответчиком доказательств, подтверждающих возврат денежных средств и оплату услуг согласно условиям договора, суду не представлено.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами произведен истцом на условиях ст. 395 ГК РФ, проверен судом и признан правильным.

Принимая во внимание положения вышеназванных норм материального права, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд взыскивает с ответчика в пользу истца сумму долга, пени и штрафа, поскольку исполнитель не исполнил свои обязательства в установленный срок, хотя должен был это сделать в силу ст.ст. 309 - 310, 314 ГК РФ.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 309, 310, 314, 395, 1102, 1103 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167 - 171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройМонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) сумму неотработанного аванса согласно Договору субподряда № СУБ-5/К от 08 апреля 2021 г. в размере 2.200.000 (два миллиона двести тысяч) руб., неустойку за нарушение срока возврата аванса в размере 54.427 (пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать семь) руб. 39 коп., неустойку (штраф) за непредставление, несвоевременное предоставление ежедневной, еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной и иной информации в размере 1 860 000 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) руб. и государственную пошлину в сумме 43.572 (сорок три тысячи пятьсот семьдесят два) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

 

Судья:                                                                                                 А.С.Чадов