АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-1827/2020

09 марта 2021 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л. Ф.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального казенного  учреждения «Управление по развитию инфраструктуры» муниципального образования  «Закаменский район» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Закаменский дорожный ремонтно-строительный участок» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки работ по  муниципальному контракту № 07.001.17.20 от 23.08.2017, о взыскании 106 090 руб 35 коп -  убытков,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Закаменский дорожный  ремонтно-строительный участок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить  недостатки работ по муниципальному контракту № 07.001.17.20 от 23.08.2017, в частности:  

- устранить образование гребенки по строительству подъезда к с. Харацай от  автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском  районе Республике Бурятия,  

- установить следующие дорожные знаки: 2.2 (уступите дорогу); 3.2 (движение  запрещено);  

- устранить следующие нарушения, отраженные в Акте проверки Республиканской  службы государственного и жилищного надзора от 09 июня 2018г № 44/7-0.2017-04а-ЖЖН- 158:  

-выполнить присыпные бирмы под устройство знаков; 

-привести расположение дорожных знаков в соответствие с пунктами 5.1.7, 5.1.8  ГОСТ 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства  организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,  светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утв. Приказом  Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст;  

- завершить работы по планировке откосов, выполнить водоотводные канавы,  кюветы, выполнить засев травы при устройстве откосов, кюветов, выполнить  рекультивацию земель.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Закаменский дорожный  ремонтно-строительный участок» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 6 000 руб 00 коп - государственную пошлину.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд  Республики Бурятия.  

Судья Л.Ф. Салимзянова