АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 г. Воронеж                           Дело № А14-1396/2022

«22» декабря 2022 г.    

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 22 декабря 2022 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном онлайн-заседании  дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Вавилон», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания», Свердловская область, г. Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 256 500 руб. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания», Свердловская область, г. Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 598 500 руб. задолженности; 8 079 руб. 75 коп. неустойки; 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя

при участии в судебном заседании:

от ООО «Вавилон»: ФИО2, представитель, доверенности от 09.12.2021 (сроком на 1 год), от 12.12.2022 (сроком на 1 год),

от ООО «ПРО-Изыскания» с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» в режиме онлайн-заседания:  ФИО3, представитель, доверенность от 10.12.2021 (сроком на три года),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания» (далее – ответчик) о взыскании  256 500 руб. неосновательного обогащения (неотработанный аванс по договору № 38-2021 от 16.08.2021).

Определением суда от 08.02.2022 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

В адрес суда через систему «Мой арбитр» 21.02.2022 от ответчика поступило встречное исковое заявление, согласно которому просит суд взыскать с ООО «Вавилон» в пользу ООО «ПРО-Изыскания» задолженность по договору № 38-2021 от 16.08.2021 в размере 855 000 руб., неустойку за просрочку оплаты в размере 8 079 руб. 75 коп., расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб.

Определением суда от 30.03.2022 встречное исковое заявление оставлено без движения, суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением суда от 18.05.2022 для совместного рассмотрения с первоначальным иском принят встречный иск общества с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания» к обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон» о взыскании 598 500 руб. задолженности по договору № 38-2021 от 16.08.2021; 8 079 руб. 75 коп. неустойки за просрочку оплаты; 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В предварительном судебном заседании 18.05.2022 истец по встречному иску  поддержал заявленные требования и ходатайство, поступившее в адрес суда по системе «Мой Арбитр», просил взыскать с ответчика по встречному иску 598 500 руб. задолженности по договору № 38-2021 от 16.08.2021; 8 079 руб. 75 коп. неустойки за просрочку оплаты; 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В порядке ст. ст. 49, 159 АПК РФ ходатайство истца по встречному иску удовлетворено, уточненные встречные требования приняты судом к рассмотрению.

В судебном заседании 06.12.2022 истец по первоначальному иску поддержал заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик по первоначальному иску в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал, сославшись на то, что заказчик не представил техническое задание, по электронной переписке исполнитель неоднократно уведомлял заказчика о наличии препятствий в выполнении  работ. До момента одностороннего отказа заказчика от исполнения договора и его расторжения, исполнителем была направлена часть результата работ.

Истец по встречному иску поддержал заявленные встречные исковые требования по основаниям, изложенным во встречном исковом заявлении.

Ответчик по встречному иску в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал, сославшись на то, что поскольку заказчик не разрабатывал техническое задание и не передавал его исполнителю, что последним не оспаривается, в отсутствие технического задания невозможно выполнить работы. Кроме того, отказ от договора предусмотрен ст. 717 ГК РФ.

Истец по встречному иску устно заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, с целью определения объема, качества и стоимости выполненных работ.

Ответчик по встречному иску возражал против удовлетворения данного ходатайства.

В порядке ст. 159 АПК РФ ходатайство истца по встречному иску о назначении судебной экспертизы принято судом к рассмотрению.

В судебном заседании 06.12.2022 объявлялся перерыв до 13.12.2022.

После перерыва в судебное заседание явился представитель ООО «Вавилон».

По техническим причинам проведение судебного заседания с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (судебные онлайн-заседания) не состоялось, в связи с чем, в целях соблюдения принципов равноправия и состязательности сторон, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, считает необходимым объявить перерыв в судебном заседании до 15.12.2022.

В адрес суда по системе «Мой арбитр» 14.12.2022 от ООО «ПРО-Изыскания» поступило ходатайство об участии в судебном заседании, назначенном на 15.12.2022 посредством использования систем веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание), которое было удовлетворено.

ООО «ПРО-Изыскания» обеспечено участие в судебном заседании 15.12.2022 в режиме онлайн-заседания. В адрес суда по системе «Мой арбитр» 15.12.2022 от ООО «ПРО-Изыскания» поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя, в связи с чем судебное заседание продолжено без использования системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» в режиме онлайн-заседания.

На основании ст. 156 АПК РФ судебное заседание 15.12.2022 проводилось в отсутствие ООО «ПРО-Изыскания», извещенного надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Судом рассматривалось ходатайство истца по встречному иску о назначении экспертизы по настоящему делу.

Суд, с учетом мнения ответчика по встречному иску, руководствуясь ст. 82, 159 АПК РФ, считает необходимым ходатайство истца по встречному иску оставить без удовлетворения, ввиду не представления перечня вопросов, подлежащих постановке перед экспертом, кандидатуры экспертного учреждения (эксперта), которому он просит поручить проведение судебной экспертизы, сведений от экспертного учреждения о возможности проведения судебной экспертизы по заявленным вопросам, ее стоимости и сроках проведения, кандидатур экспертов, их квалификации, перечне документов, необходимых для проведения экспертизы; доказательств внесения на депозитный счет суда денежных средств в счет оплаты экспертизы.

Из материалов дела следует, что между ООО «Вавилон» (подрядчик) и Администрацией Андреевского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области (муниципальный заказчик) был заключен муниципальный контракт №0169300014521000001 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Синташта в п. Андреевский Брединского района Челябинской области».

С целью исполнения принятых обязательств по разработке инженерных изысканий и проектной документации в рамках муниципального контракта, 16.08.2021 между ООО «Вавилон» (заказчик) и ООО «ПРО-Изыскания» (подрядчик) был подписан договор № 38-2021 (далее - договор), по условиям которого заказчик поручает, принимает и оплачивает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания (далее – работы) по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Синташта в п. Андреевский Брединского района Челябинской области» и сдать результат заказчику (пункт 1.1 договора). 

Результатом работ является: технические отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (пункт 1.2). 

Согласно пункту 1.4 договора содержание и объем работ определяются на основании технического задания (приложение №1 к договору), действующей нормативной документацией РФ соответствующей тематики. 

Срок выполнения работ согласно пункту 2.1 договора составляет 60 календарных дней с даты оплаты аванса согласно пункту 3.2.1 договора. 

Стоимость работ подрядчика по пункту 1.1 договора согласно смете №1 (приложение №2 к договору) составляет 855 000 руб. (включая НДС) (пункт 3.1). 

В соответствии с пунктом 3.2 договора оплата стоимости работ по пункту 3.1 договора производится заказчиком по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика в следующем порядке: 

- не позднее 5 рабочих дней от даты подписания договора подрядчик выставляет заказчику счёт на оплату аванса, а заказчик не позднее 5 рабочих дней от даты получения счёта перечисляет аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 договора (пункт 3.2.1 договора); 

- оплата за выполненные подрядчиком работы по договору производится заказчиком в течение 10 рабочих дней от даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ и на его основании в размере 50% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 договора (пункт 3.2.2 договора); 

- оставшаяся сумма в размере 20% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 договора, выплачивается подрядчику после получения положительного заключения по проектной документации, выпущенной подрядчиком (отчеты по инженерным изысканиям) от органа, проводящего экспертизу, и счета подрядчика в течение 10 рабочих дней после получения положительного заключения, но не более 180 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.2.3 договора). 

Во исполнение условий договора ООО «Вавилон» платежным поручением №136 от 08.10.2021 перечислило ООО «ПРО-Изыскания» 256 500 руб. предоплаты за выполнение предусмотренных договором №38-2021 от 16.08.2021 работ (назначение платежа: «оплата счета №46 от 16.08.2021 за инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологич., по объекту в п. Андреевский Брединского района Челчбинской обл.»). 

06.12.2021 подрядчик письмом №185 уведомил об исполнении договора по сметам (приложение 2 к договору) и для надлежащего оформления технических отчетов по результатам работ просил предоставить техническое задание, согласованное ранее, подписанное уполномоченным лицом. 

В ответ на письмо №185 от 06.12.2021, ООО «Вавилон» письмом №07-12-21/01И от 07.12.2021, ссылаясь на неутверждение к договору технического задания и невозможность передачи ООО «ПРО-Изыскания» соответствующего технического задания, определяющего содержание и объем подлежащих выполнению работ, а также на отсутствие факта передачи документации к приемке, отсутствие предъявления акта, уведомило подрядчика об утрате интереса к договору №38-2021 от 16.08.2021, отказалось от договора и потребовало возвратить перечисленный аванс в размере             256 500 руб. 

Неисполнение требований указанной претензии явилось основанием для обращения ООО «Вавилон» в суд с настоящим иском. 

В свою очередь, ссылаясь на фактическое выполнение предусмотренных договором работ до одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в полном объеме стоимостью 855 000 руб., сдачу результата работ заказчику и наличие на стороне последнего задолженности в размере 598 500 руб. (с учетом ранее перечисленного аванса), подрядчик, начислив пени за просрочку оплаты, предъявил встречные исковые требования.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца по первоначальному иску, оценив представленные по делу доказательства, суд считает заявленные требования ООО «Вавилон» подлежащими удовлетворению, встречный иск ООО «ПРО-Изыскания» подлежащим оставлению без удовлетворения, по следующим основаниям.

Исходя из правовой природы сложившихся между сторонами отношений, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о договорах подряда. 

Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ). 

Согласно п. 8.4 договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими всех принятых на себя в соответствии с договором обязательств. 

В силу п. 4.3.2 договора заказчик имеет право отказаться от исполнения договора до сдачи результата работ, уплатив подрядчику часть установленной стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

Воспользовавшись предоставленным статьей 717 ГК РФ, пунктом 4.3.2 договора правом, ООО «Вавилон» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора, направив ООО «ПРО-Изыскания» письмо от 07.12.2021 исх.№07-12-21/01И, в котором просило возвратить перечисленный аванс. 

Факт перечисления истцом по первоначальному иску аванса в размере                   256 500 руб. подтвержден представленной в материалы дела копией платежного поручения № 136 от 08.10.2021 и сторонами не оспаривается. 

Согласно п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств» при подготовке к судебному разбирательству дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, в том числе о соблюдении правил его заключения, о наличии полномочий на заключение договора у лиц, его подписавших. 

По смыслу статей 432, 702, 708 ГК РФ к существенным условиям договора подряда относятся предмет договора (содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ) и сроки выполнения работ.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (п. 1 ст. 758 ГК РФ). 

Согласно статье 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. 

Исходя из пункта 1 статьи 760 ГК РФ, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. 

Согласно пункту 1.4 договора содержание и объем работ определяются на основании технического задания (приложение №1 к договору), действующей нормативной документацией РФ соответствующей тематики. 

Пунктом 8.5 договора, в том числе, предусмотрено, что приложение №1 - техническое задание на проведение изысканий является неотъемлемой частью договора. 

Условиями договора не предусмотрено обязательств подрядчика по изготовлению технического задания, следовательно, для исполнения договора стороны должны были согласовать техническое задание. 

Из представленных доказательств следует, что до подписания договора стороны вели электронную переписку. 

13.08.2021 ООО «Вавилон» направило ООО «ПРО-Изыскания» письмо, в котором просило прислать коммерческое предложение по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, во вложении к письму был файл с техническим заданием. 

В ответ на указанное письмо ООО «ПРО-Изыскания» 13.08.2021 направило заказчику письмо с коммерческим предложением.

В тот же день (13.08.2021) ООО «Вавилон» попросило прислать подписанный договор  и счет на оплату аванса.

16.08.2021 ООО «ПРО-Изыскания» направило подписанный со своей стороны договор и счет на аванс.

08.09.2021 ООО «ПРО-Изыскания» предложило рассмотреть изменения в техническое задание.

28.09.2021 ООО «Вавилон» выслало подписанный договор и гарантийное письмо об оплате.

В ответ на указанное письмо ООО «ПРО-Изыскания» 28.09.2021 направило заказчику письмо с просьбой предоставить техническое задание на производство инженерных изысканий.

30.09.2021 ООО «ПРО-Изыскания» направило предварительную геодезию и колонки по геологии без лабораторных исследований.

04.10.2021  ООО «ПРО-Изыскания» попросило оплатить счет, поскольку срок оплаты по гарантийному письму истек.

22.10.2021 ООО «ПРО-Изыскания» для построения продольных профилей по геодезии и геологии попросило нанести необходимую ось профиля в программе « ROBUR».

17.11.2021 ООО «ПРО-Изыскания» попросило прислать подписанное техническое задание, а также проектную ось автодороги по объекту.

23.11.2021 ООО «ПРО-Изыскания» сообщило, что по Синташте имеется толь ко проект ТЗ на ИГДИ, просило представить ТЗ на другие инженерные изыскания.

06.12.2021 ООО «ПРО-Изыскания» направило заказчику письмо, в котором уведомило о выполнении инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий в рамках исполнения договора №38-2021 от 16.08.2021, просило представить для надлежащего оформления технических отчетов по результатам работ согласно СП 47.13330.2016 техническое задание, согласованное ранее и подписанное уполномоченным лицом.

Оценив представленную в дело переписку, суд приходит к выводу, что сторонами не было согласовано техническое задание, сметы и заказчик не представил никаких исходных данных для выполнения работ. 

При этом у суда отсутствуют основания для признания договора незаключенным, поскольку в п. 1.1 договора указано на выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических, инженерно - гидрометеорологических изысканий, по объекту: «Реконструкция мостового перехода через р. Синташта в п. Андреевский Брединского района Челябинской области».

Основания для выполнения работ на основании технического задания к контракту, стороной которого ООО «ПРО-Изыскания» не являлось, отсутствовали.

Факт несогласования сторонами как приложения к договору технического задания доказан. 

Учитывая изложенное, доводы ответчика по первоначальному иску о том, что непредставление заказчиком технического задания не препятствовало подрядчику приступить к выполнению работ, так как техническое задание идентично коммерческому предложению и тексту технического задания по муниципальному контракту, отклоняются по изложенным основаниям как основанные на неверном толковании условий договора и действующего законодательства. 

При этом, ссылки подрядчика на условия муниципального контракта, заключенного между истцом и Администрацией, согласование в рамках муниципального контракта технического задания, не могут быть приняты, поскольку в силу п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). 

Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328). 

В материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о приостановлении ответчиком по первоначальному иску работ в связи с необходимостью выполнения истцом по первоначальному иску своих обязательств по договору в порядке, предусмотренном статьями 716, 719 ГК РФ.

Таким образом, суд приходит к выводу, что подрядчик не воспользовался своим правом, предоставленным ему статьей 719 ГК РФ, не приступать к работе, и в нарушение требований статьи 716 ГК РФ не предупредил заказчика об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению договора. 

По смыслу пункта 2 статьи 716 ГК РФ подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работы в срок, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

При таких обстоятельствах, спорный договор расторгнут в результате одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

Суд отклоняет доводы ответчика по первоначальному иску о неправомерности отказа заказчика от исполнения договора в связи с утратой интереса ввиду следующего.

Отказ заказчика в одностороннем порядке от исполнения договора в силу ч. 2 ст. 154 ГК РФ является односторонней сделкой, которая может быть оспорена на основании статьи 168 ГК РФ. 

Исходя из текста письма от 07.12.2021 исх.№07-12-21/01И, заказчик заявил отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ, т.е. немотивированно, что является правомерным. 

В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

Согласно п. 2 и п. 4 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода. 

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564 по делу № А40-67546/2016, прекращение договора подряда не должно приводить и к неосновательному обогащению заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (ст. 1102 ГК РФ). 

У подрядчика имеется право на оплату фактически выполненной и принятой заказчиком работы до момента прекращения действия договора, оплата которой не ставится в зависимость от последующих за подписанием акта приемки выполненных работ действий исполнителя в рамках заключенного контракта (определение Верховного Суда РФ от 25.02.2016 №305-ЭС15-19959). 

Таким образом, после прекращения договорных отношений до достижения конечной цели договора на заказчика отнесена обязанность по оплате фактически имеющегося на момент такого окончания результата работ, что не исключает требования к качеству таковых работ и наличия их потребительской ценности для заказчика. 

Учитывая изложенное, истец по первоначальному иску вправе требовать возврата неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса. 

В свою очередь, на ответчика по первоначальному иску возлагается обязанность возвратить истцу по первоначальному иску неотработанный аванс, если он не докажет факт выполнения работ на спорную сумму.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему входит установление обстоятельств выполнения подрядчиком работы и ее стоимости до отказа заказчика от договора.

Согласно пункту 1 статьи 702, пункту 1 статьи 711 ГК РФ сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. 

Как следует из разъяснений п. 63-67 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. 

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лице, направившем сообщение. 

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. 

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. 

Письмом исх. №185 от 06.12.2021 до одностороннего отказа заказчика от договора подрядчик по электронной почте уведомил заказчика о готовности работ к сдаче, при этом результаты выполненных работы (технические отчеты) в электронном виде представлены не были, к электронному письму не приложены.

Учитывая, что результатом работ по договору являются документация на бумажном носителе и электроном носителе (п. 4.1 договора), то уведомление подрядчика от 06.12.2021 о готовности работ в отсутствие передачи самого результата не может быть расценено как предъявление работы к приемке, а также недостаточно для подтверждения факта выполнения работ на 06.12.2021, так как не подтверждено документально. 

ООО «ПРО-Изыскания» ссылается на предъявление результата работ по договору посредством направления почтой. 

Так 13.12.2021 подрядчик направил в адрес заказчика ценным письмом с описью вложения документацию по договору №38-2021 от 16.08.2021.

Указанные документы были направлены ООО «Вавилон» по адресу, указанному в ЕГРЮЛ: 394018, 

<

...>. 

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления-EMS с идентификатором ED167260331RU посылка с 16.12.2021 ожидала курьерской доставки в отделении АО «Почта России» №394880 и 03.01.2022 отправлена обратно отправителя из этого же почтового отделения в связи с истечением срока хранения.

При этом в отчете об отслеживании почтового отправления с официального сайта АО «Почта России» (https://www.pochta.ru/) не указаны сведения о попытках вручения почтового отправления курьером.

В представленной в материалы дела копии квитанции (накладной), раздел которой «Информация о доставке» заполнен карандашом, проставлена отметка в графе «отказ от получения», при этом отсутствуют сведения о дате отказа от получения, отметки в графе «Ф.И.О.» и иные идентифицирующие сведения. 

Согласно п. 10.4.2 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п и действовавшего в спорный период, доставка EMS-отправления осуществляется водителем-курьером по месту нахождения адресата. 

В п. 10.4.4 Порядка указано, что в случае отсутствия адресата по адресу доставки, водитель-курьер должен связаться с ним по телефону для уточнения возможности вручения отправления. 

Если адресат ответил на телефонный звонок, водитель-курьер вносит в Доставочный лист, надпись «новая доставка согласована», дату и время новой доставки, а также делает соответствующую отметку («новая доставка согласована», дату и время новой доставки) на адресном бланке РПО. 

Если адресат не отвечает на телефонный звонок, водитель-курьер должен подождать 15 минут и перезвонить адресату. 

Если адресат вновь не отвечает, водитель-курьер: 

- в доставочном листе указывает «Нет адресата», дату и время звонка; 

- оформляет извещение ф. 22, на котором указывает дату и время доставки отправления, опускает извещение в ячейку абонентского почтового шкафа (почтовый абонентский ящик); 

- выполняет отметку в чекбоксе «Нет адресата» поля «Информация о доставке» бланка Е 1-в с указанием даты и времени; 

- проводит операцию «Неудачная попытка вручения» с указанием причины с использованием Комплекта АРКС. 

Суд принимает во внимание, что сведения, отраженные в накладной (отказ от получения) и отчете об отслеживании (по истечении срока хранения) противоречат друг другу (указаны разные причины возврата, в отчете об отслеживании не указано о попытках вручения посылки). 

Кроме того, посылка поступила на отделение Почты России №394880, в то время как адрес, по которому расположено ООО «Вавилон» обслуживает отделение Почты России №394018. 

При указанных обстоятельствах у суда отсутствуют основания для вывода о надлежащем направлении в адрес ООО «Вавилон» документации. 

Как пояснил в судебном заседании представитель ООО «Вавилон» он не был уведомлен о поступлении в его адрес посылки ни курьером, ни посредством уведомления. 

Доказательств совершения курьером действий по вручению почтового отправления в деле не имеется, отчет об отслеживании данных сведений также не содержит, отметки карандашом на почтовой квитанции не могут быть признаны надлежащими ввиду несоответствия их оформления требованиям к данного рода записям. 

После возврата посылки ED167260331RU ответчик по первоначальному иску не предпринимал более попыток сдачи результатов выполненных работ. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что спорные работы не предъявлялись надлежащим образом к приемке, факт выполнения подрядчиком результата работ, имеющего для заказчика потребительскую ценность, не подтвержден, в связи с чем оснований для оплаты не имеется. 

24.01.2022 подрядчик направил заказчику претензию и акты о приемке выполненных работ письмом с описью вложения (идентификатор №ED167260141RU), которые получены истцом 31.01.2022. Однако в данном отправлении не были повторно направлены технические отчеты как результат работ. 

Судом разъяснялась сторонам возможность реализации прав в соответствии со статьей 82 АПК РФ и положениями Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

ООО «ПРО-Изыскания» не воспользовалось в порядке предусмотренном ст. 82 АПК РФ своим правом ходатайствовать перед судом о назначении судебной экспертизы в целях установления наличия потребительской ценности в фактически выполненных подрядчиком работах и их стоимости. В силу пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 №23 в случае если ходатайство об экспертизе не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания исходя их принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Подрядчиком не представлено доказательств возможности использования выполненной им части работ по назначению и наличия потребительской ценности указанной документации. 

Суд отклоняет доводы ответчика по первоначальному иску о наличии признаков злоупотребления правом со стороны истца по первоначальному иску, который заключил договор с заранее невыгодными для себя условиями, ввиду несостоятельности. 

В силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда реализация управомоченным лицом принадлежащего ему права сопряжена с нарушением установленных в ст. 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав. При этом лицо совершает действия с незаконной целью или незаконными средствами, нарушая права и законные интересы других лиц и причиняя им вред или создавая для этого условия (определение Верховного Суда РФ от 01.12.2015 № 4-КГ15-54). 

Из содержания ст. 10 ГК РФ следует, что под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным образом (определение Верховного Суда РФ от 20.10.2015 № 18-КГ15-181). 

Согласно пунктов 1, 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422). 

В силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) стороны добровольно согласились на выполнение работ по разработке проектной документации в течении 60 календарных дней с даты оплаты авансового платежа. 

В данном случае, истец, заключая спорный договор с ответчиком во исполнение принятых на себя обязательств в рамках муниципального контракта, действуя разумно и осмотрительно, должен был рассчитать срок выполнения работ по договору №38-2021 от 16.08.2021 таким образом, чтобы не допустить просрочку в выполнении своих обязательств по контракту. 

Формулирование условий договора относится к рискам сторон. 

Вопреки доводам ответчика, заключение истцом договора №38-2021 от 16.08.2021 с заранее невыгодными для себя условиями не является злоупотреблением правом, поскольку такими действиями истец не причинил вред другим лицам. 

При этом своими действиями ООО «Вавилон» не поставило ООО «ПРО-Изыскание» в положение, когда он не мог реализовать свои права, поскольку ответчик по первоначальному иску не воспользовался правом на приостановление работ на основании ст. 716 ,719 ГК РФ, а также согласился на исполнение договора в срок 60 дней с даты аванса. 

С учетом совокупности установленных судом обстоятельств: отсутствие доказательств наличия результата и передачи результата работ истцу по первоначальному иску до расторжения договора; отсутствие доказательств соответствия результата работ по объему, содержанию и качеству положениям договора №38-2021 от 16.08.2021, учитывая отсутствие в распоряжении подрядчика технического задания (иной исходной документации) в объеме, позволяющем выполнение согласованных сторонами обязательств ООО «ПРО-Изыскания», суд приходит к выводу, что ответчик по первоначальному иску не доказал наличие обстоятельств, с которыми стороны связали возникновение встречного обязательства заказчика по оплате выполненных работ. 

Поскольку материалами дела подтвержден факт перечисления ответчику по первоначальному иску аванса в размере 256 500 руб., ответчиком по первоначальному иску доказательств возврата авансового платежа, равно как и фактического выполнения работ не представлено, суд приходит к выводу о том, что требование истца по первоначальному иску о взыскании суммы неосновательного обогащения является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, а в удовлетворении встречных требований о взыскании задолженности и неустойки за нарушение срока оплаты следует отказать.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 названного Кодекса, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии со ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей) и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

При обращении в арбитражный суд с первоначальным иском ООО «Вавилон» была уплачена государственная пошлина в сумме 8 130 руб. по платежному поручению №10 от 01.02.2022. 

При обращении в арбитражный суд со встречным иском ООО «ПРО-Изыскания» платежным поручением №55 от 17.02.2022 была уплачена государственная пошлина в сумме 15 132 руб. 

С учетом результатов рассмотрения дела расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение первоначального иска в размере 8 130 руб. относятся на ответчика по первоначальному иску и подлежат взысканию с него в пользу ООО «Вавилон»; расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение встречных исковых требований относятся на ООО «ПРО-Изыскания» и возмещению не подлежат.

Кроме того, судебные издержки на оплату услуг представителя в сумме 40 000 руб. также относятся на ООО «ПРО-Изыскания» и возмещению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск общества с ограниченной ответственностью «Вавилон», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания», Свердловская область, г. Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 256 500 руб. неосновательного обогащения  удовлетворить в полном объеме.

Встречный иск  общества с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания», Свердловская область, г. Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Вавилон», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 598 500 руб. задолженности; 8 079 руб. 75 коп. неустойки; 40 000 руб. расходов на оплату услуг представителя оставить без удовлетворения.

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «ПРО-Изыскания», Свердловская область, г. Екатеринбург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Вавилон», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 256 500 руб. неосновательного обогащения; 8 130 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья                                                                                                            И.В. Кострюкова