274/2024-43790(2) 

а п 

р 

 

е л 

Арбитражный суд Рязанской области я 

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;   

http://ryazan.arbitr.ru; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru 2 

 0 

Именем Российской Федерации 2

 4

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г

о

г. Рязань Дело № А54-3773/2023 д 24 апреля 2024 года а  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24 апреля 2024 года. 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Ушаковой И.А.,  руководствуясь статьями 110, 167, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

1. Обязать акционерное общество «Рязаньавтодор» (ИНН 

<

***>) выполнить  определенные государственным контрактом от 09.09.2019г. № 45/08/2 на выполнение  подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Чернобаево -Истье -  автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе Рязанской области работы по капитальному  ремонту объекта капитального строительства - автомобильной дороги Чернобаево - Истье -  автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе Рязанской области - с применением  материалов: асфальтобетонная смесь и материалы, используемые для устройства основания  дорожного полотна методом холодной регенерации (ресайклинга), в соответствии с проектной  документацией на сумму 3 150 230,33руб. в течение 1 месяца с момента вступления решения  по делу в законную силу, а именно:  

- на участке № 1 (ПК 53+50) - оснастить участок отсутствующим слоем  асфальтобетонного покрытия 80,53 т (10 000 кв. м / 3 *416 т);  

- на участке № 3 (ПК 62+20) - оснастить участок отсутствующим слоем  асфальтобетонного покрытия 80,53 т (10 000 кв. м / 3 *416 т);  

- на участке № 5 (ПК 69+20) - оснастить участок отсутствующим слоем  асфальтобетонного покрытия 56,37 т (10 000 кв. м / 3 * 0,7 см * 0,02416 т);  

Общий объем отсутствующей асфальтобетонной смеси на трех участках ПК 53+50, ПК  62+20, ПК 69+20 составляет 217,43 т (80,53 т + 80,53 т + 56,37 т). Общее количество  неуложенной асфальтобетонной смеси на участках № 1, № 3, № 5 в количестве 217,43 т на  сумму 870 456,49 руб.  

- оснастить участок автодороги № 12 (ПК96+70) слоем отсутствующих материалов (слой  основания автомобильной автодороги из асфальтогранулобетона), используемых для  устройства основания дорожного полотна методом холодной регенерации (ресайклинга),  стоимостью 2 279 773,84 руб.  

2. Обязать акционерное общество «Рязаньавтодор» (ИНН 

<

***>) выполнить  

работы по государственному контракту от 09.09.2019г. № 45/08/2 на выполнение  подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Чернобаево -Истье -  автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе Рязанской области, соответствующие  качеству, установленному условиями государственного контракта, на сумму 4 385 292,59руб.  в течение 1 месяца с момента вступления решения по делу в законную силу, а именно:  

- Оснастить три участка автомобильной дороги ПК 65+70 лево, ПК 82+80 право, IX  86+30 лево недостающим слоем основания из асфальтогранулобетона на сумму 4 385 292,25  руб.  

3. Взыскать с акционерного общества "Рязаньавтодор" (390011, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход Федерального  бюджета госпошлину в размере 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.  

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области  может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья И.А. Ушакова