АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-8251/2019

г. Салехард

20 декабря 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 13 декабря 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 20 декабря 2019 года.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества «Промспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Яргео» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 9 216 115 рублей 26 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца – представитель не явился,

от ответчика – ФИО2, доверенность от 03.12.2019,

установил:

закрытое акционерное общество «Промспецстрой» обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Яргео» о взыскании задолженности по договору от 11.07.2016 № Я-337/23-2016 в размере 9 216 115 рублей 26 копеек.

Истец явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного разбирательства по делу извещен надлежащим образом, в том числе публично путём размещения соответствующей информации на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Руководствуясь статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд счёл возможным рассмотреть дело по существу в его отсутствие.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором требование истца не признал, просит в удовлетворении иска отказать. Утверждает, что спорная сумма денежных средств является резервом по договору, выплата которого производится после окончательной сдачи результата работ и при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 4.5 договора. Так как необходимые условия не соблюдены и выполнение работ по договору не завершено оснований для выплаты резерва не имеется.

 От истца поступило возражение на отзыв на исковое заявление, в котором он указал, что результат спорных работ может быть использован ответчиком по целевому назначению, претензий по качеству выполненных работ ответчик не имеет. Относительно доводов ответчика о наличии встречной задолженности по авансовым платежам указывает, что не имеет возможности исполнить данные обязательства преимущественно перед требованиями иных кредиторов. По вопросу об освобождении строительной площадки от принадлежащей ему техники сообщил, что после получения отзыва ответчика предпринимает меры для вывоза данного имущества. Относительно ввода объекта строительства в эксплуатацию сообщает, что работы по первому этапу получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не требовали, объект строительства, являющийся 12 этапом, введён в эксплуатацию 28.12.2017 на основании соответствующего разрешения.     

От ответчика поступило возражение на возражение истца на отзыв ответчика, согласно которому он считает, что истец не вправе требовать от него оплаты суммы резерва по договору, так как работы в полном объёме не выполнены, акт приёмки законченного строительством объекта сторонами не подписан, полный пакет исполнительной документации на выполненные работы не предоставлен, обязанности по погашению авансового платежа в размере 1 091 546 рублей 02 копеек и освобождению строительной площадки истцом не исполнены. 

Оценив представленные доказательства, заслушав представителя ответчика, суд считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что сторонами был заключен договор подряда от 11.07.2016 № Я-337/23-2016 (далее – договор), в соответствии с предметом которого истец (подрядчик) обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Обустройство Ярудейского месторождения на период пробной эксплуатации. Вахтовый жилой комплекс (ВЖК), пожарное депо, опорная база промысла (ОБП), площадка связи (ПС)», указанного в Приложении № 1, и сдать результаты выполненных работ ответчику (заказчик) по акту приёмки законченного строительством объекта по форме КС-11, а также выполнить другие работы, перечисленные в договоре, и работы, которые возникнут в период гарантийного срока, а ответчик обязуется создать истцу необходимые условия для выполнения работ по договору, принять их результат и оплатить стоимость выполненных работ. 

Согласно пункту 3.1 договора, его общая стоимость составляет 267 104 563 рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 40 744 763 рубля 98 копеек, из которых:

195 899 563 рубля 86 копеек, в том числе НДС 18% - 29 882 984 рубля32 копейки - твердая цена с учетом ПНР, включающая стоимость всех работ подрядчика,связанных со строительством объекта, указанного в Приложении № 1 к договору, а также стоимость иных работ подрядчика (за исключением стоимости основных материалов и оборудования поставки подрядчика в соответствии с пунктом 3.1.2 договора);

71 205 000 рублей, в том числе НДС 18% - 10 861 779 рублей 66 копеек - фиксированная стоимость основных материалов и оборудования поставки подрядчика, приобретаемых им в соответствии с пунктом 3.7 договора, и включает в себя стоимость основных материалов и оборудования поставки подрядчика, стоимость транспортировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и стоимость хранения материалов и оборудования поставки подрядчика, а так же стоимость транспортировки материалов и оборудования поставки заказчика. 

В пункте 3.6 договора предусмотрено, что материалы и оборудование, предоставляемые заказчиком, передаются подрядчику согласно Плану-графику поставки (Приложение № 5) но не позднее, чем за 15 календарных дней до начала вьшолнения соответствующих работ, без выставления счетов на оплату. Стоимость материалов и оборудования, переданных заказчиком подрядчику для выполнения работ по договору, не влияет на сумму договора.

В соответствии с пунктом 3.7 договора подрядчик осуществляет приобретение и поставку материалов и оборудования согласно Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение № 6), а также заключение договоров перевозки материалов и оборудования поставки подрядчика и договоров на выполнение погрузо-разгрузочных работ, приемку и хранение поставляемых им материалов и оборудования, на основании протоколов согласования поставки подрядчика, составленных по форме, приведенной в Приложении № 11 к договору, подписанных уполномоченными представителями сторон и скрепленных печатью подрядчика и заказчика.

Согласно пункту 4.1 договора, оплата работ по нему осуществляется следующим образом:

1) за работы - в размере 95 % стоимости выполненных и принятых заказчиком работ на основании подписанных заказчиком актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, за исключением стоимости мобилизации/демобилизации техники и стоимости вовлеченных в строительство объекта материалов и оборудования поставки подрядчика, включая стоимость их доставки до объекта, а также стоимости доставки до объекта материалов и оборудования поставки заказчика (5 % составляет резерв от общей суммы выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, за исключением стоимости мобилизации/демобилизации     техники  и  стоимости  вовлеченных  в  строительство объекта материалов и оборудования поставки подрядчика, включая стоимость их доставки до объекта, а также стоимости доставки до объекта материалов и оборудования поставки заказчика. Сумма резерва  оплачивается  подрядчику  после  выполнения  требований  раздела   12  договора по законченным строительством подобъектам, указанным в Приложении № 1);

2) за материалы и оборудование – заказчик осуществляет авансовые платежи. Оплата авансовых платежей на приобретение материалов поставки подрядчика осуществляется в следующем порядке: заказчик в течение 15 календарных дней перечисляет на расчетный счет подрядчика, открытый в Филиале ОО № 9 «Новоуренгойский» ПАО «Промсвязьбанк», авансовые платежи в размере, указанном в графе «Форма и условия оплаты», согласованных сторонами соответствующего Протокола согласования материалов поставки подрядчика, подписанного с двух сторон, не превышающем стоимости материалов и оборудования, установленной по соответствующим Протоколам согласования поставки подрядчика (по форме Приложения № 11 к договору), с момента согласования заказчиком предоставленного подрядчиком реестра платежей, оригинала счета на оплату.

После поступления материалов и оборудования поставки подрядчика на строительную площадку заказчиком производится окончательное авансирование соответствующего Протокола согласования поставки подрядчика в течение 15 календарных дней с момента получения согласованного с двух сторон акта наличия материалов на строительной площадке (составленного по форме, приведенной в Приложении № 18) и оригинала счета на оплату.

Погашение авансов, выплаченных заказчиком осуществляется на сумму стоимости материалов и оборудования поставки подрядчика, вовлечённых в строительство объекта за отчетный период, на основании подписанных без замечаний с двух сторон актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости вьшолненных работ и затрат по форме КС-3, до момента полного погашения.

Стоимость материалов и оборудования поставки подрядчика, вовлечённых в производство, включается в акты о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по ценам, установленным сторонами в протоколах согласования поставки подрядчика (по форме, приведенной в Приложении № 11), с учётом стоимости доставки до объекта, и оплачивается заказчиком в порядке, установленном пунктом 4.1.3 договора для оплаты работ.

В пункте 4.1.3 договора предусмотрено, что оплата за выполненные работы, кроме случая, указанного в пункте 4.5 договора, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком заказчику, не позднее последнего числа отчётного месяца, оригиналов следующих документов:

1. Исполнительной документации в объеме соответствующем объему, предъявляемых к закрытию выполненных работ, подписанную Технадзором и представителем заказчика;

2. Акта о приемке выполненных работ, подписанного подрядчиком, заказчиком и

Технадзором в 4-х экземплярах, с обязательным приложением Отчета о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходами, определенными по производственным нормам, составленного по форме М-29 (приведенной в Приложении № 10) и Отчета о списании МТР поставки Подрядчика за отчетный месяц по форме, приведенной в Приложении № 9, по данному конкретному акту о приемке выполненных работ;

3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанной подрядчиком изаказчиком в 2-х экземплярах;

4. Счета-фактуры подрядчика на полную стоимость выполненных работ в 2-х экземплярах;

5. Счета на оплату;

6. Журнала учета выполненных работ (унифицированная форма № КС-6а), в котором ведется накопительный помесячный учет работ по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и стоимости работ в соответствии с условиями договора в разрезе объектов (подобъектов) по каждому конструктивному элементу или виду работ на электронном и бумажном носителях, а так же общего журнала работ (форма приложения № 1 кРД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7);

7. Подписанного реестра актов о приемке выполненных работ за отчетный месяц в

одном экземпляре представляемого подрядчиком в Управление капитального строительства заказчика (далее - УКС ООО «ЯРГЕО»);

8. Подписанных подрядчиком и заказчиком актов монтажа оборудования по форме, приведенной в Приложении № 14;

9. Подписанных подрядчиком и заказчиком накладных на отпуск давальческих (в переработку) материалов на сторону по форме М-15;

10. Подписанных подрядчиком и заказчиком актов о приеме-передаче оборудования в монтаж;

11. По мобилизации/демобилизации:

- реестр путевых листов, согласованный с УКС ООО «ЯРГЕО»;

- копии путевых листов, заверенных подрядчиком;

- расчеты стоимости машино-часа техники;

- транспортную схему мобилизации, согласованную с УКС ООО «ЯРГЕО»;

- расчет стоимости мобилизации/ демобилизации, согласованный с УКС ООО «ЯРГЕО».

Не предоставление подрядчиком заказчику документов,  указанных в пункте 4.1.3 договора, освобождает заказчика до момента предоставления полного пакета документов от оплаты фактически выполненных работ и не влечет наложения на заказчика штрафных санкций за пользование чужими денежными средствами и просрочку платежа (пункт 4.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.5 договора окончательный расчет за выполненные работы и выплата резерва осуществляется после окончательной сдачи результатов работ и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта в течение 60 календарных дней, при условии полного погашения авансовых платежей (при выплате таковых заказчиком по договору), после:

1) выполнения подрядчиком следующих действий:

♦ окончательной сдачи результатов работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенных строительством объектов;

♦ выполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6.16 договора в части демонтажа и вывоза со строительной площадки и прилегающих к ней территорий временных зданий и сооружений;

♦ выполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6.18 договора по окончательной уборке строительной площадки и территории временного поселка строителей; 

2) представления подрядчиком заказчику следующих документов:

♦  акта сверки взаиморасчетов по выполненным работам, подписанного заказчиком и подрядчиком в 2-х экземплярах и Отчетов о списании МТР поставки подрядчика за отчетный месяц по форме, приведенной в Приложении № 9, в 2-х экземплярах;

♦  акта приемки законченного строительством объекта, подписанного представителями заказчика и подрядчика в 4-х подлинных экземплярах;

♦  оригинала акта приема-передачи от подрядчика заказчику подписанного комплекта исполнительной документации (оригинал и копия);

♦  других документов предусмотренных в пункте 12.3 договора или определенно не упомянутых в договоре, но необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если предоставление этих документов входит в обязанность подрядчика.

Истец утверждает, что в рамках договора подряда сторонами были подписаны документы о приемке-передаче выполненных работ и материалов, согласно которым истцом были переданы, а ответчиком приняты без возражений работы и материалы на общую сумму 263 076 564 рублей 14 копеек, что подтверждается,  подписанными сторонами документами по форме № КС-2 и № КС-3.

Работы на объекте были завершены 30.04.2018 (дата подписания последних КС-2, КС-3). Однако в нарушение условий договора ответчик оплатил выполненные работы частично: на сумму 253 860 448 рублей 88 копеек. 

Таким образом, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 9 216 115 рублей 26 копеек.

В целях досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию исх. № 157 от 26.12.2018 с требованием об оплате возникшей задолженности в срок не позднее 10 календарных дней с момента получения претензии. 

Так как ответчик данное требование добровольно не исполнил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

Разрешая спор по существу, суд руководствуется следующим.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьёй 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Статьёй 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьями 309, 310 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Таким образом, в силу возникшего обязательства и положений закона ответчик должен был своевременно и в полном объёме оплатить выполненные истцом работы.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указывает, что истец не в полном объёме выполнил предусмотренные договором работы, что договор является действующим и его условия предусматривают удержание суммы резерва в размере 5% стоимости выполненных работ до окончательной сдачи результатов работ, полного погашения авансовых платежей, предоставления полного комплекта исполнительной документации и окончательной уборки строительной площадки.

Оценив условия заключенного сторонами договора и представленные доказательства, суд считает возражения ответчика обоснованными.

Истец не в полном объёме выполнил предусмотренные договором работы, не предоставил ответчику весь необходимый комплект исполнительной документации, не погасил полученные от ответчика суммы авансов на приобретения материалов и оборудования.

Учитывая изложенное, поскольку договор является действующим, сторонами не расторгнут, у истца отсутствуют основания требовать от ответчика окончательного расчёта за выполненные работы в виде оплаты удерживаемой суммы резерва.

Доводы истца о том, что ответчик может использовать результат работ по назначению, а также, что ответчику была предоставлена исполнительная документация, необходимая для ввода объекта в эксплуатацию, судом отклоняются как необоснованные. 

Соответствующие обстоятельства не освобождают истца от исполнения обязательств по договору, являющихся основанием для возникновения у ответчика обязательства по уплате суммы резерва.

Истец не представил каких-либо доказательств, опровергающих доводы ответчика о неполном выполнении предусмотренных договором работ и предоставлении неполного комплекта исполнительной документации.

Доказательства погашения сумм аванса, полученного на приобретение материалов и оборудования, также отсутствуют.

Требуя у ответчика оплаты резерва до исполнения предусмотренных договором условий, истец фактически заявляет об изменении существующих между сторонами обязательств в одностороннем порядке.

Так как в силу статья 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается, требование истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 9 216 115 рублей 26 копеек удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении требования закрытого акционерного общества «Промспецстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Яргео» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженности по договору от 11.07.2016 № Я-337/23-2016 в размере 9 216 115 рублей 26 копеек отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

Е.В. Антонова